РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   20 июня 2024 года    

по делу А33-18239/2023 Красноярск  

20 июня 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

удовлетворить ходатайство публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о снижении судебной неустойки на основании статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения по  настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям № 20.2400.6464.20 от 08.06.2022, осуществив  технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной  ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) -  антенно-мачтового сооружения связи, расположенного (который будет располагаться) по  адресу: г. Красноярск, Ленинский район, ул. Глинки 46, стр. 7, 9, 10, 11, сооружения 12, 13,  участок № 1, в границах кадастрового квартала 24:50:0500203, в точке присоединения:  

I точка присоединения: максимальная мощность 10 кВт.  Линия (0,4) Проектируемая  

ТП ТП 680 Ячейка ПС Выключатель 6 кВ яч. 5 ПС ПС № 160 «ТЭЦ-1» 110/6 кВ 

Основной источник питания: ПС № 160 «ТЭЦ-1» 110/6 кВ  Резервный источник питания: отсутствует,  

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая  их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих  устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого  хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом  следующих характеристик:  

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 10 кВт; - категория надежности третья; 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ;  

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств  отсутствует;  

включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000427540: 

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов  проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением  

Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласование со всеми заинтересованными  организациями в соответствии с действующим законодательством;  

- от РУ 0,4 кВ ТП 680 до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во  внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами  Заявителя запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение  провода определить проектом;  

- определить проектом необходимость установки автоматического выключателя 0,4 кВ в  РУ 0,4 кВ ТП 680;  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков  электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №  442).  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 76 209,74 руб.  неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим  сетям № 20.2400.6464.20 от 08.06.2022 за период с 10.12.2022 по 20.06.2024; с 21.06.2024 –  неустойку по день фактического исполнения обязательств из расчета 136,33 руб. за каждый  день просрочки, а также судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки  исполнения решения суда по день его фактического исполнения и расходы по уплате  государственной пошлины в сумме 8 000 руб.  

Во взыскании судебной неустойки в остальной сумме отказать. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  1 048 руб.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья О.И. Медведева