Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-271314/22-14-2044

г. Москва

18 апреля 2023 года

Резолютивная часть объявлена                                                                 03 апреля 2023 г.

Дата изготовления решения в полном объеме                                        18 апреля 2023 г.

 

Арбитражный суд города Москвы в составе

председательствующего - судьи Лихачевой О.В.

Судьей единолично

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беловой А.А., с использованием средств аудиозаписи

рассмотрел дело по исковому заявлению ООО "ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ" (ОГРН 1137232009672)

к ответчику ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" (ОГРН 1177746544854)

о взыскании 44 249 917,63 руб.

 

в судебное заседание явились:

от истца – Жукова О.В. по доверенности от 20.12.2022г.

от ответчика – Горлова Л.В. по доверенности от 21.10.2022г. 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "ТехноСпецСтрой" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" о взыскании:

- в связи с нарушением сроков выполнения Работ по договору субподряда № ПД-43/2020 от 10.12.2020 г. суммы неустойки в размере 3 737 016,80 руб.;

- штрафа за нарушение трудовой дисциплины в размере 900 000 руб.;

- задолженности по оплате ГСМ в размере 24 854 578,59 руб. и процентов за пользование денежными средствами по ст. 395 ГК РФ в размере 1 688 142,20 руб. с последующим начислением процентов на сумму долга до момента полной оплаты;

- задолженности по договору № ОУ-160/2020 в размере 2 002 980 руб. и процентов за пользование денежными средствами по ст. 395 ГК РФ с момента расторжения договора в размере 41 980,27 руб. с последующим начислением процентов на сумму долга до момента полной оплаты;

- задолженности за предоставление услуг проживания в гостинице по договору № ОУ-72/2021 в размере 27 720 руб. и процентов по ст. 395 ГК РФ в размере 1 746,34 руб. с последующим начислением процентов на сумму долга до момента полной оплаты;

- задолженности по договору № ОУ-159/2020 в размере 293 167,80 руб., и процентов за пользование денежными средствами по ст. 395 ГК РФ с момента расторжения договора в размере 7 529,99 руб. с последующим начислением процентов на сумму долга до момента полной оплаты;

- задолженности по договору № А-23/2021 в размере 8 322 431,28 руб. и процентов по ст. 395 ГК РФ за пользование денежными средствами в размере 487 415,42 руб. с последующим начислением процентов на сумму долга до момента полной оплаты;

- задолженности по договору № А-02/2022 в размере 332 726,79 руб. и пени по п. 5.2 договора в размере 74 863,53 руб. с последующим начислением 0,1% до момента полной оплаты;

- задолженности по оплате трубы в размере 69 376,69 руб. и процентов за пользование денежными средствами по ст. 395 ГК РФ в размере 6 688,68 руб. с последующим начислением процентов на сумму долга до момента полной оплаты (с учётом уточнения заявленных требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

В судебном заседании представитель истца дал пояснения, исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика дал пояснения, возражал против удовлетворения искового заявления по доводам, изложенным в отзыве.

Заслушав объяснения сторон в судебном заседании, изучив материалы дела, всесторонне исследовав и оценив в совокупности доказательства по делу, суд считает исковые требования подлежащими полному удовлетворению по следующим основаниям.

1. Так, между ООО "ТехноСпецСтрой" (генподрядчик) и ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" (субподрядчик) заключен договор субподряда № ПД-43/2020 от 10.12.2020 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2020, дополнительного соглашения № 2 от 03.08.2021.

В соответствии с договором генподрядчик поручает, а субподрядчик обязуется выполнить собственными силами комплекс строительно-монтажных работ по строительству водовода к площадке ЛПУ на свайных фундаментах (Работы) на объекте: "Магистральный Газопровод "Сила Сибири" Этап 2.7. Участок "КС-7 Сивакинская". ЛПУМГ № 4 в г. Сковородино". Код объекта: (051-2000973) (Объект), а генподрядчик обязуется принять и оплатить результаты Работ в порядке, сроки и на условиях договора.

В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 1.2 договора субподрядчик выполняет Работы своими силами в объеме и с качеством, согласно утвержденной генподрядчиком рабочей документации, на основании подписанного Графика производства работ (Приложение № 4) и в соответствии с расчётом договорной цены (Приложение № 1, Приложение № 1.1, Приложение № 1.2, Приложение № 1.3, Приложение № 1.4), определяющими объемы и стоимость работ по договору.

В соответствии с п. 2.2 договора, субподрядчик обязан окончить Работы не позднее 30.09.2021 г.

На основании п. 5.1 договора, стоимость работ по договору определена сторонами в Приложении № 1, Приложении № 1.1, Приложении № 1.2, Приложении № 1.3, Приложении № 1.4 "Расчёт договорной цены".

31 марта 2021 г. между сторонами подписан Акт о приёмке выполненных работ КС-2 № 1 на сумму 6 335 056,09 руб. с учётом НДС, Акт о приёмке выполненных работ КС-2 № 3 на сумму 7 318 442,12 руб. с учётом НДС, Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на сумму 13 653 498,22 руб. с учётом НДС.

Таким образом, субподрядчиком не сданы работы на сумму в размере 124 567 226,53 руб.

Как установлено в статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании п. 11.2 договора, за нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения дефектов, установленных настоящим договором, по вине субподрядчика, подрядчик вправе потребовать от субподрядчика уплаты пени в размере 0,01% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 3% от цены договора.

В соответствии с расчётом истца с учётом периода действия моратория и ограничения в размере 3% размер неустойки составляет 3 737 016,80 руб. и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Довод ответчика о том, что заказчик допустил просрочку принятия подрядных работ, является несостоятельным.

В соответствии с п. 10.1 договора, сдача-приемка выполненных Работ по договору производится сторонами ежемесячно и заключается в проверке генподрядчиком данных, указанных в исполнительной документации, актах о приемке выполненных работ КС-2, фактически выполненным субподрядчиком работам, ежедневным Актам выполненных работ, завизированных сторонами, а также устранением указанных в них замечаний. По результатам проверки выполненных работ обеими сторонами подписывается Акт по форме КС-2. Результаты работ и исполнительная документация заказчику не переданы.

Ответчиком не предоставлены доказательства передачи результата работ, довод отзыва не обоснован.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Статьей 726 ГК РФ установлено, что подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором, либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Подрядчик должен уведомить заказчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ. Уведомления о готовности к сдаче результата выполненных Работ истцом получено не было, соответственно, можно сделать вывод об отсутствии результата работ.

Исполнительная документация в рамках исполнения условий договора истцу не направлялась, соответствующих документов, подтверждающих её направление ответчик не предоставил.

Согласно п. 2.2 договора субподрядчик обязан окончить Работы не позднее 30 сентября 2021 г.

Доказательства фактического выполнения работ и передачи их результата заказчику суду не предоставлено.

Следовательно, исковые требования в данной части подлежат полному удовлетворению.

2. Согласно п. 3.11 договора, субподрядчик обязуется обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на территории Объекта.

В соответствии с п. 3.12 договора, субподрядчик обязуется нести ответственность перед генподрядчиком за действия своих работников в случае фиксации факта появления работника субподрядчика на объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Так, при производстве работ на Объекте выявлены факты нарушения трудовой дисциплины работников субподрядчика, а именно - машинист бульдозера Томилов А.Ю., машинист экскаватора Топорков С.В., машинист экскаватора Пашко В.М., машинист экскаватора Абызов А.С., машинист экскаватора Дидук А.В. находились в состоянии алкогольного опьянения, о чём составлены протоколы трезвости и акты о нахождении работника на территории вахтового городка в состоянии алкогольного опьянения.

Также работниками субподрядчика были нарушены правила внутреннего распорядка в вахтовых поселках (п.п. 5.5.1 п. 5.5), утвержденные Приказом ООО "ТехноСпецСтрой" № 34/2-17-ОД от 01.03.2017 г.

В соответствии с п. 3.9 договора субподрядчик несет ответственность за соблюдение требований по охране труда, пропускному и внутриобъектовому режимам во время проведения Работ, предусмотренных договором.

В соответствии с перечнем нарушений по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды, службы контроля качества и в части производства строительно-монтажных работ нахождение на производственных объектах и лицензионных участках генподрядчика работников субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, влечет за собой наложение штрафных санкций на субподрядчика (№ п/п 12 Перечня нарушений).

В примечаниях Перечня нарушений (Приложение № 2 к договору) предусмотрено, что штраф взыскивается за каждый факт нарушения. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками субподрядной организации, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником). Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением генподрядчику убытков. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем перечне, размер налагаемого штрафа увеличивается в 2 раза.

Из пункта 5 примечаний Перечня следует, что факт нарушения устанавливается предписанием, подписанным специалистом службы охраны труда и/или работником генподрядчика, осуществляющего производственный контроль, и/или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг. В случае отказа работника субподрядчика от подписания предписания, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания предписания и не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с п. 5, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.

На основании изложенного, с ответчика подлежит взысканию сумма штрафа за нарушения трудовой дисциплины работниками в размере 900 000 руб.

Довод ответчика о том, что он не несёт ответственности за действия и бездействия своих работников, является несостоятельным, так как согласно п. 3.12 договора субподрядчик обязуется нести ответственность перед генподрядчиком за действия своих работников в случае фиксации факта появления работника субподрядчика на объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Так, именно при производстве работ на Объекте были выявлены факты нарушения дисциплины, нахождение работников ответчика в состоянии алкогольного опьянения, о чем составлены протоколы трезвости и акты о нахождении работника на территории вахтового городка в состоянии алкогольного опьянения.

В силу п. 3.9 договора, субподрядчик несёт ответственность за соблюдение требований по охране труда, пропускному и внутриобъектовому режимам во время проведения Работ, предусмотренных договором.

В соответствии с перечнем нарушений по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды, службы контроля качества и в части производства строительно-монтажных работ, нахождение на производственных объектах и лицензионных участках генподрядчика работников субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, влечёт за собой наложение штрафных санкций на субподрядчика, в том числе, за повторное нарушения (№ п/п 12 Перечня нарушений).

Заключая договор, ответчик был ознакомлен и согласен с условиями контроля дисциплины на объекте и установленной мерой ответственности за соответствующие нарушения, следовательно, исковые требования являются обоснованными.

3. В соответствии с абзацем 2 п. 5.3 договора, в случае возникновения потребности у субподрядчика в представлении ему за плату дизельного топлива или бензина (ГСМ), субподрядчик обязан подать генподрядчику письменную заявку по форме генподрядчика на следующий месяц не позднее 25-го числа предыдущего месяца. Стоимость ГСМ в случае предоставления генподрядчиком, определяется по ценам генподрядчика, указанных им в счетах/счета-фактурах/УПД. Количество полученного субподрядчиком ГСМ определяется на основании заправочных ведомостей, которые составляет генподрядчик, и/или по усмотрению генподрядчика - на основании товарных накладных/УПД. Подпись водителя субподрядчика или иного привлеченного субподрядчиком лица в заправочной ведомости генподрядчика в получении ГСМ является достаточным подтверждением получения субподрядчиком ГСМ и основанием для возникновения обязанности субподрядчика по их оплате в порядке и размере, предусмотренным настоящим договором. Оплата ГСМ осуществляется субподрядчиком на основании счетов/счетов-фактур/УПД путем перечисления денежных средств на расчетный счет генподрядчика в течение 10-ти банковских дней с момента выставления счета/счетов-фактур/УПД или иным согласованным сторонами способом в сумме, указанной в счете/счете-фактуре/УПД.

ООО "ТехноСпецСтрой" предоставило ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" ГСМ, что подтверждается УПД, сводными ведомостями, раздаточными ведомостями.

По настоящее время ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" свои обязательства по оплате не исполнило на сумму 24 854 578,59 руб. по УПД №№ 1276 от 31.12.2020, 35 от 31.01.2021, 82 от 28.02.2021, 149 от 31.03.2021, 22 от 30.04.2021, 283 от 31.05.2021, 345 от 30.06.2021, 411 от 31.07.2021, 471 от 31.08.2021, 473 от 09.09.2021, 543 от 30.09.2021, 587 от 31.10.2021, 603 от 31.10.2021, 655 от 30.11.2021, 721 от 31.12.2021, 47 от 31.01.2022, 63 от 28.02.2022, 63 от 31.03.2022.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов- определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчёт процентов произведён истцом с учётом действия периода моратория и составляет 1 688 142,20 руб., а также просит продолжать начисление процентов на сумму долга до момента полной оплаты.

Доводы ответчика о том, что отсутствуют данные, свидетельствующие о наличии правоотношений между истцом и ответчиком по передаче ГСМ, являются необоснованными.

В адрес истца неоднократно поступали письма от ответчика о предоставлении ГСМ, что подтверждается материалами дела, а также универсальными передаточными документами.

Следовательно, исковые требования заявлены обоснованно.

4. В соответствии с п. 5.5 договора субподряда № ПД-43/2020 от 10.12.2020, между ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" (заказчик) и ООО "ТехноСпецСтрой" (исполнитель) 11 декабря 2020 г. был заключен договор № ОУ-160/2020 на предоставление услуг проживания, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 30.12.2021, в соответствии с которым заказчик поручает, а исполнитель берет на себя обязательства оказать услуги по предоставлению койко-мест во временных зданиях и сооружениях (ВЗиС) для проживания работников заказчика.

На основании п. 3.1 договора № ОУ-160/2020 стоимость услуги по предоставлению одного койко-места ВЗиС составляет 420 руб. в сутки, в том числе НДС 20% - 70 руб. Ориентировочная стоимость услуг по договору составляет 11 201 400 руб., в том числе, НДС 20%.

Согласно п. 3.2 договора № ОУ-160/2020 сумма договора на основании расчета стоимости оказываемых услуг (без НДС) на одного человека, определяется исходя из потребности заказчика. Окончательная сумма договора определяется фактическим проживанием работников заказчика в общежитии, на основании выставленных счетов-фактур и Актов об оказании услуг.

В силу п. 3.3 договора № ОУ-160/2020, оплата за оказанные исполнителем услуги производится заказчиком на основании подписанного сторонами Акта об оказании услуг, при наличии оформленного надлежащим образом счета-фактуры и выставленного счета, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя в течение 5-ти календарных дней с даты подписания сторонами Акта об оказании услуг.

В соответствии с п. 4.2 договора № ОУ-160/2020 заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта об оказании услуг обязан направить исполнителю подписанный и утвержденный акт, либо мотивированный отказ от приемки услуг.

ООО "ТехноСпецСтрой" свои обязательства по договору исполнило, что подтверждается сводными ведомостями, подписанными со стороны заказчика.

До настоящего времени ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" свои обязательства по оплате не исполнило, размер задолженности составляет 2 002 980 руб.

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии с п. 8.2 договора, ст. 782 ГК РФ договор расторгнут уведомлением истца исх. № 15/08-2022 от 16.08.2022 г. с 23.10.2022 г.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов- определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчёт процентов произведён истцом с учётом действия периода моратория, даты расторжения договора и составляет 41 980,27 руб., а также просит продолжать начисление процентов на сумму долга до момента полной оплаты.

Вопреки доводам отзыва ответчика, сводки по проживанию, против которых он возражает, подписаны с его стороны.

А все акты об оказании услуг, счета-фактуры направлялись в адрес ответчика по почте в соответствии с п. 5.2 договора.

Кроме того, в материалах дела имеются Акты об оказании услуг, подписанные с двух сторон, что подтверждает факт оказания услуг и обоснованность заявленных требований.

5. В соответствии с п. 5.5 договора субподряда № ПД-43/2020 от 10.12.2020, между ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" (заказчик) и ООО "ТехноСпецСтрой" (исполнитель) 02 июля 2021 г. был заключен договор № ОУ-72/2021 на предоставление услуг проживания, в соответствии с которым заказчик поручает, а исполнитель берет на себя обязательства оказать услуги по предоставлению койко-мест во временных зданиях и сооружениях (ВЗиС) для проживания работников заказчика.

На основании п. 3 договора № ОУ-72/2021 стоимость услуги по предоставлению одного койко-места ВЗиС составляет 630 руб. в сутки, в том числе НДС 20% - 105 руб. Ориентировочная стоимость услуг по договору составляет 115 290 руб., в том числе, НДС 20%.

Сумма договора на основании расчета стоимости оказываемых услуг (без НДС) на одного человека, определяется исходя из потребности заказчика. Окончательная сумма договора определяется фактическим проживанием работников заказчика в общежитии, на основании выставленных счетов-фактур и Актов об оказании услуг.

В силу п. 3 договора № ОУ-72/2021, оплата за оказанные исполнителем услуги производится заказчиком на основании подписанного сторонами Акта об оказании услуг, при наличии оформленного надлежащим образом счета-фактуры и выставленного счета, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя в течение 5-ти календарных дней с даты подписания сторонами Акта об оказании услуг.

ООО "ТехноСпецСтрой" свои обязательства по договору исполнило, что подтверждается сводками по проживанию в вахтовом городке в гостинице ОП Сковородино в июле, сентябре, октябре 2021 г. и январе 2022 г., подписанными с двух сторон. Также в адрес ответчика были направлены акты об оказании услуг, счет-фактура посредством Почты России.

До настоящего времени ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" свои обязательства по оплате не исполнило, размер задолженности составляет 27 720 руб.

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов- определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчёт процентов произведён истцом с учётом действия периода моратория,  и составляет 1 746,34 руб., а также просит продолжать начисление процентов на сумму долга до момента полной оплаты.

Вопреки доводам отзыва ответчика, сводки по проживанию, против которых он возражает, подписаны с его стороны.

А все акты об оказании услуг, счета-фактуры направлялись в адрес ответчика по почте в соответствии с п. 5.2 договора.

Указанное подтверждает обоснованность заявленных требований.

6. В рамках договора субподряда № ПД-43/2020 от 10.12.2020 между ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" (заказчик) и ООО "ТехноСпецСтрой" (исполнитель) 15.12.2020 г. был заключен договор № ОУ-159/2020 на оказание услуг лаборатории неразрушающего контроля и строительной лаборатории, в соответствии с которым, исполнитель своими силами посредством использования своих инструментов и лаборатории неразрушающего контроля, строительной лаборатории оказывает комплекс услуг по контролю неразрушающими методами сварных соединений и комплекс услуг строительной лаборатории на объекте: "ЛПУ № 4 в г. Сковородино магистрального газопровода "Сила Сибири". Этап 2.7.1. ЛПУМГ № 4 в г. Сковородино в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири", а также другие другие работы в соответствии с видом деятельности и имеющимися областями аккредитации и аттестации лаборатории на основании Заявок заказчика, а заказчик оплачивает и принимает оказанные услуги.

В соответствии с п. 1.2 договора № ОУ-159/2020 стоимость каждой услуги определена сторонами в Соглашении о стоимости (Приложение № 1) к настоящему договору.

Согласно п. 4.3 договора, акты сдачи-приемки услуг в отношении исполненных Заявок выставляются ежемесячно.

ООО "ТехноСпецСтрой" свои обязательства по договору исполнило в полном объеме, 11.03.2022 г. между истцом и ответчиком подписано УПД № 141, акт сдачи-приемки оказанных услуг.

По настоящее время ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" свои обязательства по оплате не исполнило, размер задолженности составляет 293 167,80 руб.

В соответствии со ст. 450, ст. 782 ГК РФ договор расторгнут уведомлением истца исх. № 15/08-2022 от 16.08.2022 г. с 22.09.2022 г.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов- определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчёт процентов произведён истцом с учётом действия периода моратория, даты расторжения договора и составляет 7 529,99 руб., а также просит продолжать начисление процентов на сумму долга до момента полной оплаты.

Отклоняя доводы отзыва ответчика, суд отмечает, что 11 марта 2022 г. между истцом и ответчиком подписан УПД № 141, акт сдачи-приемки оказанных услуг, что подтверждает факт оказания услуг, а также обоснованность заявленных требований.

7. В рамках договора субподряда № ПД-43/2020 от 10.12.2020 г. между ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" (арендатор) и ООО "ТехноСпецСтрой" (арендодатель) 19.04.2021 был заключен договор № А-23/2021 аренды строительной техники с экипажем, согласно которому, арендодатель по письменной заявке арендатора, направленной за 2 (два) рабочих дня до начала аренды, обязуется предоставить арендатору во временное пользование технику согласно Приложению № 1 к договору за плату, а также оказать арендатору услуги по управлению и технической эксплуатации, предоставив арендатору специалистов по управлению техникой.

В соответствии с п.п. 4.1, 4.2 договора № А-23/2021 размер арендной платы по настоящему договору определяется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору, платежи по договору вносятся арендатором ежемесячно по реквизитам арендодателя, указанным в настоящем договоре, в течение 5-ти рабочих дней после выставления документов согласно п. 4.6 договора.

ООО "ТехноСпецСтрой" свои обязательства по договору исполнило в полном объеме, что подтверждается УПД, сводными ведомостями, актами приема-передачи (возврата) строительной техники).

По настоящее время ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" свои обязательства по оплате не исполнило, размер задолженности составляет 8 322 431,28 руб.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов- определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчёт процентов произведён истцом с учётом действия периода моратория,  и составляет 487 415,42 руб., а также просит продолжать начисление процентов на сумму долга до момента полной оплаты.

Отклоняя утверждение ответчика о том, что не предоставлены надлежащие доказательства оказания ему услуг, суд обращает внимание, что между истцом и ответчиком подписаны УПД, акты приема-передачи/возврата строительной техники, что подтверждает факт оказания услуг по аренде.

Пунктом 1 ст. 614 ГК РФ установлено, что арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). При этом, порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.

В письме Минфина России от 13.10.2011 № 03-03-06/4/118 отмечено, что ежемесячного заключения актов оказанных услуг по договору аренды (субаренды) для целей документального подтверждения расходов в виде арендных платежей для целей налогообложения не требуется.

С учётом изложенного, требования истца являются полностью обоснованными.

8. В рамках договора субподряда № ПД-43/2020 от 10.12.2020 между ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" (субарендатор) и ООО "ТехноСпецСтрой" (арендатор) 17.01.2022 г. был заключен договор субаренды ТС № А-02/2022, согласно которому, арендатор передает, а субарендатор принимает во временное владение и пользование транспортное средство, указанное в п. 1.2 договора № А-02/2022 без экипажа и обязуется оплачивать стоимость в порядке и размере, установленном условиями настоящего договора.

Согласно п.п. 1.2, 1.3 договора № А-02/2022 объектом аренды по настоящему договору является Автомобиль Mitsubishi PAJERO SPORT SP, легковой универсал, год выпуска 2018, цвет серебристый, VIN Z8TGUKS10HM053126, паспорт ТС № 400Х793686, СТС № 99 34 428862, г/н У 500 АН 797, вместе с ТС арендатор передаёт субарендатору топливную карту АО "ННК-Амурнефтепродукт" № 5039801000000411601 в целях заправки ТС топливом из расчёта, указанного в п. 4.2.1 договора.

На основании п.п. 4.1, 4.2 договора № А-02/2022 стоимость аренды ТС установлена в размере 10 082,63 руб. за сутки, в стоимость услуг не входит: управление ТС, ремонт ТС, техническое обслуживание ТС. Полная стоимость аренды рассчитывается исходя из количества арендуемого периода времени, подтвержденными актами передачи и возврата ТС. В стоимость аренды включены расходы на ГСМ из расчета не более 56 литров в сутки.

На основании п. 4.4 договора № А-02/2022 субарендатор производит оплату в течении 10-ти календарных дней с момента получения счета на оплату и УПД.

ООО "ТехноСпецСтрой" свои обязательства по договору № А-02/2022 исполнило, что подтверждается Актом приема-передачи автомобиля, размер задолженности ответчика составляет 332 726,79 руб.

В соответствии с п. 5.2 договора № А-02/2022, в случае нарушения сроков оплаты арендатор вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки.

Как установлено в статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с расчётом истца с учётом периода действия моратория размер неустойки составляет 74 863,53 руб. с последующим начислением 0,1% до момента полной оплаты долга.

Доводы ответчика являются необоснованными, между истцом и ответчиком 17.01.2022 подписан акт приема-передачи транспортного средства, от подписания УПД ответчик уклонился, следовательно исковые требования являются мотивированными и правомерными.

9. В рамках договора субподряда № ПД-43/2020 от 10.12.2020 в адрес ООО "ТехноСпецСтрой" поступило письмо исх. № 31-СК от 24.05.2021 от ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" о предоставлении трубы КОРСИС ПРО ON/DO 315 SN 16 TY 22/21/21-001-73011750-201.

ООО "ТехноСпецСтрой" обязательство по предоставлению трубы исполнило, что подтверждается подписанным с двух сторон УПД № 241 от 24.05.2022.

Таким образом, за ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" перед ООО "ТехноСпецСтрой" имеется задолженность в размере 69 376,69 руб.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов- определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчёт процентов произведён истцом с учётом действия периода моратория,  и составляет 6 688,68 руб., а также просит продолжать начисление процентов на сумму долга до момента полной оплаты.

Доводы ответчика об отсутствии доверенности на материально-ответственное лицо, несостоятелен на основании того, что полномочия лица, принявшего ТМЦ, следовали из обстановки (ст. 182 ГК РФ), указанное лицо является сотрудником ответчика, что подтверждается соответствующей перепиской. Кроме того, принятие трубы в заявленном объеме подтверждается УПД № 241 от 24.05.2022, подписанным и скрепленным печатью ответчика.

Таким образом, требования истца в данной части также являются обоснованными.

В пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что по смыслу ст. 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика пени до момента фактического исполнения ответчиком обязательства по оплате также подлежит удовлетворению.

В силу положений части 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (часть 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве).

Таким образом, в данной части исковые требования также подлежат удовлетворению.

Оснований для применения ст. 333 ГК РФ арбитражным судом первой инстанции не установлено.

В силу статей 307, 309 и 310 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

По общему правилу, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

В силу статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Данный принцип представляет собой правило, по которому заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать свою правоту в споре путем представления доказательств. Состязательность предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны и снятие по общему правилу с арбитражного суда обязанности по сбору доказательств. При этом, в силу части 2 указанной статьи лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Оценив в совокупности приведенные сторонами доводы и представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд отмечает, что в нарушение статьи 65 АПК РФ, ответчик не представил в материалы настоящего дела каких-либо доказательств, опровергающих доводы истца.

Следовательно, иск подлежит удовлетворению судом в полном объеме.

В соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ИНВЕСТЭКСПОРТ" (ОГРН 1177746544854) в пользу ООО "ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ" (ОГРН 1137232009672) 3 737 016,80руб. – неустойки, 900 000руб. – штрафа, 24 854 578,59руб. – задолженности, 1 688 142,20руб. – процентов, с последующим начислением процентов до момента фактической оплаты, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды, 2 002 980руб. – задолженности по договору № ОУ-160/2020, 41 980,27руб. – процентов, с последующим начисление процентов до момента фактической оплаты, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды, 27 720руб. – задолженности за представление услуг проживания, 1 746руб. – процентов, с последующим начислением процентов до момента фактической оплаты, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды, 293 167,80руб. – задолженности по договору № ОУ-159/2020, 7 529,99руб. – процентов, с последующим начислением процентов до момента фактической оплаты, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды, 8 322 431,28руб. – задолженности по договору №А-23/2021, 487 415,42руб. – процентов, с последующим начислением процентов до момента фактической оплаты, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды,332 726,79руб. – задолженности по договору № А-02/2022, 74 863,53руб. – пени, с последующим начислением до момента фактической оплаты, исходя из 0,1% в день, 69 376,69руб. – задолженности, 6 688,68руб. – процентов, с последующим начислением процентов до момента фактической оплаты, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды и 200 000руб. – государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

 

Судья:                                                                                                 О.В. Лихачева