141_35362324 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-35516/23-141-290

г. Москва

12 апреля 2023г.

Резолютивная часть решения объявлена 06 апреля 2023г.  Мотивированное решения изготовлено 12 апреля 2023г.  

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрел дело по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города  Москвы (ИНН 

<

***>)  

к ООО СК «Литора» (ИНН 

<

***>) о взыскании 2 294 748руб. 03коп. 

В судебное заседание явились: 

от истца - ФИО2 по доверенности от 28.12.2022г.,  от ответчика – не явился, извещен,  

УСТАНОВИЛ:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города  Москвы обратился с исковым заявлением к ООО СК «Литора» 2 294 748руб. 03коп.  штрафа по договору № ПКР-004969-20 от 26.03.2020г.  

Ответчик в заседание суда не явился, извещен надлежащим образом о времени и  месте проведения предварительного судебного заседания, а также о рассмотрении  искового заявления в случае неявки сторон или какой-либо из сторон и в отсутствие  заявленных возражений против завершения предварительного судебного заседания и  открытия судебного заседания в первой инстанции.  

Исковое заявление рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в порядке  ч. 4 ст. 121, ст. 123, 137 ч.ч. 1, 3 ст. 156 АПК РФ по имеющимся в деле материалам.  

Истец поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.  

Оценив материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришел к выводу  об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.  

Как усматривается из материалов дела, 26.03.2020г. между истцом и ответчиком  заключен договор № ПКР-004969-20.  

В соответствии с вышеуказанным договором ответчик обязался выполнить  работы, а истец принять и оплатить их.  

Согласно п. 6.1.10 договора ответчик обязался выполнить и сдать работы в  порядке, в объеме и в сроки, предусмотренные договором, и сдать законченные работы  по актам согласно п. 1.3, п. 1.4, п. 1.8. договора.  

Из графика производства работ следует, что дата начала работ – 26.03.2020г.,  дата окончания работ – 29.09.2021г.  

19.08.2021г. истцом принято решение об одностороннем отказе от исполнения  договора в связи с задержкой ответчиком начала выполнения работ более, чем на 5  календарных дней.  

Пунктом 14.7.2. договора предусмотрено, что в случае задержки  генподрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по  причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в  многоквартирном доме истец вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке со  взысканием причиненных истцу убытков.  

Согласно п. 12.7.12. договора в случае досрочного расторжения договора в  одностороннем порядке по инициативе заказчика по основаниям, указанным в п. 14.7.  договора, генподрядчик уплачивает заказчику в штраф в размере, предусмотренном п.  228 Постановления Правительства РФ № 615-ПП. Указанный штраф уплачивается  помимо средств, который генподрядчик обязан будет возместить заказчику в качестве  причиненных убытков (вреда).  

Стоимость работ в соответствии с дополнительным соглашением № 1 от  06.04.2021г. составляет 22 947 480руб. 28коп.  

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями  закона.  

Доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору ответчиком в  материалы дела не представлено.  

Так, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика штрафа в размере 2  294 748руб. 03коп. (10% от 22 947 480руб. 28коп.) в связи с расторжением договора по  основаниям, указанным в п. 14.7. договора.  

Размер штрафа судом проверен, признан правильным и соответствующим  последствиям нарушения обязательства, в связи с чем неустойка подлежит взысканию с  ответчика в судебном порядке.  

На основании ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины  относятся на ответчика.  

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330 ГК РФ, ст. ст. 110, 123, 156, 167-171, 176  АПК РФ, суд   

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью СК «Литора» (ИНН  

<

***>) в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города  Москвы (ИНН 

<

***>) 2 294 748руб. 03коп. штрафа и 34 474руб. 00коп. расходов  по уплате госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд  в течение месяца со дня принятия.  

Судья А.Г. Авагимян