1376/2017-257147(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 30 октября 2017 года 

по делу № А33-24079/2017 Красноярск

30 октября 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Красноярская  Геоархеология" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации24.03.2008) удовлетворить.  

Внести изменения в государственный контракт от 16.06.2017 № 64/17 на выполнение  работ по сохранению объекта культурного наследия, заключенный между обществом с  ограниченной ответственностью "Красноярская Геоархеология" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации - 24.03.2008) и Краевым государственным  казённым учреждением "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации - 25.02.1997) на  проведение мероприятий по организации и выполнению всего комплекса аварийно- спасательных археологических работ на территории выявленного объекта археологического  наследия «Красноярск. Стоянка ФИО1 гора-5», входящего в состав комплекса  памятников археологии «ФИО1 гора» при строительстве объекта «Строительство  автодороги в створе ул. Волочаевская от ул. Дубровинского до ул. Копылова» в г.  Красноярске, изложив пункты 3.1., 3.2. и Приложение 2 настоящего контракта в следующей  редакции:  

«3.1. Срок действия контракта: начало-с момента заключения контракта; окончание - 30.11.2018.»; «3.2. Срок выполнения работ по контракту: начало - с момента заключения контракта; окончание - 31.07.2018.»; 

«Приложение 2 к Контракту № 64/17 от «16» июня 2017 г.  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по организации и выполнению всего комплекса работ по выполнению аварийно-  

спасательных археологических работ на территории объекта археологического наследия 

«Стоянка ФИО1 гора-5», входящего в состав комплекса памятников археологии  

«ФИО1 гора» при строительстве объекта «Строительство автодороги в створе ул.  Волочаевская от ул. Дубровинского до ул. Копылова» в г. Красноярске 1 этап  

строительства. 

 № этапов 

Наименование видов 

Стоимость 

Сроки 

Примеча- 

работ, этапов, (%  

(руб.)/% 

выполнения 

ние 

выполнения) 

1 

2 

3 

4 

5 

1. 

Предварительные  

Начало: с 

работы. Полевые  

9 500 000,00/10  

момента 

работы. Камеральные  

0 

заключения 

работы и подготовка  

Контракта. 

отчёта. 

Окончание: 

«31» июля 2018 г. 

Дата сдачи отчёта.  

«31» июля 2018 г. 

Итого: 

9 500 000,00/10  

0 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья Л.О. Петракевич