АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(с перерывом в порядке ст.163 АПК РФ)

Дело № А66-1733/2024

г.Тверь

05 марта 2025 года

 

Резолютивная часть решения оглашена 24 февраля 2025 года

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Кольцовой Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Токаревой С.В., при участии представителей: истца – ФИО1, ответчика – ФИО2, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства Администрации города Твери, г.Тверь, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата гос. регистрации 23.03.2001)  

к Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-внедренческая фирма «Экотэр», Московская область, г.Люберцы (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата гос. регистрации 24.12.1991) 

неимущественное требование,

УСТАНОВИЛ:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства Администрации города Твери, г.Тверь, обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-внедренческая фирма «Экотэр», Московская область, г.Люберцы, об обязании ответчика в течение 1 (одного) месяца с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу, в рамках гарантийных обязательств устранить выявленные недостатки (дефекты) некачественно выполненных работ по муниципальный контракту от 23.01.2023 № 0836600003322000650 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Улица Трехсвятская» (1 этап: от ул. Новоторжская до бульвара ФИО3, включая перекресток с бульваром ФИО3), выполнив по всей поверхности объекта: от ул. Новоторжской до б-ра ФИО3 восстановление нарушения целостности замощения из гранитной плитки: устранить разность высот между смежными гранитными плитами с сохранением проектных уклонов; устранить деформацию (просадку) основания, выполненного из песка из отсева дробления крупностью до 5 мм; произвести замену имеющих сколы по плоскости и по граням гранитных плит. 

Одновременно истцом заявлено требование о взыскании с общества с ограниченной ответственностью Производственно-внедренческая фирма «ЭКОТЭР» в пользу Департамента ЖКХ и строительства судебную неустойки в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения, начисляемую по истечении срока для исполнения решения суда после вступления его в законную силу и до момента его исполнения.

К участию в  деле в  качестве  третьего  лица  привлечено МУП  "Тверьстройзаказчик".

В обоснование   иска  истец  ссылается  на выявление  дефектов  работ в  период гарантийного срока. 

Ответчик иск не признал, ссылаясь на выполнение работ в  соответствии  с  условиями контракта и  технической  документации к  нему.

От истца поступило ходатайство о назначении по делу экспертизы.

Определением от 03.06.2024 удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований (исх.№ б/н от 23.05.2024) в части исправления недостатков на участках согласно приложенной схеме.

          Судом с учетом предмета спора, мнения представителей сторон сформулирован перечень вопросов для судебной экспертизы:

1.                Соответствуют ли выполненные работы по устройству покрытия из гранитной плитки и брусчатки на объекте  по благоустройству общественной территории «Улица Трехсвятская» (1 этап: г.Тверь  от ул. Новоторжская до бульвара ФИО3, включая перекресток с бульваром ФИО3) требованиям контракта, технического задания, проектной документации, а также строительным нормам и правилам, предъявляемым для данного вида работ;

2.                Установить виды и объемы дефектов нарушения целостности устройства покрытия из гранитной плитки и брусчатки на объекте и причину их возникновения;

3.                Установить способы, виды и объемы работ, которые необходимо произвести для устранения дефектов нарушения целостности устройства покрытия из гранитной плитки и брусчатки на объекте и причину их возникновения.

          От истца поступило платежное поручение №1745 от 08.07.2024 о внесении на депозитный счет суда 177 000 руб. предоплаты за экспертизу, а также CD-диск с проектной документацией.

Определением от 16.07.2024 (резолютивная часть от 15.07.2024) по делу назначил экспертизу, проведение экспертизы поручено Обществу с ограниченной ответственностью "Группа  компаний Эксперт" г.Тверь (эксперты ФИО4, ФИО5).

Определением от 16.07.2024 (резолютивная часть от 15.07.2024) производство по делу приостановлено.

26 сентября 2024 года экспертное заключение поступило в суд.

Определением от 27.09.2024 года производство по делу возобновлено.

Стороны ознакомились с заключением эксперта.

В судебном заседании 18.12.2024 года заслушаны пояснения эксперта, эксперт представил письменные пояснения.

Определением от 18.12.2024 года удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований.

Истец требования поддержал, ходатайств об уточнении исковых требований в части указания срока выполнения ответчиком работ не представил.

Ответчик заявил о намерении урегулировать спор и направить мировое соглашение истцу.

Суд в соответствии со ст.163 АПК РФ объявил перерыв в судебном заседании до 24 февраля 2025 года 11 часов 40 минут. Информация о перерыве размещена в установленном порядке на официальном сайте Арбитражного суда Тверской области в сети Интернет.

После перерыва судебное заседание продолжено.

Истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований в части указания срока выполнения работ( 2  месяца с  даты  вступления  решения  в  законную силу) , в остальной части требования поддержал без изменений.

Суд удовлетворил ходатайство истца в порядке ст.49 АПК РФ с занесением определения в протокол судебного заседания в порядке ст.155 АПК РФ.

Ответчик заявил ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы.

Истец против назначения повторной экспертизы возражает.

Рассмотрев ходатайство ответчика в порядке ст.87 АПК РФ, суд отказал в его удовлетворении.

Ответчик заявил ходатайство о снижении размера неустойки в порядке ст.333 ГК РФ.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

23 января 2023 года между департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее - Департамент ЖКХ и строительства, Заказчик, Истец) и обществом с ограниченной ответственностью Производственно-внедренческая фирма «ЭКОТЭР» (далее - ООО ПВФ «ЭКОТЭР», Подрядчик, Ответчик) заключен муниципальный контракт № 0836600003322000650 (далее - контракт) на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Улица Трехсвятская» (1 этап: от ул. Новоторжская до бульвара ФИО3, включая перекресток с бульваром ФИО3) (далее по тексту - работы, объект).

Контрактом предусмотрена обязанность Подрядчика выполнить работы с надлежащим качеством и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), проектно-сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к контракту) и сдать выполненные работы Заказчику согласно разделу 7 контракта.

Виды работ «Благоустройство - покрытия», предусмотренные контрактом по 2 этапу, согласно актам о приемке выполненных работ от 05.12.2023 №№ 2.1 (2), 2.2(2), 2.3(2), 2.4(2), 2.5(2) приняты сторонами 06.12.2023. Работы по заключительному 10 этапу «Наружное электроснабжение и освещение», согласно акту о приемке выполненных работ от 15.12.2023 № 9(10) приняты сторонами 15.12.2023.

В декабре  2023  года сторонами подписаны  акты  приемки работ.

Департаментом ЖКХ и строительства в ходе эксплуатации объекта в период гарантийного срока были выявлены недостатки (дефекты) вследствие некачественно выполненных ООО ПВФ «ЭКОТЭР» работ.

Выявленные недостатки (дефекты) вследствие некачественно выполненных со стороны ООО ПВФ «ЭКОТЭР» работ оказывают влияние на условия безопасной эксплуатации объекта, а впоследствии в случае их несвоевременного устранения, могут привести к угрозе жизни и здоровья людей, дальнейшему разрушению и непригодности объекта.

Пунктом 8.1 контракта установлено, что гарантийный срок на качество результата выполненных работ на объекте устанавливается сроком на 3 (три) года со дня подписания сторонами документа о приемке по заключительному этапу. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

При обнаружении признаков разрушений, дефектов вследствие некачественно выполненных работ или применения некачественных материалов Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика (пункт 8.2 контракта).

Подрядчик обязан в срок, установленный Заказчиком, произвести устранение выявленных дефектов, указанных в уведомлении, или полностью переделать работы за свой счет (пункт 8.3 контракта).

28 декабря 2023 года Департаментом ЖКХ и строительства в адрес ООО ПВФ «ЭКОТЭР» направлена претензия (исх. 28/4620-и) о наступлении гарантийного случая и необходимости устранения выявленных недостатков (дефектов) работ в течение 1 (одного) календарного месяца с момента получения претензии, с приложением таблицы с перечнем выявленных дефектов.

26 января 2024 года  в адрес Департамента ЖКХ и строительства от ООО ПВФ «ЭКОТЭР» поступил ответ (исх. № 3) о несогласии с предъявленными в претензии требованиями.

31 января 2024 года Департаментом ЖКХ и строительства был проведен контрольный осмотр объекта в целях проверки устранения со стороны ООО ПВФ «ЭКОТЭР» содержащихся в претензии от 28.12.2023 выявленных в рамках гарантийного срока недостатков (дефектов) работ по контракту. По результатам проведенного контрольного осмотра, было установлено, что выявленные недостатки (дефекты) со стороны ООО ПВФ «ЭКОТЭР» в рамках гарантийных обязательств по контракту в установленные сроки не устранены, претензионные требования не исполнены.

Поскольку в досудебном порядке спор не урегулирован, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, выслушав  доводы   представителей  сторон,    суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, судом. Возможность защиты гражданских прав служит одной из гарантий их осуществления. Право на судебную защиту  является правом, гарантированным статьей 46 Конституции Российской Федерации.

Статья 12  Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает способы защиты гражданских прав. Право каждого лица защищается всеми не запрещенными законами способами, что следует из положений Конституции Российской Федерации. 

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Указанная норма закона содержит перечень юридических фактов, с которыми связано возникновение гражданских прав и обязанностей, как по воле субъекта  гражданского права, так и помимо его воли. Одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей является договор.

Юридические лица свободны в заключение договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный  законом или иными правовыми актами (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение о предмете договора, условиях, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договора данного вида.

Право требования истца основано на ненадлежащем исполнении  ответчиком муниципального контракта от 23.01.2023 №0836600003322000650.

Анализ условий договора позволяет суду сделать вывод о том, что указанный договор по своей правовой природе являются договором подряда. Взаимоотношения сторон по нему регулируются  главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. Представленные в материалы договор не противоречит требованиям, предъявляемым к данному виду договоров параграфом 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, является заключенным.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчик) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правила статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определяют, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. По соглашению между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки отдельных этапов работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

 Действующее законодательство возлагает на стороны обязанность надлежащего исполнения обязательства в соответствии с его условиями и требованиями закона (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации), односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим. 

Согласно пункту 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Пунктом 1 статьи 722 ГК РФ предусмотрено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

В силу пункта 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Согласно пункту 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия, непригодным для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика, безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Согласно части 3 статьи 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Предельный срок обнаружения недостатков по договорам строительного подряда в силу статьи 756 ГК РФ составляет пять лет.

Пунктом 8.1 контракта стороны установили гарантийный срок в течение 3 лет со дня подписания сторонами документа о приемке по заключенному этапу.

28 декабря 2023 года Департаментом ЖКХ и строительства в адрес ООО ПВФ «ЭКОТЭР» направлена претензия (исх. 28/4620-и) о наступлении гарантийного случая и необходимости устранения выявленных недостатков (дефектов) работ в течение 1 (одного) календарного месяца с момента получения претензии, с приложением таблицы с перечнем выявленных дефектов.

26 января2024 года  в адрес Департамента ЖКХ и строительства от ООО ПВФ «ЭКОТЭР» поступил ответ (исх. № 3) о несогласии с предъявленными в претензии требованиями.

31 января 2024 года Департаментом ЖКХ и строительства был проведен контрольный осмотр объекта в целях проверки устранения со стороны ООО ПВФ «ЭКОТЭР» содержащихся в претензии от 28.12.2023 выявленных в рамках гарантийного срока недостатков (дефектов) работ по контракту. По результатам проведенного контрольного осмотра, было установлено, что выявленные недостатки (дефекты) со стороны ООО ПВФ «ЭКОТЭР» в рамках гарантийных обязательств по контракту в установленные сроки не устранены, претензионные требования не исполнены.

В соответствии со ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный  суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с  согласия  лиц участвующих в  деле.

Определением от 16.07.2024 (резолютивная часть от 15.07.2024) по делу назначена экспертиза, проведение экспертизы поручено Обществу с ограниченной ответственностью "Группа  компаний Эксперт" г.Тверь (эксперты ФИО4, ФИО5).

На  разрешение эксперта были поставлены вопросы:

1. Соответствуют ли выполненные работы по устройству покрытия из гранитной плитки и брусчатки на объекте  по благоустройству общественной территории «Улица Трехсвятская» (1 этап: г.Тверь  от ул. Новоторжская до бульвара ФИО3, включая перекресток с бульваром ФИО3) требованиям контракта, технического задания, проектной документации, а также строительным нормам и правилам, предъявляемым для данного вида работ;

2. Установить виды и объемы дефектов нарушения целостности устройства покрытия из гранитной плитки и брусчатки на объекте и причину их возникновения;

3. Установить способы, виды и объемы работ, которые необходимо произвести для устранения дефектов нарушения целостности устройства покрытия из гранитной плитки и брусчатки на объекте и причину их возникновения.

После  получения  судом  результата экспертизы, производство по делу  возобновлено. Стороны  ознакомились с  заключением эксперта.

Как следует из заключения экспертизы, выполненные работы по устройству покрытия из гранитной плитки и брусчатки на объекте  по благоустройству общественной территории «Улица Трехсвятская» (1 этап: г.Тверь  от ул. Новоторжская до бульвара ФИО3, включая перекресток с бульваром ФИО3) не соответствуют требованиям контракта, технического задания, проектной документации, а также строительным нормам и правилам, предъявляемым для данного вида работ, основной причиной образования выявленных дефектов является нарушение технологии монтажа со стороны подрядной организации ООО ПВФ «Экотэр» при проведении работ, не соответствующие требованиям СП 508.1325800.2022, СП 82.133330.2016 ГОСТ 32018-2012. Экспертом определены виды и объемы работ, которые необходимо произвести для устранения дефектов целостности устройства покрытия из гранитной плитки и брусчатки на объекте и причину их возникновения.

Перед началом проведения экспертизы эксперт предупрежден об уголовной  ответственности за дачу заведомо  ложного заключении.

У  суда  не  имеется оснований  сомневаться  в компетенции эксперта  и правильности сделанных им выводов.

В связи с возникшими у сторон вопросами судебных заседаниях 20.11.2024 и 18.12.2024. в порядке ст.86 АПК РФ были заслушаны пояснения эксперта ФИО4

06 декабря и 26 декабря 2024 года экспертом представлены письменные пояснения.

По смыслу пункта 5 статьи 720 ГК РФ и статьи 68 АПК РФ допустимым доказательством в случае спора по качеству и объему выполненных работ является заключение эксперта. В такой ситуации, заключение эксперта, способное подтвердить объем фактически выполненных работ и их качество, является доказательством, на котором суд основывает свои выводы.

Согласно части 1 статьи 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены, и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу.

В экспертном заключении учтены представленные сторонами документы, экспертом даны полные ответы на поставленные судом вопросы, заключение составлено в установленном законом порядке, цель проведенной экспертизы достигнута.

После получения судом экспертного заключения истец в порядке ст.49 АПК РФ уточнил исковые требования в части перечня  работ по  исправления  недостатков.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в  их совокупности, в том числе заключение судебной экспертизы, установив наличие недостатков в выполненных ответчиком работах, предъявление требований по их устранению в пределах гарантийного срока; принимая во внимание отсутствие доказательств того, что недостатки являются следствием нормального износа объекта или неправильной эксплуатации, суд пришел к выводу о наличии у ответчика обязательств по устранению недостатков.

До момента обращения истца с рассматриваемым иском в суд, указанные в исковом заявлении дефекты ответчиком устранены не были.

В соответствии с частью 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик отвечает за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Надлежащих доказательств того, что указанные недостатки произошли не по вине подрядчика, ответчик в нарушение статьи 65 АПК РФ не представил.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства на которые оно ссылается как на основания своих требований или возражений. При этом арбитражный суд оценивает  относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Бремя представления доказательств, подтверждающих выполнение работ в порядке и объемах, предусмотренных соглашением сторон, законодателем возлагается на Подрядчика. 

В соответствии пунктом 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается  сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Кроме того, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). К числу таких последствий относится признание судом требований истца обоснованными в случае непредставления ответчиком доказательств опровергающих их правомерность.

В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих надлежащее исполнение гарантийных обязательств.

Установленные по результатам осмотра дефекты являются недостатками работы, обнаруженными в пределах гарантийного срока, которые в соответствии со статьями 722, 723 ГК РФ ответчик безвозмездно обязан устранить в разумный срок.

Защита гражданских прав возможна путем присуждения  к исполнению обязанности в натуре. Этот способ защиты  предусмотрен абзацем седьмым статьи  12 Гражданского кодекса Российской Федерации и рассматривается как самостоятельный способ защиты гражданских прав.

В судебной практике исполнение обязательств в натуре в качестве способа  защиты гражданских прав трактуется  как понуждение должника выполнить  действия, которые  он должен совершить в силу связывающего стороны обязательства (договора).

В соответствии с пунктом 1 статьи 396 Гражданского кодекса Российской Федерации при ненадлежащем исполнении обязательства должником кредитор может потребовать исполнения обязательства в натуре, то есть потребовать совершения тех действий, которые составляют содержание обязанности. 

Следовательно, требование о понуждении к исполнению обязанности в натуре может быть удовлетворено судом  только в том случае, когда  эта обязанность прямо предусмотрена законом или договором.

Истец  основывает свои требования на ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств, вытекающих из муниципального контракта от 23.01.2023 № 0836600003322000650.

Таким образом, положения абзаца седьмого статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат применению в совокупности с положениями статьи 397 настоящего кодекса и специальными нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими отношения сторон по договорам подряда.

Поскольку обязанность, обусловленная договором, ответчиком не исполнена, истец вправе требовать обязать ответчика выполнить гарантийные обязательства.

С учетом изложенного, требования  истца об обязании ответчика устранить дефекты удовлетворяются в полном объеме.

В силу статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения. 

Суд, считает что  предложенный истцом сроком устранения дефектов в течение двух  месяцев со дня вступления решения в законную силу, не является  достаточным с учетом  перечня  позиций  для  их исправления. Суд также  учитывает  положения  строительных норм, запрещающих производство работ в  зимний  период.

Исходя  из изложенного, суд приходит к  выводу об установлении срока исправления  дефектов  5  месяцев с момента наступления благоприятных погодных условий для выполнения работ с учетом действующих строительных норм и правил.

Истец  также просит взыскать с ответчика компенсацию (судебную неустойку) в случае несвоевременного исполнения решения суда в размере 5 000 рублей в день, начиная со дня, следующего за днем истечения одного месяца с даты вступления в силу решения суда, по день фактического исполнения решения.

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную названным Кодексом и другими федеральными законами (часть 2 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В определении Конституционного суда Российской Федерации от 20.03.2008 № 153-О-О согласно частям 1 и 2 статьи 6 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» разъяснено, что вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации; неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом. 

При этом, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 25 января 2001 года № 1-П, неправомерная задержка исполнения судебного решения должна рассматриваться как нарушение права на справедливое правосудие в разумные сроки, что предполагает необходимость справедливой компенсации лицу, которому причинен вред нарушением этого права. 

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1). 

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7), на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7, судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства. 

Во втором абзаце пункта 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 разъяснено, что размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. 

Заявленная неустойка определена истцом исходя из 5000 рублей за каждый день неисполнения решения суда. 

Ответчик  заявил о снижении размера неустойки.

Принимая во внимание принцип справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного поведения, суд считает возможным присудить неустойку в случае несвоевременного исполнения ответчиком решения суда по настоящему делу в размере 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда в части  исполнения гарантийных обязательства по муниципальному контракту от 23.01.2023 № 0836600003322000650, начиная со дня, следующего за днем  истечения срока, установленного судом для исполнения обязательств.

Расходы по уплате государственной пошлины и  по экспертизе  по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации    относятся на ответчика.

В связи с  тем, что суд отклонил ходатайство ответчика   о назначении повторной  экспертизы, ответчику подлежит возврату  с  депозитного счета  Арбитражного суда Тверской  области   170 000 руб. предоплаты  за  дополнительную  (повторную) экспертизу, которая  была  перечислена  на  депозитный  счет суда про платежному поручению № 695 от 19.11.24г.

Руководствуясь ст.ст.  65, 110,156,163,167, 170, 176 Арбитражного процессуального Кодекса  РФ  гл. 25.3 НК РФ, суд      

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО ПВФ «ЭКОТЭР» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) после вступления  решения  в  законную силу  в  течении  5  месяцев с момента  наступления  благоприятных погодных условий  для  выполнения работ   с  учетом  действующих строительных норм  и правил, выполнить  гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 23.01.2023 № 0836600003322000650 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Улица Трехсвятская» (1 этап: от ул. Новоторжская до бульвара ФИО3, включая перекресток с бульваром ФИО3), а  именно восстановление нарушения целостности замощения из гранитной плитки, в местах (участках) расположения выявленных недостатков (дефектов), указанных на Дефектной карте (далее также – Схема мест (участков) расположения выявленных недостатков (дефектов), прилагается), выполнив следующие виды работ, приведенные  в  таблице  по 84  пунктам, а  именно:

№ 

Место расположение дефекта согласно Схеме

Выявленные недостатки (дефекты) работ

Виды и объемы работ, которые необходимо произвести для устранения выявленных недостатков (дефектов) работ

1

1-1//А-Б

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- обратный уклон по плитке

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 2 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 в количестве 3 штук

2.

1-1//Б-В

-разность высот между смежными плитками более 2 мм

-отсутствие заполнения швов песком

-произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 10,0 кв.м

-произвести заполнение швов между плитами песком на площади 10,0 кв.м

3.

1/-2/А-Б

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

-разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

-произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 4 шт.

-произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 40,0 кв.м

-произвести заполнение швов между плитами песком на площади 40,0 кв.м

4.

1/-2/Б-В

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- деформация основания

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 5 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 10,0 кв.м

-произвести заполнение швов между плитами песком на площади 10,0 кв.м

- произвести устранение деформации основания на площади 10,0 кв.м

5.

1/-2/В-Г

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 400х400 в кол-ве 1 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 100х200 в кол-ве 11 шт.

6.

1-2/Б

1-2/Д

- частичное или полное отсутствие герметика в узле установки бетонных лотков дренажной системы

- произвести устройство узла заполнения шнура и герметика примыкания бетонных лотков дренажной системы и гранитной плитки - 10 м

7.

1/-2/Г-Д

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками

- отсутствие заполнения швов песком

- деформация основания

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 в количестве 8 штук

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 40,0 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 40,0 кв.м

- произвести устранение деформации основания на площади 40,0 кв.м

8.

1/-2/Д-Е

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 в количестве 4 штук

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 30,0 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 30,0 кв.м

9.

2-3/А-Б

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

-произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 2 шт.

-произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 30,0 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 30,0 кв.м

10.

2-3/Б-В

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

-произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 5 шт.

-произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 30,0 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 30,0 кв.м

11.

2-3/В-Г

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести переустройство мощения гранитных плит 400х400 в количестве 6 штук

- произвести переустройство мощения гранитных плит 100х200 в количестве 4 штук

12.

2-3/Г-Д

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- сквозные щели по периметру столбов освещения до 30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 8 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит в количестве 1 шт. по периметру столбов

13.

2-3/Д-Е

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 3 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 30,0 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 30,0 кв.м

14.

2-3/Д

2-3/Б

- частичное или полное отсутствие герметика в узле установки бетонных лотков дренажной системы

- произвести устройство узла заполнения шнура и герметика примыкания бетонных лотков дренажной системы и гранитной плитки - 10 м

15.

3-4/А-Б

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 3 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 3 шт.

16.

3-4/Б-В

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- сквозные щели по периметру столбов освещения до 30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 12 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 400х400 в кол-ве 2 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит  в количестве 1 шт. по периметру столбов

17.

3-4/В-Г

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 3 шт.

18.

3-4/Г-Д

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 3 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 30,0 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 30,0 кв.м

19.

3-4/Д

- частичное или полное отсутствие герметика в узле установки бетонных лотков дренажной системы

- произвести устройство узла заполнения шнура и герметика примыкания бетонных лотков дренажной системы и гранитной плитки - 10 м

20.

3-4/Д-Е

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 3 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 2 шт.

21.

4-5/А-Б

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 5 шт.

22.

4-5/Б-В

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- сквозные щели по периметру столбов освещения до 30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 13 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 в количестве 1 шт. по периметру столбов

23.

4-5/В-Г

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 400х400 в кол-ве 2 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 4 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 100х100 в кол-ве 11 шт.

24.

4-5/Г-Д

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 2 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 400х400 в кол-ве 2 шт

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 60,0 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 60,0 кв.м

25.

4-5/Д

- частичное или полное отсутствие герметика в узле установки бетонных лотков дренажной системы

- произвести устройство узла заполнения шнура и герметика примыкания бетонных лотков дренажной системы и гранитной плитки - 10 м

26.

4-5/Д-Е

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 2 шт.

27.

5-6/А-Б

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 11 шт.

28.

5-6/Б-В

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- сквозные щели по периметру столбов освещения до 30 мм

- сколы граней гранитных плит, расположенные по кругу

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 13 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит в количестве 1 шт. по периметру столбов

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 11 шт.

29.

5-6/В-Г

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 400х400 в кол-ве 6 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 100х200 в кол-ве 5 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 60,0 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 60,0 кв.м

30.

5-6/Г-Д

Сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 13 шт.

31.

5-6/Д-Е

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 6 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 4 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 20,0 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 20,0 кв.м

32.

5-6/Д

- частичное или полное отсутствие герметика в узле установки бетонных лотков дренажной системы

- произвести устройство узла заполнения шнура и герметика примыкания бетонных лотков дренажной системы и гранитной плитки - 10 м

33.

6-7/А-Б

Сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 11 шт.

34.

6-7/Б-В

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- сквозные щели по периметру столбов освещения до 30 мм

- сколы граней гранитных плит, расположенные по кругу

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 400х400 в кол-ве 13 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит в количестве 1 шт. по периметру столбов

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 13 шт.

35.

6-7/В-Г

Сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 400х400 в кол-ве 3 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 100х200 в кол-ве 4 шт.

36.

6-7/Г-Д

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 6 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 2 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит  на площади 20,0 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 20,0 кв.м

37.

6-7/Д-Е

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 2 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 6 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 30,0 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 30,0 кв.м

38.

6-7/Д

6-7/Б

- частичное или полное отсутствие герметика в узле установки бетонных лотков дренажной системы

- произвести устройство узла заполнения шнура и герметика примыкания бетонных лотков дренажной системы и гранитной плитки - 10 м

39.

7-8/А-Б

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 3 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 – 5 кв.м.

- произвести заполнение швов между плитами песком – 5 кв.м.

40.

7-8/Б-В

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- сквозная трещина

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 12 шт.

-  произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 1 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 30 кв.м.

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 30 кв.м.

41.

7-8/В-Г

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- сколы граней гранитных плит, расположенные по кругу

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 400х400 в кол-ве 3 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 100х200 в кол-ве 4 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 10 шт.

42.

7-8/Г-Д

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 8 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 20 кв.м.

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 20 кв.м.

43.

7-8/Д-Е

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 2 шт.

-  произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 6 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит на площади 20 кв.м.

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 20 кв.м.

44.

7-8/Д

7-8/Б

- частичное или полное отсутствие герметика в узле установки бетонных лотков дренажной системы

- произвести устройство узла заполнения шнура и герметика примыкания бетонных лотков дренажной системы и гранитной плитки - 10 м

45.

8-9/А-Б

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 5 шт.

-  произвести демонтаж с заменой гранитных плит 100х100 в кол-ве 11 шт.

46.

8-9/Б-В

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 12 шт.

-  произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 13 шт.

47.

8-9/В-Г

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- сколы граней гранитных плит, расположенные по кругу

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 400х400 в кол-ве 3 шт.

-  произвести демонтаж с заменой гранитных плит 100х200 в кол-ве 4 шт.

-  произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 15 шт.

48.

8-9/Г-Д

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- плитка шлифованная по торцам

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 12 шт.

-  произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 2 шт.

-  произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 2 шт.

-  произвести переустройство мощения гранитных плит на площади 40 кв.м.

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 40 кв.м.

49.

8-9/Д-Е

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 6 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 4 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит  на площади 40 кв.м.

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 40 кв.м.

50.

8-9/Д

- частичное или полное отсутствие герметика в узле установки бетонных лотков дренажной системы

- произвести устройство узла заполнения шнура и герметика примыкания бетонных лотков дренажной системы и гранитной плитки - 10 м

51.

9-10/А-Б

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 1шт.

52.

9-10/Б-В

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- сколы граней гранитных плит, расположенные по кругу

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 7 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 3 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 14 шт.

53.

9-10/В-Г

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- сколы граней гранитных плит, расположенные по кругу

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 100х100 в кол-ве 4 шт.

- произвести демонтаж с заменой

гранитных плит 800х400 в кол-ве 15 шт.

54.

9-10/Г-Д

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- плитка шлифованная по торцам

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 2 шт.

-  произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 3 шт.

-  произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 4 шт.

-  произвести переустройство мощения гранитных плит на площади 30 кв.м.

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 30 кв.м.

55.

9-10/Д

- частичное или полное отсутствие герметика в узле установки бетонных лотков дренажной системы

- произвести устройство узла заполнения шнура и герметика примыкания бетонных лотков дренажной системы и гранитной плитки - 10 м

56.

9-10/Д-Е

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 1 шт.

-  произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 4 шт.

57.

10-11/А-Б

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- сколы граней гранитных плит, расположенные по кругу

-  произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 3 шт.

-  произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 15 шт.

58.

10-11/Б-В

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 13 шт.

-  произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 4 шт.

59.

10-11/Б

10-11/Д

- частичное или полное отсутствие герметика в узле установки бетонных лотков дренажной системы

- произвести устройство узла заполнения шнура и герметика примыкания бетонных лотков дренажной системы и гранитной плитки - 10 м

60.

10-11/В-Г

Сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 400х400 в кол-ве 6 шт.

61.

10-11/Г-Д

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 10 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 4 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит на площади 40 кв.м.

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 40 кв.м.

62.

10-11/Д-Е

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 5 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит на площади 20 кв.м.

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 20 кв.м.

63.

11-12/А-Б

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 3 шт.

64.

11-12/Б-В

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 6 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 8 шт.

65.

11-12/В-Г

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 400х400 в кол-ве 13 шт.

66.

11-12/Г-Д

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 10 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 4 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит на площади 30 кв.м.

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 30 кв.м.

67.

11-12/Д-Е

Сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 5 шт.

68.

11-12/Д

11-12/Б

- частичное или полное отсутствие герметика в узле установки бетонных лотков дренажной системы

- произвести устройство узла заполнения шнура и герметика примыкания бетонных лотков дренажной системы и гранитной плитки - 10 м

69.

12-13/А-Б

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 3 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит на площади 30 кв.м.

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 30 кв.м

70.

12-13/Б-В

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 6 шт.

71.

12-13/В-Г

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 на площади 80 кв.м.

- произвести переустройство мощения гранитных плит на площади 80 кв.м.

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 80 кв.м

72.

12-13/Г-Д

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 3 шт.

73.

12-13/Д

12-13/Б

- частичное или полное отсутствие герметика в узле установки бетонных лотков дренажной системы

- произвести устройство узла заполнения шнура и герметика примыкания бетонных лотков дренажной системы и гранитной плитки - 10 м

74.

12-13/Д-Е

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 4 шт.

75.

13-14/А-Б

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 6 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит на площади 80 кв.м.

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 80 кв.м

76.

13-14/Б-Д

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 23 шт.

77.

13-14/Е-Ж

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 800х400 в кол-ве 5 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит на площади 80 кв.м.

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 80 кв.м

78.

15-16/А-Б

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 400х400 в кол-ве 23 шт.

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 200х200 в кол-ве 9 шт.

- произвести переустройство мощения гранитных плит на площади 10 кв.м.

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 10 кв.м

79.

15-16/Б-Д

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести переустройство мощения гранитных плит 400х400 на площади 380 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 380 кв.м

80.

17-18/А-Е

- сколы граней гранитных плит, размером до 50х30 мм

- произвести демонтаж с заменой гранитных плит 400х400 в кол-ве 21 шт.

81.

17-18/А-Б

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 30 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 30 кв.м

82.

17-18/Б-В

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 30 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 30 кв.м

83.

17-18/В-Д

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 30 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 30 кв.м

84.

17-18/Д-Е

- разность высот между смежными плитками более 2 мм

- отсутствие заполнения швов песком

- произвести переустройство мощения гранитных плит 800х400 на площади 30 кв.м

- произвести заполнение швов между плитами песком на площади 30 кв.м

 Взыскать с  ООО ПВФ «ЭКОТЭР» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)   в  пользу Департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства Администрации города Твери, г.Тверь, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> )  на случай  неисполнения  судебного акта   судебную неустойку  в  размере 1000 руб.  за  каждый  день просрочки исполнения  решения  суда, начиная  со  дня, следующего за  днем истечения срока, установленного судом для  исполнения  обязательств.

Взыскать с  ООО ПВФ «ЭКОТЭР» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>):

-  в  пользу Департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства Администрации города Твери, г.Тверь, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> ) 177 000 руб. расходов  по экспертизе;

-в  доход бюджета  6000 руб.  госпошлины.

Возвратить   ООО ПВФ «ЭКОТЭР» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  с  депозитного счета  Арбитражного суда  Тверской  области  170 000 руб., предоплаты  за  дополнительную экспертизу, перечисленной  по платежному  поручению № 695 от 19.11.24г.

Исполнительные  листы выдать в  порядке ст. 319 АПК РФ 

Настоящее решение может быть обжаловано в    соответствии со ст.ст. 257, 273, 276   Арбитражного процессуального   кодекса  Российской Федерации  в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд город Вологда в течение месяца со дня его принятия.

Судья                                                                                  Т.В.Кольцова