ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410002, г. Саратов, ул. Лермонтова д. 30 корп. 2 тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А06-6865/2020

г. Саратов

18 февраля 2022 года

Резолютивная часть постановления объявлена 14 февраля 2022 года

Полный текст постановления изготовлен 18 февраля 2022 года

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н. В. Савенковой,

судей О.В. Лыткиной, В. Б. Шалкина 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания               ФИО1,

 при участии в судебном заседании представителя ООО «Континент» ФИО2, действующей на основании доверенности от 10.01.2022 года,

рассмотрев  в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» на решение Арбитражного суда Астраханской области от 09 декабря 2021 года по делу № А06-6865/2020, 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Континент», г. Астрахань, (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

к обществу с ограниченной ответственностью «Жилсервис», г. Знаменск, Астраханская область, (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

 третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области», г. Астрахань, 

о взыскании задолженности в размере 760 408 руб. 80 коп.,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (далее по тексту ООО «Континент», истец) обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (далее по тексту ООО «Жилсервис», ответчик) о взыскании задолженности по договору № 16-ПСД-1 от 09.04.2019г. в сумме 760 408 руб. 80 коп. 

В ходе рассмотрения дела к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечена Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области».

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 09 декабря 2021 года по делу № А06-6865/2020 исковые требования удовлетворены. С Общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис»в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Континент» взыскана задолженность в сумме 760 408 руб. 80 коп., а также судебные расходы, связанные с оплатой госпошлины в сумме 18 208 руб. и судебной экспертизы в сумме 96 400 руб. С депозитного счета арбитражного суда Астраханской области на счет Общества с ограниченной ответственностью «Институт строительной экспертизы, оценки и строительной безопасности» перечислены денежные средства в сумме 96 400 руб., уплаченные по платежному поручению № 84 от 09.03.2021г. за проведение судебной экспертизы.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Жилсервис» обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда от 09.12.2021 года по делу № А06-6865/2020 отменить как незаконное и необоснованное, принятое в результате неверного применения норм материального права, и принять по делу новый судебный акт, которым отказать истцу в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на то, что судом не принята во внимание и не рассмотрена консультация специалиста-эксперта ООО «Спецавтоматика», и то, что ООО «Континент» предъявленная ПСД от 19.06.2020 года на сумму 760408 рублей 80 копеек Заказчиком не согласована (не принята), о чем Подрядчик был уведомлен.

Судом не учтено, что к этому сроку ПСД была сдана ООО «Жилсервис» Заказчику -  НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области». Несвоевременно предоставленные истцом комплекты ПСД от 19.06.2020 года, не прошедшие согласования и соответствующую проверку, не являются результатом работ, и не имеют для ответчика потребительской ценности.

ПСД была выполнена ответчиком без участия истца, что подтвердил НО «Фонд капительного  ремонта МКД Астраханской области. Договор подряда истцом исполнен частично и оплачен в размере фактически выполненных работ на сумму 702468 рублей.

В порядке статьи 262 АПК РФ  от ООО «Континент» поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, который приобщен к материалам дела.

От ООО «Жилсервис» поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, в связи с невозможностью обеспечить явку представителя по болезни.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд не находит оснований для его удовлетворения в связи со следующим.

Согласно частям 3 и 4 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле и извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными либо признает, что дело не может быть рассмотрено в данном судебном заседании в связи с необходимостью предоставления отсутствующим участником процесса дополнительных доказательств. Указанной нормой установлено право, а не обязанность суда отложить судебное разбирательство, и его реализация связана с установлением судом уважительности причин неявки и невозможности рассмотрения дела.

 Суд вправе отклонить ходатайство, если сочтет возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие представителя одной из сторон по имеющимся в материалах дела доказательствам. 

Рассмотрев указанное ходатайство, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его удовлетворения, поскольку ООО «Жилсервис», заявив ходатайство об отложении рассмотрения апелляционной жалобы, не обосновало необходимость личного участия представителя в судебном разбирательстве, почему не может быть направлен иной представитель, какие дополнительные доказательства, имеющие значение для разрешения спора и принятия законного решения, будут представлены.

Процессуальные права лиц, участвующих в деле, определены в  части 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами (часть 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Удовлетворение необоснованного ходатайства об отложении судебного заседания может привести к нарушению принципа правовой определенности и соответствующих процессуальных гарантий, в том числе права на судопроизводство в разумный срок.

Кроме того, внутренние организационные проблемы юридического лица, в том числе болезнь представителя, не могут быть признаны достаточными и уважительными причинами для отложения судебного разбирательства.

Арбитражный апелляционный суд не находит правовых оснований, по которым рассмотрение апелляционной жалобы невозможно в данном судебном заседании, поэтому с учетом положений статей 158, 267 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство ответчика об отложении  судебного разбирательства не подлежит удовлетворению.

Представитель ООО «Континент» в судебном заседании суда апелляционной инстанции просила решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, в связи с необоснованностью содержащихся в ней доводов.

Иные лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о месте и времени судебного разбирательства путем направления определения, выполненного в форме электронного документа, в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке и по основаниям, предусмотренным статьями 258, 266-271 АПК РФ.  

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Решение суда является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права (пункт 10 раздела «Разрешение споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». Судебная коллегия по гражданским делам. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 4 марта 2015 года № 1 (2015)).

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает, что судебный акт не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 09.04.2019г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Континент» (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (Заказчик) заключен договор № 16-ПСД-1, в соответствии с условиями которого, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство собственными и (или) привлеченными силами в установленный договором срок разработать проектно-сметную документацию по объектам согласно Технического задания (Приложение № 2). 

В соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №1 к Договору) стоимость работ по Договору составила 1 502 468,00 рублей, НДС не облагается. 

Сторонами согласованы условия оплаты по Договору - путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере выполнения и принятия работ на основании подписанных актов выполненных работ в течение 3 (трех) банковских дней (л.д. 14, т.1). 

В соответствии с пунктом 4.1 договора, общий срок выполнения работ составляет 30 рабочих дней с момента предоставления заказчиком исходной документации в полном объеме. 

Согласно доводам искового заявления, в июне 2019 года по инициативе Заказчика объем работ был уменьшен до 1 473 796,80 рублей, НДС не облагается, в связи с чем Подрядчиком было оформлено дополнительное соглашение №1 к Договору. 

В ходе исполнения договора Заказчик частично оплачивал работы по Договору, были произведены следующие авансовые платежи (л.д.47-49, т.1): 200 000,00 рублей  платежным поручением №632 от 18.07.2019г.; 302 468,00 рублей платежным поручением № 43 от 27.01.2020г.; 200 000,00 рублей  платежным поручением №89 от 19.02.2020г. 

Истец пояснил, что взятые на себя обязательства, выполнил надлежащим образом, направил в адрес ответчика документы о выполненной работе: разработанную проектно-сметную документацию, а также Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справку о стоимости выполненных работ КС-3 и счет на оплату, однако Заказчик со своей стороны указанные документы не подписал и оплату по Договору не произвел. 

Истец направил ответчику претензию с требованием оплатить задолженность в размере 760 408,80 рублей за выполненные работы, которая оставлена ответчиком без удовлетворения. 

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, установив факт исполнения обязательств истцом и доказанность наличия у ответчика задолженности перед истцом, удовлетворил заявленные исковые требования. 

В результате анализа материалов дела судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции, считает его основанным на тщательном исследовании представленных сторонами доказательств, правильном применении норм права.

При этом суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: 1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно пункту 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. 

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Буквальное толкование условий заключенного сторонами договора № 16-ПСД-1 от 09.04.2019 г.  позволяет сделать вывод о том, что в нем определены все существенные условия договора, и по своей правовой природе данный договор является договором подряда, взаимоотношения сторон по которому регулируются, в том числе  положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Согласно статье 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 

В силу статьи 760 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 761 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. 

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, а также быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (пункт 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан приступить к приемке результата работы после получения сообщения подрядчика о готовности к сдаче указанного результата, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами; при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. 

В силу статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику, что также следует из п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

Статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком. 

Акт, подписанный одной стороной, порождает правовые последствия, свойственные акту, подписанному обеими сторонами. Однако такой акт представляет собой оспоримую сделку, которая может быть признана судом недействительной в случае обоснованности мотивов отказа от подписания акта. 

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ лишь в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком. 

Таким образом, по смыслу названных норм оплате подлежат работы, выполненные подрядчиком в соответствии с условиями договора подряда и принятые заказчиком без претензий по их видам, объему и качеству. 

В силу требований гражданского законодательства факт выполнения работ подрядчиком должен подтверждаться надлежащими доказательствами, а именно актами сдачи-приемки работ. 

В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Истцом в материалы дела представлены документы о выполненной работе: разработанная проектно-сметная документация, а также Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справка о стоимости выполненных работ КС-3, счет на оплату. 

Ответчик, возражая против удовлетворения заявленных требований, указал, что выполненные истцом работы не актуальны для заказчика, ответчик самостоятельно разработал сметную документацию и сдал работы по основному договору, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Жилсервис» и Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области», во избежание нарушения сроков выполнения работ по основному договору. В целях ненарушения сроков по основному договору, он нанимал сторонние силы (субподрядчиков) и самостоятельно сдал результат работ третьему лицу - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области». 

Аналогичные доводы приведены ООО «Жилесервис» и в апелляционной жалобе.

Вместе с тем, вопреки доводам апелляционной жалобы, доказательств заключения договоров с иными субподрядчиками для выполнения проектно-сметных работ, порученных истцу, материалы дела не содержат.

В ходе рассмотрения дела истцом было заявлено ходатайство о проведении по делу судебной экспертизы. 

Судом данное ходатайство удовлетворено, назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту Общества с ограниченной ответственностью «Институт строительной экспертизы, оценки и промышленной безопасности» ФИО3.

 Перед экспертом поставлены вопросы: 

1.Соответствует ли выполненная в рамках договора подряда № 16-ПСД-1 от 09.04.2019г. проектно-сметная документация требованиям СНиП, Техническому заданию (Приложение №2 к договору) и другим действующим нормативным актам РФ в части состава, содержания и оформления? 

2.Определить объем и фактическую стоимость выполненных работ по исполнению проектной документации (раздел РД), а также сметной документации, разработанной ООО «Континент», в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в строительстве и проектировании? 

Согласно выводам заключения судебной экспертизы № 259/21 от 03.08.2021г., выполненная в рамках договора подряда № 16-ПСД-1 от 09.04.2019г. проектно-сметная документация требованиям Технического задания (Приложение № 2 к договору 38 объектов) и другим действующим нормативным актам РФ, в том числе: 

- 1. ГОСТ Р 21.1101-2013.Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации (действующий на 2019г.) 

- 2. Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 06.07.2019) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (действующий на 2019г.).

 3. Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ. МДС 81-35.2004 (с изменением от 20.03.2006г., с изменением от 01.06.2012г. с изменениями от 16.06.2014 пр.294/пр) в части состава, содержания и оформления соответствует. 

Объем выполненных работ по исполнению – разработке проектной документации (Раздел РД), а также сметной документации, разработанной ООО «Континент», в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в строительстве и проектировании составляет: 

- Разработка проектно-сметной документации стадия РД и стадия СМ по 36 объектам. Наименование, адреса и месторасположение объектов указаны в столбце 2 Таблицы 3,4,5. 

- Фактическая стоимость выполненных работ по исполнению – разработке проектной документации (Раздел РД), а также сметной документации, разработанной ООО «Континент», в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в строительстве и проектировании указаны в столбце 3,4, таблицы № 5 и составляет: 

1. стоимость разработки проектной документации (Раздел РД) – 2 458 849 руб. 

2. стоимость разработки сметной документации (Раздел СМ) – 2 349 918 руб. Итого: 4 808 767 руб. 

Согласно дополнительным пояснениям эксперта к заключению экспертизы № 259/21 от 03.08.2021г., фактическая стоимость проектной документации (Раздел РД), а также сметной документации, разработанной ООО «Континент», в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в строительстве и проектировании, в рамках условий заключенного договора подряда № 16-ПСД-1 от 09.04.2019г. составила 1 473 796 руб. 80 коп. 

Проанализировав экспертное заключение Общества с ограниченной ответственностью «Институт строительной экспертизы, оценки и промышленной безопасности» № 259/21 от 03.08.2021г, с учетом дополнительных пояснений эксперта, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что данное экспертное заключение соответствует требованиям статьи 86 АПК РФ по форме и содержанию, не содержит противоречий, отсутствуют основания для иного толкования выводов экспертизы, и оснований считать заключение эксперта от 03.08.2021 года недостоверным доказательством не имеется. Заключение судебной экспертизы по делу является ясным, полным и непротиворечивым, выводы эксперта - мотивированными. Недостатков в экспертном заключении № 259/21 от 03.08.2021г., сомнений в правильности и объективности содержащихся в нем выводов не имеется, каких-либо доказательств, опровергающих выводы эксперта, не представлено (статьи 9, 65 АПК РФ).

Таким образом,  суд обоснованно принял заключение судебной экспертизы от № 259/21 от 03.08.2021г. как надлежащее доказательство.

Оснований не согласиться с оценкой данного доказательства судом первой инстанции у суда апелляционной инстанции не имеется.

В силу части 2 статьи 64, части 3 статьи 86 АПК РФ заключения экспертов относятся к доказательствам, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Доказательств, свидетельствующих о недостоверности выводов эксперта не представлено; экспертное заключение является ясным и полным,  оформлено в соответствии с требованиями статьями 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в нем отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сведения, противоречий в выводах эксперта не усматривается.

Экспертиза проведена в соответствии с требованиями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, эксперт предупрежден об уголовной ответственности, сомнений в обоснованности заключения эксперта у суда не возникло.

Доказательств того, что при проведении судебной экспертизы были допущены нарушения, лишающие полученное по ее результатам заключение доказательственной силы, суду также не представлено.

Заключение эксперта подтверждает объем, качество и стоимость фактически выполненных истцом работ по договору № 16-ПСД-1 от 09.04.2021 года.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Недопустим односторонний отказ от исполнения обязательства. 

Доводы апелляционной жалобы о том, работы были выполнены ответчиком самостоятельно и сданы основному заказчику в феврале 2020 года, т.е. до получения от истца комплектов ПСД - 19.06.2020 года; представленные истцом ПСД не являются результатом работ, и не имеют для ответчика потребительской ценности отклоняются судом апелляционной инстанции.

Статья 715 ГК РФ предусматривает право заказчика во всякое время проверять ход и качество выполняемой подрядчиком работы и отказаться от исполнения договора с возмещением убытков в случае невыполнения подрядчиком работы в установленный срок или выполнения работы ненадлежащим образом.

Данная норма корреспондируется с положениями статьи 397 ГК РФ о праве кредитора в случае неисполнения должником обязательства выполнить для кредитора определенную работу, поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить ее своими силами и потребовать от должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

Однако Заказчик, от объема работ по разработке сметного раздела проектной документации, до их выполнения истцом не отказался. 

Более того, воспользовался результатом работ, выполненных истцом, исполнив обязательства по договору № 16-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 года, заключенному между ООО «Жилсервис» и НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области».

Доказательств обратного, вопреки доводам апелляционной жалобы, материалы дела не содержат.

Учитывая, что работы выполненные истцом оплачены ответчиком частично, доказательств погашения задолженности по договору не предоставлено, размер задолженности не оспорен, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об удовлетворении заявленных требований и взыскал с ответчика в пользу истца задолженность по договору в сумме 760 408 руб. 80 коп.

Оснований для иной оценки обстоятельств спора и представленных в материалы дела доказательств судом апелляционной инстанции не установлено.

Содержащиеся в жалобе доводы не содержат фактов, которые влияли бы на законность и обоснованность обжалуемого решения. Они не опровергают выводы суда первой инстанции по существу рассмотренного дела, а выражают несогласие с ними, что не является основанием для отмены оспариваемого решения.

Судебный акт первой инстанции принят при полном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, нормы процессуального и материального права применены судом верно, с учетом конкретных обстоятельств дела, содержащиеся в нем выводы не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, судом первой инстанции не нарушено единообразие в толковании и применении норм права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 268 – 271   Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Астраханской области от 09 декабря  2021 года по делу №А06-6865/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через  арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                 Н. В. Савенкова

 

Судьи                                                                                                  О.В. Лыткина

 

В. Б. Шалкин