ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-20403/2020

Дело № А40-232969/2019

г. Москва

08 сентября 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 07 сентября 2020 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 08 сентября 2020 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бодровой Е.В.,

судей Кузнецовой Е.Е., Порывкина П.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "СТРОЙТОРГСЕРВИС" на Решение Арбитражного суда г.Москвы от 17.03.2020 по делу №А40-232969/19, по иску ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИАН XXI" (ИНН: 

<

***>) к ООО "СТРОЙТОРГСЕРВИС" (ИНН: 

<

***>) о взыскании 18 518 327 руб. 75 коп., по встречному иску о взыскании задолженности по оплате работ в размере 1 735 110 руб. 90 коп., убытков в размере 361 000 руб., неустойки в размере 173 000 руб., денежные средства в размере 34 438 руб. в счет оплаты госпошлины.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 24.06.2020,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 31.10.2019,

У С Т А Н О В И Л:

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИАН XXI» (далее – истец)  обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГСЕРВИС» (далее – ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в размере 4 496 406 руб. 70 коп. и стоимости переданных давальческих материалов в размере 14 021 921 руб. 05 коп. 

ООО «СТРОЙТОРГСЕРВИС» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с встречным иском к ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИАН XXI» о взыскании задолженности по оплате работ в размере 1 735 110 руб. 90 коп. убытков в размере 361 000 руб. и неустойки в размере 173 000 руб. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.03.2020 первоначальный иск удовлетворен в полном объеме, в удовлетворении встречного иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение Арбитражного суда города Москвы и принять по делу новый судебный акт.  

В обоснование доводов апелляционной жалобы, заявитель указал, что вывод суда первой инстанции о правомерности расторжения истцом (заказчиком) договора подряда, не соответствует обстоятельствам дела. 

Ссылается на то, что суд первой инстанции необоснованно отклонил доказательства выполнения ответчиком работ по договору.

Утверждает, что судом первой инстанции неправомерно были удовлетворены исковые требования о взыскании стоимости давальческих материалов в размере 14 021 921 рублей 05 коп.

Считает, что судом первой инстанции незаконно и необоснованно отказано в удовлетворении исковых требований о взыскании с ООО «СК СИАН XXI» задолженности по оплате выполненных работ в размере 1 735 110 руб. 90 коп., неустойки в размере 173 511 руб. и убытков в размере 361 000 руб.

Полагает, что убытки подрядчика в размере 361 000 руб. документально подтверждены.

Представитель ответчика в судебное заседание суда апелляционной инстанции явился, доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции представитель истца явился, против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в соответствии со ст.ст. 226, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не находит оснований для отмены судебного акта.

Как следует из материалов дела, 02.12.2016 между истцом и ответчиком заключен договор подряда № 01-11-16/П по монтажу витражей с остеклением и вентилируемых фасадов, в том числе монтаж отливов, откосов, парапетных крышек, пожарных отсечек и иные виды работ по адресу: 

<

...>.

Общая стоимость договора, в редакции дополнительного соглашения от 22.11.2017 года, составила 19 896 098 руб. 26 коп.

Истцом, по договору произведена оплата в общем размере 16 032 213,25 рублей. Срок производства работ устанавливался согласно графика производства работ. Дополнительным соглашением от 22.11.2017 года сторонами изменен срок окончания производства работ - не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты оплаты генподрядчиком денежных средств, в виде авансового платежа, указанного в п. 2.5.3. договора (2 000 000 руб.). 

15 декабря 2017 года, платежным поручением № 711 от 15.12.2017г., в порядке п. 2.5.3. договора, истец осуществил уплату авансового платежа в размере 2 000 000 руб. 24 января 2018 года между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение № 3, которым стороны предусмотрели выполнение дополнительных работ на 1 517 400 руб. 

Работы должны были быть выполнены в течение 45 рабочих дней с даты оплаты аванса (70% от стоимости работ). 

Аванс не был оплачен, в связи с чем, обязанность по выполнению работ у ответчика не возникла, течение срока выполнения работ не началось. 

Таким образом, с учетом продления срока выполнения работ, ответчик должен был выполнить работы в срок не позднее 15 февраля 2018 года. 

В нарушении условий договора ответчиком взятые на себя обязательства в установленные сроки не выполнены. 

В связи с допущенными подрядчиком нарушениями сроков выполнения работ, генподрядчик в одностороннем порядке отказался от исполнения договора, направив в адрес ООО «Стройторгсервис» уведомление об отказе от договора исх. № 09-СН от 21.02.2018г., котором уведомил ответчика о расторжении договора. 

Уведомление об отказе от договора получено ответчиком 21.02.2018 года, таким образом договор подряда № 01-11-16П от 02.12.2016 года, считается расторгнутым с 21 февраля 2018 года. 

Истцом 22 марта 2018 года в адрес ответчика направлена претензия, с требованием о возврате денежных средств, а так же возврате неизрасходованных материалов, либо оплаты их стоимости, которая оставлена ответчиком без удовлетворения. 

Правоотношения, сложившиеся между сторонами, подлежат регулированию общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и специальными нормами, содержащимися в главе 37 ГК РФ. 

Из п. 1 ст. 702 ГК РФ следует, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 10.2. договора, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 

В силу п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

В соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон. 

Из материалов дела следует, что договор подряда № 01-11-16П от 02.12.2016 года, является расторгнутым с 21 февраля 2018 года, в связи с отказом истца от исполнения договора в одностороннем порядке на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ, в связи с невыполнением ответчиком работ в установленные договором сроки.

Согласованный сторонами срок выполнения работ, по которым истцом было произведено авансирование, составил, в соответствии с дополнительным соглашением от 22.11.2017 года, 15 февраля 2018г. 

Иных соглашений об изменении сроков выполнения работ, в порядке п. 3.5. договора, сторонами не заключалось. 

Таким образом, материалами дела подтверждается правомерность расторжения договора на основании ст. 715 ГК РФ. 

Согласно п. 3 ст. 450, п. 2 ст. 453 ГК РФ, в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются. 

Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено, и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя и подлежат возвращению другой стороне (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49, пункт 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35). 

Таким образом, при прекращении договора подряда требование заказчика о возврате неизрасходованного аванса подлежит разрешению согласно нормам главы 60 ГК РФ, при этом подрядчик имеет право на оплату фактически выполненных работ. 

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 

Кроме того, в соответствии с п. 10.3. договора, при расторжении, генподрядчик вправе требовать от подрядчика возврата суммы предварительной оплаты (аванса) за работы, не выполненные подрядчиком. Согласно материалам дела и подтверждено письменными объяснениями ответчика, всего в пользу ответчика истцом было выплачено 16 032 213 руб. 25 коп. аванса, ответчиком возвращено неотработанного аванса на общую сумму 6 532 213 руб. 

При этом, как указывает истец, ответчиком выполнено работ на общую сумму 5 003 593 руб. 55 коп. (работы на сумму 4 776 279,55 руб. по акту КС-2 № 1 от 31.03.2017г., материалы на сумму 227 314 руб. по письму заказчика от 01.02.2017г.).

С учетом выполненных работ, а так же возвращенных денежных средств, ответчик имеет задолженность на сумму 4 496 406 руб. 70 коп. 

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указал, что письмом от 26.02.2018 № 5 подрядчик направил в адрес заказчика акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также исполнительную документацию. 

Письмо было получено 26.02.2019г. начальником участка ФИО4 

По мнению ответчика, результат работ, указанный в акте выполненных работ от 26.02.2018 № 2 на сумму 5 442 979 руб. 66 коп., был фактически принят заказчиком без замечаний, однако от подписания акта он уклонился, в связи с чем, акт выполненных работ был подписан подрядчиком по правилам ст. 753 ГК РФ в одностороннем порядке. 

Однако довод ответчика о передаче 26.02.2018г. КС-2, КС-3 начальнику участка ФИО4 не может быть принят во внимание, поскольку последний с января 2018 года не работал в организации истца, что подтверждается приказом о его увольнении.

Согласно ст. 7 договора подрядчик предоставляет генподрядчику при сдаче работ акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, журнал учета выполненных работ с приложением в 3 трех экземплярах всей исполнительной документации по выполненным работам. 

Согласно п. 4.1.19 договора подрядчик ведет журнал учета выполненных работ, который применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании объемов выполненных работ и согласованных расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. 

Согласно п. 4.1.6. договора подрядчик к моменту окончания работ обязан передать генподрядчику полный комплект исполнительной документации. 

В соответствии с пп. 2.5.2 договора, оплата работ осуществляется после передачи и подписания полного комплекта работ, а именно актов КС-2, справок КС-3 и получения всей исполнительной документации.

Согласно п. 4.1.6. договора подрядчик к моменту окончания работ обязан передать генподрядчику полный комплект исполнительной документации.

Доказательств передачи предусмотренной договором исполнительной документации на выполненные работы, ответчиком не представлено.

Ввиду не предоставления исполнительной документации, журнала производства работ, отчета о расходовании давальческого материала, суд первой инстанции верно указал, что не может признать доказанным факт выполнения работ и предъявления их к сдаче, как то предусмотрено договором.

Таким образом, из материалов дела следует, что ответчиком работы, указанные в акте 26.02.2018г. надлежащим образом истцу сданы не были. Кроме того, спорный акт составлен после расторжения договора истцом на основании ст. 715 ГК РФ. 

В связи с указанным, у истца не возникло обязанности по оплате указанных в акте работ на сумму 5 442 979 руб. 66 коп. 

Поскольку ответчик факт получения суммы аванса не оспорил, доказательства исполнения обязательства в полном объеме, а также возврата истцу спорной суммы денежных средств не представил, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требование о взыскании неосновательного обогащения в сумме 4 496 406 руб. 70 коп.

Истец для производства работ, по накладным на отпуск материалов на сторону, передал ответчику материалы на общую сумму 28 510 471 руб. 07 коп. 

При производстве работ, согласно отчетам ответчика, ответчиком израсходована часть переданных материалов на общую сумму 14 488 550 руб. 02 коп. 

Материалы на сумму 14 021 921 руб. 05 коп. ответчиком не возвращены, отчетов об использовании давальческих материалов на указанную сумму не представлено. 

Ответчик не оспаривает факт передачи ему материалов на указанную сумму, вместе с тем указал, что подрядчику были переданы материалы, при этом за материалы на сумму 14 488 550,02 руб. подрядчик отчитался, а остальные материалы использовал в работе, указанной в акте выполненных работ от 26.02.2018 № 2. 

Так, актом выполненных работ № 2 предусмотрены работы по монтажу переданных подрядчику в качестве материала кронштейнов, направляющих, утеплителя, керамогранита, откосов, отливов, АКП, каркасов витражей, витражей и пр. Территория объекта, на котором проводились работы, была огорожена забором и охранялась специализированной частной охранной организацией по договору, заключенному с заказчиком. 

Въезд, выезд и проход на территорию объекта осуществлялся по пропускам, которые оформлял заказчик. 

Вынос материальных ценностей с территории объекта был полностью исключен. При этом такие материалы как утеплитель и витражи являются крупногабаритными и перемещение их возможно только с использованием грузового транспорта. 

Подрядчик никогда не вывозил с территории объекта никаких материальных ценностей и не обращался к заказчику за разрешением на вывоз какого-либо имущества. 

Действительно после отказа заказчика от исполнения договора на этажах объекта оставалось некоторое незначительное количество материала, поскольку хранение его на улице могло привести к порче материала. 

Сотрудники подрядчика совместно с представителями ООО «ЛОРА» произвели подсчет неиспользованных материалов, однако документы были фактически утеряны, поскольку охрана запретила вход работникам подрядчика на территорию объекта, в том числе в бытовку, в которой хранились соответствующие документы. 

Также, подрядчик неоднократно предлагал заказчику создать комиссию для передачи давальческих материалов: Письмом от 28.03.2018 № 12 подрядчик предложил создать комиссию для оформления возврата давальческих материалов и передачи результата фактически выполненных работ. 

Письмом от 10.05.2018 № 18 подрядчик повторно предложил создать комиссию для оформления возврата давальческих материалов, а также отметил, что не имеет возможности обеспечить сохранность материала, поскольку на объекте была снята охрана. 

Письмом от 24.07.2018 № 30 подрядчик напомнил заказчику, что результат работ фактически передан заказчику и попросил вернуть подписанные акты выполненных работ. 

Письмо было проигнорировано заказчиком. 

Все обращения подрядчика были проигнорированы заказчиком. Заказчик, проявивший надлежащую осмотрительность должен был принять строительную площадку, а также неиспользованный материал по акту, о чем неоднократно просил подрядчик, однако, не сделал этого.

Вместе с тем, ответчиком не представлено доказательств невозможности составления описи, находящегося на территории объекта материала. 

Довод об отсутствии допуска на объект документально не подтвержден. 

Согласно материалам дела, между сторонами сложилась практика составления и подписания сторонами отчета об использованных материалах заказчика переданных (на давальческой основе) на выполнение работ по договору. 

Однако, отчет по спорному материалу полностью или в части, в том числе использованного в работах, указанных в акте КС-2 от 26.02.2018г., ответчиком не представлен. 

Доказательств направления в адрес истца сопроводительного письма от 24.07.2018г. (после расторжения договора) с приложенными к нему отчетами об израсходованных материалах № 1 от 31.01.2018г., № 5 от 31.11.2017г., № 6, 7, 8 от 30.11.2017г. в материалы дела не представлено. Протоколы опроса свидетелей ФИО5 и ФИО6 от 21.11.2019г. не подтверждают объем и стоимость давальческого материала, использованного в работе и находящегося на объекте. 

Ответчиком не представлен акт приема-передачи материалов, которые он намеревался передать истцу. 

Доказательств возврата материала истцу на сумму 14 021 921,05 рублей в материалы дела не представлено. 

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требование истца о взыскании стоимости переданных давальческих материалов в размере 14 021 921 руб. 05 коп. 

Истец по встречному иску указал, что за все время исполнения договора, заказчик перечислил на банковский счет денежные средства в размере 16 032 213 руб. 25 коп. 

В соответствии с п. 10.6 договора за нарушение заказчиком сроков окончательной оплаты выполненных подрядчиком работ по договору, подрядчик вправе требовать от заказчика уплаты неустойка в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оплате работ, сроки оплаты которых нарушены, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости подлежащих оплате работ.

Акт выполненных работ № 2 был оформлен по правилам ст. 753 ГК РФ 26.02.2018г. 

Таким образом, по расчету ответчика неустойка составила 173 511 руб. 09 коп. 

Вместе с тем, согласно п. 2.4. договора генподрядчик имеет право поручить подрядчику выполнение работ, не вошедших в договор. 

На выполнение этих работ стороны составляют дополнительное соглашение с указанием объема и стоимости дополнительных работ. Этим же соглашением устанавливается форма, сроки оплаты и виды работ, а также сроки выполнения этих работ. 

Подрядчик приступает к выполнению данных работ после подписания соответствующего дополнительного соглашения. 

При этом, п. 7.1. договора определена форма сдачи выполненных работ, а именно: подрядчик по окончании выполнения работ по договору направляет генподрядчику не позднее 25 числа отчетного месяца в 3 экземплярах следующие отчетные документы: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, журнал учета выполненных работ с приложением всей исполнительной документации по выполненным работам. Дополнительное соглашение на выполнение работ, указанных в акте от 18.04.2017г. на сумму 157 080 руб. 00 коп. сторонами не заключалось. 

Стоимость и объем указанных работ сторонами не согласовывались. В установленном договором порядке, работы на сумму 157 080 руб. 00 коп. ответчиком не сдавались. Акты № 1 - № 9 в обоснование работ на сумму 157 080 руб. 00 коп., а также акт от 15.01.2018 № 1 на сумму 203 499 руб. 26 коп., на который ссылается ответчик, в материалы дела не представлены. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает, что обязанность по оплате истцом суммы в размере 788 537 руб. 92 коп. ответчиком не обоснована. 

Поскольку, у истца не возникло обязанности по оплате указанных в акте от 26.02.2018г. работ на сумму 5 442 979 руб. 66 коп., встречные требования ответчика о взыскании стоимости выполненных работ в размере 1 735 110 руб. 90 коп., а также неустойки за нарушение срока оплаты выполненных работ в размере 173 511 руб., правомерно оставлены без удовлетворения.

Ответчик указывает, что в связи с уклонением заказчика от исполнения встречных обязательств (непредоставление давальческих материалов) подрядчик нес убытки в размере 361 000 руб., выразившиеся в простое рабочих, расходах по монтажу и на аренду подъемных механизмом (люлек), что подтверждается письмом от 27.06.2017г., актом от 18.04.2017г., актом от 15.05.2017.

В силу п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Требование ответчика основано на приложении к акту от 18.04.2017г. на сумму 361 900 руб., который подписан нач. участка ООО «СК СИАН XXI» ФИО4 и прорабом ООО «Стройторгсервис» ФИО7 Приложение содержит ссылку на акты № 1 - № 16 за период с 14.12.2016г. по 12.04.2017г., которые в материалы дела ответчиком не представлены, доказательства их направления в адрес истца отсутствуют. 

При этом, сам акт от 18.04.2017г., подписанный в том числе техническим директором истца ФИО6, не содержит ссылок на фиксацию факта простоя и причинение истцом убытков ответчику. 

Приложение ФИО6 не подписано. Также приложение не поименовано в акте в качестве такового. 

Таким образом, суд первой инстанции верно установил, что бесспорных доказательств факта простоя, в том числе по вине истца, в материалы дела не представлено.

Обоснованность расчета, указанных в приложении убытков ответчиком не подтверждена. Ответчиком не представлены договор аренды люлек и доказательства несения расходов на их оплату. 

Доказательства направления письма № 42 от 27.06.2017г. в адрес истца с требованием компенсации убытков, в материалах дела отсутствуют. 

Оценив представленные в дело доказательства в совокупности и взаимной связи, в том числе условия договора, суд считает, что ответчик не доказал наличия причинно-следственной связи между действиями истца и возникновением у ответчика убытков, а также наличие понесенных им расходов в заявленном размере.

Исходя из изложенного, в удовлетворении встречного иска было правомерно отказано.

Девятый арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, верно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Доводы подателя апелляционной жалобы об обратном основаны на переоценке представленных в дело доказательств. Иное толкование заявителем положений гражданского законодательства, а также иная оценка обстоятельств настоящего дела не свидетельствуют о неправильном применении судом норм материального права. 

Принцип правовой определенности предполагает, что стороны не вправе требовать пересмотра решения суда только в целях проведения повторного слушания и получения нового судебного постановления другого содержания. Иная точка зрения на то, как должно было быть разрешено дело, - не может являться поводом для отмены состоявшегося по настоящему делу решения.

Арбитражным судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено по существу законное и обоснованное решение.

Оснований, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены судебного решения арбитражного суда первой инстанции, по настоящему делу не имеется.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.03.2020 по делу №А40-232969/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

Председательствующий судьяЕ.В. Бодрова

СудьиЕ.Е. Кузнецова

П.А. Порывкин

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.