АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-2273/2025

г.Чита

26 июня 2025 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Могойтуйская строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение месяца с момента вступления в законную силу решения суда устранить недостатки работ выполненных в рамках муниципального контракта № 1-2023 на выполнение работ по созданию и обустройству сада Памяти – сквера Победы расположенного по адресу: п/ст. Степь, Проспект имени Ленина, Оловяннинского района, Забайкальского края от 20.02.2023, а именно:  

- в конструкции ограждения в местах проседания грунта при установке металлических столбов (4 пролета) с южной стороны ограждения;  

- боковые бордюрные камни состыковать на равном расстоянии от поверхности почвы длиной 27 метров по тротуару, выложенному брусчаткой от калитки в юго-восточном направлении на территории «Сада Памяти»;  

- заменить тротуарную плитку, имеющую структурные недостатки на площади 49 кв.м. на территории прилегающей ближе к сцене на территории «Сада Памяти».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Могойтуйская строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 50000 руб. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Я.А. Понуровский