Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-32806/2021

04 апреля 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 марта 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  04 апреля 2022 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеевой О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью «Экоинжстрой» (адрес: 199106, 

<

...>, лит. Б, оф. 15, ОГРН: 

<

***>), 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Теплосфера» (адрес: 192012, 

<

...>, лит. И, пом. 620, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании денежных средств, 

при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 10.01.2022), 

- от ответчика: ФИО3 (доверенность от 25.03.2021), ФИО4 (доверенность от 10.01.2022), ФИО5 (доверенность от 19.10.2021), ФИО6 (доверенность от 25.03.2021),  

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Экоинжстрой» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Теплосфера» о взыскании 3 253 123 руб. 91 коп. задолженности по договорам от 21.10.2019 № СУБ89/792967/СС, от 23.11.2018 № СУБ54/792967/СС, от 10.07.2020 № СУБ99-1/792967/ПНР, 38 771 руб. 71 коп. неустойки, а также неустойки до момента фактического исполнения основного обязательства. 

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве. 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосфера» предъявило к обществу с ограниченной ответственностью «Экоинжстрой» встречное исковое заявление о взыскании 2 455 199 руб. 93 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 23.11.2018 № СУБ54/792967/СС, 183 607 руб. 36 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 21.10.2019 № СУБ89/792967/СС. 

Определением от 22.07.2021 встречный иск принят судом к производству для совместного рассмотрения с первоначальным иском. 

В судебном заседании стороны поддержали заявленные требования в полном объеме. 

Суд установил следующие обстоятельства. 

1.  Между ООО «Теплосфера» (Подрядчик) и ООО «ЭкоИнжСтрой» (Субподрядчик) 21.10.2019 заключен Договор №СУБ89/792967/СС на выполнение комплекса работ по монтажу автоматической противопожарной защиты, охранной сигнализации, проводного радиовещания, системы оповещения и управления эвакуацией, телевидения, автоматизации систем управления технологическими процессами Блока 1 КПП и Блока 2 Паркинг на объекте: «Строительство областной детской больницы с поликлиникой г. Сертолово Всеволожского района. 1 этап-Поликлиника по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Сертолово -1» (далее – Договор № СУБ89). 

Цена Договора согласно пункту 3.1. Договора составляет 2 589 685 рублей 20 копеек. 

Стоимость выполненных работ согласно подписанных между сторонами Актов выполненных работ по Объекту (пункт 3.4. Договора) была уменьшена до 2 309 079 рублей 30 копеек. 

В соответствии с пунктом 2.2. Договора, окончательный срок выполнения работ – не позднее «29» декабря 2019 года (69 календарных дней).  

Согласно пункту 4.3.2. Договора Субподрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с согласованной технической документацией (проектной, сметной, исходно-разрешительной), строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.

Факт выполнения Субподрядчиком работ на сумму 2 309 079, 29 рублей подтверждается подписанными сторонами без разногласий и замечаний актами о приемке выполненных работ (КС-2) и соответствующими справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Выполненные работы оплачены Подрядчиком частично в сумме 2 193 625, 31 рублей.

Учитывая, что Субподрядчик исполнил свои обязательства по Договору в полном объеме, на стороне Подрядчика возникло обязательство по оплате выполненных работ, а также по оплате гарантийного удержания, производимого в порядке пункта 3.7. Договора.

Задолженность в размере 115 453, 98 руб. признана Подрядчиком в акте сверки взаимных расчетов за период с 21.10.2019 по 31.12.2020. 

Ввиду наличия неисполненного обязательства ООО «ЭкоИнжСтрой» направил претензию и предложил погасить задолженность в размере 115 453 рубля 98 копеек в десятидневный срок, который установлен в п. 9.4 Договора. До настоящего времени оплата не произведена.

Согласно пункту 6.9 Договора в случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе требовать уплаты пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока для исполнения (пункт 3.7 Договора в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами документов, указанных в пункте 3.6 Договора). Размер пени устанавливается равным 1/300 на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы. Просрочка оплаты с 31.01.2021 по 14.03.2022 составила 348 дня.

2. Между ООО «Теплосфера» (Подрядчик) и ООО «ЭкоИнжСтрой» (Субподрядчик) 23.11.2018 заключен Договор №СУБ54/792967/СС на выполнение комплекса работ по монтажу слаботочных инженерных систем здания поликлиники Блок 3на объекте: «Строительство областной детской больницы с поликлиникой г. Сертолово Всеволожского района. 1 этап-Поликлиника по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Сертолово -1» (далее – Договор № СУБ54). 

Цена Договора согласно пункту 3.1. Договора составила 34 676 986 руб. 80 коп. (в редакции ДС № 4 от 24.06.2019). 

Стоимость выполненных работ по Договору согласно подписанных между сторонами Актов выполненных работ по Объекту (пункт 3.4. Договора) была уменьшена до 33 274 204 руб. 80 коп. 

Пунктом 1 Дополнительного соглашения № 3 от 20.06.2019 была установлена новая дата начала работ: в течение 3 календарных дней с момента подписания договора. В соответствии с пунктом 2.2. Договора, окончательный срок выполнения работ – не позднее «31» октября 2019 года (в редакции ДС № 5.1 от 31.08.2019) (342 календарных дня). 

Подрядчик и Субподрядчик 24 нюня 2019 заключили Дополнительное соглашение № 4, в котором в связи с изменением объема работ были скорректированы сводные таблицы смет. Установлена цена Договора в размере 34676986 руб., в том числе НДС.

Подрядчик и Субподрядчик 27.08.2019 заключили Дополнительное соглашение № 5, в котором согласовали объем и стоимость дополнительных работ в размере 15437916 руб. 93 коп, в том числе НДС и установили сроки выполнения дополнительных работ – не позднее 20.11.2019 г.

Подрядчик и Субподрядчик 04.09.2019 заключили Дополнительное соглашение № 6, в котором согласовали объем и стоимость дополнительных работ в размере 1237636 руб. 00 коп, в том числе НДС и установили сроки выполнения дополнительных работ – не позднее 30.11.2019 г.

Подрядчик и Субподрядчик 06.11.2019 заключили Дополнительное соглашение № 7, которым внесли изменения в Дополнительное соглашение № 5 от 27.08.2019 г. в части Локальных сметных расчетов, установили стоимость дополнительных работ в размере 16585723 руб. 87 коп.

В результате произведённых корректировок цена работ по Договору № СУБ54/792967/СС составила 55 346 422, 76 руб.

Порядок расчетов установлен в пункте 3 Договора, порядок сдачи и приемки работ разделом 5 Договора.

Факт выполнения Субподрядчиком работ на сумму 55 346 422, 76 руб. подтверждается подписанными сторонами без разногласий и замечаний актами о приемке выполненных работ (КС-2) и соответствующими справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Выполненные работы оплачены Подрядчиком частично в сумме 53 208 752, 83 руб.

Учитывая, что Субподрядчик исполнил свои обязательства по Договору в полном объеме, на стороне Подрядчика возникло обязательство по оплате выполненных работ, а также по оплате гарантийного удержания, производимого в порядке пункта 3.7. Договора.

Задолженность в размере 2 137 669, 93 руб. признана Подрядчиком в акте сверки взаимных расчетов за период с 23.11.2018 по 31.12.2020. 

Ввиду наличия неисполненного обязательства ООО «ЭкоИнжСтрой» направило претензию и предложил погасить задолженность в размере 2 137 669 рублей 93 копейки в десятидневный срок, который установлен в пункте 9.4 Договора. До настоящего времени оплата не произведена.

Согласно пункту 6.9 Договора в случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе требовать уплаты пенен. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока для исполнения (пункт 3.7 Договора в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами документов, указанных в п. 3.6 Договора). Размер пени устанавливается равным 1/300 на дату уплаты пенен ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.

Просрочка оплаты с 31.01.2021 по 14.03.2022  составила 348 дня.

3. Между ООО «Теплосфера» (Подрядчик) и ООО «ЭкоИнжСтрой» (Субподрядчик) заключен договор №СУБ99-1/792967/ПНР от 10.07.2020, по которому Субподрядчик принял на себя обязательство по заданию Подрядчика выполнить комплекс пуско-наладочных работ на объекте: Строительство областной детской больницы с поликлиникой г. Сертолово Всеволожского района. 1 этап - Поликлиника по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Сертолово «Больничный комплекс. 1-я очередь» по адресу: Санкт-Петербург, Сертолово-1, а Подрядчик взял на себя обязательство принять результат выполненных работ и обеспечить оплату в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора была определена в пункте 3.1. и составила 1 000 000 рублей. 13 июля 2020 года Стороны заключили Дополнительное Соглашение № 1 к договору субподряда №СУБ99-1/792967/ПНР, по которому Подрядчик принял на себя обязательство выполнить дополнительные пусконаладочные работы в Блоке 1,2 на объекте: «Строительство областной детской больницы с поликлиникой г. Сертолово Всеволожского района. 1 этап - Поликлиника по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Сертолово».

Стоимость дополнительных работ составила 500 000 рублей (пункт 2 Дополнительного соглашения), общая цена Договора - 1 500 000 рублей, о чем были внесены соответствующие изменения в пункт 3.1. Договора.

Порядок расчетов установлен разделом 3 Договора, порядок сдачи и приемки работ разделом 5 Договора.

Факт выполнения Субподрядчиком работ на сумму 1 500 000 рублей подтверждается подписанными сторонами без разногласий и замечаний актами о приемке выполненных работ (КС-2) и соответствующими справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Выполненные работы оплачены Подрядчиком частично в сумме 500 000 рублей Учитывая, что Субподрядчик исполнил свои обязательства по Договору в полном объеме, на стороне Подрядчика возникло обязательство по оплате выполненных работ, а также по оплате гарантийного удержания, производимого в порядке п. 3.7. Договора.

Задолженность в размере 1 000 000 руб. признана Подрядчиком в акте сверки взаимных расчетов за 2020 г.

Ввиду наличия неисполненного обязательства ООО «ЭкоИнжСтрой» направил претензию и предложил погасить задолженность в размере 1 000 000 рублей в десятидневный срок, который установлен в пункте 9.4 Договора. До настоящего времени оплата не произведена.

Согласно пункту 6.9 Договора в случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе требовать уплаты пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока для исполнения (п. 3.7 Договора в течение 2 банковских дней с момента подписания сторонами документов, указанных в п. 3.6 Договора). Размер пени устанавливается равным 1/300 на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.

Просрочка оплаты с 11.01.2021 по 14.03.2022 составила 429 дня.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «ЭкоИнжСтрой» в суд с настоящим иском. 

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

В пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - Информационное письмо № 51) разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Факт выполнения работ должен подтверждаться надлежащими доказательствами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Статьей 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Факт выполнения ООО «ЭкоИнжСтрой» обязательств по договорам подтверждается материалами дела, в том числе подписанными ООО «Теплосфера» без возражений актами выполненных работ (КС-2, КС-3), актами сверок взаимных расчетов, и ответчиком не оспаривается. 

Оценив с соблюдением требований статей 67, 68, 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд считает требование истца по первоначальному иску о взыскании задолженностей в заявленных размерах подлежащим удовлетворению, учитывая отсутствие доказательств, свидетельствующих об исполнении ответчиком обязанности по оплате выполненных работ по договору от 21.10.2019 № СУБ89/792967/СС в размере 115 453 руб. 98 коп., от 23.11.2018 № СУБ54/792967/СС в размере 2 137 669 руб. 93 коп., от 10.07.2020 № СУБ99-1/792967/ПНР в размере 1 000 000 руб.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Материалами дела подтверждается нарушение ООО «Теплосфера» обязательств по договорам в части сроков оплаты, в связи с чем, у  ООО «ЭкоИнжСтрой» возникло право на взыскание пеней. 

Проверив расчеты, суд признал их обоснованными, выполненными в соответствии с условиями договоров и подлежащими применению.

Ответчик расчеты неустойки не оспорил; контррасчеты не представил; ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ не заявил. 

На основании изложенного, требования ООО «ЭкоИнжСтрой» по первоначальному иску подлежат удовлетворению в полном объеме с отнесением на ООО «Теплосфера» в порядке статьи 110 АПК РФ расходов по уплате государственной пошлины. 

В рамках встречного иска общество с ограниченной ответственностью «Теплосфера» предъявило к обществу с ограниченной ответственностью «Экоинжстрой» требования о взыскании 2 455 199 руб. 93 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 23.11.2018 № СУБ54/792967/СС, 183 607 руб. 36 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 21.10.2019 № СУБ89/792967/СС. 

В обоснование исковых требований Подрядчик указал, что по Договору № СУБ89, окончательный срок выполнения работ – не позднее «29» декабря 2019 года (п. 2.2. договора). Работы по Договору № СУБ89 Субподрядчиком выполнены с нарушением сроков, установленных п. 2.2. Договора № СУБ89, что подтверждается подписанными между сторонами Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 02.04.2020, от 11.06.2020г., от 08.07.2020, от 10.08.2020; Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 02.04.2020, №3 от 11.06.2020г., № 4 от 08.07.2020, №5 от 10.08.2020. 

В соответствии с пунктом 2.2. Договора № СУБ54, окончательный срок выполнения работ – не позднее «31» октября 2019 года (в редакции ДС № 5.1 от 31.08.2019г.) (342 календарных дня). 

Работы по Договору № СУБ54 Субподрядчиком выполнены с нарушением сроков, установленных п. 2.2. Договор № СУБ54, что подтверждается подписанными между сторонами Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 16.01.2020, 01.04.2020, 13.05.2020, 27.05.2020, 08.06.2020, 25.06.2020, 07.08.2020г.

Между сторонами 27.08.2019 подписано дополнительное соглашение № 5 к Договору № СУБ54 (далее - ДС №5) на выполнение дополнительных работ по монтажу оборудования систем автоматической противопожарной защиты, охранной сигнализации, проводного вещания, системы оповещения и управления эвакуацией, системы электрочасофикации на Объекте.

Срок окончания выполнения работ п. 5.2. ДС №5 к Договору № СУБ54 – не позднее 20.11.1019 (85 календарных дней).

Работы по Договору ДС №5 к Договору № СУБ54 выполнены с нарушением сроков, установленных п. 5.2. ДС №5, что подтверждается подписанными между сторонами Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 12 от 11.03.2020г; №14 от 13.03.2020; №15,16,18 от 25.05.2020; №20 от 27.04.2020; № 21,22 от 13.05.2020; № 24 от 25.05.2020; №29 от 08.08.2020; №30,31,32 от 22.06.2020; №34,35,36,37 от 10.07.2020; № 38,40,41 от 13.07.2020; №42 от 07.08.2020; №47,48 от 13.08.2020.

Между сторонами 04.09.2019 подписано дополнительное соглашение № 6 к Договору № СУБ54 (далее - ДС №6) на выполнение дополнительных работ по наружным сетям связи и монтажу системы диспетчеризации вертикального транспорта Блока 3 на Объекте. Срок окончания выполнения работ п. 5.2. ДС №6 к Договору № СУБ54– не позднее 30.11.1019 (87 календарных дней). Работы ДС №6 к Договору № СУБ54выполнены с нарушением сроков, установленных п. 5.2. ДС №6, что подтверждается подписанными между сторонами Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 11 от 11.03.2020, №13 от 13.03.2020, №28 от 08.06.2020, №39 от 13.07.2020, №46 от 10.08.2020. 

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока его обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Согласно пункту 1 статьи 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. 

Согласно пункту 1.1. Договора № СУБ89/792967/СС от 21.10.2019 Субподрядчик взял на себя обязательства в установленный Договором срок по заданию Подрядчика выполнить комплекс работ по монтажу автоматической пожарной защиты, охранной сигнализации, проводного радиовещания, системы оповещения и управления эвакуацией, телевидения, автоматизации систем управления технологическими процессами Блока 1 КПП и Блока 2 Паркинг на объекте «Строительство областной детской больницы с поликлиникой г. Сертолово Всеволожского района. 1 этап - Поликлиника по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Сертолово», а Подрядчик обязан принять результат выполненных работ и обеспечить оплату.

В соответствии с пунктом 1.2. Субподрядчик выполняет работы в соответствии со Сводными сметным расчетом (Приложение № 1), Техническим заданием (Приложение N° 2), требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, градостроительного плана земельного участка, технической документацией (проектной, сметной, исходно-разрешительной).

Подрядчик обязан предоставить Субподрядчику по акту строительную площадку для выполнения работ в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, т.е. не позже 31 октября 2019 года (пункт 4.2.1 Договора). Однако строительная площадка, готовая к монтажу оборудования, ООО «ЭкоИнжСтрой» в соответствии с договором передана в установленный срок не была. 

В соответствии с пунктом 4.2.2. Подрядчик обязан передать Субподрядчику в срок до начала выполнения работ, утвержденную и согласованную в установленном порядке проектную и сметную документацию, градостроительный план земельного участка, а также необходимую разрешительную документацию. Согласно Техническому заданию пункт 6.14. Подрядчик обязан передать субподрядчику Рабочую документацию согласно перечню.

В соответствии с пунктом 6.13 Договора Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла по вине другой Стороны.

Подрядчик неоднократно нарушал условия и сроки договора, в частности, сроки передачи проектной и рабочей документации, сроки передачи строительной площадки. Документация была передана в период с мая 2020 г. по июль 2020 г., что подтверждается представленными в материалы дела доказательства (л.д. 14-34 Том 4). 

Согласно пункту 1.1. Договора № СУБ54/792967/СС от 23.11.2018  Субподрядчик принял на себя обязательства в установленный Договором срок по заданию Подрядчика выполнить комплекс работ по монтажу слаботочных инженерных систем здания поликлиники Блок 3, на объекте «Строительство областной детской больницы с поликлиникой г. Сертолово Всеволожского района. 1 этап - Поликлиника по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Сертолово», а Подрядчик обязан принять результат выполненных работ и обеспечить оплату.

В соответствии с пунктом 1.2, Субподрядчик выполняет работы в соответствии со Сводными сметным расчетом (Приложение № 1), Техническим заданием (Приложение № 2), требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, градостроительного плана земельного участка, технической документацией (проектной, сметной, исходно-разрешительной).

Согласно пункту 4.2.1. Подрядчик обязан предоставить Субподрядчику по акту строительную площадку для выполнения работ в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. В соответствии с пунктом 4.2.2. Подрядчик обязан передать Субподрядчику в срок до начала выполнения работ, утвержденную и согласованную в установленном порядке проектную и сметную документацию, градостроительный план земельного участка, а также необходимую разрешительную документацию. В ходе проведения работ сторонами производилась замена оборудования в связи со снятием его с производства (Письмо №. 20-19 от 22.04.2019, Письмо 30-19 от 27.05.2019), (л.д. 46-49, 72-73 том 4). 

В соответствии с пунктом 6.13 Договора Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла по вине другой Стороны.

В пункте 3 Технического задания изложены обязательные требования к выполнению работ, согласно которым Субподрядчик, приступает к работам только после приемки фронта работ по Акту от подрядчика. Однако Подрядчик в установленные сроки фронт работ Субподрядчику не передал. Помещения объекта, в которых производились монтажные работы, не имели строительной готовности, по этой причине монтаж в полном объеме в установленный срок не был произведен по независящим от Субподрядчика причинам.

Подрядчик обязан предоставить Субподрядчику рабочую документацию, согласованную «В производство работ». Электрической энергией объект обеспечивает Подрядчик. Субподрядчик в течение длительного времени не имел возможности производить монтаж в связи с отсутствием на объекте электроснабжения, что подтверждается Письмом № 26-19 от 15.05.2019 (л. д. 70,107 том 4).

Согласно Техническому заданию пункт 14. Подрядчик обязан передать субподрядчику Рабочую документацию по перечню. Проектная документация по настоящему договору Подрядчиком была передана только в 2019 года, что подтверждается Письмом № 37-19 от 24.06.2019 о предоставлении проектной документации, Реестром переданной исполнительной документации от 08.08.2019 (л. 

<

...> том 4), письмами ООО «Теплосфера» № 1401 от 10.12.2019, № 75 от 10.12.2019  (л. 

<

...> том 4). 

При этом Подрядчик вносил изменения в документацию уже после передачи ее Субподрядчику. Последние изменения в проектную документацию были внесены Подрядчиком в июле 2020 г. Кроме того, уже установленное оборудование выводилось из строя при проведении строительных работ другими субподрядчиками (Письмо № 36 от 21.06.2019, л.д. 76, 114 том 4). 

Часть оборудования поставлял Подрядчик, поставка была осуществлена в период с января 2020 г. по июль 2020 г., что подтверждается Накладными на отпуск материалов на сторону со стороны ООО «Теплосферы» №№ 356 от 10.01.2020, 392 от 07.05.2020, 499 от 22.05.2020, 773 от 10.072020 (л. 

<

...>, 7 том 4); Отчетами об использовании давальческого сырья № 2 от 01.04.2020 г., № 3 от 13.05.2020 г., № 4 от 08.06.2020 г. № 5 от 18.08.2020 г. (л. д. 3-6 Том 4); перемещением товаров ООО «Теплосфера» Т000004663 от 10.01.2020 г., Т000111121 от 07.05.2020 г. (л. 

<

...> Том 4).

Подрядчик обязан предоставить Субподрядчику по акту строительную площадку для выполнения работ в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, однако строительная площадка не была готова, что подтверждается документами (письмо ООО «Теплосфера» от 26.06.2020 л. д. 67 том 4, Письмо № 110-20 от 23.07.2020  об отключении электропитания и установки мебели для монтажа систем том 8, Письмо № 708 от 03.06.2020 о невозможности монтажа том 8, Письмо от 04.05,2020 о незаконченном монтаже потолка том 8, Письмо № 71-20 от 07.05.2020 об уточнении сроков готовности для монтажа оконечных устройств том 8, Служебная записка Инженера технадзора ООО «Теплосфера» ФИО7 от 04.05.2020 г. об отсутствии строительного готовности объекта, Письмо № 74-20 от 13 мая 2020 г. Повторно. О подведении эл.линий питания, Письмо руководителя строительства ООО «Теплосфера» ФИО8 от 03.06.2020 г. за № 708 об отсутствии строительной готовности объекта для монтажа оконечных устройств том 8).

ООО «ЭкоИнжСтрой» неоднократно просило Подрядчика продлить срок выполнения работ в связи с указанными обстоятельствами (Письмо № 98-19 от11.12.2019 лист дела 102 том 4, Письмо № 90-20 от 19 июня 2020 г. О продлении сроков из-за увеличения работ, Протокол разногласий том 8).

В ходе работ Субподрядчиком было демонтировало и утрачено установленное сторонней организацией оборудование, о чем было сообщено ответчику (письмо № 61-20 от 14.04.2020 листы дела 57 том 4, письмо № 57-20 от 09.04.2020, л.д. 54 том 4). 

Оценив с соблюдением требований статей 67, 68, 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что просрочка выполнения работ Субподрядчиком была вызвана нарушением Подрядчиком встречных обязательств по Договорам, а также кредиторских обязанностей. 

При таких обстоятельствах основания для взыскания неустойки за просрочку выполнения работ с ООО «ЭкоИнжСтрой» отсутствуют. 

Встречный иск ООО «Теплосфера» удовлетворению не подлежит. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Теплосфера» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭкоИнжСтрой» по первоначальному иску 115 453, 98 руб. основного долга, 26 785 руб. 32 коп. пеней за период с 31.01.2021 по 14.03.2022 по договору от 21.10.2019 № СУБ89/792967/СС, а также пени из расчета 1/300 на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы за период с 15.03.2022 по дату фактического исполнения основного обязательства; 2 137 669, 93 руб. основного долга, 495 939 руб. 42 коп. пеней за период с 31.01.2021 по 14.03.2022 по договору от 23.11.2018 № СУБ54/792967/СС, а также пени из расчета 1/300 на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы за период с 15.03.2022 по дату фактического исполнения основного обязательства; 1 000 000 руб. основного долга, 286 000 руб. пеней за период с 11.01.2021 по 14.03.2022 по договору от 10.07.2020 № СУБ99-1/792967/ПНР, а также пени из расчета 1/300 на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы за период с 15.03.2022 по дату фактического исполнения основного обязательства, 39 266 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Теплосфера» в доход федерального бюджета 4 043 руб. государственной пошлины. 

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.