Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-13659/2019

31 октября 2019 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  28 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  31 октября 2019 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Киселевой А.О.,

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Баскаковым С. А.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест" (адрес:  Россия 197022, г Санкт-Петербург, 

<

...>/Литер А, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: :Общество с ограниченной ответственностью "Капитал стройиндустрия" (адрес:  Россия 199406, г Санкт-Петербург, 

<

...> лит. А, пом. 23-Н, каб. 1, ОГРН:  

<

***>);

третье лицо: Временный управляющий ФИО1 (адрес:  Россия 193231, Санкт-Петербург, а/я 3, ОГРН:  )

об обязании и взыскании,

 

при участии

- от истца: представитель ФИО2 (доверенность от 25.09.2019 г.),

- от ответчика: не явился, извещен,

- от третьего лица: не явился, извещен, 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром социнвест» (далее – Истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Капитал стройиндустрия» (далее – Ответчик) о понуждении исполнить обязательство в натуре: передать в течение 15 календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда оформленную надлежащим образом исполнительную документацию по объекту по объекту «Обустройство офисных помещений для размещения подразделений ОАО «Газпром» и дочерних обществ ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге по адресу: пл. Победы дом 2, лит. А (БЦ «Виктория») 4-я очередь» по договору генерального подряда от 22.12.2017 № 258-4710-ДПД-17, а также взыскать пени в размере 39 961,06 рублей и расходы по оплате государственной пошлины.

В ходе рассмотрения дела Истец неоднократно корректировал требование об обязании передать документацию в части состава. Согласно уточнениям от 26.07.2019 г. № 21-ЮУ Истец изложил указанное требование в следующей редакции:           

«Обязать Ответчика в течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу передать Истцу оформленную надлежащим образом исполнительную документацию по объекту «Обустройство офисных помещений для размещения подразделений ОАО «Газпром» и дочерних обществ ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге по адресу: пл. Победы дом 2, лит. А (БЦ «Виктория») 4-я очередь» по договору генерального подряда от 22.12.2017 № 258-4710-ДПД-17, а именно:

№ п/п

Шифр РД

 Наименование и номер комплекта исполнительной документации по видам работ / конструктивным элементам / инженерным системам  

Номер папки

Содержание папки

Наличие замечаний к исполни-тельной докумен-тации, отраженных в письмах ООО "Газпром социнвест"

Количество экземпляров исполнительной документации, подлежащей передаче в ООО "Газпром социнвест" на бумажном носителе (с учетом устранения замечаний)

Количество экземпляров исполнительной документации, подлежащей передаче в ООО "Газпром социнвест" на электронном носителе (с учетом устранения замечаний)

1

Общий журнал работ

-

2/3-1

Общий журнал работ

Исх. № 3575 от 22.05.2018

1

-

2

Журнал входного контроля и учета материалов

 - 

2/3-2.1

Журнал входного контроля и учета материалов

Исх. № 1493 от 01.03.2018

4

-

3

Журнал производства сварочных работ

 - 

2/3-5

Журнал производства сварочных работ

Исх. № 3575 от 22.05.2018

1

-

4

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений.

 - 

2/3-6

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений.

Исх. № 3575 от 22.05.2018

1

-

5

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-АР

Архитектурные решения

3/1-1.1

Рабочая документация

Исх. № 1493 от 01.03.2018

4

1

6

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-АР

3/1-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

Исх. № 1493 от 01.03.2018

2

1

7

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-АР

Архитектурные решения

3/1-2.2

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

Исх. № 5112 от 10.07.2018

4

1

8

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-АР

3/1-2.3

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

Исх. № 1493 от 01.03.2018

2

1

9

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-АР

3/1-2.4

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

Исх. № 1493 от 01.03.2018

Исх. № 5112 от 10.07.2018

4

1

10

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-КМ

Конструкции металлические

3/3-1.1

Рабочая документация

Исх. № 1493 от 01.03.2018

4

1

11

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ВК.1

Водопровод и канализация

3/4-1.1

Рабочая документация

 -

2

1

12

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ВК.1

3/4-1.2

Рабочая документация

 -

2

1

13

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ВК.1

3/4-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

 -

1

1

14

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ВК.2

Водопровод и канализация

3/4-1.1.1

Рабочая документация

 -

2

1

15

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ВК.2

3/4-1.1.2

Рабочая документация

 -

2

1

16

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ВК.2

3/4-2.1.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

 -

1

1

17

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ОВ1 книга 1

Отопление

3/5-1.1

Рабочая документация

 -

2

1

18

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ОВ1 книга 1

3/5-1.2

Рабочая документация

 -

2

1

19

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ОВ1 книга 1

3/5-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

 -

1

1

20

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ОВ1 книга 2

3/5-1.1.1

Рабочая документация

 -

2

1

21

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ОВ1 книга 2

3/5-1.1.2

Рабочая документация

 -

2

1

22

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ОВ1 книга 2

3/5-2.1.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

 -

1

1

23

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ЭОМ.1

Электроснабжение и электроосвещение

3/6-1.1

Рабочая документация

 -

-

1

24

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ЭОМ.3

3/6-1.2

Рабочая документация. Изм. 1

 -

2

1

25

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ЭОМ.2

3/6-1.1.1

Рабочая документация

 -

-

1

26

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ЭОМ.2

3/6-1.1.1.1 

Рабочая документация

Исх. № 3575 от 22.05.2018

4

1

27

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ОВ2 книга 1

Вентиляция

3/7-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

Исх. № 1493 от 01.03.2018

Исх. № 5112 от 10.07.2018

4

1

28

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ОВ2 книга 2

3/7-2.1.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

Исх. № 1493 от 01.03.2018

Исх. № 5112 от 10.07.2018

4

1

29

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -Д книга 1

Диспетчеризация инженерных систем

3/8-1.1

Рабочая документация книга 1

 -

-

1

30

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -Д книга 2

3/8-1.1

Рабочая документация книга 2

 -

-

1

31

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -Д.2

3/8-1.1.1

Рабочая документация

 -

-

1

32

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -Д 

3/8-1.2

Рабочая документация

 -

-

1

33

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -СОУЭ.1

Система оповещения и управления эвакуацией

3/9-1.1

Рабочая документация

 -

-

1

34

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -СОУЭ.1

3/9-1.2

Рабочая документация

 -

-

1

35

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -СОУЭ.2

3/9-1.1.1

Рабочая документация. Часть 3.

 -

-

1

36

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -СОУЭ.3

3/9-1.1.1.1

Рабочая документация

 -

-

1

37

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-АПС .1

Система автоматической пожарной сигнализации

3/10-1.1

Рабочая документация

 -

-

1

38

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-АПС. 2

3/10-1.1.1

Рабочая документация

 -

-

1

39

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -АУПТ.1

Система автоматического водяного пожаротушения

3/11-1.1

Рабочая документация

 -

-

1

40

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -АУПТ.2

3/11-1.1.1

Рабочая документация

 -

-

1

41

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -АУПТ.3

3/11-1.1.1.1

Рабочая документация

 -

-

1

42

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -АППЗ.1

Автоматическая противопожарная защита

3/12-1.1

Рабочая документация

 -

-

1

43

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -АППЗ.2

3/12-1.1.1

Рабочая документация

 -

-

1

44

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ТВ

Телевидение

3/19-1.1

Рабочая документация

 -

-

1

45

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ЭН

Наружное электроосвещение

3/20-1.1

Рабочая документация

Исх. № 3575 от 22.05.2018

4

1

46

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ЭН

Наружное электроосвещение

3/20-2.1

Рабочая документация

Исх. № 3575 от 22.05.2018

2

-

47

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ЭН

Наружное электроосвещение

3/20-2.2

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

Исх. № 3575 от 22.05.2018

2

-

 

Уточнения судом приняты в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Определением от 29.07.2019 г. суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего Ответчика ФИО1

В судебном заседании представитель Истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик и третье лицо, извещенные о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, своих представителей не направил. Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей Ответчика и третьего лица, которые извещены надлежащим образом, о чем в материалах дела имеются соответствующие доказательства в соответствии с требованиями ст. 123 АПК РФ.

От Ответчика поступило ходатайство от 17.09.2019 г. о рассмотрении дела в отсутствие представителя. Присутствовавший в предыдущих судебных заседаниях представитель Ответчика возражал против заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве.    

При отсутствии возражений сторон, в соответствии с положениями ст. 137 АПК РФ суд подготовил дело к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в суде первой инстанции.

Заслушав представителя Истца, суд установил следующие обстоятельства. 

Между Истцом (заказчик) и Ответчиком (подрядчик) был заключен договор генерального подряда от 22.12.2017 № 258-4710-ДПД-17 (далее – договор), в соответствии с которым Ответчик обязался выполнить строительные и отделочные работы, работы по инженерно-техническому оснащению, пусконаладочные работы (включая индивидуальные испытания и комплексное опробование), а также работы и услуги, необходимые для строительства объекта «Обустройство офисных помещений для размещения подразделений ОАО «Газпром» и дочерних обществ ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге по адресу: пл. Победы дом 2, лит. А (БЦ «Виктория») 4-я очередь».

Согласно п. п. 6.1.1, 6.1.11 договора Генподрядчик обязался выполнить указанные работы и услуги в соответствии  с проектной и рабочей документацией, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации, при этом, своевременно и надлежащим образом оформить и передать заказчику исполнительную документацию, соответствующую требованиям строительных норм и правил, технических регламентов, иных обязательных требований и условий договора.

В соответствии с пунктом 6.1.46 Договора полный комплект исполнительной документации (в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе) подлежал передаче Заказчику к моменту приемки выполненных в полном объеме работ; согласно Графику выполнения работ по Договору срок передачи такой документации был установлен 30.10.2017 г.

К указанному сроку Ответчик свои обязательства не выполнил. Согласно письму от 18.12.2017 г. № 17-3298 Ответчик гарантировал, что предоставит полный пакет исполнительной документации не 01.02.2018 г.    

Несмотря на неоднократные обращения Истца с требованием передать исполнительную документацию (письма № 13155 от 29.12.2017 г., № 830 от 06.02.2018 г., № 1080 от 14.02.2018 г., № 1939 от 21.03.2018 г., № 2105 от 26.03.2018 г.), Ответчик не передал Истцу исполнительную документацию в полном объеме, что послужило основанием для обращения Истца в суд с настоящим иском.

Выслушав доводы представителя Истца, ознакомившись с позицией Ответчика, рассмотрев представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно ст. 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета  договора  подряда,  если  это  предусмотрено договором  либо  характер  информации  таков,  что  без  нее  невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Положения п. п. 6.1.1, 6.1.11, 6.1.46 договора предусматривают обязанность Ответчика передать Истцу исполнительную документацию в соответствующем объеме.  

Согласно требованиям ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Ответчиком в материалы дела не было представлено относимых и допустимых доказательств в опровержение обоснованных Истцом обстоятельств, не представлено и доказательств передачи исполнительной документации по договору в полном объеме.

В ходе рассмотрения дела судом была назначена сверки переданной Ответчиком документации, по результатам проведения которой Истцом в материалы дела был представлен акт от 24.05.2019 г., а также уточнены исковые требования.

В силу ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему  внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Требование Истца подтверждено материалами дела и подлежит удовлетворению на основании статей 309, 310, 722, 726 ГК РФ. 

Ввиду установленного судом факта не исполнения обязательства по передаче исполнительной документации Истцом, суд, руководствуясь положениями ст. 330 ГК РФ, полагает основанным требование Истца о взыскании неустойки в порядке положений п. 17.2 договора согласно расчету Истца.   

Расходы Истца по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела возлагаются на Ответчика с учетом положений ст. ст. 102, 110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Капитал стройиндустрия» в течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу передать обществу с ограниченной ответственностью «Газпром социнвест» оформленную надлежащим образом исполнительную документацию по объекту «Обустройство офисных помещений для размещения подразделений ОАО «Газпром» и дочерних обществ ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге по адресу: пл. Победы дом 2, лит. А (БЦ «Виктория») 4-я очередь» по договору генерального подряда от 22.12.2017 № 258-4710-ДПД-17, а именно:

№ п/п

Шифр РД

 Наименование и номер комплекта исполнительной документации по видам работ / конструктивным элементам / инженерным системам  

Номер папки

Содержание папки

Наличие замечаний к исполни-тельной докумен-тации, отраженных в письмах ООО "Газпром социнвест"

Количество экземпляров исполнительной документации, подлежащей передаче в ООО "Газпром социнвест" на бумажном носителе (с учетом устранения замечаний)

Количество экземпляров исполнительной документации, подлежащей передаче в ООО "Газпром социнвест" на электронном носителе (с учетом устранения замечаний)

1

Общий журнал работ

-

2/3-1

Общий журнал работ

Исх. № 3575 от 22.05.2018

1

-

2

Журнал входного контроля и учета материалов

 - 

2/3-2.1

Журнал входного контроля и учета материалов

Исх. № 1493 от 01.03.2018

4

-

3

Журнал производства сварочных работ

 - 

2/3-5

Журнал производства сварочных работ

Исх. № 3575 от 22.05.2018

1

-

4

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений.

 - 

2/3-6

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений.

Исх. № 3575 от 22.05.2018

1

-

5

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-АР

Архитектурные решения

3/1-1.1

Рабочая документация

Исх. № 1493 от 01.03.2018

4

1

6

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-АР

3/1-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

Исх. № 1493 от 01.03.2018

2

1

7

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-АР

Архитектурные решения

3/1-2.2

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

Исх. № 5112 от 10.07.2018

4

1

8

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-АР

3/1-2.3

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

Исх. № 1493 от 01.03.2018

2

1

9

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-АР

3/1-2.4

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

Исх. № 1493 от 01.03.2018

Исх. № 5112 от 10.07.2018

4

1

10

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-КМ

Конструкции металлические

3/3-1.1

Рабочая документация

Исх. № 1493 от 01.03.2018

4

1

11

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ВК.1

Водопровод и канализация

3/4-1.1

Рабочая документация

 -

2

1

12

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ВК.1

3/4-1.2

Рабочая документация

 -

2

1

13

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ВК.1

3/4-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

 -

1

1

14

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ВК.2

Водопровод и канализация

3/4-1.1.1

Рабочая документация

 -

2

1

15

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ВК.2

3/4-1.1.2

Рабочая документация

 -

2

1

16

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ВК.2

3/4-2.1.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

 -

1

1

17

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ОВ1 книга 1

Отопление

3/5-1.1

Рабочая документация

 -

2

1

18

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ОВ1 книга 1

3/5-1.2

Рабочая документация

 -

2

1

19

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ОВ1 книга 1

3/5-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

 -

1

1

20

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ОВ1 книга 2

3/5-1.1.1

Рабочая документация

 -

2

1

21

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ОВ1 книга 2

3/5-1.1.2

Рабочая документация

 -

2

1

22

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ОВ1 книга 2

3/5-2.1.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

 -

1

1

23

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ЭОМ.1

Электроснабжение и электроосвещение

3/6-1.1

Рабочая документация

 -

-

1

24

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ЭОМ.3

3/6-1.2

Рабочая документация. Изм. 1

 -

2

1

25

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ЭОМ.2

3/6-1.1.1

Рабочая документация

 -

-

1

26

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ЭОМ.2

3/6-1.1.1.1 

Рабочая документация

Исх. № 3575 от 22.05.2018

4

1

27

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ОВ2 книга 1

Вентиляция

3/7-2.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

Исх. № 1493 от 01.03.2018

Исх. № 5112 от 10.07.2018

4

1

28

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ОВ2 книга 2

3/7-2.1.1

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

Исх. № 1493 от 01.03.2018

Исх. № 5112 от 10.07.2018

4

1

29

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -Д книга 1

Диспетчеризация инженерных систем

3/8-1.1

Рабочая документация книга 1

 -

-

1

30

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -Д книга 2

3/8-1.1

Рабочая документация книга 2

 -

-

1

31

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -Д.2

3/8-1.1.1

Рабочая документация

 -

-

1

32

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -Д 

3/8-1.2

Рабочая документация

 -

-

1

33

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -СОУЭ.1

Система оповещения и управления эвакуацией

3/9-1.1

Рабочая документация

 -

-

1

34

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -СОУЭ.1

3/9-1.2

Рабочая документация

 -

-

1

35

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -СОУЭ.2

3/9-1.1.1

Рабочая документация. Часть 3.

 -

-

1

36

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -СОУЭ.3

3/9-1.1.1.1

Рабочая документация

 -

-

1

37

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-АПС .1

Система автоматической пожарной сигнализации

3/10-1.1

Рабочая документация

 -

-

1

38

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-АПС. 2

3/10-1.1.1

Рабочая документация

 -

-

1

39

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -АУПТ.1

Система автоматического водяного пожаротушения

3/11-1.1

Рабочая документация

 -

-

1

40

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -АУПТ.2

3/11-1.1.1

Рабочая документация

 -

-

1

41

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -АУПТ.3

3/11-1.1.1.1

Рабочая документация

 -

-

1

42

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -АППЗ.1

Автоматическая противопожарная защита

3/12-1.1

Рабочая документация

 -

-

1

43

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -АППЗ.2

3/12-1.1.1

Рабочая документация

 -

-

1

44

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4 -ТВ

Телевидение

3/19-1.1

Рабочая документация

 -

-

1

45

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ЭН

Наружное электроосвещение

3/20-1.1

Рабочая документация

Исх. № 3575 от 22.05.2018

4

1

46

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ЭН

Наружное электроосвещение

3/20-2.1

Рабочая документация

Исх. № 3575 от 22.05.2018

2

-

47

ОПГС-2015-БЦ-СПБ-002-4-ЭН

Наружное электроосвещение

3/20-2.2

Акты, документы, удостоверяющие качество, исполнительные схемы

Исх. № 3575 от 22.05.2018

2

-

 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капитал стройиндустрия» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Газпром социнвест»:

- пени в размере 39 961,06 рублей,

- расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                          Киселева А.О.