307/2021-76228(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А13-5713/2021

город Вологда

12 июля 2021 года

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 110, статьями 167-171, 176, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный  суд Вологодской области  

р е ш и л:

внести изменения в муниципальный контракт от 13.11.2020   № 01303000343200001550001 на выполнение работ по подготовке проектной  документации в целях строительства объекта «Распределительный газопровод  по хутору Исады и мкр. Исады п. Вохтога Грязовецкого района Вологодской  области (МО Вохтожское)» между обществом с ограниченной  ответственностью «Проектный центр» и Администрацией муниципального  образования Вохтожское:  

пункт 3.1 контракта изложить в следующей редакции: «срок выполнения  работ: с момента заключения муниципального контракта до 01 ноября 2021  года»;  

раздел 4 Приложения № 1 к муниципальному контракту изложить в  следующей редакции: «срок выполнения работ: с момента заключения  муниципального контракта до 01 ноября 2021 года».  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в  Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Н.Ю. Курпанова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2020 5:34:20

Кому выдана Курпанова Наталья Юрьевна