АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

http://kostroma.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А31-9142/2018

г. Кострома

24 октября 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 октября 2018 года.

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Мофы В.Д. при ведении протокола секретарем судебного заседания Абрамовой М.А. рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Газсервис» (ИНН 4401149990, ОГРН 1144401002338) к обществу с ограниченной ответственностью «Современные технологии теплоснабжения» (ИНН 4401112728, ОГРН 1104401007930) о взыскании долга, пени.

В судебном заседании приняли участие: от истца ФИО2 (доверенность от 11.10.2018).

Суд установил следующее.     

Общество с ограниченной ответственностью «Газсервис» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд Костромской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Современные технологии теплоснабжения» (далее ответчик) о взыскании 153 745 рублей долга, 15 374 рублей 50 копеек пени.

Истец заявленные требования поддержал.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, отзыв на иск не представил, требования истца не оспорил.

Суд, руководствуясь частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрел дело в отсутствие ответчика.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие фактические обстоятельства.

26 июня 2015 года истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда № 16/15-ПГ на выполнение строительно-монтажных работ по установке и обвязке ГРПШ, прокладке наружного газопровода к БМК, расположенной по адресу: Костромская область, ГП 

<

...>.

Стоимость работ составляет 153 745 рублей (п. 2.1 договора)

Срок начала работ определен в течение 3-х дней с момента подписания договора, срок окончания – 1.08.2015 года (п. 4.1 договора).

Сдача-приемка выполненных работ оформляется актом выполненных работ, подписанным сторонами (п. 5.2 договора).

Заказчик обязан внести на расчетный счет подрядчика 100% стоимости работ в течение 10 дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ (п. 6.3 договора).

При нарушении сроков оплаты заказчик выплачивает подрядчику штраф (пеню) а размере 0,01 % от общей стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора (п. 9.3 договора).

27 июля 2015 года сторонами подписан акт приемки выполненных работ на сумму 153 745 рублей.

Согласно утверждению истца выполненные работы ответчиком не оплачены, долг составляет 153 745 рублей.

Утверждение истца ответчиком не оспорено, доказательств оплаты долга не представлено.

Истцом за нарушение сроков оплаты работ начислена пеня за период с 7.08.2015 года по 7.05.2018 года в сумме 15 374 рублей 50 копеек.

По результатам анализа установленных фактических обстоятельств, норм действующего законодательства суд приходит к выводу об обоснованности требования истца в связи со следующим.

В пункте 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Факт выполнения работ и размер задолженности подтвержден представленными доказательствами и ответчиком не оспорен.

Доказательства оплаты ответчиком не представлены.

В силу п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Расчет пени ответчиком не оспорен, судом проверен и принят.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Современные технологии теплоснабжения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Газсервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 153 745 рублей задолженности, 15 374 рубля 50 копеек пени, а также 6 074 рубля в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по вступлении решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и, если решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.

Судья                           В.Д. Мофа