43_38685348 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 

26. 02. 2024 года. Дело № А40-253492/23-43-1998  Арбитражный суд г. Москвы  

в составе председательствующего Романова О.В., единолично,  протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО " УК Блэквуд " (ОГРН 

<

***>) к ООО " Вектор " (ОГРН 

<

***>) 

об обязании подрядчика завершить работы по договору подряда от 01.09.2023 г. № 07УКБ/2023 в  срок до 01.05.2024 г. и о взыскании 552 780 руб. 47 коп. – неустойки,  

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 07 от 13.11.2023 г., от ответчика – не явился.  

Руководствуясь статьями 7, 8, 9, 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 155, 159, 162, 166-171,  174, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Ходатайство ответчика об отложении рассмотрения дела оставить без удовлетворения. 

Иск ООО " УК Блэквуд " (ОГРН 

<

***>) к ООО " Вектор " (ОГРН 

<

***>)  об обязании подрядчика завершить работы по договору подряда от 01.09.2023 г. № 07УКБ/2023 в  срок до 01.05.2024 г. и о взыскании 552 780 руб. 47 коп. – неустойки удовлетворить в части требования о взыскании 552 780 руб. 47 коп. – неустойки.  

В остальной части иск оставить без удовлетворения с отнесением соответствующей части  расходов по уплате госпошлины на истца.  

Взыскать с ООО " Вектор " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " УК Блэквуд " (ОГРН  

<

***>) 552 780 руб. 47 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 14 056  руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный  срок со дня принятия.  

Судья О.В. Романов