Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-9315/2023

г. Хабаровск

20 сентября 2024 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи С.М. Курносовой,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Лунау И.А.,  

рассмотрев в заседании суда дело по иску федерального  государственного казенного учреждения «Тайга» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, адрес: 680012, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Градиент» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680011, 

<

...>, этаж 1, оф. 6)  

о понуждении совершить действия, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно  предмета спора: Управление Федерального агентства по государственным  резервам по Дальневосточному федеральному округу (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, адрес: 680000, 

<

...>),  общество с ограниченной ответственностью «Экспертный центр  «Надежность» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 400078,  

<

...>),   Прокуратура Хабаровского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  адрес: 680000, 

<

...>)  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Градиент»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок три месяца с даты  вступления в силу решения суда, привести объекты строительства в  

соответствие с условиями государственных контрактов, в том числе с учетом  дополнительных соглашений к ним:  

1. По государственному контракту № 100174778122100147 от  23.05.2022 произвести демонтаж верхнего слоя отсыпной площадки до  георешетки ФИО1 50/50-40 (500), провести устройство верхнего слоя,  состоящего из щебня.  

2. По государственному контракту от 22.06.2022 №  100174778122100191 устранить недостатки в выполненных работах  следующим образом:  

-на стенах произвести демонтаж выполненных обойных работ,  расчистку степ от шпаклевки, грунтование поверхности стен, шпатлевание  поверхности стен, оклейку стен обоями;  

-на потолках расчистить поверхности от покрасок, произвести грунтовку  поверхностей потолка, произвести окраску потолков;  

-на полах произвести демонтаж плинтусов из ПВХ, демонтаж  линолеума, демонтаж OSB плит, демонтаж листов оргалита, дефектовку  необходимости смены дощатых полов; монтаж фанеры (OSB плит), монтаж  линолеума «ТARKET FORCE», монтаж плинтусов из ПВХ;  

-произвести демонтаж дверных полотен и дверных коробок и очистку  остатков монтажной пены, монтаж дверных коробок и дверных полотен,  герметизация швов;  

-сантехнические работы: произвести монтаж креплений для  трубопроводов канализации диаметром 50 мм. и водоснабжения диаметром  25 мм., закрепить трубопроводы канализации и водоснабжения в  смонтированные крепления, демонтаж С-образного полотенцесушителя  размером 350x500 мм, монтаж М-образного полотенцесушителя с размером  500x600 мм, монтаж душевой лейки на смеситель ванны, демонтаж мойки из  нержавеющей стали без сливной доски на кухне, монтаж мойки из  нержавеющей стали со сливной доской на кухне, демонтаж и монтаж  унитаза-компакт, регулировка смывного бачка унитаза, замена резьбовых  фитингов и гибких подводок;  

- электромонтажные работы: демонтаж розеток без крышек, монтаж  розеток с крышками.  

3. По государственным контрактам № 100174778122100085 от  30.03.2022, № 100174778122100147 от 23.05.2022 предоставить комплект  исполнительной документации на выполненные работы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Градиент»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину по иску в размере 6 000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

 Судья С.М. Курносова