ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-94207/20-67-738

г. Москва

23 июля 2020 г.

Резолютивная часть решения оглашена 20 июля 2020 г.

Полный тест решения изготовлен 23 июля 2020 г.                                                                   

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарём с/з ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Монолит-Спб" (198095, 

<

...> литер И, ЭТ/ПОМ/ОФ 7/30-Н/705, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.04.2017, ИНН: 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Энергоэксперт" (450059, 

<

...>, офис Б, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.03.2014, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 26 628 826,68 руб. 

при участии: 

от истца: ФИО2 по дов-ти от 25.05.2020, адвокат. ФИО3 по дов. от 25.05.2020, диплом. 

от ответчика:  ФИО4 по дов. от 19.07.2019, диплом.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Монолит-Спб" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Энергоэксперт" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору от 29.01.2019 № ЭЭ-ГДУ-1 ДО/2019/М в размере 25 985 729 руб. 96 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2019 по 27.04.2020 в размере 643 096 руб. 72 коп.

Заявленные требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела, между ООО «Монолит-СПб» (Исполнитель, ИНН 

<

***>) и ООО «Энергоэксперт» (Субподрядчик, ИНН 

<

***>) заключен Договор № ЭЭ-ГДУ-1ДО/2019/М на выполнение работ по диагностическому обследованию объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2019 г. от 29.01.2019 г. (далее - Договор).

Вышеназванный договор, по правовым признакам, является договором подряда и регулируется нормами материального права, содержащимися в параграфе 1 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729).

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1.1. Договора, ООО «Энергоэксперт» поручает, а ООО «Монолит-СПб» обязуется выполнить собственными силами без привлечения сторонних организаций в установленный договором срок работы по диагностическому обследованию объектов добычи для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2019 году согласно Приложению № 1 к Договору, являющемуся неотъемлемой его частью, а ООО «Энергоэксперт» обязуется принимать работы и оплачивать их стоимость в соответствии с разделом 7 Договора.

ООО «Монолит-СПб» свои обязательства по Договору выполнило в полном объеме, что подтверждается Актами сдачи-приемки выполненных работ и счетами фактурами, направленными ООО «Монолит-СПб» в адрес ООО «Энергоэксперт» в соответствии с положениями п. 7.1. Договора, а также актом сверки взаимных расчетов за период 2019 г.

Так, ООО «Монолит-СПб» в адрес ООО «Энергоэксперт» были направлены следующие счета-фактуры и акты выполненных работ:

с/ф № 412, акт№ 1 от 31.05.2019 г. на сумму 7 014 736,73 руб.

с/ф № 1699, акт № 2 от 12.09.2019 г. на сумму 784 260,50 руб.

с/ф № 2268, акт № 3 от 30.09.2019 г. на сумму 65 132 024,65 руб.

с/ф № 2314, акт № 4 от 31.10.2019 г. на сумму 1 460 918,79 руб.

с/ф №2315, акт №5 от 31.10.2019 г. на сумму 1 473 181,34 руб.

с/ф № 2316, акт № 6 от 31.10.2019 г. на сумму 1 235 251,68 руб.

с/ф № 2317, акт № 7 от 31.10.2019 г. на сумму 1 544 071,20 руб.

с/ф № 2318, акт № 8 от 31.10.2019 г. на сумму 1 544 071,20 руб.

с/ф № 2319, акт№ 9 от 31.10.2019 г. на сумму 1 529 008,62 руб.

с/ф № 2320, акт№ 10 от 31.10.2019 г. на сумму 1 544 071,20 руб. 

с/ф № 2321, акт № 11 от 31.10.2019 г. на сумму 1 544 071,20 руб. 

с/ф № 2408 акт № 12 от 31.10.2019 г. на сумму 1 250 314,26 руб. 

с/ф № 2409, акт № 13 от 31.10.2019 г. на сумму 772 022,40 руб.

с/ф № 2410, акт№ 14 от 31.10.2019 г. на сумму 816 717,78 руб.

с/ф№2411,акт№ 15 от 31.10.2019 г. на сумму 1 702 912,70 руб. 

с/ф №2412, акт № 16 от 31.10.2019 г. на сумму 1 202 709,89 руб. 

с/ф № 2413, акт № 17 от 31.10.2019 г. на сумму 2 836 154,88 руб. 

с/ф № 2414, акт № 18 от 31.10.2019 г. на сумму 2 299 351,52 руб. 

с/ф № 2415, акт№ 19 от 31.10.2019 г. на сумму 680 320,26 руб. 

с/ф № 2416, акт № 20 от 31.10.2019 г. на сумму 666 188,38 руб. 

с/ф №2417, акт №21 от 31.10.2019 г. на сумму 1 092 792,20 руб. 

с/ф № 2418, акт № 22 от 31.10.2019 г. на сумму 2 152 037,60 руб. 

с/ф № 2479, акт № 23 от 30.11.2019 г. на сумму 1 725 539,67 руб. 

с/ф № 3002, акт № 24 от 31.12.2019 г. на сумму 1 915 022,79 руб. 

Итого на общую сумму 103 916 751,44 руб.

ООО «Энергоэксперт» выполненные работы были оплачены частично, в соответствии со следующими платежными поручениями:

№ 4937 от 12.09.2019 г. на сумму 7 798 997,23 руб.

№ 197 от 08.11.2019 г. на сумму 20 000 000,00 руб.

№ 436 от 10.12.2019 г. на сумму 45 132 024,25 руб.

№ 532 от 25.12.2019 г. на сумму 5 000 000,00 руб.

Итого на общую сумму 77 931 021,48 руб.

Таким образом, неоплаченный ООО «Энергоэксперт» остаток по Договору составляет 25 985 729,96 руб.

Согласно п. 7.2. Договора, оплата выполненных работ, согласно подписанным сторонами Актам сдачи-приемки выполненных работ, осуществляется ООО «Энергоэксперт» перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «Монолит-СПб» в течение 30 (тридцати) дней после получения средств от Подрядчика (ООО «Стройгазмонтаж») при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры, подтвержденных подписанными обеими сторонами Актами сдачи-приемки выполненных работ, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Акта сдачи-приемки при условии сдачи ООО «Энергоэксперт» результатов работ в порядке, предусмотренном Договором. Обязанность ООО «Энергоэксперт» по оплате выполненных ООО «Монолит-СПб» работ исполнена на момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка ООО «Монолит-СПб». Форма оплаты - безналичная.

Согласно п. 7.5. Договора, стороны ежеквартально, в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем окончания квартала, подписывают акт сверки взаимных расчетов по состоянию на последнее число квартала.

В соответствии с подписанным между ООО «Монолит-СПб» и ООО «Энергоэксперт» актом сверки за период 2019 г., ООО «Энергоэксперт» работы, выполненные ООО «Монолит-СПб», приняло в полном объеме в размере 103 916 751,44 руб., а также подтвердило наличие задолженности в размере 25 985 729,96 руб. перед ООО «Монолит-СПб».

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов.

В силу статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приема-передачи или иной приравненный к нему документ.

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам и неправильным применением норм материального права.

С учетом изложенного, истец доказал факт наличия у ответчика задолженности представленными в материалы дела доказательствами, требование о взыскании задолженности по договору от 29.01.2019 № ЭЭ-ГДУ-1 ДО/2019/М в размере 25 985 729 руб. 96 коп. признается судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2019 по 27.04.2020 в размере 643 096 руб. 72 коп.

В силу п. 10.1. Договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Учитывая то, что Договором не установлена ответственность ООО «Энергоэксперт» за нарушение сроков исполнения обязательства по оплате выполненных ООО «Монолит-СПб» работ, в рамках действующего законодательства ООО «Энергоэксперт» несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Согласно положениям пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Представленный истцом расчет подлежащих взысканию процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 643 096 руб. 72 коп., составленный исходя из действующей в период с 01.12.2019 по 27.04.2020 г. ключевой ставки Банка России, а также период их начисления и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

С учетом изложенного, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2019 по 27.04.2020 в размере 643 096 руб. 72 коп.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Энергоэксперт" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Монолит-Спб"   задолженность по договору от 29.01.2019 № ЭЭ-ГДУ-1 ДО/2019/М в размере 25 985 729 (двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать девять) руб. 96 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2019 по 27.04.2020 в размере 643 096 (шестьсот сорок три тысячи девяносто шесть) руб. 72 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 156 144 (сто пятьдесят шесть тысяч сто сорок четыре) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:                                                                                                              В.Г. Джиоев