29/2017-150160(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 04 июля 2017 года 

по делу А33-8400/2017 Красноярск 

04 июля 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Внести изменения в заключенный обществом с ограниченной ответственностью  «Промстрой» и краевым государственным казенным учреждением «Управление  капитального строительства» государственный контракт от 23.02.2017 № 14-09- 17/Ф.2017.8770, изложив пункты 2.1 и 14.4 в следующей редакции:  

«2.1. Течение срока выполнения работ начинается на следующий день после даты  заключения контракта. Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения  контракта, до 31.12.2017г.  

Дата начала выполнения работ: 24.01.2017г. Дата окончания выполнения работ: 31.12.2017г.», 

«14.4. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и  действует до 31.12.2017г. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от  исполнения своих обязательств по контракту.».  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья М.В. Лапина