АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, 

<

...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Именем Российс кой Федерации

30 марта 2026 года Дело № А33-2634/2026

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении ходатайства ответчика о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Частично удовлетворить исковые требования.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) исполнить обязательства по осуществлению технологического присоединения по договору технологического присоединения № 20.2400.8196.25 от 24.07.2025 в соответствии с техническими условиями к данному договору № 8000674701 в течение двух месяцев с даты принятия настоящего решения:

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87, и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

- строительство ЛЭП-6(10) кВ от точки, указанной в пункте № 7 технических условий № 8000674701, до проектируемой ТП 6(10) кВ (п. 10.2.3.). Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом.

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 6 (10) кВ. Тип и место установки разъединителя определить проектом.

- строительство ТП 6(10) кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от проектируемой ТП 6(10) кВ (п. 10.2.3.) до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, Код доступа к материалам дела -

2 А33-2634/2026

установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

- направить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям способом, позволяющим установить, что уведомление подписано уполномоченным лицом и исходит от сетевой организации, с размещением данного уведомления в личном кабинете ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) на портале электросетевых услуг.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый календарный день в случае просрочки исполнения судебного решения по настоящему делу, неустойку по договору № 20.2400.8196.25 от 24.07.2025 в размере 676,75 руб. за период с 27.01.2026 по 30.01.2026 с последующим начислением неустойки по день фактического исполнения обязательств в размере 169,18 руб. за каждый календарный день просрочки, а также судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 21 667 руб.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или

3 А33-2634/2026

вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья В.В. Белов