АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru

E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-3353/2020

09 февраля 2021 года

город  Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 02 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 09 февраля 2021 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гаврилюк М.П., при ведении протокола судебного заседания и его аудиозаписи секретарём судебного заседания В.А. Синча,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

Администрации Красногвардейского района Республики Крым (ОГРН 

<

***>)                       к  обществу с ограниченной ответственностью «Таврида-М» (ОГРН 

<

***>)

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - обществу с ограниченной ответственностью «Фенстер»  (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 22 144 972,41 руб.,

при участии:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности № б/н от 30.10.2020, личность установлена паспортом гражданина РФ;

ответчик не явился, извещен надлежаще.

установил:

Администрация Красногвардейского района Республики Крым обратилась в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Таврида-М», согласно которого просит взыскать сумму штрафных санкций в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом № Ф.2018.478184 от 08.10.2018 г. в размере                                     22 144 972, 41 руб.

Исковые требования мотивированы тем, что подрядчиком при исполнении строительно-монтажных работ было допущено ряд нарушений условий их исполнения установленных положениями контракта.

Общество с ограниченной ответственностью «Таврида-М» исковые требования не признало, считает что нарушения не имеют стоимостного выражения, в связи с чем ходатайствовало о снижении неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ.

Третье лицо представило письменное пояснение, указав, что истцом не представлено доказательств подтверждающие, что последствия неисполнения обязательств принесло ему какие-либо убытки.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Судом установлено, что  08.10.2018 г. между Администрацией Красногвардейского района и обществом с ограниченной ответственностью «Таврида-М» был заключен муниципальный контракт № Ф.2018.478184 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт (замена оконных блоков) в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым».

Согласно пункта 1.1 контракта заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт  (замена оконных блоков) в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Красногвардейского района Республики Крым» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3), а также в соответствии с объемами, указанными в проектно-сметной документации, в срок, установленный пунктом 4.1 настоящего контракта, Графиком производства работ (Приложение № 1), по цене в соответствии со Сводной сметой стоимости строительства (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Объем выполняемых работ: в соответствии с проектно-сметной документацией (пункт 1.2 контракта).

Пунктом 2.1 контракта предусмотрено, что цена контракта устанавливается на основании результатов электронного аукциона в соответствии со Сводной сметой стоимости строительства (Приложение № 2 к Контракту) и составляет 67 105 976,74 руб. без НДС.

Расчет цены контракта приведен в Сводной смете стоимости строительства (Приложение № 2 к Контракту). В случае снижения начальной (максимальной) цены Контракта в ходе закупки к указанной сводной смете стоимости строительства применяется коэффициент снижения стоимости работ, составляющий 0,924, который определяется после подведения итогов закупки как отношение цены контракта, предложенной подрядчиком к начальной (максимальной) цене контракта (пункт 2.1.1 контракта).

Пунктом 3.9 контракта предусмотрено, что Формы КС-2, КС-3 подписываются только после подписания актов освидетельствования скрытых работ.

Согласно пункта 4.1 контракта работы, предусмотренные контрактом, выполняются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к настоящему контракту), при этом, началом выполнения работ является момент заключения контракта, а окончанием – 13.12.2018г..

Работы считаются завершенными с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (пункт 4.2 контракта).

Объем работ но контракту должен быть исполнен в соответствии с Графиком производства работ и в пределах лимитов бюджетных обязательств (пункт 4.3 контракта).

Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (пункт 16.1 контракта).

Настоящий контракт действует до 31.12.2018 года. Отношения но настоящему контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств (пункт 16.2 контракта).

Как указывает истец, подрядчиком были нарушены взятые на себя обязательства по муниципальному контракту №0.2018.4781848 от 08 октября 2018 года и протокольным решениям заседаний Координационного штаба по контролю за ремонтами, капитальными ремонтами и строительству на территории Красногвардейского района Республики Крым, рабочих и выездных совещаний по вопросу выполнения работ по объекту «Капитальный ремонт (замена оконных блоков) в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Красногвардейского района Республики Крым».

На основании п. 5.1.2. Контракта, в порядке осуществления строительного контроля, рассматривать образцы строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее, «товары»), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие Российским стандартам, (паспорта на поставленные товары, накладные от поставщиков, сертификаты соответствия, Технические свидетельства о разрешении применения их в строительстве на территории РФ, пожарные сертификаты и прочее) с оригинальной печатью производителя или лица, заявителя подтверждающего документа, в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со следующего дня после получения от Подрядчика этих образцов.

В соответствии с п. 5.4.1. Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания контракта, разработать и предоставить заказчику График производства работ. Подписанный сторонами График производства работ оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

В соответствии с п. 5.4.3. Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней, после дня подписания Контракта, предоставить Заказчику:

а)  Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте.

б)  Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте.

в)  Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на

объекте.

г)  Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на объекте.

д)  Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и механизмами на объекте.

е)  Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на объекте.

ж) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.

В соответствии с п. 5.4.4. Контракта, провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целы-о обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте, всех работников подрядчика также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке;

В соответствии с п. 5.4.5. Контракта, для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой, спецобувью, защитными касками, защитными очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.

В соответствии с п. 5.4.6. Контракта, обеспечить в ходе строительства за свой счет необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д. 

В соответствии с п. 5.4.7. Контракта, не позднее 3-х (трех) рабочих дней со дня заключения договора субподряда уведомить Заказчика о заключении договора с указанием реквизитов Субподрядчика и объемов Работ, передаваемых Подрядчиком субподрядным организациям, разрешительные документы субподрядной организации на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Субподрядной организации и другие необходимые документы, относящиеся к Работам, передаваемым Субподрядчику.

Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения Работ, переданных для выполнения субподрядным организациям.

В соответствии с п. 5.4.8. Контракта, предоставить Заказчику, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по настоящему Контракту. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.

В соответствии с п. 5.4.11. Контракта, исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от рабочей документации и условий настоящего Контракта.

В соответствии с п. 5.4.13. Контракта, обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с документацией, техническими регламентами, СНиПами, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.

В соответствии с п. 5.4.14. Контракта, поставить на строительную площадку все предусмотренные проектной документацией и Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Так же осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

В соответствии с п. 5.4.15. Контракта, организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

В соответствии с п. 5.4.16. Контракта, по требованию заказчика, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и технических свидетельств являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.

В соответствии с п. 5.4.17. Контракта, вести журнал учета выполненных Работ, журнал производства Работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые Работы.

Постоянно вести Журнал учета выполненных работ. Общий Журнал производства работ, специальные Журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Все Журналы учета выполненных работ представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.

В соответствии с п. 5.4.21. Контракта, известить заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения заказчика и авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями заказчика и строительного контроля (технического надзора), затем восстановить ее за свой счет. При этом заказчик не несет ответственности за нарушение сроков строительства объекта.

В соответствии с п. 5.4.23. Контракта, осуществлять в процессе выполнения Работ систематическую, я по завершению Работ, окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора.

В соответствии с п. 5.4.29. Контракта, в срок не более 5-ти (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а)     декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б)         копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, Подрядчиком.

В соответствии с п. 5.5.2. Контракта, Подрядчик не вправе приступать к общестроительным работам до проекта организации строительства, безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу строительства.

В соответствии с п. 5.5.4. Контракта, Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в проектной документации.

В соответствии с п. 5.5.5. Контракта, Подрядчик не вправе поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектно-сметной документации.

В соответствии с п. 13.3. Контракта, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с заказчика штраф в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

Размер штрафа устанавливается в размере 10 000,00 рублей.

В соответствии с п. 13.6. Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения                                                                     поставщиком          (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

Размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, что составляет 671 059,77 рублей. 

В соответствии с п. 13.7. Контракта, за каждый факт неисполнения или не надлежащее исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

Размер штрафа устанавливается в размере 10 000,00 руб.

В соответствии с п. 13.8. Контракта, за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

Размер штрафа устанавливается в размере 503 294,83 руб.

В соответствии с п. 13.9. Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

Размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, что составляет 671 059,77 руб.

Вышеизложенные обстоятельства, а также образовавшаяся задолженность по уплате штрафа в размере  22 144 972, 41 руб. послужили основанием для обращения с настоящим исковым заявлением в суд.

Порядок заключения и исполнения муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд урегулирован Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По государственному и муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 740 ГК РФ предусмотрено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, предусмотренной законом или договором неустойкой.

По смыслу статьи 330 ГК РФ по основаниям возникновения неустойка подразделяется на законную (нормативную) и договорную (добровольную).

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В статье 332 ГК РФ определено, что кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Кроме того, предусмотрено право сторон на увеличение ее размера.

Согласно пункту 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Суд считает подлежащим удовлетворению требования истца в части, так как нарушение пунктов 5.1.2, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.11, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.15, 5.4.16, 5.4.17, 5.4.21, 5.4.23, 5.4.29, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, подтверждается, в том числе перепиской между сторонами и не опровергается ответчиком и третьим лицом.

Однако, суд считает доводы ответчика о применении пункта 13.7 в качестве применения ответственности за допущенные нарушения, правомерными, так как все указанные истцом нарушения не имеют стоимостного выражения, в связи с чем сумма штрафа за нарушение составит 10 000,00 руб., а за 33 нарушения - 330 000,00 руб.

На основании изложенного, требования истца подлежат удовлетворению в части, а именно в размере 330 000,00 руб.

В свою очередь, ответчиком, в порядке статьи 333 ГК РФ, было заявлено ходатайство об уменьшении размера неустойки до 330 000,00 руб. 

Суд считает, что заявление удовлетворению не подлежит ввиду следующего:

В соответствии с пунктом 77 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды, не предъявление кредитором в течение длительного времени после наступления срока исполнения обязательства требования о взыскании основного долга само по себе не может расцениваться как содействие увеличению размера неустойки.

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства, в том числе, вследствие тяжелого финансового положения сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки. При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования.

Аналогичная позиция изложена в пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», что при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться этими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать имущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно.

В Информационном письме Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 N 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" содержаться выводы судов о том, что основанием для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др.

Доказательства, подтверждающие явную несоразмерность неустойки следствиям нарушения обязательств, представляются лицом, заявившим ходатайство об уменьшении неустойки.

Для того чтобы применить указанную статью, арбитражный суд должен располагать данными, позволяющими установить явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (о сумме основного долга, о возможном размере убытков, об установленном в договоре размере неустойки и начисленной общей сумме, о сроке, в течение которого не исполнялось обязательство, и др.).

Так как исковые требования подлежат удовлетворению в размере 330 000,00 руб., то оснований для снижения неустойки до этой же суммы не имеется. 

Согласно ч. 3 ст. 110 АПК РФ, государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Таврида-М» в пользу Администрации Красногвардейского района Республики Крым штраф в размере 330 000,00 руб.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Таврида-М» в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 1993,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.                                                                     

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                            М.П. Гаврилюк