АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-196236/22-134-1095

г. Москва

16 октября 2024 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Титовой Е. В., при ведении протокола помощником судьи Адыг У. Г., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению: 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПФО ГРУПП» (105122,  

<

...>, Э 23 ПОМ I К 7 ОФ 2327,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.05.2016, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТ  ИНВЕСТ СТРОЙ» (195027, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПРОСПЕКТ ШАУМЯНА, 4,  КОРП.1 ЛИТ.А, ПОМ.1Н, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2008,  ИНН: 

<

***>)  

о признании договора № О-249/10/2020 от 12 октября 2020 года расторгнутым, о  взыскании суммы неотработанного аванса в размере 22 123 010 руб. 40 коп., неустойки,  начисляемой в соответствии с п. 8. 2 договора за нарушение срока выполнения работ по  соглашению № 1 к договору в размере 6 998 786 руб. 02 коп., штрафа, начисляемой в  соответствии с п. 8.16 договора за необоснованный отказ от производства работ по  соглашению № 1 к договору и расторжение договора по основаниям согласно п. 10.1  договора в размере 2 509 321 руб. 30 коп., неустойки, начисляемой в соответствии с п.  8.2. договора за нарушение срока выполнения работ по соглашению № 2 к договору в  размере 82 200 руб. 00 коп., штрафа, начисляемой в соответствии с п. 8.16 договора за  необоснованный отказ от производства работ по соглашению № 2 к договору и  расторжение договора по основаниям согласно п. 10.1 договора в размере 30 000 руб.  00 коп., неустойки, начисляемой в соответствии с п. 8.2. договора за нарушение срока  выполнения работ по соглашению № 3 к договору в размере 319 980 руб. 60 коп.,  штрафа, начисляемой в соответствии с п. 8.16 договора за необоснованный отказ от  производства работ по соглашению № 3 к договору и расторжение договора по  основаниям согласно п. 10.1 договора в размере 122 130 руб. 00 коп., неустойки,  начисляемой в соответствии с п. 8.2. договора за нарушение срока выполнения работ по  соглашению № 4 к договору в размере 235 400 руб. 00 коп., штрафа, начисляемой в  соответствии с п. 8.16 договора за необоснованный отказ от производства работ по  соглашению № 4 к договору и расторжение договора по основаниям согласно п. 10.1  договора в размере 16 008 руб. 90 коп., неустойки, начисляемой в соответствии с п. 8.2.  

договора за нарушение срока выполнения работ по соглашению № 5 к договору в  размере 307 700 руб. 00 коп., штрафа, начисляемой в соответствии с п. 8.16 договора за  необоснованный отказ от производства работ по соглашению № 5 к договору и  расторжение договора по основаниям согласно п. 10.1 договора в размере 58 880 руб.  40 коп., с учетом уточнений, принятых в порядке ст. 49 АПК РФ.  

По встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Балт Инвест Строй»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к Обществу с ограниченной  ответственностью «ПФО Групп» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о  взыскании стоимости неоплаченных работ по договору подряда № О-249/10/2020 от 12  октября 2020 года в общем размере 3 406 346 руб.  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1, (паспорт, доверенность № О-5/2024/1 от 09 января 2024 года,  диплом);  

от ответчика: ФИО2, (паспорт, доверенность № б/н от 01 сентября 2023  года, диплом);  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Балт Инвест Строй»  (ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ПФО  Групп» (ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 7 944 066 руб. 62 коп., а также расходы  по оплате государственной пошлины в размере 32 910 руб. 83 коп.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. Встречные исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПФО Групп» (ИНН:  

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Балт Инвест  Строй» (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 3 406 346 руб. 00 коп., а также  расходы по оплате государственной пошлины в размере 40 032 руб. 00 коп.  

Произвести зачет встречных требований. 

С учетом зачета, Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Балт  Инвест Строй» (ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «ПФО Групп» (ИНН: 

<

***>) денежные средства в размере  4 537 720 руб. 62 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПФО Групп» (ИНН:  

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Балт Инвест  Строй» (ИНН: 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере  7 121 руб. 17 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПФО Групп» (ИНН:  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  51 078 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья: Е.В. Титова