Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

город Пермь 

12.08.2022 года Дело № А50-21567/20

Резолютивная часть решения объявлена 10.08.2022 года. 

Полный текст решения изготовлен 12.08.2022 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Катаевой-Гатиатуллиной Л.Р., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИЙ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И ГАЗА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к муниципальному казенному учреждению "СЛУЖБА БЛАГОУСТРОЙСТВА Г.БЕРЕЗНИКИ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,) 

Администрации города Березники (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения контракта, о взыскании задолженности в размере 2 031 802 руб. 21 коп.,

при участии в судебном заседании: 

от истца: не явились, извещены,

от ответчика 1: ФИО1, паспорт, доверенность, ФИО2, паспорт, доверенность,

от ответчика 2: не явились, извещены,

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИЙ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И ГАЗА" (далее – Истец, подрядчик) обратилось в арбитражный суд с иском к муниципальному казенному учреждению "СЛУЖБА БЛАГОУСТРОЙСТВА Г.БЕРЕЗНИКИ" (далее – Ответчик 1, Заказчик) и Администрации города Березники (далее – Ответчик 2) о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения контракта, о взыскании задолженности в размере 2 031 802 руб. 21 коп.

Определением суда от 11.12.2020 в рамках настоящего дела назначена строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено ООО «Центр экспертизы строительства» экспертам ФИО3 и ФИО4.

17.03.2022 года в Арбитражный суд Пермского края поступило заключение эксперта  по делу №А50-21567/2020.

Протокольным определением от 12.05.2022 г. производство по делу возобновлено.

Истцом представлена Рецензия на Заключение экспертизы.

14.06.2022 г. в материалы дела поступили письменные пояснения экспертов на Рецензию.  Письменные ответы экспертов на вопросы сторон приобщены к материалам дела в порядке ст. 159 АПК РФ.

        Истец в судебное заседание не явился, извещен.

        Ответчик с исковыми требованиями не согласен, полагает, что исковые требования не подлежат удовлетворению, поскольку фактически выполненные работы имеют существенные и неустранимые недостатки, проектная документация не имеет потребительской ценности, что также нашло свое отражение в Заключении судебных экспертов.

Исследовав материалы дела, заслушав представителя ответчика, суд установил.

Как следует из материалов дела, между ООО «Транснефтегазпроект» (Подрядчик) и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» (Заказчик) 24 октября 2017 года, на основе положений Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной систем, Закон № 44-ФЗ), был заключен Контракт № 0156300046617000303 (далее - Контракт).

В соответствии с п. 1.1 Контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. Циренщикова (далее – проектная документация) и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить в соответствии с условиями настоящего контракта.

Результатом работ является проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы и рабочая документация, согласованная в установленном порядке с эксплуатирующими организациями по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по

ул. Циренщикова» (п. 1.2 Контракта)

Цена настоящего Контракта составляет 2 031 802 руб. 21 коп.  (за 1 этап составляет 1 132 405 руб. 79 коп.; за 2 этап составляет 899 396 руб. 42 коп.

Работы выполнить в два этапа в течение 275 календарных дней с даты заключения контракта 1 этап - в течение 230 календарных дней с даты заключения контракта разработать проектную документацию, согласовать ее в установленном порядке с эксплуатирующими организациями и получить положительное заключение государственной экспертизы;

2 этап – в течение 45 календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу, разработать рабочую документацию.

Инженерные изыскания и проектно-сметная документация (1 этап) были выполнены в полном объеме и в срок направлены Заказчику по накладной № 32 от 10.05.2018года, проектная и рабочая документация направлена по накладной №25 от 18.05.2020 года в бумажном виде, по накладной № 27 от 20.05.2020 года в электронном виде.

После направления документации Подрядчик продолжил согласование проектных решений в эксплуатирующих организациях, были получены все согласования, кроме согласования АО «Березниковская сетевая компания», которое без решения Заказчика не могло быть получено. Данные обстоятельства подтверждаются письмами № 212 от года, № 1175 от 20.09.2019 года, № 1176 от 20.09.2019 года, 1206 от 10.10.2019 года, № 1233 от 15.10.2019 года, № 1299 от 17.10.2019 года, № 26 от 30.01.2020 года, № 37 от года, № 77 от 19.03.2020 года, № 127 от 16.04.2020 года, № 165 от 15.05.2020 года.

 По мнению Истца Заказчик от совершения действий, направленных на решение вопроса о согласовании проектной документации уклонился, в согласованиях не участвовал.

Так, Письмом № 1345 от 05.12.2019 года, № 1361 от 13.12.2019 года АО «Березниковская сетевая компания» потребовала письма о направлении документации на согласование направлять через Заказчика, тем самым требуя от Заказчика принять решение о предварительном согласовании реконструкции тепловых сетей.

Заказчик от совершения действий по передаче документации в АО «Березниковская сетевая компания» либо уклонялся, либо передавал их с существенной задержкой.

Письмом № 1258 от 22.11.2018 года Заказчик принял решение не передавать проектную документацию, предусмотренную Контрактом на государственную экспертизу в связи с отсутствием необходимости в ее проведении, о чем уведомил Подрядчика. Кроме того, Заказчик указанным письмом уведомил Подрядчика о самостоятельной передаче документации на экспертизу достоверности сметной стоимости, однако от ее передачи в дальнейшем уклонился.

18 мая 2020 года Подрядчиком повторно направлен Заказчику полный комплект результатов инженерных изысканий, проектно-сметной и рабочей документации, предусмотренной Контрактом, а также акты сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры.

Истец полагает, что Заказчик уклонился от подписания актов выполненных работ, при этом мотивированный отказ от приемки работ с перечнем недостатков и сроком их устранения Подрядчику не направил.

12.05.2020 года Заказчиком принято Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, соответствующее уведомление размещено в ЕИС, направлено Подрядчику посредством почтовой связи, по электронной почте.

В обоснование принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик указал на то, что Подрядчик проектную документацию в полном объеме не разработал, замечания Заказчика в части разработанной проектной документации не устранил, в установленном порядке не согласовал проектную документацию с эксплуатирующими организациями, в связи с чем отсутствует возможность направления проектной документации на государственную экспертизу. Рабочая документация не разработана, результат работ в составе и объеме, установленном пунктами 3.3.2., 3.3.3., 3.7.2 Контракта, Заказчику не передан.

Заказчик от отмены Решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта отказался, в связи с чем Подрядчик 17.06.2020 года направил в адрес Заказчика претензию, в которой просил принять работы по актам сдачи-приемки и произвести оплату выполненных работ в размере 2 031 802 руб. 21 коп.

Данная претензия оставлена Заказчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с иском.

Возражая по доводам Истца Ответчик ссылается на тот факт, что по состоянию на 25.03.2019 г. работы в установленномКонтрактом порядке и объеме ООО «Транснефтегазпроект» не выполнены, результат работ МКУ «СБ» не передан, вина Заказчика в нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ не установлена.

Истцу письмом от 16.04.2020 № 492 указано, что в нарушение условий контракта им не решается вопрос о согласовании проектных решений с сетевыми организациями - АО «БСК», АО «Газпром газораспределение Пермь». Ответ на письмо в адрес МКУ «СБ» не поступил.

В связи с этим, а так же учитывая, что на 12.05.2020 г. работы по контракту истцом не завершены, разработанная проектная документация с эксплуатирующими организациями не согласована, заказчику в установленном порядке не передана, не разработана и не передана рабочая документация, срок выполнения работ по контракту нарушен более чем на 1 год и 9 месяцев, т.е. более чем в два раза, МКУ «СБ» принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Кроме того, исходя из результатов проведенной судебной экспертизы результаты выполненных работ не имеют ценности для Ответчика, следовательно, оплате не подлежат.  Просит в иске отказать.

Исследовав изложенные обстоятельства дела, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд полагает, что требования Истца не подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).

Отношения сторон регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде и нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе).

В соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

По смыслу ст. 768 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации, в части, не урегулированной им - закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со ст.ст.758, 760 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, согласовать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, и передать готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ заказчику. 

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Выполнение работ ненадлежащего качества влечет для подрядчика последствия, предусмотренные ст.723, ст.761 ГК РФ, в частности, право заказчика отказаться от исполнения договора в случае, если обнаруженные недостатки не были устранены или являются существенными и неустранимыми (ч.3 ст.723 ГК РФ). 

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Из материалов дела следует, что акты о приемке выполненных работ не подписаны со стороны ответчика.

Пунктом 6 ст. 753 ГК РФ предусмотрено, что заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

По смыслу указанных норм обязанность доказывания обоснованности мотивов отказа от подписания актов о приемке выполненных работ возложена на заказчика, а суд должен проверить обоснованность мотива отказа заказчика от подписания акта.

При оценке мотивов отказа от подписания актов выполненных работ суд исходит из следующего.

Обоснованными мотивами для отказа от подписания акта могут быть: отрицательные результаты испытаний при приемке; нарушение процедуры приемки работ, предусмотренной договором или установленной нормативно-правовыми актами для отдельных объектов строительства; обнаружение недостатков, которые исключают возможность использования объекта строительства для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком и др. (существенные недостатки).

Ввиду наличия возражений ответчика относительно объема и качества выполнения работ, по  ходатайству сторон была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой было поручено ООО «Центр экспертизы строительства» эксперту ФИО3 и ФИО4

Перед экспертами поставлены следующие вопросы:

1. Определить объем и стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту от 24.10.217 № 0156300046617000303?

2. Имеются ли недостатки в выполненных работах, определить их характер (устранимые/неустранимые, существенные/несущественные)?

17.03.2022 года в Арбитражный суд Пермского края поступило заключение эксперта  по делу №А50-21567/2020.

По результатам проведенной судебной экспертизы эксперты пришли к выводам:

По первому вопросу: стоимость фактически выполненных работ по Контракту составляет 1 095 700,49 руб.

По второму вопросу: В выполненных работ по Контракту от 24.10.2017 г. имеются недостатки (Перечень недостатков приведен в Таблице №22). В совокупности недостатки работ являются существенными, неустранимыми (устранение экономически нецелесообразно).

Протокольным определением от 12.05.2022 г. производство по делу возобновлено.

Не согласившись с выводами экспертов Истцом представлена Рецензия (Заключение специалиста №074.04-22/СТ/Рец). Заявлено ходатайство о проведении повторной экспертизы.

       14.06.2022 г. в материалы дела поступили письменные пояснения экспертов на Рецензию (л.д.111-137 т.3).  Письменные ответы экспертов на вопросы сторон приобщены к материалам дела в порядке ст. 159 АПК РФ.

Возражая против удовлетворения первоначальных требований, ответчик, указал, что обязанность по оплате работ у заказчика не наступила, поскольку результат работ им не принят в связи с выполнением работ по договору не в полном объеме, с ненадлежащим качеством. Данные выводы также подтверждены экспертным заключением.

При этом также следует отметить, что даже заключение эксперта, являясь одним из предусмотренных ст. 64 АПК РФ доказательств, не имеет заранее установленной силы и исследуется судом наряду с другими доказательствами по делу (ч. 5 ст. 71, ч. 3 ст. 86 АПК РФ).

       Экспертом сделаны выводы о том, что объем фактически выполненных работ не соответствует объему работ в соответствии с Контрактом; стоимость фактически выполненных Обществом работ составляет 1 095 700,49 руб.; результат работ имеет существенные и неустранимые недостатки (устранение дефектов экономически не целесообразно).

В силу ч. 2 ст. 86 АПК РФ в заключении эксперта должны быть отражены, в частности, содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их обоснование; иные сведения в соответствии с федеральным законом.

В выводах экспертного заключения содержатся ответы на все поставленные судом вопросы, противоречия в выводах экспертов отсутствуют. На все вопросы, поставленные перед экспертом по итогам проведения экспертизы, экспертом даны письменные ответы. Ответы являются ясными, полными, непротиворечивыми и основаны на материалах дела. Надлежащих доказательств, опровергающих вышеуказанные выводы экспертизы, суду не представлены.  Каких-либо доказательств, влекущих вывод о пристрастности данной экспертной организации, суду не представлено. При изложенных обстоятельствах, оснований полагать экспертное заключение  недопустимым доказательством у суда не имеется.

Суд, проанализировав экспертное заключение, признает его ясным и полным. Противоречивых выводов заключение не содержит, оформлено в соответствии с требованиями ст. 82, 83, 87 АПК РФ, содержит предусмотренные ч. 2 ст. 86 АПК РФ сведения, в связи с чем указанное заключение в силу ст. 64, 67 и 68 АПК РФ принимается в качестве надлежащего доказательства по делу.

Частью 1 ст. 65 АПК РФ предусмотрена обязанность каждого лица, участвующего в деле, доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Сведения, содержащиеся в экспертном заключении, истцом документально не опровергнуты. Судом не установлено сомнений в обоснованности выводов эксперта в отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих о том, что оспариваемое заключение содержит недостоверные выводы, а также доказательств того, что выбранные экспертом способы и методы исследования привели к неправильным выводам (ст. 65 АПК РФ).

Вопреки позиции истца, представленное данной стороной в опровержение доводов ответчика, Заключение специалиста АНО «Центр развития экспертиз «Лаборатория экспертных исследований» ФИО5 (л. д. 99-100 т. 2), не опровергает выводов, к которым пришли эксперты ФИО3 и ФИО4, в заключении которых содержится подробное описание проведенного исследования с применением соответствующих надлежащих методик и инструментария.

Оснований не доверять заключению вышеназванных экспертов, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного экспертного заключения, не имеется.

Представленная истцом рецензия (Заключение) не является тем доказательством, которое опровергает достоверность заключения эксперта, полученного в рамках установленной процессуальным законодательством процедуры назначения судебной экспертизы, включающей, в том числе, и выбор специалистов для проведения экспертизы.  

Кроме того, следует учитывать, что Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и арбитражное процессуальное законодательство не предусматривает возможности оспаривания заключения эксперта рецензией другого экспертного учреждения.

Квалификация экспертов, требуемая для осуществления экспертиз, подтверждается материалами дела. Документы, опровергающие должную квалификацию экспертов в материалы дела не представлены. Эксперты  предупреждены о мерах ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Таким образом, оснований для назначения по делу повторной экспертизы у суда не имеется.

Как указывалось ранее, доказательств принятия спорных работ ответчиком истец не представил (ст. 65 АПК РФ). 

Выполнение работ ненадлежащего качества влечет для подрядчика последствия, предусмотренные ст.723, ст.761 ГК РФ, в частности, право заказчика отказаться от исполнения договора в случае, если обнаруженные недостатки не были устранены или являются существенными и неустранимыми (ч.3 ст.723 ГК РФ). 

Суд также обращает внимание, что в  п. 12, 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» разъяснено, что заказчик не лишен права представить суду свои возражения по качеству работ, принятых им по двустороннему акту, а наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по объему, стоимости работ и качеству их выполнения.

При этом следует отметить, что такие возражения в силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ должны носить конкретный характер и подтверждаться надлежащими доказательствами.

В п. 1 ст. 721 ГК РФ установлено, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Как следует из условий договора, Подрядчик выполняет работы согласно в соответствий с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту) с соблюдением действующих нормативных документов в РФ, Пермском крае, г. Березники.

Согласно п. 1 ст. 722 указанного Кодекса в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Как следует из материалов дела, акт о приемке выполненных работ  заказчиком не подписан, иных доказательств принятия ответчиком работ, выполненных истцом, не имеется.

При этом не может быть признана обоснованной ссылка истца на то, что работы считаются принятыми  по накладной № 32 от 10.05.2018года, (проектная и рабочая документация) по накладной №25 от 18.05.2020 года в бумажном виде, по накладной № 27 от 20.05.2020 года в электронном виде.

Напротив, решением суда по делу №А50-10987/19 установлено, что на 25.03.2019г. работы в установленном Контрактом порядке и объеме ООО «Транснефтегазпроект» не выполнены, результат работМКУ «СБ» не передан, вина Заказчика в нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ не установлена. Истцу письмом от 16.04.2020 № 492 указано, что в нарушение условий контракта им не решается вопрос о согласовании проектных решений с сетевыми организациями - АО «БСК», АО «Газпром газораспределение Пермь». Ответ на письмо в адрес МКУ «СБ» не поступил. Учитывая что на 12.05.2020 г. работы по контракту истцом не завершены, разработанная проектная документация с эксплуатирующими организациями не согласована, заказчику в установленном порядке не передана, не разработана и не передана рабочая документация, срок выполнения работ по контракту нарушен более чем на 1 год и 9 месяцев, т.е. более чем в два раза, МКУ «СБ» принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что качество и объем фактически выполненных работ по  разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. Циренщикова  на сумму 1 095,70,49 руб., не соответствуют условиям договора и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническими актами.

По факту работы выполнены не в полном объеме и некачественно. Указанные дефекты, отраженные в Заключении эксперта, являются существенными, поскольку, как следует из экспертного устранение экономически нецелесообразно.

Экономическая нецелесообразность ремонта может свидетельствовать о наличии в выполненных работах существенного недостатка, а именно недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен без несоразмерных расходов, - недостаток, расходы на устранение которого приближены к стоимости или превышают стоимость самого товара (работы, услуги) либо выгоду, которая могла бы быть получена потребителем от его использования.

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в дело доказательства, в том числе пояснения сторон, данных в судебном заседании, возражения ответчика суд приходит к выводу об отсутствии у Заказчика оснований для оплаты. 

Согласно ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Пунктом 10.4 контракта предусмотрено право заказчика в одностороннем порядке отказаться от его исполнения в случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ по контракту в случаях существенного нарушения условий контракта:

- Задержка Подрядчиком начала работ более чем на 3 дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

- Нарушение Подрядчиком условий настоящего Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных условиями Контракта и действующими нормативными актами;

-Невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств по настоящему контракту;

- В случае исключения Подрядчика из саморегулируемой организации, членом которой он является.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела усматривается, что общий срок выполнения работ по Контракту составляет 275 календарных дней с даты заключения контракта, т.е. с 25.10.2017 г. по 26.07.2018 г. включительно.

При этом, по условиям контракта подрядчик не имеет права приступать к работам 2-го этапа - разработке рабочей документации, без надлежащей сдачи Заказчику результата работ 1-го этапа - проектной документации, согласованной с эксплуатирующими организациями и получившей положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости, так как исходными данными для выполнения работ 2-го этапа является результат работ 1-го этапа.

Доказательством надлежащего выполнения работ 1-го этапа является Акт сдачи-приемки выполненных работ 1 этапа, который до настоящего времени сторонами не подписан, т.к. пунктом 3.5. Контракта установлено, что Заказчик не принимает и не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ 1 этапа до полного устранения Подрядчиком замечаний, получения положительного заключения государственной экспертизы и проверки соответствия проектной документации на бумажном и электронном носителе.

Между тем в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие выполнение подрядчиком работ в указанный срок.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

С учетом вышеизложенного суд полагает, что заказчиком правомерно принято решение об отказе от исполнения контракта. 

После принятия указанного решения у ответчика прекратилась обязанность по приемке работ.

Поскольку судом установлен факт наличия недостатков в выполненных работах, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели, мотивы отказа ответчика от приема и оплаты обоснованы, равно, как, и обоснованным признается односторонний отказ ответчика от договора подряда, следовательно, обязанность по оплате данных работ у заказчика не возникла.

С учетом изложенного, суд отказывает в удовлетворении иска в полном объеме.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Е.Ю. Дрондина