АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Октябрьский проспект, дом 19, город Владимир, 600005 

тел. (4922) 47-23-41, факс (4922) 47-23-98 

http://www.vladimir.arbitr.ru; http://www.my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А11-6390/2023

23 января 2024 года

город Владимир

 

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Бондаревой -  Битяй Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Квартал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  адрес: 600021, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Стройкомплекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес:  600009, 

<

...>)  

об обязании исполнить гарантийные обязательства (с учетом уточнений), 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176, 318 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Обязать общество с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Стройкомплекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить в  течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу недостатки  переданного управляющей компании общество с ограниченной ответственностью  «Квартал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по договору 15.12.2021 жилого  здания по адресу: адресу: 

<

...>, а именно, выполнить следующие работы по обеспечению исправного состояния  капитальных стен и обеспечить температурно-влажностный режим подземной части  дома, в том числе, обеспечив надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен  подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями:  

Наименование работ/материалы  

Ед.изм. 

Кол-во 

стоим ость  

Всего  

стоимость  

работ  

Всего  стоимость  

материалов  

Работы внутри паркинга 

1. 

Демонтаж штукатурного покрытия  

кв.м 

900  

100 р.  

90 000 р.  

2. 

Демонтаж напольного покрытия по  периметру парковки  

кв.м 

88  

600 р.  

52 800 р.  

3. 

Заделка трещин, выбоин, арматуры в  местах сечения воды составом пени трон  

кв.м 

35  

800 р.  

28 000 р.  

15 000р  

4. 

Заделка примыкания пола к стенам  составом пени трон  

кв.м 

88  

800 р.  

70 400 Р.  

35 000р.  

5. 

Грунктовка стен 

КВ.М  

900  

20 р. 

18 000 р.  

1500 р.  

6. 

Оштукатуривание стен 

кв.м  

900  

350 р.  

315 000 р.  

143 000 р.  

7. 

Шпатлевание стен 

кв.м  

900  

200 р.  

180 000 Р.  

38 000 р.  

8. 

Заливка примыкания стен к полу  

кв.м  

88  

600 р.  

52 800 р.  

35 000 р.  

Итого по внутренним работам 

807 000 р.  

257 500 р.  

ИТОГО ВСЕГО 

1 074 500 р.  

Устройство дренажа по периметру дома 

8. 

Рытье траншеи глубиной до 2-х метров 

м. 

150  

500 р.  

75 000 р.  

9. 

Укладка дренажа с засыпкой грунта  

кв.м  

195  

400 р.  

78 000 р.  

Итого 

153 000 р.  

117 000 р.  

ИТОГО ВСЕГО 

270 000 р.  

Устройство реле ПР 200-220.28.2.0 

Реле ПР 200-220.28.2.0 

шт.  

1 

20 520 р.  

Демонтаж монтажа реле ПР 200220.28.2.0  

шт.  

1 

10 000 р.  

ИТОГО СТОИМОСТЬ 

1 375 020 р. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный  

застройщик «Стройкомплекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Квартал» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) государственную пошлину в сумме 6000 рублей 00 копеек.  

Выдача исполнительных листов производится в соответствии со статьей 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд,  г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с  момента принятия решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев  со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Ю.В. Бондарева-Битяй