АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-5558/2023

г. Салехард

04 апреля 2024 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Санджиева М.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Ивановым С.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Тюмень-Инжиниринг» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) об обязании  выполнить гарантийные обязательства по контракту,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора,общество с ограниченной  ответственностью «Сальто», муниципальное автономное учреждение дополнительного  образования Пуровская районная спортивная школа олимпийского резерва «Авангард»,  при участии в судебном заседании посредством веб-конференции:  

от истца - представитель ФИО1 по доверенности № 08-02/03 от 15.01.2024;  от ответчика - представитель ФИО2 по доверенности от 05.04.2020.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казенного учреждения «Управление городского  хозяйства» удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Тюмень-Инжиниринг»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в течение двадцати календарных дней с  момента вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства  по муниципальному контракту № 01903000013210004850001 от 25.05.2021, устранить  недостатки работ при устройстве площадки для мини-футбола (покрытие тип 2), а  именно:  

- устранить недопустимые деформации основания из щебня до 50 мм (по  высоте) площадки для мини футбола (футбольного поля и полосы безопасности);  

- устранить разрывы и некачественное выполнение стыков водопроницаемой  мембраны площадки для мини футбола (футбольного поля и полосы безопасности);  

- устранить недопустимые деформации покрытия из искусственной травы  футбольного поля и полосы безопасности до 55 мм (по высоте), волнистость покрытия,  

 

неравномерное и не в полном объеме распределение кварцевого песка и резинового  гранулята по площади покрытия.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тюмень-Инжиниринг»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 6 000 рублей 00 копеек.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

М.А. Санджиев

Судья