АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2025 года

Дело № А33-38699/2024

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2025 года.

В полном объеме решение изготовлено 25 декабря 2025 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Васильевой Т.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (ИНН 2463102814, ОГРН 1162468093952)

к обществу с ограниченной ответственностью «Тасей» (ИНН 

<

***>)

о взыскании договорной неустойки,

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, КГБУ «Усольское лесничество»,

в отсутствие лиц, участвующих в деле (до перерыва),

в присутствии:

от истца (после перерыва) ФИО1 – представителя по доверенности от 27.12.2024, личность удостоверена паспортом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Филимоничевым Е.В.,

установил:

министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Тасейлес» (далее – ответчик) о взыскании неустойки в размере 324 218,38 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 10.01.2025 возбуждено производство по делу.

Определением от 15.04.2025 судебное разбирательство отложено, произведена замена ненадлежащего ответчика: ООО «Тасейлес», на надлежащего: ООО «Тасей» (ИНН 

<

***>).

Протокольным определением от 25.09.2025 судебное заседание отложено на 27.11.2025.

Истец, ответчик, третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, для участия в судебном заседании 27.11.2025 не явились. Сведения о дате и месте слушания размещены в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 14 час. 30 мин. 11.12.2025, о чем вынесено протокольное определение.

Заседание продолжено 11.12.2025 в 14 час. 33 мин.

Истец, третье лицо, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, для участия в судебное заседание 11.12.2025 не явились. Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края.

Суд заслушал пояснения представителя ответчика.

Рассмотрев ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения, суд отказывает в его удовлетворении.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между агентством лесной отрасли Красноярского края (далее - арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Тасейлес» (далее - арендатор) заключен договор аренды лесного участка от 30.12.2009 № 391-3 (далее - договор), согласно пункту 1 которого арендодатель, действующий в соответствии со статьями 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации, обязуется предоставить, а арендатор обязуется принять во временное пользование лесные участки, находящиеся в государственной собственности, определенные пунктом 2 договора (далее – лесные участки).

В соответствии с пунктом 2 договора лесные участки, общей площадью 17826 га, расположены:

Красноярский край, Тасеевский район, Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество, в кварталах №№ 29, 30, 48, 49, 67, части кварталов 5, 6, 15-19, 38-41, 66, 68, 85, 86, в том числе:

- лесной участок площадью 4 525,00 га, отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Тасеевский район, Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество в кварталах: №№ 5 (за исключением части выделов 26, 27, 28, 30, 32), 6 (за исключением части выделов 31-36, 41, 42, 44), 29, 30, 48, 49,с номером учетной записи в государственном лесном реестре № 24-0983-2009-10-3352-1,

- лесной участок площадью 8 841,00 га, отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Тасеевский район. Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество в кварталах: №№ 15 (за исключением части выделов 9, 14-17), 16 (за исключением части выделов 3. 15, 18, 20-22), 17 (за исключением части выделов 14, 21-29), 18 (за исключением части выделов 2, 6, 10, 11, 13, 15, 18, 21-25, 27, 29, 30), 19 (за исключением части выделов 22, 26, 28, 29, 31), 38 (за исключением части выделов 14-19, 21, 25). 39 (за исключением части выделов 23, 28), 40 (за исключением части выделов 35. 38. 39. 42-44), 41 (за исключением части выделов 1, 8, 10, 15, 17, 18, 22, 27, 30, 34). с номером учетной записи в государственном лесном реестре № 24-0984-2009-10-3352-1:

- лесной участок площадью 3 939,00 га, отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Тасеевский район. Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество в кварталах: №№ 66 (за исключением части выделов 1, 2, 10, 30), 67, 68 (за исключением части выделов 3-5, 7, 8, 10, 13-18, 21, 22), 86 (за исключением части выделов 17, 20, 25, 31-34), с номером учетной записи в государственном лесном реестре № 24-0985-2009-10-3352-1;

- лесной участок площадью 521,00 га, отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Тасеевский район, Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество в кварталах: №№ 85 (за исключением части выделов 3, 4, 7, 8, 10, 13-18, 21, 22), с номером учетной записи в государственном лесном реестре № 24-0986-2009-10-3352-1, предназначены для заготовки древесины.

В силу пункта 5 договора ежегодная арендная плата 760 360 руб., НДС не облагается.

Согласно подпункту «ж» пункта 13 договора арендатор обязан осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия, лесовосстановление и уход за лесом на лесном участке на условиях и в сроки, которые указаны в проекте освоения лесов и приложении № 6 за счет собственных средств.

Дополнительным соглашением от 26.04.2018 № 1 к договору пункт 2 договора стороны изложили в следующей редакции:

«2. Лесные участки, общей площадью 17826 га, предназначенные для заготовки древесины, в том числе:

лесной участок, площадью 4525 га (уточненная площадь по результатам межевания 45258854 кв.м), отнесенный к эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Тасеевский район, Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество, в кварталах № 5, 6, 29, 30, 48, 49 с кадастровым номером 24:36:0506001:8;

лесной участок площадью 275,3354 га (уточненная площадь по результатам межевания 2757911 кв.м), отнесенный к эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Тасеевский район, Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество, в кварталах № 15 (части выделов 6-9, 14, 18, 19, 23-25, 27, 28), 38 (выделы 6, 22 части выделов 1, 2, 8, 10, 14, 21, 23, 24, 27, 28, 33-35) с кадастровым номером 24:36:0000000:652;

лесной участок площадью 8565,6646 га (уточненная площадь по результатам межевания 85798316 кв.м), отнесенный к защитным и эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Абанский район, Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество, в кварталах № 15 (выделы 1-5, 10-13, 15-1.7. 20-22, 26, 29, части выделов 6-9, 14, 18, 19, 23-25, 27, 28), 16-19, 38 (выделы 3-5, 7,9, 11-13, 15-20, 25, 26, 29-32, части выделов 1, 2, 8, 10, 14, 21, 23, 24, 27, 28, 33-35), 39-41, с кадастровым номером 24:36:0000000:650;

лесной участок площадью 3939 га (уточненная площадь по результатам межевания 39830635 кв.м), отнесенный к эксплуатационным лесам, принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Тасеевский район, Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество, в кварталах № 66-68, 86 с кадастровым номером. 24:36:0000000:642;

лесной участок площадью 521 га (5196287 кв.м), отнесенный к эксплуатационным лесам., принадлежащий на праве собственности Российской Федерации, расположенный: Красноярский край, Тасеевский район, Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество, в квартале № 85 с кадастровым номером 24:36:0301003:972.»

Указанным дополнительным соглашением пункт 15 договора дополнен следующим абзацем:

«за невыполнение и несвоевременное выполнение противопожарных, санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по воспроизводству лесов, установленных подпунктами «е», «ж» пункта 13 договора - 3-кратная стоимость затрат, необходимых для выполнения этих мероприятий по нормативам в области лесного хозяйства, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции арендодателя».

Между обществом с ограниченной ответственностью «Тасейлес» (далее – передающая сторона) и обществом с ограниченной ответственностью «Тасей» (далее – принимающая сторона) заключен договор переуступки прав по договору аренды лесных участков от 27.04.2018 № 391-з от 30.12.2009 (далее договор уступки), в соответствии с пунктом 1 которого передающая сторона передает принимающей стороне, а принимающая сторона принимает от передающей стороны права и обязанности арендатора, являющегося стороной по договору аренды лесных участков от 30.12.2009 №391-з, заключенному с агентством лесной отрасли Красноярского края.

В силу пункта 5 договора уступки с 27.04.2018 всю ответственность по договору аренды перед Министерством лесного хозяйства Красноярского края несет принимающая сторона.

Согласно пункту 7 договора уступки с 27.04.2018 арендатором по договору аренды лесных участков от 30.12.2009 №391-з, становится принимающая сторона, приобретая соответствующие права и обязанности, установленные для арендатора договором аренды, а также действующим Российским законодательством.

Дополнительным соглашением от 04.10.2019 № 2 к договору пункт 2 договора стороны изложили в следующей редакции:

«2. Лесной участок из состава земель лесного фонда, общей площадью 17842 га защитных и эксплуатационных лесов, расположенный: Красноярский край, Тасеевскии район, Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество в кварталах №5, 6, 15-19, 29, 30, 38-41, 48,49, 66, 67, 68, 85, 86, предназначенный для заготовки древесины, в том числе:

площадью 4527,0 га (уточненная площадь по результатам межевания 45258854 кв.м.), расположенный: Красноярский край, Тасеевскии район, Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество, в кварталах: №№ 5, 6, 29, 30,48, 49, с кадастровым номером: 24:36:0506001:8;

площадью 275,3354 га (уточненная площадь по результатам межевания 2757911 кв.м.), расположенный: Красноярский край, Тасеевскии район, Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество, в кварталах: №№ 15 (части выделов 6, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 25, 26, 30, 32, 36, 37), 38 (выдел 50, части выделов 1-3, 10, 11, 21, 22, 27, 34, 35, 43, 51, 52, 55, 56, 58, 63, 67), с кадастровым номером: 24:36:0000000:652;

площадью 8576,6646 га (уточненная площадь по результатам межевания 85798316 кв.м.), расположенный: Красноярский край, Абанский район, Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество, в кварталах: №№ 15 (выделы 1-5, 8, 9, 11, 12, 14-16, 18, 19, 21, 22, 24, 27-29, 31, 33-35, 38-39, части выделов 6, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 25, 26, 30, 32, 36, 37), 16-19, 38 (выделы 4-9, 12-20, 23-26, 28-33, 36-42,44-49, 53, 54, 57, 59-62, 64-66, части выделов 1-3, 10, 11, 21, 22, 27, 34, 35, 43, 51, 52, 55, 56, 58, 63, 67), 39-41, с кадастровым номером: 24:36:0000000:650;

площадью 3941,0 га (уточненная площадь по результатам межевания 39830635 кв.м.), расположенный: Красноярский край, Тасеевскии район, Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество, в кварталах: №№ 66-68, 86, с кадастровым номером: 24:36:0000000:642;

площадью 522,0 га (уточненная площадь по результатам межевания 5196287 кв.м.) расположен: Красноярский край, Тасеевский район, Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество, в квартале № 85, с кадастровым номером: 24:36:0301003:972;

категория защитности: леса, расположенные в водоохранных зонах, нерестоохранные полосы лесов, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов.».

Указанным дополнительным соглашением пункт 5 изложен в следующей редакции: «Ежегодная арендная плата составляет 1 839 474 руб.».

В материалы дела представлен акт приема-передачи лесного участка в аренды по договору.

КГБУ «Усольское лесничество» подготовило расчетно-технологическую карту, согласно которой затраты на мероприятия по агротехническому уходу путем оправки в 2023 году составляют 9 316,62 руб. за 1 га, 3-х кратная стоимость, соответственно, составляет 324 218,38 руб. (9 316,62 х11,6 х 3).

Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края в адрес ООО «Тасей» направлена претензия от 14.03.2024 № 86-03946, в которой арендатору предложено добровольно в срок до 30.04.2024 уплатить неустойку. Претензия оставлена арендатором без внимания, неустойка не оплачена.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в суд с настоящим иском.

Возражая относительно заявленных требований, ответчик указывал, что истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора (претензия от 14.03.2024 № 86-03946 ответчиком не получена, поскольку отправлена другому юридическому лицу – ООО «Тасейлес» (ИННН 2436003980, ОГРН 

<

***>). Ввиду несоблюдения претензионного порядка ответчик ходатайствовал об оставлении искового заявления без рассмотрения.

По существу заявленных требований ответчик пояснял следующее:

- на основании проекта освоения лесов от 2021 года и дополнения к проекту освоения лесов от 2024 года в рамках договора аренды № 391-з от 30.12.2009 арендатором - ООО «Тасей» проведены мероприятия по воспроизводству лесов и лесовосстановительные мероприятия такие, как посадка лесных культур путем дополнения лесных культур на территории Красноярского края, Тасеевского района, Усольского лесничества, Кайтымского участкового лесничества на площади 11,6 га;

- о выполнении мероприятий свидетельствует акт по воспроизводству лесов для внесения информации в государственный лесной реестр и ее изменении от 23.06.2023. Натурное обследование произведено комиссионно с участием представителей КГБУ «Усольское лесничество». Результат оценки работ признан комиссией удовлетворительным;

- 23.06.2023 произведено натурное обследование по проведению агротехнического ухода за лесными культурами путем ручной оправки растений от завала травой и почвой, по результатам обследования составлен акт по воспроизводству лесов для внесения информации в государственный лесной реестр и ее изменения (агротехнический уход за лесными культурами путем ручной оправки растений от завала травой и почвой, заноса песком и выдувания почвы, выжимания морозом) на территории Красноярского края, Тасеевского района, Усольского лесничества, Кайтымского участкового лесничества на площади 11,6 га. О выполнении мероприятий свидетельствует акт по воспроизводству лесов для внесения информации в государственный лесной реестр и ее изменении от 23.06.2023. Натурное обследование произведено комиссионно с участием представителей КГБУ «Усольское лесничество». Результат оценки работ признан комиссией удовлетворительным;

- в отношении участка 1 Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество, квартал 86, выдел 28, площадью 0,5 га.

Данный участок лесных культур был передан в аренду на основании договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды лесных участков от 30 декабря 2009 года № 391-3, имеющий кадастровый номер 24:3 6:05 06001:8. Лесные культуры сосны обыкновенной созданы весной 2018 года ручной посадкой сеянцами под меч ФИО2. Схема смешения пород С-С-С- С. Обработка почвы была проведена осенью 2017 года, механизированная, расстояние между борозд - 5,0 м, глубина обработки почвы 20 см. Посадочный материал - сеянцы сосны обыкновенной с открытой корневой системой (далее ОКС) двухлетнего возраста, с питомника Долгомостовского лесничества (паспорт на посадочный материал № 8 от 08 мая 2018 г, выдан Долгомостовским лесным питомником, КГБУ «Долгомостовское лесничество»).

Согласно акту технической приёмки от 08.06.2018, количество посадочных мест составляет 4000 шт/га, расстояние между растениями в рядах 5 х 0,5 м, между центрами борозд 5,0 м, приживаемость растений составила 100,0%. Состояние лесных культур - удовлетворительное. Из-за низкой приживаемости и сохранности культур в 2023 году было проведено дополнение. Дополнение лесных культур, проведено ручной посадкой сеянцами сосны обыкновенной 2-х летнего возраста, под меч ФИО2 (паспорт на посадочный материал № 2 от 11 мая 2023 года, выдан КГБУ «Усольское лесничество). Агротехнические уходы проведены по всей площади лесных культур согласно Проекту лесовосстановления. В итоге осмотра участка выявлено, что общее состояние лесных культур неудовлетворительное - культуры фактически отсутствуют по всей площади. Сохранность растений единичная, при этом у большинства сохранившихся саженцев имеются повреждения коры (обгрызание коры на высоте 10-15 см, мышевидными грызунами по окружности стволика), также саженцы характеризуются отсутствием вершинки. Сохранность культур составляет 7,0 %;

- в отношении участка 2 Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество, квартал 86, выдел 9, 27, 28, площадью 2,5 га.

Данный участок лесных культур передан в аренду на основании договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды лесных участков от 30 декабря 2009 года № 391-3, имеющий кадастровый номер 24:36:0506001:8. Лесные культуры сосны обыкновенной были созданы весной 2018 года ручной посадкой сеянцами под меч ФИО2. Схема смешения пород С-С-С- С. Обработка почвы была проведена осенью 2017 года, механизированная, бороздами, расстояние между борозд - 5,0 м, глубина обработки почвы 20 см. Посадочный материал - сеянцы сосны обыкновенной с открытой корневой системой (далее ОКС) двухлетнего возраста, с питомника Долгомостовского лесничества (паспорт на посадочный материал № 8 от 08 мая 2018 г, выдан Долгомостовским лесным питомником, КГБУ «Долгомостовское лесничество»).

Согласно акту технической приёмки от 08.06.2018, количество посадочных мест составляет 4000 шт/га, расстояние между растениями в рядах 0,5-0,5 м, между центрами борозд 5,0 м, приживаемость растений составила 100%. Состояние лесных культур - удовлетворительное. Из-за низкой приживаемости и сохранности культур в 2023 году было проведено дополнение. Дополнение лесных культур, проведено ручной посадкой сеянцами сосны обыкновенной 2-х летнего возраста, под меч ФИО2 (паспорт на посадочный материал № № 2 от 11 мая 2023 года, выдан КГБУ «Усольское лесничество). Агротехнические уходы были проведены по всей площади лесных культур согласно проекту лесовосстановления.

В итоге осмотра участка выявлено, что общее состояние лесных культур неудовлетворительное - культуры практически отсутствуют равномерно по всей площади. Сохранность растений - единичная, при этом большинство сохранившихся саженцев имеют повреждения коры (обгрызание коры на высоте 10-15 см, мышевидными грызунами по окружности стволика), также саженцы характеризуются отсутствием вершинки. Сохранность культур составляет 7,6 %;

- в отношении участка 3 Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество, квартал 86, выдел 28, площадью 2,6 га.

Данный участок лесных культур был передан в аренду на основании договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды лесных участков от 30 декабря 2009 года № 391-3, имеющий кадастровый номер 24:36:0506001:8.

Лесные культуры сосны обыкновенной созданы весной 2018 года ручной посадкой сеянцами под меч ФИО2. Схема смешения пород С-С-С-С. Обработка почвы была проведена осенью 2017 года, механизированная, бороздами, расстояние между борозд - 5,0 м, глубина обработки почвы 20 см. Посадочный материал - сеянцы сосны обыкновенной с открытой корневой системой (далее ОКС) двухлетнего возраста, с питомника Долгомостовского лесничества (паспорт на посадочный материал № 8 от 08 мая 2018 г, выдан Долгомостовским лесным питомником, КГБУ «Долгомостовское лесничество»).

Согласно акту технической приёмки от 08.06.2018, количество посадочных мест составляет 4000 шт/га, расстояние между растениями в рядах 5-0,50 м, между центрами борозд 5,0 м, приживаемость растений составила 100,0%. Состояние лесных культур - удовлетворительное. Из-за низкой приживаемости и сохранности культур в 2023 году было проведено дополнение. Дополнение лесных культур, проведено ручной посадкой сеянцами сосны обыкновенной 2-х летнего возраста, под меч ФИО2 (паспорт на посадочный материал № № 2 от 11 мая 2023 года, выдан КГБУ «Усольское лесничество). Агротехнические уходы были проведены по всей площади лесных культур, согласно Проекту лесовосстановления.

В итоге осмотра участка выявлено, что общее состояние лесных культур неудовлетворительное - культуры равномерно отсутствуют по всей площади. Сохранность растений - единичная, при этом большинство сохранившихся саженцев имеют повреждения коры (обгрызание коры на высоте 12-20 см, мышевидными грызунами по окружности стволика), также саженцы характеризуются отсутствием вершинки. Сохранность культур составляет 4,2 %;

- в отношении участка 4 Усольское лесничество, Кайтымское участковое лесничество, квартал 86, выдел 9, площадью 6,0 га.

Данный участок лесных культур был передан в аренду на основании договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды лесных участков от 30 декабря 2009 года № 391-3, имеющий кадастровый номер 24:3 6:05 06001:8.

Лесные культуры сосны обыкновенной созданы весной 2018 года ручной посадкой сеянцами под меч ФИО2. Схема смешения пород С-С-С-С. Обработка почвы была проведена осенью 2017 года, механизированная, бороздами, расстояние между борозд - 5,0 м, глубина обработки почвы 20 см. Посадочный материал - сеянцы сосны обыкновенной с открытой корневой системой (далее ОКС) двухлетнего возраста, с питомника Долгомостовского лесничества (паспорт на посадочный материал № 8 от 08 мая 2018 г, выдан Долгомостовским лесным питомником, КГБУ «Долгомостовское лесничество»).

Согласно акту технической приёмки от 08.06.2018, количество посадочных мест составляет 4000 шт/га, расстояние между растениями в рядах 5-0,5 м, между центрами борозд 5,0 м, приживаемость растений составила 100%. Состояние лесных культур - удовлетворительное. Из-за низкой приживаемости и сохранности культур в 2023 году было проведено дополнение. Дополнение лесных культур, проведено ручной посадкой сеянцами сосны обыкновенной 2-х летнего возраста, под меч ФИО2 (паспорт на посадочный материал № № 2 от 11 мая 2023 года, выдан КГБУ «Усольское лесничество). Агротехнические уходы были проведены по всей площади лесных культур, согласно Проекту лесовосстановления.

В итоге осмотра участка выявлено, что общее состояние лесных культур неудовлетворительное - культуры отсутствуют равномерно по всей площади.

Сохранность растений - единичная, при этом большинство сохранившихся саженцев имеют повреждения коры (обгрызание коры на высоте 10-15 см, мышевидными грызунами по окружности стволика), также саженцы характеризуются отсутствием вершинки. Сохранность культур составляет 2,1 %;

- обследование участков проведено комиссионно с участием представителей филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Красноярского края», представителей КГБУ «Усольское лесничество» в присутствии представителя ответчика ООО «Тасей».

На основании изложенного ответчик полагает, что требования истца о наличии задолженности ООО «Тасей» по мероприятиям по воспроизводству лесов за 2023 год: агротехнический уход путем оправки - 11,6 га не подлежат удовлетворению, задолженность в виде начисления неустойки в размере, установленном подпунктом «и» пункта 14 Договора аренды отсутствует;

- обстоятельства, приведшие к гибели лесных культур и как следствие списание площадей, не зависело от добросовестности ответчика и является основанием для освобождения ответчика от ответственности в виде неустойки, поскольку мероприятия по воспроизводству лесов за 2023 год: агротехнический уход путем оправки - 11,6 га фактически ответчиком исполнены.

От истца в материалы дела поступили письменные пояснения, в которых истец указывал, что министерство, рассмотрев отзыв ООО «Тасей» на исковое заявление министерства о взыскании договорной неустойки, подтверждает информацию ООО «Тасей», зафиксированную в представленных актах натурного осмотра и актах по воспроизводству лесов, в том числе о списании лесных насаждений на площади 11,6 га в 2023 году.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» споры в области охраны окружающей среды разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Согласно части 2 статьи 4 Лесного кодекса Российской Федерации от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в лесных отношениях участвуют соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, установленных нормативными правовыми актами.

Распоряжением Правительства Красноярского края от 13.07.2016 № 560-р образовано Министерство лесного хозяйства Красноярского края, действующее на основании Положения.

Постановлением Правительства края от 26.07.2016 № 374-п утверждено Положение о Министерстве лесного хозяйства Красноярского края (далее - Положение о Министерстве).

Министерство является органом исполнительной власти Красноярского края, который на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава края, законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства края осуществляет надзор (контроль) в области лесных отношений.

Постановлением Правительства Красноярского края от 28.12.2023 № 1103-п внесены изменения в Положение о Министерстве лесного хозяйства Красноярского края, в частности, наименование Министерства изменено на Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

15.01.2024 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении наименования Министерства лесного хозяйства Красноярского края на Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (далее также – Министерство).

Таким образом, Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края является надлежащим истцом по делу.

В соответствии со статьями 42, 58 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

В статье 1 Лесного кодекса Российской Федерации изложены принципы лесного законодательства, содержание которых охватывает отношения по управлению, сохранению, воспроизводству, охране, защите, использованию лесов, в том числе по обеспечению многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного лесопользования для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Статьей 5 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе.

В соответствии с пунктом 4 статьи 23.5 Лесного кодекса Российской Федерации осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии проектирования и последующего осуществления мероприятий по воспроизводству лесов на указанных лесных участках.

Согласно части 1 статьи 62 Лесного кодекса Российской Федерации, пункту 3 Правил лесовосстановления, утвержденных Приказом Минприроды от 29.12.2021 №1024 (далее - Правила лесовосстановления) лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

В соответствии с частью 5 статьи 62 Лесного кодекса Российской Федерации лесовосстановление проводится лицами, осуществляющими рубки лесных насаждений в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 29.1, статьей 30 и частью 4.1 статьи 32 настоящего Кодекса.

С учетом положений статей 61, 62 Лесного кодекса Российской Федерации, а также указанных выше пунктов Правил лесовосстановления, лесовосстановительные мероприятия осуществляется лицами, использующими леса в соответствии с проектом освоения лесов, который содержит детализированные условия исполнения договора аренды лесного участка для арендаторов.

Согласно части 6 статьи 62 Лесного кодекса Российской Федерации лесовосстановление проводится в соответствии с проектом лесовосстановления, который разрабатывается в соответствии со статьей 89.1 настоящего Кодекса.

Пунктом 3 Правил лесовосстановления предусмотрено, что лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их биологического разнообразия.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Правил лесовосстановление осуществляется на основании проекта лесовосстановления лицами, осуществляющими рубки лесных насаждений в соответствии с Лесного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 29.1, статьей 30, частью 4.1 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, арендатор обязан выполнять мероприятия по лесовосстановлению в соответствии с Правилами лесовосстановления с учетом проводимых им рубок.

В соответствии с пунктом 15 (в редакции дополнительного соглашения от 26.04.2018 № 1) за невыполнение и несвоевременное выполнение противопожарных, санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по воспроизводству лесов, установленных подпунктами «е», «ж» пункта 13 договора, предусмотрена 3-кратная стоимость затрат, необходимых для выполнения этих мероприятий по нормативам в области лесного хозяйства, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции арендодателя.

Министерство просит взыскать с ответчика неустойку в размере 324 218,38 руб. за невыполнение ответчиком мероприятий по воспроизводству лесов в 2023 году в объеме 11,6 га.

Возражая относительно заявленных требований, ответчик указывал, что истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора, просил оставить исковое заявление без рассмотрения.

Согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Таким образом, законом установлен обязательный претензионный порядок разрешения гражданско-правовых споров о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров. Поэтому при обращении с исковым заявлением истцу необходимо представить документы, подтверждающие соблюдение им претензионного или иного досудебного порядка.

Исходя из буквального толкования части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в рассматриваемом случае, спор может быть передан на разрешение арбитражного суда исключительно после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии, если иное не установлено законом или договором.

При оценке доводов сторон о соблюдении претензионного порядка суд учитывает, что основная задача применения досудебного порядка урегулирования спора состоит в том, чтобы побудить стороны самостоятельно урегулировать возникший конфликт. Его использование позволяет стороне, права которой предполагаются нарушенными, довести до сведения другой стороны (предполагаемого нарушителя) свои требования, а нарушителю - добровольно удовлетворить обоснованные требования, не допуская переноса возникшего спора на рассмотрение суда.

Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора понимается одна из форм защиты гражданских прав, которая заключается в попытке урегулирования возникшего спора самими спорящими сторонами до передачи этого спора в арбитражный или иной компетентный суд. Такой порядок урегулирования спора направлен на добровольное разрешение сторонами имеющегося гражданско-правового конфликта без обращения за защитой в суд. При этом претензионный порядок не должен являться препятствием для защиты лицом своих нарушенных прав в судебном порядке, в связи с чем при решении вопроса о возможности оставления иска без рассмотрения суду, исходя из указанных выше целей претензионного порядка, необходимо учитывать перспективы возможного досудебного урегулирования спора.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 306-ЭС15-1364, правовые основания для оставления иска без рассмотрения по ходатайству одной из сторон отсутствуют, если удовлетворение такого ходатайства приведет к необоснованному затягиванию разрешения спора и ущемлению прав другой стороны.

В пункте 4 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015, по смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указано, что претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

Пунктом 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» суд первой инстанции или суд апелляционной инстанции, рассматривающий дело по правилам суда первой инстанции, удовлетворяет ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора, если оно подано не позднее дня представления ответчиком первого заявления по существу спора и ответчик выразил намерение его урегулировать, а также если на момент подачи данного ходатайства не истек установленный законом или договором срок досудебного урегулирования и отсутствует ответ на обращение либо иной документ, подтверждающий соблюдение такого урегулирования (часть 5 статьи 3, пункт 5 части 1 статьи 148, часть 5 статьи 159 АПК РФ, часть 4 статьи 1, статья 222 ГПК РФ).

В подтверждение соблюдения претензионного порядка в материалы дела истцом представлена претензия с требованием об оплате задолженности, а также почтовая квитанция от 14.03.2024 № 86-03946, адресованная обществу «Тасей» ФИО3 по адресу: 

<

...> Октября, стр. 38Б, пом. 2. Указанный адрес соответствует юридическому адресу ответчика. Почтовому отправлению присвоен номер почтового идентификатора 80090594624917.

Согласно сведениям с сайта «Почта России» указанное почтовое отправление направлено 15.03.2024, прибыло в место вручения 19.03.2024, 19.03.2024 осуществлена неудачная попытка вручения, 19.04.2024 почтовое отправление возвращено отправителю из-за истечения срока хранения.

В пункте 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 67 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», бремя доказывания факта направления (осуществления) сообщения и его доставки адресату лежит на лице, направившем сообщение. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что содержание сообщения было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие последствия (например, договор считается расторгнутым вследствие одностороннего отказа от его исполнения).

Нахождение уведомления в отделении почтовой связи является временем, необходимым для надлежащего уведомления ответчика. Поступление отправления в отделение почтовой связи ответчика не означает его доставку получателю. Получатель вправе получить свою корреспонденцию в течение всего срока её хранения. Корреспонденция хранится в организации почтовой связи в течение месячного срока, в течение которого получатель может получить корреспонденцию.

Процессуальной фикцией о надлежащем уведомлении является истечение срока хранения поступившей корреспонденции и отправка её обратно отправителю.

Указанная позиция согласуется с положениями пункта 67 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25, согласно которому сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, суд признает соблюденным истцом претензионный порядок урегулирования спора. Тот факт, что первоначально истец обратился с требованиями к ненадлежащему ответчику, правового значения при оценке доводов ответчика о несоблюдении истцом претензионного порядка, не имеет, учитывая, что материалами настоящего дела подтвержден факт направления претензии надлежащему ответчику.

Заявленные исковые требования мотивированы невыполнением ответчиком мероприятий за 2023 год по агротехническому уходу путем оправки на площади 11,6 га.

Возражая против удовлетворения заявленных исковых требований, истец представил в материалы дела акты по воспроизводству лесов от 23.06.2023 (в актах зафиксирован способ проведения агротехнического ухода за лесными культурами – ручная отправка растений от завала травой и почвой; площадь, на которой произведена отправка, - 11, 6 га = 6 га + 2,6 га + 0,5 га + 2,5 га). Работы по ручной отправке приняты комиссионно: инженером по лессовостановлению ФИО4, лесничим Троицкого участкового лесничества ФИО5, директором КГКУ Усольское лесничество ФИО6

Неустойка как мера гражданско-правовой ответственности подлежит начислению за противоправное поведение, а именно за невыполнение указанных мероприятий.

Оценив материалы дела, суд приходит к выводу, что материалами дела (представленными актами по воспроизводству лесов от 23.06.2023) опровергается факт невыполнения мероприятий по агротехническому уходу.

При этом сам по себе факт дальнейшей гибели лесных культур, что подтверждается актом натурного обследования лесных культур № 1 от 10.10.2023 (в соответствии с пунктом 60 Правил лессовосстановления лесные культуры с приживаемостью менее 25 % считаются погибшими и подлежат списанию), не отменяет факт надлежащего выполнения работ по агротехническому уходу путем ручной отправки растений от завала травой и почвой.

Указанные в качестве причин гибели лесных культур на участках 1, 2, 3 4 Усольского лесничества Кайтымского участкового лесничества в квартале 86, выделы 28, 9, 27,28, 28, 9. площадью 0,5 га, 2, 5 га, 2,6 га, 6,0 га соответственно обстоятельства (вся площадь лесных культур заросла высокой густой травянистой растительностью, задавливающей саженцы; по всей площади, имеются многочисленные норы мышевидных грызунов; у большинства сохранившихся саженцев имеются повреждения коры (обгрызание коры на высоте 10-15 см, мышевидными грызунами по окружности стволика), также саженцы характеризуются отсутствием вершинки) не свидетельствуют о ненадлежащем качестве выполненных работ по агротехническому уходу в июне 2023 года. Зафиксированное в акте натурного обследования лесных культур № 1 от 10.10.2023 зарастание лесных культур высокой густой растительностью также само по себе не свидетельствует о ненадлежащем качестве проведенных работ: работы проведены, приняты, зарастание травой обусловлено естественными причинами (работы выполнены в июне 2023 года, зарастание зафиксировано в октябре 2023 года).

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, учитывая, что материалами настоящего дела подтверждается факт надлежащего исполнения ответчиком обязательств по осуществлению мероприятий по воспроизводству лесов за 2023 год (агротехнический уход путем ручной отправки), оснований для начисления неустойки за неисполнение ответчиком указанных обязательств у истца не имелось, в связи с чем, требования истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 324 218,38 руб. удовлетворению не подлежат. Суд отказывает в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально удовлетворенным требованиям.

Истец на основании статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины.

Учитывая результат рассмотрения настоящего спора, а также тот факт, что истец по настоящему делу освобожден от уплаты госпошлины, суд не рассматривает вопрос о распределении судебных расходов по уплате госпошлины за рассмотрение настоящего иска.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Т.А. Васильева