АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А57-3315/2024

08 августа 2024 года

город Саратов

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 июля 2024 года 

Полный текст решения изготовлен 08 августа 2024 года

 

            Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи В.Е. Козиковой,

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Е.М. Гукасовой,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Министерства здравоохранения Саратовской области ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 

к индивидуальному предпринимателю ФИО1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: 

ГУЗ Саратовской области «Саратовская районная больница», 

о взыскании неустойки,

при участии: 

лица, участвующие в деле не явились, извещены надлежащим образом 

 

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Саратовской области поступило исковое заявление Министерства здравоохранения Саратовской области к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании неустойки по контракту №086020000082200698_88204 от 21.10.2022 г. в размере 1008106, 67 руб., штрафа в размере 1000 руб.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

           Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее, чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Также, информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседание, об объявленных перерывах в судебном заседании была размещена на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru.

В соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Ответчик представил письменный отзыв с указанием правовой позиции по делу.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассматривается в порядке статей 153-167 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

           Изучив представленные документы, заслушав представителя истца, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из искового заявления, Между министерством здравоохранения Саратовской области (далее - Заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (далее - Поставщик) 21 октября 2022 заключен государственный контракт № 086020000082200698_88204 .(далее - Контракт) на поставку медицинских изделий - системы рентгеновской компьютерной томографии всего тела (далее - .Оборудование), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия.

Согласно пункту 1.3. Контракта Получателем Оборудования по Контракту является государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Саратовская районная больница».

В соответствии с пунктом 2.2. Контракта цена Контракта составляет 31 018 666 (тридцать один миллион восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, НДС не облагается на основании п. 2. мт. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 5.1. Контракта установлен срок поставки Оборудования в 2023 году по заявке Заказчика (Получателя), в один этап, в течение 90 дней, с момента направления заявки.

Заявка на поставку Оборудования направлена Получателем Поставщику 09.03.2023. Таким образом, срок поставки Оборудования по Контракту установлен до 07.06.2023 включительно.

Согласно пункту 5.2. Контракта фактической датой поставки считается дата, указанная в документе о приемке.

Согласно дате, указанной в товарной накладной, поставка осуществлялась 11.08.2023 на сумму 31 018 666 (тридцать один миллион восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

Таким образом, согласно нормам гражданского законодательства и по; условиям Контракта Поставщиком нарушены условия Контракта, а именно допущена 'просрочка поставки.

Согласно пункту 11.8. Контракта в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате  неустоек, пеней).

Согласно пункту 11.9. Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно информации Банка России года, ключевая ставка на 11.18.2023 составляет 15%

Размер пени составляет 1008106 (один миллион восемь тысяч сто шесть) рублей 67 копеек.

Согласно пункту 11.12. Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, при цене Контракта от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

Пунктом 6.3. Контракта предусмотрена обязанность Поставщика своевременно предоставлять достоверную информацию о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Уведомления от индивидуального предпринимателя ФИО1 о невозможности исполнения обязательств по контракту в срок, в адрес министерства здравоохранения Саратовской области не поступало. Следовательно, за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 6.3. Контракта считаем правомерным взыскание штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

21 ноября 2022 года в адрес индивидуального предпринимателя ФИО1 была направлена претензия, исх. № 12-01-27/18009. Ответ на претензию не получен.

Добровольно в установленный законом срок индивидуальный предприниматель ФИО1, обязательства взятые на себя по Контракту не исполнило, пени и штраф так же не выплачены.

На основании указанных обстоятельств истец обратился с иском в арбитражный суд.

Исследовав материалы дела, суд находит исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

По условиям п. 1.3 Контракта, а также Приложения № 3 к нему, поставка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию и инструктаж специалистов Заказчика осуществлялись для последующей эксплуатации поставляемого оборудования ГУЗ СО «Саратовская районная больница», которая также являлась Грузополучателем по заключенному контракту и администрация которой непосредственно осуществляла деятельность по подготовке помещения для установки и участие в приемке поставленного оборудования и оказанных услуг.

Согласно п. 3.2.1. Контракта «Поставщик вправе требовать от Заказчика (Получателя) подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так 16.01.2023 года истцом в адрес ответчика письмом № 01-07/б/н от 16.01.2023г. был направлен запрос о предоставлении информации (технического задания), а также требований, предъявляемых к помещению для установки предмета поставки, в ответ на который 18.01.2023 года в адрес ГУЗ СО «Саратовская РБ» было направлено письмо № 3 от 17.01.2023 года с вложением с указанием технических требований, которые должны быть соблюдены для последующего осуществления установки и ввода в эксплуатацию оборудования, подлежащего поставке ( компьютерный томограф), а также приложением руководства по подготовке к монтажу названного оборудования.

09.03.2023 года Получателем оборудования была направлена заявка на поставку оборудования.

04.04.2023 года администрацией ГУЗ СО «Саратовская районная больница» было направлено письмо № 01-07/533 с просьбой о направлении специалистов, ответственных за монтаж и установку оборудования по адресу строящегося объекта (

<

...> уч. 60).

15.05.2023 года после проведения соответствующего осмотра помещения ответчиком был сделан вывод о неготовности помещения для монтажа оборудования, а также об отсутствии в проектной документации Заказчика распределительного щита, необходимого для подключения оборудования к электросети, системы кондиционирования и осушения воздуха, отсутствии надлежащей подготовки пола и другими недостатками, в связи с чем было направлено письмо № 124 от 15.05.2023 г., содержащее подробную информацию о несоответствии осмотренного помещения техническим требованиям для целей размещения оборудования.

17.05.2023 года, до истечения 90 дней на поставку, названная заявка была отозвана письмом № 01-07/751 в связи с отсутствием возможности установки оборудования, поскольку здание, в котором располагается помещение, в котором в свою очередь должно быть установлено оборудование, не построено. О возможности осуществления поставки администрация ГУЗ СО «Саратовская РБ» обязалась уведомить нас после получения информации от ГКУ СО «Управление капитального строительства» о сроках готовности помещения к установке оборудования.

14.06.2023 года ГУЗ СО «Саратовская РБ» было направлен запрос о готовности оборудования к отгрузке письмом № 01-07/903в, на что в тот же день был предоставлен ответ посредством электронной почты о том, что оборудование уже находится на складе и готово к отгрузке и в течение 7-10 дней с даты получения положительного заключения по готовности помещения от инженера производителя, тогда же и будут назначены даты монтажа и ввода в эксплуатацию.

21.06.2023 года нами был осуществлен повторный выезд специалистов нашей организации для проведения осмотра помещения, по результатам которого 23.06.2023 года было направлено письмо № 187 о несоответствии помещения техническим требованиям производителя оборудования для целей установки в нем компьютерного томографа. Кроме того, указанное письмо содержит информацию о готовности оборудования для осуществления его отгрузки, установки и монтажа.

29.06.2023 года было направлено письмо об обеспечении скорейшей доставки оборудования, а в тот же день нами был направлен ответное письмо № 195 о готовности к доставке и назначении времени для приемки оборудования на 05.07.2023 года на 9:00.

Тем не менее, в указанную дату конечный пользователь отказался от приемки оборудования по причине отсутствия готовности соответствующего помещения для этих целей.

14.07.2023 года администрация ГУЗ СО «Саратовская РБ» сообщила о готовности помещения к установке и монтажу оборудования (письмо 01-07/1093 от 14.07.2023 года), и 17.07.2023 года аналогичным по содержанию письмом с приложением Актов проверки работоспособности и эффективности систем кондиционирования и вентиляции, а также протоколов испытаний попросила организовать выезд наших специалистов для осуществления установки оборудования.

24.07.2023 года нами была осуществлена поставка оборудования по адресу Грузополучателя, а 03.08.2023 года также установка, ввод в эксплуатацию оборудования и инструктаж конечного пользователя.

Вышеизложенная информация была отражена в ответе на претензию истца № 12-01-2/18009 от 21.11.2023 года.

От ГУЗ Саратовской области «Саратовская районная больница» поступил отзыв на исковое заявление, в котором указывает, что соответствии с Государственным Контрактом № 0860500000222000013 от 10 июня 2023 года заключенным между Государственном казенным учреждением Саратовской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование ;- ГКУ СО «УКС») именуемым  в дальнейшем  «Заказчик»,     с  одной  стороны,  и  Обществом  с  ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ПДПСТРОЙ» (сокращенное наименование ООО Специализированный застройщик «ПДПСТРОЙ») именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, (ИКЗ: 222645213198764520100100120034120414, ИГК: A10000105621R3BOOO 6020017) Заказчик, (признанный таковым Приказом комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области от 12.08.2019 г. №01-12/02-1) поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы на объекте: «Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Саратовская районная больница» строительство поликлиники («Поликлиника на 300 посещений в смену по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Соколовское муниципальное образование, 

<

...> уч.60»)». Согласно п. 2.1., данного Государственного Контракта, срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 25 декабря 2022 г. Впоследствии срок исполнения контракта продлено до 30 июня 2024 гола.

Проектная документация по объекту: «Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Саратовская районная больница» строительство поликлиники («Поликлиника на 300 посещений в смену по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Соколовское муниципальное образование, 

<

...> уч.60»)» разработана государственным унитарным проектным предприятием «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖЛАНПРОЕКТ» Саратовской области.

На основании распоряжения Правительства Саратовской области от 25.07.2022 № 261-Пр (с изменениями от 01.09.2022) «О возложении обязанностей по приобретению оборудования» министерством здравоохранения области проводились мероприятия по закупке оборудования для оснащения строящегося объекта: «Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Саратовская районная больница» строительство поликлиники («Поликлиника на 300 посещений в смену по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Соколовское муниципальное образование, 

<

...> уч.60»)».

В ходе проведения конкурентных процедур в целях оснащения строящегося объекта «Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Саратовская районная больница» строительство поликлиники («Поликлиника на 300 посещений в смену по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Соколовское муниципальное образование, 

<

...> уч.60»)» министерством здравоохранения Саратовской области (Заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО1 (Поставщик) заключен Государственный Контракт № 086020000082200б298_88204   от 21 октября 2022 года на поставку медицинского изделия -системы рентгеновской компьютерной томографии всего тела (далее по тексту - Оборудование), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия.

В соответствии с п. 1.3. данного Государственного Контракта Получателем оборудования является ГУЗ СО «Саратовская РБ».

Согласно условий пунктов 5.1. и 5.2. вышеуказанного Государственного Контракта поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в Место доставки в соответствии с Отгрузочной разнарядкой в 2023 году по заявке Заказчика (Получателя), в один этап в течение 90 дней, с момента направления заявки. Заявка направляется не позднее августа 2023 г. Направление заявки производится Заказчиком (Получателем) факсимильно или по электронной почте. Поставка Оборудования производится до 15.00 часов в рабочие дни, кроме праздничных и выходных дней. Поставщик за 5 дней до осуществления поставки Оборудования в соответствии с Отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) направляет в адрес Заказчика (Получателя) уведомление о времени доставки Оборудования в Место доставки. Фактической датой поставки считается дата, указанная в документе о приемке.

В ходе осуществления подготовки помещения для установки Оборудования и самой поставки оборудования администрацией ГУЗ СО «Саратовская РБ» (далее по тексту -Учреждение) велась длительная переписка:

- Учреждением, 16.01.2023 №01-07/б/н направлен запрос поставщику оборудования ИП ФИО1. о предоставлении требований, предъявляемых к помещению для установки поставляемого оборудования.   18.01.2023г., за исх. № 3 от 17.01.2023 г., получен ответ от ИП ФИО1 с приложением перечней требований по установке оборудования.

- 19.01.2023 г. в целях своевременной подготовки специализированных помещений, полученные требования производителей к помещениям для размещения поставляемого оборудования отправлены в ГУПП «Институт Саратовгражданпроект».

- Ввиду приближения срока окончания строительства предусмотренного Государственным Контрактом № 0860500000222000013 от 10 июня 2023 года (до 30 июня 2023 года) и в целях исполнения пункта 5.1. Контракта (поставка Оборудования в течении 90 дней с момента получения заявки) 09.03.2023 г. Учреждением направлена заявка ИП ФИО1 на поставку оборудования (исх. №01 -07/ от 09.03.2023 г.).

-   23.03.2023г. (исх. №01-07/450 от 23.03.2023) в ГКУ СО «Управление капитального строительства» Учреждением направлен запрос о предоставлении информации о готовности помещений и сроках завершения работ по их подготовке в целях реализации мероприятий по вводу в эксплуатацию поставляемого Оборудования.

-   03.04.2023 в Учреждение поступил запрос ГКУ СО «Управление капитального строительства» о предоставлении технического задания на подготовку помещений КТ, рентгена, маммографа, флюорографа (исх. №01-01/973 от 03.04.2023). 04.04.2023г. Учреждением отправлен ответ на письмо ГКУ СО «Управление капитального строительства» с приложением необходимой информации (исх. №01-01/973 от 03.04.2023).

-   04.04.2023 в адрес Поставщика (ИП ФИО1) учреждением направлено письмо с просьбой о выезде специалистов, ответственных за монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию по адресу строящегося объекта с целью проверки помещения.

-   по результатам выезда представителя Поставщика (ИП ФИО1), выявлены недочеты при подготовке помещения, препятствующие установке оборудования. Список недочетов представлен в письме поставщика исх. № 124 от 15.05.2023 г. на имя Минздрава Саратовской области и ГУЗ СО «Саратовская РБ». 16.05.2023 г. информационным письмом (исх. №01-07/745 от 16.05.2023г.) вышеуказанные недочеты отправлены Учреждением в ГКУ СО «Управление капитального строительства».

-   17.05.2023 г. в связи с необходимостью устранения недостатков по готовности помещения для установки Оборудования и отсутствием информации по срокам их устранения от ГКУ СО «Управление капитального строительства» заявка на поставку оборудования от 09.03.2023 г. была отозвана Учреждением (исх. №01-07/751 от 17.05.2023 г.).

-   02.06.2023 в адрес учреждения поступила информация от ГКУ СО «Управление капитального строительства» о сроках выполнения работ по государственному контракту №0860500000222000013 - строительству здания поликлиники и готовности помещений - до 30 июня 2023 года.

-   14.06.2023 г. в адрес Поставщика (ИП ФИО1) направлено письмо (исх. № 01-07/903в от 14.06.2023) с просьбой сообщить о готовности осуществления поставки оборудования, так как ГКУ СО «Управление капитального строительства» сообщило срок окончания строительных работ - 30.06.2023 г.

-   21.06.2023 г. представителем Поставщика (ИП ФИО1) осуществлен повторный выезд и визуальный осмотр для определения готовности помещения к монтажу и вводу в эксплуатацию компьютерного томографа. По результатам повторного выезда и осмотра помещения представителем Поставщика выявлены повторные нарушения при подготовке помещения для размещения компьютерного томографа. Все нарушения изложены в письме и направлены в адрес Учреждения, Министерства здравоохранения области и заместителя председателя правительства Саратовской области, (исх. № 187 от 23.06.2023г.).

-   21.06.2023 г. в Учреждение поступила информация ГКУ СО «УКС» о строительной готовности специализированных помещений (под размещение рентгенологического оборудования) строящейся поликлиники р.п. ФИО2. (вх. 01-01/1944 от 28.06.2023 г.)

-   29.06.2023 г. Учреждением в адрес Поставщика (ИП ФИО1) направлена повторная заявка на отгрузку Оборудования.

-   29.06.2023 г. поставщик (ИП ФИО1) сообщил о готовности поставить оборудование 05.07.2023 г. (исх. №195 от 29.06.2023).

-   14.07.2023 г. Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области подписано разрешение на ввод объекта (здания поликлиники в р.п. ФИО2) в эксплуатацию.

-   -14.07.2023 г. Учреждением в адрес Поставщика (ИП ФИО1) направлена информация о готовности помещения к установке компьютерного томографа и просьбой организовать выезд специалистов, ответственных за монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию, (исх. № 01-07/1093 от 14.07.2023 г.).

-   -17.07.2023 г. аналогичная информация направлена в адрес Поставщика (ИП ФИО1) с приложением актов проверки работоспособности и эффективности систем кондиционирования, вентиляции, протоколов испытаний (исх. № 01-07/б/н от 17.07.2023г.).

-   -18.07.2023 г. в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом Саратовской области нежилое здание поликлиники в р.п. ФИО2 передано на праве оперативного управления ГУЗ СО «Саратовская РБ».

-   -24.07.2023 г. Поставщиком (ИП ФИО1) по счет-фактуре № 46 от 24 июля 2023 г. осуществлена доставка Оборудования в помещение поликлиники р.п. ФИО2.

-   В период времени с 25.07.2023 г. по 03.08.2023 г. Поставщиком (ИП ФИО1) проводились работы по установке, монтажным работам Оборудования, ввод его в эксплуатацию и обучение персонала, по результатам которых Поставщиком (ИП ФИО1.) и Учреждением подписаны документы о приемке Оборудования: счет-фактура №. 49 от 04.08.2023 г., акт приема-передачи Оборудования и акт ввода Оборудования в эксплуатацию.

-   Таким образом, системы рентгеновской компьютерной томографии всего тела поставлена Поставщиком (ИП ФИО1) по Государственному Контракту № 0860200000822006298_88204 от 21 октября 2022 года в течение 36 дней с момента направления ГУЗ СО «Саратовская РБ» повторной заявки на поставку Оборудования.

           В силу ч. 1, 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

           Учитывая вышеизложенное, суд, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ в их взаимосвязи и совокупности, приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца.

Руководствуясь статьями  110,  167-170 Арбитражного процессуального кодекса   Российской   Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении   заявленных исковых требований.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, путем подачи соответствующей жалобы через арбитражный суд первой инстанции. 

 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области

 

В. Е. Козикова