РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-275934/25-110-2129

05.02.2026 г.

Резолютивная часть решения объявлена 23.01.2026

Решение в полном объеме изготовлено 05.02.2026

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Булаховой М.Н,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального государственного автономного учреждения "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" (117218, Г.МОСКВА, ПР-КТ НАХИМОВСКИЙ, Д.36, К.1, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "КВАНТ" (124460, Г.МОСКВА, Г. ЗЕЛЕНОГРАД, ПР-Д 4801-Й, Д. 7, СТР. 5, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 3 150 000 рублей,

при участии:

от истца –ФИО1 по дов.,

от ответчика- не явился,

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное автономное учреждение "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "КВАНТ" о взыскании 3 000 000 руб. задолженности по договору № НИОКТР-НСи-2-2024 от 05.02.2024 г., 150 000 руб. неустойки.

Ответчик отзыв не представил, в заседание не явился, спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123, 156 АПК РФ,

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт» -НИИСИ) (далее - Истец, Исполнитель) и ООО «КВАНТ» (далее - Ответчик, Заказчик) заключен договор № НИОКТР-НСи-2-2024 от 05.02.2024 г. (далее - Договор).

Согласно п. 2.1. Договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по «Разработке базовых технологических процессов Установки индивидуальной химической аэрозольной обработки. Реализации базовых технологических процессов в установке, проведению испытаний» согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Договору) и Календарному плану (Приложение №2 к Договору). Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить его в порядке и в сроки, которые оговорены Сторонами в Договоре.

Цена Договора в соответствии с п. 5.1. составляет 26 400 000 (двадцать шесть миллионов четыреста тысяч рублей) 00 коп., НДС не облагается. Цена второго этапа согласно Протокола соглашения о договорной цене (Приложение №3 к Договору) составляет 3 000 000 (три миллиона рублей) 00 коп. Срок завершения второго этапа «Разработка эскизного проекта в части реализации БТП на Установке индивидуальной химической аэрозольной обработки», согласно дополнительному соглашению № 1 к Договору, установлен 30 ноября 2024 г.

В обоснование требования истец указал, что ответчиком не оплачены работы по 2 этапу на сумму 3 000 000 руб.

Акт сдачи-приемки результатов работ к Договору подписан Сторонами без замечаний 30 ноября 2024 г.

В соответствии с п.5.5. Договора оплата работы производится в течение 5 (пяти) дней после подписания Акта сдачи-приемки результатов работ по каждому завершенному этапу.

По факту нарушения договорных обязательств Истцом было направлено в адрес Ответчика претензионное письмо №1000-01-01.14/2703 от 07.07.2025 г. с требованием в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии принять меры по погашению суммы долга по договору и уплаты пени.

20.08.2025 г. Стороны Договора заключили соглашение о его расторжении (далее - Соглашение). Согласно п. 4 Соглашения Заказчик обязуется в срок до 31.08.2025 г. оплатить Исполнителю задолженность в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей и пени за просрочку денежного обязательства в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Ввиду не поступления оплаты в указанный с Соглашении срок, Истец направил в адрес Ответчика претензионное письмо № 1000-01-01.14/3529 от 10.09.2025г. Требования претензии Ответчиком не удовлетворены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 769 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования и разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

В соответствии со ст. 774 ГК РФ Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ обязан: передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию; принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Доказательств оплаты ответчиком не представлено, в связи с чем требование о взыскании 3 00 000 руб. задолженности подлежит удовлетворению.

Согласно п. 8.6 Договора, в случае нарушения Заказчиком своего обязательства по оплате принятой в установленном договором порядке работы Исполнитель в праве потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от цены работы соответствующего этапа.

Неустойка рассчитывалась истцом следующим образом:

Сумма долга х процентная ставка х количество дней просрочки /100 Ставка по договору: 0,1 % в день

период

дней

неустойка

Ограничение неустойки

сумма неустойки, руб.

07.12.2024-07.07.2025

213

639 000

5%

150 000,00

Сумма основного долга

3 000 000

Сумма процентов по задолженности

150 000

Размер неустойки равен 150 000 руб.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КВАНТ" ( ОГРН: 

<

***>) в пользу Федерального государственного автономного учреждения "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" ( ОГРН: 

<

***>) 3 150 000 руб. задолженности, 150 000 руб. неустойки, 119 500 в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В.Мищенко