АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А47-4097/2024

г. Оренбург

05 августа 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена       30 июля 2024 года

В полном объеме решение изготовлено        05 августа 2024 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи                  Федоровой С.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лебедевой Н.В. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью "СКС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Москва)

к некоммерческой организации "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 630 666 руб. 94 коп.

Истец и ответчик, извещенные надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, в соответствии с требованиями ст.ст.  121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе путем размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в судебное заседание не явились. Судебное заседание проводится в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их отсутствие.

 

Общество с ограниченной ответственностью "СКС" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с исковым заявлением к некоммерческой организации "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" (далее - ответчик) о взыскании  процентов  по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 09.03.2021 до 08.02.2024 в размере 630 666 руб. 94 коп.

Определением суда от 18.03.2024 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Ответчику предложено представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление.

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд пришел к выводу о том, что имеется основание для рассмотрения дела по общим правилам искового производства, предусмотренное частью 5 статьи 227 АПК РФ, а именно: рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.

Определением от  14.05.2024 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, назначил предварительное судебное заседание.

Представитель истца в судебном заседании  заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении. В обоснование исковых требований ссылается на то, что в связи с признанием судом в рамках дела № А47-10163/2021 неправомерности взыскания  неустойки, перечисленной в адрес ответчика кредитной организацией по банковской гарантии и взыскания в пользу ООО «СКС» 2 315 818 руб. 84 коп., имеет место  неправомерное удержание денежных средств, в связи с чем, подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 630 666 руб. 94 коп. за период с 09.03.2021 года по 08.02.2024 .

Ответчик заявленные требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление, в обоснование заявленных возражений указывает,  на то, что начисление процентов по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации  на сумму убытков в размере 2 315 818 руб. 84 коп. за период предшествующий моменту вступления судебного акта по делу № А47-10163/2021  в законную силу, является неправомерным. Ответчик считает период возможного начисления процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ – с 19.01.2024 по 08.02.2024.

Лица, участвующие в деле, не заявили ходатайства о необходимости предоставления дополнительных доказательств. При таких обстоятельствах, суд рассматривает дело, исходя из совокупности имеющихся в деле доказательств, с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении материалов дела, судом установлены следующие обстоятельства. 

Между НО "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" (заказчик) и ООО "СканСориум" (подрядчик) заключен договор от 11.09.2020 № ЛО-5/2020 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – договор), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы на проведение комплекса работ по капитальному ремонту объекта: капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>; капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>; капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>, включая подготовительные работы, и сдачу Объекта в эксплуатацию, а также иные неразрывно связанные с Объектом работы, включая декларирование согласно технического регламента Таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов", в том числе в течение гарантийного срока в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора, ПСД, НПА (пункт 2.1 Договора).

Согласно пункту 2.2. Договора, объем и состав работ, выполняемых Подрядчиком по Объекту, определен ТЗ, СД, НПА и должен обеспечивать нормальную эксплуатацию объекта по завершению работ.

В соответствии с пунктом 2.8  договора в качестве обеспечения исполнения обязательств установлено: банковская гарантия № МСБ/ОГ/20-002723 от 08 сентября 2020г. выдана ПАО Банк «ФК Открытие». Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Исполнителем самостоятельно. 

В силу пунктов 2.9, 2.10 договора  обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Исполнителем при направлении Заказчику подписанного с его стороны проекта договора. 

Заказчик в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

В соответствии с банковской гарантией МСБ/ОГ/20-002723 от 08.09.2020 (далее – банковская гарантия) ПАО Банк «ФК Открытие» (гарант) обязуется выплатить бенефециару - НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области  сумму гарантии в пределах 32 833 970 руб. 40 коп., в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом (ООО «Скансориум») основного обязательства по договору № ЛО-5/2020.

В соответствии с условиями банковской гарантии  Бенефициар вправе истребовать сумму Гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора.

Гарантия не может быть отозвана Гарантом (является безотзывной.

В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Принципалом Основного обязательства Бенефициар вправе представлять Гаранту Требование по гарантии в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную обьему фактически исполненных Принципалом обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Бенефициаром, но не превышающем Сумму гарантии.

Гарант не проверяет расчет суммы, включаемой в Требование по гарантии, и оценивает его по внешним признакам В Требовании по гарантии должны быть указаны конкретные факты невыполнения или ненадлежащего выполнения обеспечиваемых Гарантией обязательств, ссылка на номер и дату выдачи Гарантии, требуемая сумма и расчетный счет Бенефициара для ее зачисления, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару.

Гарант не позднее пяти банковских дней со дня, следующего за днем получения Требования по гарантии со всеми приложенными к нему документами (если они предусмотрены условиями Гарантии), осуществляет уплату требуемой суммы либо отказывает в удовлетворении требования, о чем сообщает Бенефициару, указав причину отказа. Гарант отказывает Бенефициару в удовлетворении Требования по гарантии по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 376 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Исполнением обязательства Гаранта по Гарантии является фактическое поступление требуемой Бенефициаром денежной суммы на счет, указанный в Требовании по гарантии, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару.

Бенефициар имеет безусловное право на истребование сумм по Гарантии полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору в предусмотренные Договором сроки, а также в случае расторжения Договора.

Как следует из искового заявления, ввиду несвоевременного исполнения обязательств по данному договору и нарушения сроков передачи результата работ ООО «СКС» (до 18.12.2023 года ООО «Скансориум») была начислена неустойка в размере 2 787 559, 72 рублей, которая на основании вышеуказанной банковской гарантии, была перечислена кредитной организацией в адрес НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области».

Не согласившись с данным обстоятельством ООО «СКС» (до 18.12.2023 года ООО «Скансориум») обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области  в рамках дела № А47-10163/2021 с исковым заявлением к НО «Фонду модернизации ЖКХ Оренбургской области» с требованием о снижении суммы неустойки, перечисленной кредитной организацией некоммерческой организации «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» по банковской гарантии с 2 787 559, 72 рублей до 194 583, 60 рублей и взыскании 2 592 976, 12 рублей.

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 18.12.2023 года по делу №А47-10163/2021 исковые требования ООО «СКС» (до 18.12.2023 года ООО «Скансориум») к некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» удовлетворены частично - снижена сумма неустойки, перечисленной кредитной организацией по банковской гарантии до 471 740, 88 рублей и взыскано с НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» в пользу ООО «СКС» 2 315 818, 84 рублей, а также 32 121 рубль - расходы на уплату государственной пошлины.

В связи со вступлением в силу указанного решения 26.01.2024 выдан исполнительный лист серии ФС 047223043.

На основании исполнительного листа серии ФС 047223043 по делу № А47-10163/2021  ОСП Ленинского района г. Оренбурга ГУФССП России по Оренбургской области платежным поручением от 07.02.2024 перечислены обществу с ограниченной ответственностью денежные средства в размере 2 347 939 руб. 84 коп. (дата зачисления – 08.02.2024).

Ввиду признания судом в рамках дела № А47-10163/2021 неправомерности взывания неустойки, перечисленной в адрес ответчика кредитной организацией по банковской гарантии и взыскания в пользу ООО «СКС» вышеуказанных сумм, истцом начислены проценты за пользование чужими денежными средствами  по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период  с 09.03.2021 по 08.02.2024.

В целях досудебного порядка урегулирования спора, истец направил в адрес ответчика претензию № 12.02.2024 № 1 с требованием погасить задолженность по процентам.

В ответе на претензию от 19.02.2024 некоммерческая организация "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" указала на несогласие с периодом начисления процентов, требования истца не удовлетворены.

Поскольку предпринятые обществом  меры, направленные на досудебное урегулирование спора, результатов не дали, истец обратился в Арбитражный суд Оренбургской области с рассматриваемым исковым заявлением.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Как следует из статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 369 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства).

Согласно пункту 1 статьи 370 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, от отношений между принципалом и гарантом, а также от каких-либо других обязательств, даже если в независимой гарантии содержатся ссылки на них.

Сам институт банковской гарантии направлен на обеспечение бенефициару возможности получить исполнение максимально быстро, не опасаясь возражений принципала-должника, в тех случаях, когда кредитор (бенефициар) полагает, что срок исполнения обязательства либо иные обстоятельства, на случай наступления которых выдано обеспечение, наступили.

При этом правила пункта 1 статьи 370 ГК РФ о независимости банковской гарантии не исключают требований принципала к бенефициару о возмещении убытков, вызванных недобросовестным поведением последнего при получении суммы по банковской гарантии.

На основании статьи 373 Гражданского кодекса Российской Федерации банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии не предусмотрено иное.

Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия (статья 374 ГК РФ).

По пункту 1 статьи 376 Гражданского кодекса Российской Федерации гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены гаранту по окончании определенного в гарантии срока.

Таким образом, выплата по банковской гарантии покрывает убытки заказчика, наступившие по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком.

Как следует из пункта 2.9 договора от 11.09.2020 обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Исполнителем при направлении Заказчику подписанного с его стороны проекта договора. 

В соответствии с банковской гарантией МСБ/ОГ/20-002723 от 08.09.2020 (далее – банковская гарантия) ПАО Банк «ФК Открытие» (гарант) обязуется выплатить бенефециару - НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области  сумму гарантии в пределах 32 833 970 руб. 40 коп., в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом (ООО «Скансориум») основного обязательства по договору № ЛО-5/2020.

В связи с  несвоевременным исполнением обязательств по данному договору и нарушения сроков передачи результата работ ООО «СКС» была начислена неустойка в размере 2 787 559, 72 рублей, которая на основании банковской гарантии, была перечислена кредитной организацией в адрес НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» 

В подтверждение указанного представлены платежные поручения № 186 от 05.03.2021, № 191 от 09.03.2021.

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 18.12.2023 года по делу №А47-10163/2021 исковые требования ООО «СКС» (до 18.12.2023 года ООО «Скансориум») к некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» удовлетворены частично - снижена сумма неустойки, перечисленной кредитной организацией по банковской гарантии до 471 740, 88 рублей и взыскано с НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» в пользу ООО «СКС» 2 315 818, 84 рублей, а также 32 121 рубль - расходы на уплату государственной пошлины.

В ходе рассмотрения дела № А47-10163/2021 судом был установлен факт надлежащего исполнения обязательств по договору ЛО-5/2020 года и своевременная готовность и передача результата работ Подрядчиком в адрес Заказчика. 

Согласно ч. 3 ст. 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

Обстоятельства, установленные в рамках дела № А47-10163/2021 являются преюдициальными при рассмотрении настоящего дела в силу ч. 3 ст. 69 АПК РФ и не подлежат доказыванию вновь при рассмотрении данного дела.

На основании исполнительного листа серии ФС 047223043 по делу № А47-10163/2021  ОСП Ленинского района г. Оренбурга ГУФССП России по Оренбургской области платежным поручением от 07.02.2024 перечислены обществу с ограниченной ответственностью денежные средства в размере 2 347 939 руб. 84 коп. (дата зачисления – 08.02.2024).

В силу пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

Согласно пункту 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее –Постановление Пленума № 7) проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ). 

В силу пункта 2 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 

Нормами главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму убытков не допускается, поскольку проценты, как и убытки, - вид ответственности за нарушение обязательства и по отношению к убыткам, так же как и неустойка, носят зачетный характер. 

В обоснования периода начисления процентов истец указывает, что 

 в рамках дела №А47-10163/2021 ООО «СКС» с НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области взыскана сумма в размере 2 315 818 рублей 84 копейки. Денежные средства на основании банковской гарантии были перечислены кредитным учреждением НО «Фонду модернизации ЖКХ Оренбургской области» - 05.03.2021 года в размере 1 072 138 рублей 35 копеек (платёжное поручение №186 от 05.03.2021 года) и 09.03.2021 года в размере 1 715 421 рублей 37 копеек (платёжное поручение №191 от 09.03.2021 года). Следовательно, с указанных сроков у ООО «СКС» (до 18.12.2021 года ООО «Скансориум») появилось право требования оплаты процентов по ст. 395 ГК РФ - за каждый день просрочки вплоть до возврата суммы неустойки, перечисленной по банковской гарантии. Оплата данной неустойки на расчётный счёт ООО «СКС» по исполнительному листу поступила 08.02.2024 года.

Как следует из пункта 57 Постановления Пленума № 7 обязанность причинителя вреда по уплате процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, возникает со дня вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование потерпевшего о возмещении причиненных убытков, если иной момент не указан в законе, при просрочке их уплаты должником.

Таким образом, только с момента вступления в законную силу решения суда о взыскании убытков спорная сумма является задолженностью ответчика перед истцом в силу такого решения; просрочка вступившего в законную силу исполнения решения суда является основанием для взыскания процентов на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, решение суда от 18.12.2023 по делу № А47-10163/2021 лицами, участвующими в деле не обжаловалось и вступило в законную силу 19.01.2024

Таким образом, начисление истцом процентов на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму убытков в размере 2 315 818 руб. 84 коп. за период, предшествующий моменту вступления судебного акта по данному делу в законную силу, является неправомерным. 

На основании указанного, судом признается обоснованным период взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами с 19.01.2024 по 08.02.2024, и с учетом произведенного судом  расчета сумма процентов, подлежащих взысканию с ответчика  в пользу истца, составляет 21 259 руб. 98 коп.

С учетом изложенного,  исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СКС» подлежат частичному удовлетворению в размере 21 259 руб. 98 коп.

В удовлетворении остальной части требований следует отказать.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При обращении в суд с исковым заявлением, истец оплатил государственную пошлину в размере  15 613 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 16 от 12.03.2024.

Государственная  пошлина  по делу в сумме  526  руб. 00 коп. в соответствии со статьей  110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  относятся на ответчика и взыскивается в пользу истца пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "СКС"  удовлетворить частично.

  Взыскать с некоммерческой организации "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" в пользу  общества с ограниченной ответственностью "СКС"  проценты за период с 19.01.2024 по 08.02.2024 в размере 21 259 руб. 98 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 526 руб. 00 коп.

Исполнительный  лист выдать истцу в порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в законную силу.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

Судебные акты, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее следующего дня после дня их принятия.

По ходатайству указанных лиц копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

             Судья                                                                     С. Г. Федорова