АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-56515/2021

24 августа 2022 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 17 августа 2022 года 

Полный текст решения изготовлен 24 августа 2022 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.В. Высоцкой при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Д.Ю. Кайгородовой рассмотрел в судебном заседании дело № А60-56515/2021 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ПК Стройпрофиль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к акционерному обществу "Форум-Групп" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 79 827 273 руб. 26 коп.

при участии в судебном заседании

от истца: представители не явились, извещены надлежащим образом,

от ответчика: представители не явились, извещены надлежащим образом.

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Отводов составу суда не заявлено.

Общество с ограниченной ответственностью "ПК Стройпрофиль" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к акционерному обществу "Форум-Групп" о взыскании 79 827 273 руб. 26 коп., в том числе задолженности по договору № 27С от 01.09.2018 в размере 75 429 721 руб. 75 коп., неустойки за период с 26.03.2020 по 29.10.2021 в размере 4 397 551 руб. 51 коп., продолжать начислять неустойку по день фактической оплаты задолженности.

Определением арбитражного суда от 15.11.2021 исковое заявление принято к рассмотрению, назначено предварительное судебное заседание.

Определением арбитражного суда от 28.12.2021 суд завершил рассмотрение всех вынесенных в предварительное судебное заседание вопросов, назначил судебное заседание.

Определением арбитражного суда от 11.02.2022 производство по делу №А60-56515/2021 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления акционерного общества «Форум-Групп» о  включении требований в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственность «ПК Стройпрофиль» в рамках дела о его банкротстве № А60-7280/2021.

Определением арбитражного суда от 21.06.2022 производство по делу возобновлено.

Стороны явку в судебное заседание не обеспечили.

Определением арбитражного суда от 27.07.2022 суд отложил рассмотрение дела.

От ответчика 16.08.2022 поступили письменные пояснения на исковое заявление в порядке ст. 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Других ходатайств и заявлений в суд не поступало.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Свердловской области от 09.09.2021 по делу № А60-7280/2021 в отношении общества с ограниченной ответственностью "ПК Стройпрофиль" (ИНН 

<

***>) прекращена процедура наблюдения, общество с ограниченной ответственностью "ПК Стройпрофиль" признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев - до 03.03.2022. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего должника возложено на ФИО1 (ИНН 

<

***>, адрес для направления корреспонденции: 428003, 

<

...>), 3 1245703334 11171421 члена Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа.

Согласно п. 2 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ конкурсный управляющий обязан принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В результате анализа финансово-хозяйственной деятельности на основании собранных документов и информации  конкурсным управляющим было выявлено следующее: истец указывает, что у ответчика имеется задолженность в размере 75 429 721 руб. 75 коп.

Указанная задолженность образовалась следующим образом, а именно между обществом с ограниченной ответственностью "ПК Стройпрофиль" (подрядчик) (далее – ООО «ПК Стройпрофиль», истец) и акционерным обществом "Форум-Групп" (генеральный подрядчик) (далее – АО «Форум-Групп», ответчик) был заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: Комплекс многоквартирных домов смешанного использования со встроено-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, расположенный в квартале улиц Радищева-Сакко и Ванцетти-Шейнкмана в г. Екатеринбурге 3 этап строительства жилые дома № 1,2.3 и часть подземной автостоянки № 10.1 № 27 от 01.09.2018, по условиям которого, Подрядчик принимает на себя обязательство в полном объеме в соответствий с проектной документацией своими силами и материалами выполнить работы по устройству вентилируемых фасадов и светопрозрачных конструкций в соответствии с согласованной Сторонами рабочей документацией подрядчика шифр ЖК-Ф-9.2018-00 Генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

 Во исполнение условий договора истцом были выполнены работы на общую сумму 317 018 840 руб. 45 коп., что подтверждается актами о приемке выполненных работ, сертификатами оплаты, а также справками о стоимости выполненных работ и затрат. 

Указанные документы подписаны сто стороны ответчика, что подтверждает факт принятия работ на сумму 317 018 840 руб. 45 коп.

Генеральный подрядчик производит подрядчику оплату авансовых шинелей в объемах и сроки, указанные в Графике авансирования (Приложение № 10).

Расчеты за выполняемые подрядчиком по настоящему договору работы производятся Генеральным подрядчиком ежемесячно - в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета, выставленного подрядчиком на основании подписанных сторонами акта формы КС-2 и справки формы КС-3, а также сертификата оплаты.

Окончательная оплата выполненных работ по настоящему договору производится по окончании выполнения подрядчиком работ по настоящему договору в полном объеме и приемки результата Генеральным подрядчиком - в течение десяти банковских дней с момента получения Генеральным подрядчиком счет-фактуры, выставленной подрядчиком на основании подписанных сторонами Акта формы КС-2 (последнею) и справки формы КС-3, а также сертификата оплаты, при условии устранения подрядчиком всех замечаний и выполнения условий, предусмотренных п.п. 4.1.18., 4.1.19., 4.1.23 настоящего договора.

Истец указывает, что ответчиком оплачены работы в размере 241 589 118 руб. 70 коп., поскольку работы оплачены не в полном объеме у ответчика перед истцом образовалась задолженность в размере 75 429 721 руб. 75 коп.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием оплатить задолженность, образовавшуюся на основании выполнения работ в рамках договора  № 27 от 01.09.2018, однако претензия оставлена без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами права.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором указывает, что у ответчика перед истцом задолженность отсутствует по следующим основаниям.

В рамках исполнения договора истцом было выполнено работ на общую сумму 317 018 840 руб. 45 коп., что не оспаривается ответчиком, однако ответчик указывает, что во исполнение условий договора им в адрес истца были перечислены денежные средства в размере 323 543 252 руб. 93 коп., из которых 241 589 118 руб. 07 коп., перечисление денежных средств на счет истца, 66 103 192 руб. 22 коп. перечисление денежных средств в адрес третьих лиц по поручению (писем) истца, 15 850 942 руб. 01 коп. сертификат оплаты, удержание за услуги неподрядных услуг.

Из указанных выше обстоятельств следует, что у истца перед ответчиком имеется задолженность перед ответчиком в размере 6 136 997 руб. 15 коп., сумма неотработанного аванса по договору.

Наличие задолженности в размере 6 136 997 руб. 15 коп. подтверждается определением арбитражного суда от 04.04.2022 о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела № А60-7280/2021, которое вступило в законную силу.

Ответчик указывает, что оснований для удовлетворения заявленных требований нет ввиду отсутствия задолженности у ответчика перед истцом.

Суд, изучив представленные в материалы дела документы на основании ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отказывает в удовлетворении заявленных требований, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела работы в рамках спорного договора выполнены на общую сумму 317 018 840 руб. 45 коп., что не оспаривается ни истцом, ни ответчиком. Истец указывает на оплату выполненных работы ответчиком в размере 241 589 118 руб. 07 коп. Однако из представленных в материалы дела документов и пояснений ответчика следует, что работы оплачены в размере 323 543 252 руб. 93 коп., из них:

241 589 118 руб. 07 коп. - перечисление АО «Форум-групп» денежных средств на счет истца;

66 103 192 руб. 22 коп. - перечисление АО «Форум-групп» на основании писем истца денежных средств в пользу третьих лиц, в счет исполнения обязательств истца;

15 850 942 руб. 01 коп. - сертификат оплаты, представляющие собой удержание за услуги генподряда.

Ответчиком приведен сводный расчет общей стоимости работ, выполненных истцом согласно актам (включая сумму гарантийного удержания):

№ п/п

Дата КС

№ КС

Общая сумма КС

1

15.02.2019

1

1 852 677,22 руб.

2

28.02.2019

2

3 075 829,85 руб.

3

31.03.2019

3

2 584 472,05 руб.

4

31.03.2019

4

7 577 055,27 руб.

5

05.04.2019

5

1 161 170,68 руб.

6

30.04.2019

6

4 300 146,94 руб.

7

30.04.2019

7

9 741 701,09 руб.

8

31.05.2019

8

3 852 952,94 руб.

9

31.05.2019

8

6 829 565,82 руб.

10

30.06.2019

9

8 277 071,43 руб.

11

30.06.2019

10

5 406 639,23 руб.

12

31.07.2019

10

6 028 593,28 руб.

13

31.07.2019

11

13 957 657,04 руб.

14

31.08.2019

13

9 841 142,38 руб.

15

31.08.2019

15

7 331 449,02 руб.

16

31.08.2019

14

1 925 183,29 руб.

17

30.09.2019

15

13 358 469,29 руб.

18

30.09.2019

16

8 863 426,93 руб.

19

30.09.2019

17

188 188,58 руб.

20

31.10.2019

16

900 707,71 руб.

21

31.10.2019

17

11 752 400,05 руб.

22

31.10.2019

17

12 516 853,19 руб.

23

31.12.2019

18

15 889 662,12 руб.

24

31.12.2019

18

5 037 445,39 руб.

25

31.12.2019

19

6 169 680,92 руб.

26

31.01.2020

19

27 894 036,54 руб.

27

31.01.2020

19

8 141 195,11 руб.

28

31.01.2020

20

7 083 071,99 руб.

29

29.02.2020

21

6 894 514,39 руб.

30

29.02.2020

21

2 572 866,67 руб.

31

25.03.2020

22

13 194 727,21 руб.

32

25.03.2020

23

1 099 102,65 руб.

33

25.03.2020

24

964 578,88 руб.

34

25.03.2020

2

2 123 110,87 руб.

35

30.04.2020

20

39 752 566,27 руб.

36

30.06.2020

20

38 878 928,16 руб.

ИТОГО

317 018 840,45

В порядке предварительной оплаты истцу осуществлены платежи на общую сумму 323 543 252 руб. 93 коп., что следует из представленных в дело № А60-7280/2021 документов.

Размер неосвоенных истцом денежных средств (неотработанный аванс) по договору подряда составил 6 136 997 руб. 15 коп.

Ответчиком удержания с истца при расчетах не производились, все платежи произведены в порядке предварительной оплаты (авансом), аванс подрядчиком не отработан, что установлено вступившим в законную силу судебным актом в рамках дела № А60-7280/2021.

Фактически вступившими в законную силу судебными актами установлено отсутствие какой-либо задолженности в пользу истца, напротив имеется задолженность истца перед ответчиком по договору, истцом данный факт не оспорен, доказательств в опровержение факта наличия задолженности не представлено.

На основании изложенного, суд отказывает в удовлетворении заявленных требований ввиду отсутствия задолженности у ответчика перед истцом. Поскольку судом отказано в удовлетворении заявленных требований, то оснований для взыскания неустойки также не имеется.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации  судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку при принятии искового заявления была предоставлена отсрочка по оплате государственной пошлины истцу, то государственная пошлина подлежит взысканию в доход федерального бюджета с истца, так как в удовлетворении требований судом отказано. 

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований отказать.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПК Стройпрофиль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 000 руб. 00 коп.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                                            Е.В. Высоцкая