67/2023-274724(1) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  № 09АП-61378/2023

Дело № А40-48205/23

г. Москва

03 октября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2023 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 03 октября 2023 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи: Порывкина П.А., судей: Титовой И.А., Новиковой Е.М., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу МИНИСТЕРСТВА  ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на решение Арбитражного суда г. Москвы  от 17.07.2023 по делу № А40-48205/23 о взыскании с АО "ВНИИ "СИГНАЛ" в пользу  МИНОБОРОНЫ РОССИИ 7 000 000 руб. неустойки, по иску МИНОБОРОНЫ  РОССИИ (119019, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) к АО "ВНИИ "СИГНАЛ" (601903,  ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОВРОВ ГОРОД, КРУПСКОЙ УЛИЦА, 57, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании 23 814 188,34 руб.,  

При участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от 12.10.2022, от ответчика: ФИО3 по доверенности от 27.12.2022. 

У С Т А Н О В И Л:

Минобороны России (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города  Москвы с иском о взыскании с АО "ВНИИ "СИГНАЛ" (далее – ответчик) неустойки в  размере 23 814 188 руб. 34 коп. по государственному контракту от 28 декабря 2019 г. №  1920187318211412245201386.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2023 по делу № А4048205/23 исковые требования удовлетворены частично, а именно: с АО "ВНИИ  "СИГНАЛ" (601903, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОВРОВ ГОРОД, КРУПСКОЙ  УЛИЦА, 57, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу МИНОБОРОНЫ  РОССИИ (119019, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) взыскано 7 000 000 (семь миллионов) руб.  неустойки. В остальной части требования оставлены без удовлетворения.  

Министерство обороны Российской Федерации, не согласившись с выводами  суда, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить,  принять по делу новый судебный акт.  

В судебном заседании представитель подателя апелляционной жалобы доводы  апелляционной жалобы поддержал по мотивам, изложенным в ней.  

Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной  жалобы.  

Через канцелярию суда поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу,  который в порядке статьи 262 АПК РФ приобщен судом к материалам дела.  

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст. ст. 266 и  268 АПК РФ.  

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции, вопреки доводам  апелляционной жалобы, полно и всесторонне исследовал имеющие значение для  правильного рассмотрения дела обстоятельства, правильно применил и истолковал  нормы материального и процессуального права.  

Как установлено судом первой инстанции, между Министерством обороны  Российской Федерации (далее - Заказчик) и АО "ВНИИ "СИГНАЛ" (далее -  Поставщик) заключен государственный контракт от 28 декабря 2019 г. №  1920187318211412245201386.  

Поставщиком осуществлена поставка Товара с нарушением срока,  установленного Контрактом.  

Вместе с тем, Поставщиком осуществлена поставка Товара с нарушением срока,  установленного Контрактом, 27.12.2021 и 28.12.2021, что подтверждается актами  приема-передачи Товара №№ 4/33, 4/32, 4/34, на общую сумму 226 346 705 руб. 07 коп.  

Просрочка составляет 372 дня за период с 22.12.2020 по 28.12.2021.  По расчету истца неустойка составила 23 814 188 руб. 34 коп.  

В соответствии с разделом 11 Контракта Минобороны России в адрес АО  «ВНИИ «Сигнал» направлена претензия от 20 октября 2022 № 207/8/3877, которая  оставлена без удовлетворения.  

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения  Минобороны России в суд с иском.  

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с  обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных законом.  

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую  деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или  закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской  деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным  подобным использованием.  

В соответствии со ст. 526 ГК РФ «По государственному или муниципальному  контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд (далее -  государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется  передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его  указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется  обеспечить оплату поставленных товаров».  

В соответствии со ст. 525 ГК РФ, «К отношениям по поставке товаров для  государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки  (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса».  

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Судом проверен расчет неустойки и признан правильным. 

Как верно отметил суд первой инстанции, ответчик в своем отзыве на иск не  отрицает допущенную просрочку исполнения обязательств и ссылается на то, что  просрочка исполнения обязательств со стороны Ответчика возникла по вине  соисполнителей.  

Ответчик, зная о невыполнении Договора от 20.01.2020 г. с АО «ГК Промтех»,  заключил новый договор 21.09.2020 г. с этим же соисполнителем, тем самым взял на  себя риски невыполнения обязательств.  

В соответствии с п. 3.1.3. Контракта Исполнитель вправе привлекать к  выполнению контракта соисполнителей (третьих лиц).  

Невыполнение соисполнителем (третьим лицом) обязательств перед  Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения Контракта.  

Ответчиком в суде первой инстанции заявлено ходатайство о применении  положений ст. 333 ГК РФ относительно суммы взыскиваемой неустойки.  

В пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 ГК РФ"  разъяснено, что исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в  своем интересе (статья 1 ГК РФ), неустойка может быть снижена судом на основании  статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны  ответчика. При этом ответчик должен представить доказательства явной  несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что  возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие  нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.  

Соответствующее заявление о снижении размера неустойки сделано ответчиком  в суде первой инстанции.  

Суд первой инстанции, с учетом баланса интереса сторон, компенсационного  характера неустойки, а также принципа соразмерности начисленной неустойки  последствиям неисполнения обязательства ответчиком, правомерно применил  положения статьи 333 ГК РФ и уменьшил сумму подлежащей взысканию неустойки до  7 000 000 руб.  

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для переоценки  вывода суда первой инстанции о соразмерности присужденной неустойки  последствиям допущенного нарушения.  

Таким образом, апелляционный суд соглашается с выводами суда первой  инстанции об удовлетворении исковых требований в размере 7 000 000 руб.  

Аргументированных доводов, основанных на доказательственной базе,  опровергающих выводы суда, изложенные в решении, и позволяющих изменить или  отменить обжалуемый судебный акт, заявителем на момент рассмотрения  апелляционной жалобы не представлено.  

Заявителем жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и  бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы, изложенные в  апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не  учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое  значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и  

законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с  чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.  

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции установлены все  фактические обстоятельства по делу, правильно применены нормы материального и  процессуального права, принято законное и обоснованное решение и у суда  апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены обжалуемого судебного  акта Арбитражного суда города Москвы.  

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену  судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.  

Руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2023 по делу № А4048205/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев  со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского  округа.  

Председательствующий судья: П.А. Порывкин  Судьи: Е.М. Новикова   И.А. Титова  

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.