АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25

http://www.kursk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А35-9090/2022

12 декабря 2022 года

г. Курск

 

Резолютивная часть решения объявлена 05.12.2022.

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ АЛЬП-ВЫСОТКА» (ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» (ИНН 

<

***>) 

о взыскании задолженности по договору №2суб/21-0358 от 27.05.2021 в размере 972 936 руб. 18 коп., пени в размере 241 288 руб. 17 коп. за период с 31.01.2022 по 05.10.2022, расходов по оплате госпошлины.

В судебном заседании участвуют представители:

от истца: ФИО2 – по доверенности от 20.05.2021,

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом.

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ АЛЬП-ВЫСОТКА» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» о взыскании задолженности по договору №2суб/21-0358 от 27.05.2021 в размере 972 936 руб. 18 коп., пени в размере 241 288 руб. 17 коп. за период с 31.01.2022 по 05.10.2022, расходов по оплате госпошлины.

В судебном заседании представитель истца устно ходатайствовал об уточнении исковых требований, согласно которому просит взыскать задолженность по договору №2суб/21-0358 от 27.05.2021 в размере 972 936 руб. 18 коп., пени в размере 241 288 руб. 17 коп. за период с 31.01.2022 по 05.10.2022, продолжая начисление пени по день фактического исполнения обязательства. Уточненные требования приняты судом к производству. 

Соглашение сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным требованиям и возражениям.     

Представитель истца поддержал заявленные требования с учетом уточнения.

Дело рассмотрено в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ АЛЬП-ВЫСОТКА», адрес - 443001, 

<

...>, этаж 14, помещение 4, ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН 29.04.2008, ИНН 

<

***>.

Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой», адрес - 305029, 

<

...>, офис 50А, ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН 18.11.2014, ИНН 

<

***>.

27.05.2021 года между ООО «Спецмонтажстрой» (Подрядчик) и ООО «КОМПАНИЯ АЛЬП-ВЫСОТКА» (Субподрядчик) заключен договор субподряда №2суб/21-0358, по условиям которого Субподрядчик обязуется выполнить Антикоррозионные работы технологических трубопроводов Установки АВТ-5 АО «КНПЗ» в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, Техническим Заданием и передать Подрядчику завершенный строительством Объект, а Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его (п.2.1).

Согласно пункту 3.1  договора цена договора, в соответствии с расчетом цены договора (Приложение № 2) согласно дополнительному соглашению. 

В силу п.4.1, оплата выполненных Работ производится Подрядчиком после предоставления Субподрядчиком оригиналов соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст. 13 Договора и подписания в соответствии со ст. 6 Договора Актов сдачи-приемки в следующие сроки:

4.1.1. не ранее 45 (сорока пяти), но не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней; после поступления денежных средств на счёт Подрядчика.

4.1.2. не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, в случае если Субподрядчик является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с федеральным законом №209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».В пункте 5.2 договора приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 3-х дней после получения им сообщения от Подрядчика о выполнении комплекса работ поэтапно.

Субподрядчик обязан передать счета-фактуры одновременно с Актом приема-передачи оказанных услуг в течение 5 (пяти) календарных дней по завершении оказания услуг, но не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным.

Счета-фактуры на уплаченные по договору авансы Субподрядчик обязан передать Подрядчику в течение 5 календарных дней с момента зачисления авансового платежа на  счет Субподрядчика , но не позднее 3 числа месяца, следующего за месяцем зачисления аванса.

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

Сторона вправе задерживать оплату по настоящему Договору в случае нарушения требований настоящего Договора по оформлению счетов-фактур до их устранения.

В течение 5 (пяти) дней Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующий требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений (п.4.9).

Пунктом 5.1 установлены календарные сроки выполнения Работ по Договору:

срок начала выполнения Работ - с момента подписания договора, срок окончания выполнения Работ - октябрь 2021.

Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Субподрядчиком согласно Графику производства Работ (Приложение № 4) по законченным Этапам и Оперативному Графику производства Работ.

Приемка выполненных работ производится исключительно по законченным этапам Работ по Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Этапность Работ определяется сторонами в Приложении № 4 (п.6.1.1).

В течение 5 (пяти) рабочих дней (но не позднее 25-го числа месяца окончания Этапа работ) после проведения строительного контроля Подрядчика Субподрядчик направляет Подрядчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительной и первичной учетной документации в соответствии с ст. 13 Договора, подписанный и заверенный уполномоченным представителем Субподрядчика с официальным сопроводительным письмом для проведения приемки Этапа Работ (п.6.1.2).

Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает полученную от Субподрядчика исполнительную и первичную учетную документацию, осуществляет приемку работ и направляет подписанный со своей стороны комплект исполнительной и первичной учетной документации Субподрядчику.

Согласно п.6.2.4, приемка законченного строительством Объекта производится по Акту приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11)/Акту приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (по форме КС-14) и актов завершения ПНР.

При отсутствии Дефектов в выполненных Работах, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта первичных учетных документов и исполнительной документации подписать Акт сдачи-приёмки законченного строительством Объекта, по форме Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11)/Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

В случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению Рабочей документации, переданной Субподрядчику или допущения Дефектов выполненных Работ и/или в случае неправильного ведения исполнительной документации, либо ее отсутствия/некомплектности, а также при наличии не устранённых нарушений природоохранного законодательства на месте производства работ Подрядчик вправе отказаться от приемки выполненных Субподрядчиком работ до момента устранения выявленных Дефектов/Недостатков (п.6.1.4).

Как следует из искового заявления и представленных в материалы дела документов, 30.11.2021 между ООО «Компания Альп-Высотка» и ООО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» были подписаны Акты о приемке выполненных работ, по форме КС-2:

• № 1 на сумму 163 982 руб. 40 коп.;

• № 3-1490-ТХ-СД-1560 на сумму 4 778 руб. 90 коп.;

• № 3-1489-ТХ-СД-1561 на сумму 2 762 руб.;

• № 3-1448-ТХ-СД-1334 на сумму 193 309 руб. 14 коп.;

• № 3-1456-ТХ-СД-1395 на сумму 19 546 руб. 66 коп.;

• № 3-1147-ТХ-СД-292-1 на сумму 232 268 руб. 90 коп.;

• № 3-1411-ТХ-СД-1064 на сумму 114 055 руб. 69 коп.;

• № 3-1455-ТХ-СД-1350 на сумму 57 494 руб. 45 коп.;

• № 3-1458-ТХ на сумму 65 624 руб. 95 коп.;

• № 3-1491-ТХ-СД-1551 на сумму 4 774 руб. 06 коп.;

• № 3-1463-ТХ-СД-1704 на сумму 104 417 руб. 05 коп.;

• № 3-1418-ТХ-СД-1201 на сумму 69 527 руб. 82 коп.;

на общую сумму 1 032 542 руб. 02 коп. (включая НДС 20%).

30.11.2021 между ООО «Компания Альп-Высотка» и ООО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» были подписаны справки о стоимости выполненных работ и затрат, по форме КС-3, на общую сумму 1 032 542 руб. 02 коп. (включая НДС 20%).

К каждому из вышеуказанных актов КС-2 и Справок КС-3 Сторонами были подписаны Журнал учета выполненных работ, а также справки о стоимости использованных материалов подрядчика.

Однако ответчиком обязательство по своевременной и полной оплате выполненных работ исполнено не было, что явилось основанием для начисления процентов за пользование чужими денежными средствами и обращения истца в суд с настоящим иском.

Ответчик письменного отзыва не представил, заявленные требования не оспорил.

Арбитражный суд считает уточненные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом. 

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В силу пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В пункте 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. 

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Факт выполнения истцом соответствующих работ подтверждается представленными в материалы дела доказательствами и не оспорен ответчиком.

Доказательств оплаты выполненных работ в полном объеме ответчиком в материалы дела не представлено.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Частью 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Ввиду изложенного, оценив представленные документы, суд приходит к выводу о том, что поскольку ответчик своевременно не оплатил задолженность, исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в части взыскания сумму задолженности по договору №2суб/21-0358 от 27.05.2021 в размере 972 936 руб. 18 коп.

В силу статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (пеней, штрафом), предусмотренной  законом или договором.

Согласно части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 3.16 договора, в остальном, что не предусмотрено Договором и Приложениями к нему, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

Частью 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Ввиду неоплаты ответчиком в полном объеме и в установленный срок стоимости выполненных работ, суд считает обоснованным начисление истцом неустойки, производя расчет по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Однако, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 №497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, неустойка подлежит взысканию за период с 31.01.2022 по 31.03.2022, с 01.10.2022 по 05.12.2022 в размере 122 589 руб. 96 коп., продолжив начисление неустойки по день фактического исполнения обязательств.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 6 - 10, 49, 65, 70, 110, 167-170, 176, 177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ АЛЬП-ВЫСОТКА» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ АЛЬП-ВЫСОТКА» (ИНН 

<

***>) 1 095 526 руб. 14 коп., в том числе задолженность по договору №2суб/21-0358 от 27.05.2021 в размере 972 936 руб. 18 коп., пени за период с 31.01.2022 по 31.03.2022, с 01.10.2022 по 05.12.2022 в размере 122 589 руб. 96 коп., продолжив начисление неустойки по день фактического исполнения обязательств, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 22 684 руб. 00 коп.

В остальной части исковых требований отказать.

Настоящее решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                                 А.Ю. Беседина