ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-160435/23-15-1312

21 ноября 2023 г.

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 ноября 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 21 ноября 2023 года.

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "АТОЛЛ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании неустойки по Контракту №1922187304291452209002219 от 19.12.2019г.

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон: 

от истца – ФИО2 по дов. №207/4/245д от 12.10.2022 г.

от ответчика– ФИО3 по дов. №1/КУ от 14.09.2023 г. 

 

УСТАНОВИЛ:

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "АТОЛЛ" (далее – ответчик) о взыскании неустойки по государственному контракту по №1922187304291452209002219 от 19.12.2019г. в размере 306 507.07 руб.

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Ответчик, представил отзыв на исковое заявление, согласно которому требования не признает, ходатайствовал об оставлении искового заявления без рассмотрения.

Суд, исследовав материалы дела, изучив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим  основаниям.

Как следует из материалов дела, между Министерством обороны Российской Федерации (далее -Заказчик) и АО «НИИ «АТОЛЛ» (далее - Исполнитель) заключен государственный контракт от 19 декабря 2019 г. № 1922187304291452209002219 на выполнение опытно-конструкторской работы (далее - ОКР).

Согласно п. 1.1 Контракта, Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок выполнить ОКР в объеме, соответствующую) качеству, результату и иным требованиям, установленными Контрактом и своевременно сдать Заказчику ее результат.

В соответствии с пунктом 8.1 Контракта стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Согласно ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Расчет неустойки за просрочку исполнения обязательств по Контракту складывается из следующих показателей: цена отдельного этапа исполнения Контракта х 1/300 х размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) х количество дней просрочки.

В соответствии с п. 2.2 Контракта срок выполнения Исполнителем этапа № 4 ОКР стоимостью 4 211 457,88 руб. - 31 августа 2022 г.

Датой исполнения обязательств по отдельным этапам ОКР является дата подписания Заказчиком (Представителем Заказчика) Акта сдачи-приемки выполненного этапа ОКР (п. 4.3 Контракта).

Исполнителем нарушены условия Контракта, обязательства по этапу № 4 ОКР по состоянию на 17 марта 2023 г. не выполнены.

Просрочка исполнения обязательства с 1 сентября 2022 г. по 17 марта 2023 г. составляет 198 дней.

Ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии - 7,5%.

Размер неустойки за просрочку выполнения этапа № 4 ОКР составляет: 4 211 457,88 руб. х 1/300 х 7,5% х 198 дней (с 1 сентября 2022 г. по 17 марта 2023 г.) = 208 467,17 руб.

В соответствии с п. 2.2 Контракта срок выполнения Исполнителем этапа № 5 ОКР стоимостью 3 087 871,00 руб. - 10 ноября 2022 г.

Датой исполнения обязательств по отдельным этапам ОКР является дата подписания Заказчиком (Представителем Заказчика) Акта сдачи-приемки выполненного этапа ОКР (п. 4.3 Контракта).

Исполнителем нарушены условия Контракта, обязательства по этапу № 5 ОКР по состоянию на 17 марта 2023 г. не выполнены.

Просрочка исполнения обязательства с 11 ноября 2022 г. по 17 марта 2023 г. составляет 127 дней.

Ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии - 7,5%.

Размер неустойки за просрочку выполнения этапа № 5 ОКР составляет:

3 087 871,00 руб. х 1/300 х 7,5% х 127 дней (с 11 ноября 2022 г. по 17 марта 2023 г.) = 98 039,90 руб.

Общий размер неустойки по этапам №4, №5 ОКР составляет: 208 467,17 руб. + 98 039,90 руб. = 306 507,07 руб.

Истцом в адрес Ответчика были направлены претензии от 20 марта 2023 г.: № 207/8/пр-433, № 207/8/пр-433.1, № 207/8/пр-439, № 207/8/пр-439.1 которые оставлены Ответчиком без удовлетворения.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению, в силу следующего.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом, а при исполнении обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, договором (ст. 310 ГК РФ).

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором исковые требования не признал, просил оставить исковое заявление без рассмотрения.

В соответствии с п. 5 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» под текущими платежами понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Согласно п.2 ст.5 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов.

Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих процедур, применяемых в деле о банкротстве, не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве.

В соответствии с п. 2.2 Контракта срок выполнения Исполнителем этапа № 4 ОКР стоимостью 4 211 457,88 руб. - 31 августа 2022 г.

Датой исполнения обязательств по отдельным этапам ОКР является дата подписания Заказчиком (Представителем Заказчика) Акта сдачи-приемки выполненного этапа ОКР (п. 4.3 Контракта).

Исполнителем нарушены условия Контракта, обязательства по этапу № 4 ОКР по состоянию на 17 марта 2023 г. не выполнены.

Просрочка исполнения обязательства с 1 сентября 2022 г. по 17 марта 2023 г. составляет 198 дней.

Ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии - 7,5%.

Размер неустойки за просрочку выполнения этапа № 4 ОКР составляет: 4 211 457,88 руб. х 1/300 х 7,5% х 198 дней (с 1 сентября 2022 г. по 17 марта 2023 г.) = 208 467,17 руб.

В соответствии с п. 2.2 Контракта срок выполнения Исполнителем этапа № 5 ОКР стоимостью 3 087 871,00 руб. - 10 ноября 2022 г.

Датой исполнения обязательств по отдельным этапам ОКР является дата подписания Заказчиком (Представителем Заказчика) Акта сдачи-приемки выполненного этапа ОКР (п. 4.3 Контракта).

Исполнителем нарушены условия Контракта, обязательства по этапу № 5 ОКР по состоянию на 17 марта 2023 г. не выполнены.

Просрочка исполнения обязательства с 11 ноября 2022 г. по 17 марта 2023 г. составляет 127 дней.

Ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии - 7,5%.

Размер неустойки за просрочку выполнения этапа № 5 ОКР составляет: 3 087 871,00 руб. х 1/300 х 7,5% х 127 дней (с 11 ноября 2022 г. по 17 марта 2023 г.) = 98 039,90 руб.

Общий размер неустойки по этапам №4, №5 ОКР составляет: 208 467,17 руб. + 98 039,90 руб.= 306 507,07 руб.

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) разграничивает задолженность, подлежащую включению в реестр требований кредиторов должника в рамка дела о банкротстве, и текущие платежи, которые подлежат взысканию в общеисковом порядке.

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона о банкротстве под текущими платежами понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом.

В соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве по денежным обязательством обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному ГК РФ, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию.

Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.

Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов.

Соответственно, к указанным требованиям не применяются положения п. 1 ст. 4 Закона о банкротстве.

Более того, в п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве отражено, что с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

То есть, для определения того, является ли денежное требование текущим, необходимо установить дату его возникновения и соотнести указанную дату с моментом возбуждения дела о банкротстве.

Сам по себе факт заключения Контракта до возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) не свидетельствует о том, что требования об исполнении обязательств по Контракту в целом являются реестровыми и подлежат рассмотрению в деле о несостоятельности (банкротстве) должника.

Согласно материалам дела, срок исполнения обязательств:

-           по этапу № 4 ОКР - 31 августа 2022 г.

-           по этапу № 5 ОКР - 10 ноября 2022 г.

Дело о банкротстве в отношении должника возбуждено определением Арбитражного суда Московской области от 25 февраля 2022 г. по делу №А41-715/2022.

Расчет неустойки Минобороны России произведен:

-           по этапу № 4 ОКР за период с 1 сентября 2022 г. по 17 марта 2023 г.;

-           по этапу № 5 ОКР за период с 11 ноября 2022 г. по 17 марта 2023 г.

Т.е. в отношении обязательств, возникших после возбуждения в отношении должника дела о банкротстве.

В связи с чем, заявленная сумма неустойки относится к текущим платежам, начисление которой не прекращается с даты введения в отношении Ответчика процедуры наблюдения, которая введена определением Арбитражного суда Московской области от 24 мая 2022 г. по делу № А41-715/2022.

В связи с чем, основания для оставления искового заявления без рассмотрения и отказа во взыскании заявленной суммы неустойки за указанный период не имеется.

Указанная позиция также подтверждаются судебной практикой, судебными актами по делам №№: А40-62178/2018, А40-284939/2018, А40-136016/2020, А40-136017/2020, А40-136019/2020, А40-136018/2020, А40-267076/2021.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что ответчик уклоняется от ответственности за нарушение срока исполнения обязательств по контракту по формальным основаниям, в связи с чем суд доводы ответчика, изложенные в отзыве, признает формализованными, поскольку они опровергаются фактическими обстоятельствами дела и направлены на неправомерное уклонение от ответственности за нарушение срока исполнения обязательств по контракту.

В силу пункта 1 статьи 330 Кодекса неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

Согласно ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Расчет неустойки за просрочку исполнения обязательств по Контракту складывается из следующих показателей: цена отдельного этапа исполнения Контракта х 1/300 х размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) х количество дней просрочки.

Размер неустойки за просрочку выполнения этапа № 4 ОКР составляет: 4 211 457,88 руб. х 1/300 х 7,5% х 198 дней (с 1 сентября 2022 г. по 17 марта 2023 г.) = 208 467,17 руб.

Размер неустойки за просрочку выполнения этапа № 5 ОКР составляет: 3 087 871,00 руб. х 1/300 х 7,5% х 127 дней (с 11 ноября 2022 г. по 17 марта 2023 г.) = 98 039,90 руб.

Учитывая изложенное, суд считает требования истца правомерными и подлежащими  удовлетворению, а неустойка (пеня) по договорам в сумме 306 507,07 руб. подлежит принудительному взысканию с ответчика в пользу истца, так как от него не поступили документы в суд, подтверждающие ее оплату и так как односторонний отказ от исполнения обязательств, в данном случае денежных, противоречит  ст. ст.  309, 310 ГК РФ.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 190, 193, 307-309, 330, ГК РФ, ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "АТОЛЛ" в пользу МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ неустойку в размере 306 507,07 руб.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "АТОЛЛ" в Федеральный бюджет РФ государственную пошлину в размере 9 130 руб.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

 

СУДЬЯ:                                                                                          М.А. Ведерников