16_4822400  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-1050/2023

г. Белгород

25 июля 2023 года

Арбитражный суд Белгородской области  

в составе судьи Танделовой З. М. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио и  видеозаписи секретарём судебного заседания ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ООО "Сибгипрошахт"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к АО "ОЭМК ИМ. А.А. УГАРОВА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  о взыскании 1 619 172 руб. 

и иску АО "ОЭМК ИМ. А.А. УГАРОВА" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к ООО "Сибгипрошахт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 523 819,15 руб. 

 при участии в судебном заседании:  

от ООО "Сибгипрошахт": представитель ФИО2, доверенность от 03.11.2023,  диплом (онлайн-участие);  

от АО "ОЭМК ИМ. А.А. УГАРОВА": представитель ФИО3, доверенность от  16.11.2022, диплом (онлайн-участие).  

Руководствуясь ст. 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

1.Иск ООО "Сибгипрошахт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  удовлетворить частично.  

2.Взыскать с АО "ОЭМК ИМ. А.А. УГАРОВА" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО "Сибгипрошахт" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) задолженность по оплате стоимости выполненных проектно-изыскательских работ по «Техническому перевооружению склада накопления и  отгрузки готовой продукции с устройством шаропрокатного стана 20-60» по  договору подряда № 7871/ОЕ-212891 от 04.10.2021 в размере 38 098,18 руб. и  судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2000 руб.  

3.В удовлетворении остальной части иска отказать. 

4.Иск АО "ОЭМК ИМ. А.А. УГАРОВА" удовлетворить полностью.  

5.Взыскать с ООО "Сибгипрошахт" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу АО "ОЭМК ИМ. А.А. УГАРОВА" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) неустойку за нарушение срока выполнения проектно-изыскательских работ по «Техническому перевооружению склада накопления и  отгрузки готовой продукции с устройством шаропрокатного стана 20-60», по  договору подряда № 7871/ОЕ-212891 от 04.10.2021 за период с 04.05.2022 по  03.10.2022 в размере 523 819,15 рублей и судебные расходы по уплате  госпошлины в размере 13 476 рублей.  

6.Произвести зачет взаимных исковых требований, в результате  которого:  

7.Взыскать с ООО "Сибгипрошахт" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу АО "ОЭМК ИМ. А.А. УГАРОВА" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) денежные средства в размере 497 196,97 руб.  

8. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

9. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области в месячный  срок.  

Судья Танделова З. М.