АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: 8 (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: 8 (4842) 599-457 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-6706/2022

02 марта 2023 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Пашковой Е.А.,  

руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

удовлетворить иск полностью. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Авангард24" за свой счет  

устранить выявленные в период течения гарантийного срока недостатки выполненных  

работ по контракту от 27.09.2021 № 43, а именно: устранить течь водопровода в подвале,  

устранить трещины на фасаде и произвести покраску фасада, закрепить надлежащим  

образом металлопрофиль на цоколе и привести его в надлежащее состояние,  

отремонтировать кровлю котельной и произвести обработку стен противогрибковыми  

средствами, а также привести стены в надлежащий вид. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Авангард24" предоставить  

муниципальному казенному учреждению "Центр культурного развития" исполнительную  

документацию на выполненные виды работ: Технические решения 1. Вход крыльцо площадка; 2. Фасад замена утеплителя + лаборатория на отрыв; 3. Увеличение объема утеплителя фасада; 4. Штукатурка стен фасада; 

5. Исполнительная таблица помещениям (подвал и котельную);  Акты освидетельствования скрытых работ  

1. Устройство молниезащиты; 2. Монтаж утеплителя на стены фасада; 3. Устройство сетки по утеплителю стен фасада; 4. Перетирка стен фасада; 5. Окраска стен фасада; 6. Штукатурка стен фасада; 7. Устройство каркаса цоколя с пароизоляцией; 8. Обшивка цоколя по каркасу; 9. Устройство отлива цоколя; Исполнительные схемы 1. Фасад утепление (проставить размеры); 2. Фасад штукатурка (проставить размеры); 3. Молниезащита (проставить размеры); 4. Цоколь с разрезом (проставить размеры). 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Авангард 24" в пользу  

муниципального казенного учреждения "Центр культурного развития"  

12 000 руб. расходов истца на уплату государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  

Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через  

Арбитражный суд Калужской области. 

Судья Е.А. Пашкова