РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А69-1087/2017

г. Кызыл

12 июля 2017 года

Арбитражный суд Республики Тыва, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180,  181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

В удовлетворении искового заявления общества с ограниченной ответственностью  "Мегастрой" к государственному казённому учреждению Республики Тыва "Госстройзаказ" о признании права общества приостановить исполнение обязательства по передаче  квартир в рамках государственного контракта № 30-15 от 16.11.2015 г. до надлежащего ис- полнения государственным казённым учреждением Республики Тыва "Госстройзаказ"  встречного обязательства по пункту 2.3. контракта (предварительная оплата) и на после- дующие 41 календарный день в соответствии с пунктом 9.1 контракта, взыскании с госу- дарственного казённого учреждения Республики Тыва "Госстройзаказ" в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Мегастрой" предусмотренной пунктом 2.3 государствен- ного контракта № 30-15 от 16.11.2015 г. предварительной оплаты в сумме 10 905 800 руб.  отказать полностью.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Мегастрой" государствен- ную пошлину в доход федерального бюджета в размере 65 529 руб.  

Решение может быть обжаловано в Третий арбитражный апелляционный суд в месяч- ный срок со дня его принятия путём подачи апелляционной жалобы через Арбитражный  суд Республики Тыва.  

Судья Ш.С.Чигжит