ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело  № А40-103552/19-151-895

г. Москва

12 ноября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 октября 2019  года 

Решение в полном объеме изготовлено 12 ноября 2019  года

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В. (в порядке ст. 18 АПК ПФ)

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ПАО «Газпром автоматизация»

к ответчику ООО «ПК и БЗ»

о взыскании 3 121 748 руб. 32 коп. 

при участии

от истца: ФИО2 по доверенности от 22.07.2019 года. 

от ответчика: ФИО3 по доверенности 

У С Т А Н О В И Л:

ПАО «Газпром автоматизация» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ответчику – ООО «ПК и БЗ» о взыскании неустойки по договорам №3/190114 от 01.07.2015 и №4/190314 от 01.07.2015 в сумме 3 121 748, 32 руб. 

Определением от 31.07.2019 в порядке ст. 18 АПК РФ произведена замена состава суда. 

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу. 

Представитель истца настаивал на удовлетворении требований в полном объеме. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения требований, заявил о пропуске срока исковой давности в части требований о взыскании неустойки за период с 08.02.2016 по 10.04.2017. 

Изучив материалы дела и представленные доказательства, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из представленных доказательств, договоры заключены на выполнение проектных и изыскательских работ в отношении объекта «Цифровая радиорелейная линия связи Константиновка-Апастово» (договор № 3/190114) и объекта «Модернизация РРЛ Псков-В. Луки» (договор № 4/190114).

Договорами установлен срок окончания работ: 28 февраля 2015.

Пунктами 12.1 договоров предусмотрено, что они вступают в силу с момента их подписания и распространяются на отношения сторон с 1 июля 2014.

В соответствии с п. 2.1 договоров, сроки выполнения работ (этапов работ) согласовываются сторонами в календарном плане (приложение №2). Договором от 01.07.2015 №3/190114 срок окончания этапа работ №1 (комплексные инженерные изыскания) был установлен 31.03.2015. Договором от 01.07.2015 №4/190314 срок окончания этапа работ №1 (комплексные инженерные изыскания) был установлен 28.02.2015. 

Согласно п. 4.5 договоров по окончании работ (этапа работ) субподрядчик передает подрядчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему перечня выпущенной документации. Последние акты сдачи-приемки работ по этапу №1 договоров были направлены субподрядчиком в адрес подрядчика 10.04.2017. 

В соответствии с п. 8.7 договоров, за нарушение субподрядчиком (или привлеченными им третьими лицами) сроков выполнения работ (начала работ, этапов работ) или срока окончания работ в целом, предусмотренных календарным планом, подрядчик вправе взыскать с субподрядчика неустойку в виде пени из расчета 0.05% от стоимости невыполненных в срок работ (этапа работ), но не более 20% от стоимости невыполненного в срок этапа работ за каждый день просрочки. 

Размер неустойки за просрочку выполнения работ по этапу 1 по договору от 01.07.2015 №3/190114 составляет 954 224 руб., размер неустойки за просрочку выполнения работ по этапу 1 по договору от 01.07.2015 №4/190314 составляет 2 167 524, 32 руб. 

Общий размер неустойки  составляет 3 121 748, 32 руб. 

Удовлетворяя заявленные требования в части, суд руководствуется следующим. 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК РФ).

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (ст. 708 ГК РФ).

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст. 758 ГК РФ).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (ст. 330 ГК РФ).

В соответствии с п. 4.1 договоров передача подрядчику результатов работ осуществляется по передаточному документу (по форме приложения № 5) по этапам работ, определенным в календарном плане (приложение № 2). Субподрядчик обязуется передавать подрядчику результаты выполненных работ нарочным. В этом случае датой передачи результатов работ подрядчику является дата подписания передаточного документа уполномоченным лицом подрядчика, получившим результаты работ (п. 4.2 договоров). Приемка результатов работ осуществляется уполномоченным лицом подрядчика по комплектности, указанной в передаточном документе, в срок не более 5 календарных дней с момента постановки на передаточном документе отметки уполномоченного лица подрядчика о начале приемки. Если по истечении указанного срока подрядчик не заявит о несоответствии переданных субподрядчиком результатов работ данным, указанным в передаточном документе субподрядчика, то результаты работ будут считаться переданными в объеме и по комплектности, указанных в передаточном документе субподрядчика. При подписании передаточного документа субподрядчика уполномоченное лицо подрядчика обязано указать дату получения результатов работ и указать свою должность и ФИО (п. 4.4 договоров).

К договорам были составлены по форме приложения № 5 передаточные документы, которые в свою очередь были подписаны лицами, непосредственно осуществляющими взаимодействие при исполнении договоров.

Ответчиком заявлено о пропуске срока исковой давности за период с 08.02.2016 по 10.04.2017. Ходатайство мотивировано тем, что согласно пункту 2.1. договоров сроки выполнения работ (этапов работ) согласовывается сторонами в календарном плане (приложение № 2 к Договорам. Договором от 01.07.2015 № 3/190114 срок окончания этапа работ № 1 (комплексные инженерные изыскания) был установлен 31.03.2015. Договором от 01.07.2015 № 4/190314 срок окончания этапа работ № 1 (комплексные инженерные изыскания) был установлен 28.02.2015. 

Следовательно, право требования от субподрядчика передачи результата работ в судебном порядке (или расторжения договора в связи с несвоевременной сдачей результата) возникло у Подрядчика, исходя из положений статьи 190 ГК РФ, по Договору от 01.07.2015 № 3/190114 - 03.04.2015, по Договору от 01.07.2015 № 4/190314 - 01.03.2015.

По мнению ответчика, указанные даты являются начальным моментом для исчисления срока исковой давности по основному обязательству (по передаче результата работ), так как срок исполнения окончен.

Поэтому ответчик считает, что исковая давность по главному требованию истекает по Договору от 01.07.2015 № 3/190114 - 01.04.2018, по Договору от 01.07.2015 № 4/190314- 01.03.2018.

Именно требование по своевременной передаче результата работ было обеспечено неустойкой. Согласно пункту 1 статьи 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство, требование о возмещении неполученных доходов при истечении срока исковой давности по требованию о возвращении неосновательного обогащения и т.п.), в том числе возникшим после начала течения сроков исковой давности по главному требованию (пункт 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43).

Согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения (п. 2 указанной статьи ГК РФ).

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ от 28.02.1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» заявление стороны в споре о применении срока исковой давности является основанием к отказу в иске при условии, что оно сделано на любой стадии процесса до вынесения решения судом первой инстанции и пропуск указанного срока подтвержден материалами дела; что срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом, а также гражданином-предпринимателем по требованиям, связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 15.03.2018 по делу №А40-202132/17 установлено, что в процессе непосредственного выполнения работ по договорам, представителем со стороны истца выступал ФИО4, задания и график выполнения работ к заключенным договорам подписаны главным инженером проекта ФИО4 Кроме того, суд учитывает, что на письмах, которые содержат информацию о наличии замечаний в представленных результатах работ, исполнителем является ФИО4 Одновременно с подписанием 1 июля 2015 г. передаточных документов № 1 спорная проектная документация была передана ответчику на ответственное хранение. Таким образом, первый этап приёмки работ, а именно проверка комплектности, истцом выполнен, ответчиком принят.

Как следует из представленных истцами в материалы дела доказательств и не оспаривается ответчиком, истцом в адрес ответчика направлялась претензия (27.02.2019). В соответствии с п. 10.2 договора, срок рассмотрения претензии – 30 календарных дней. Согласно сведений с сайта Почты России, претензия получена ответчиком 19.03.2019. Срок ответа на претензию истек 18.04.2019. Таким образом, соблюдение претензионного порядка истцом длилось 51 день (с 27.02.2019 по 18.04.2019). Следовательно, с 27.02.2019 по 18.04.2019 (51 день) течение срока исковой давности было приостановлено ввиду установленного законом требования по соблюдению обязательного претензионного порядка (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). 

Суд отклоняет довод ответчика о применении срока исковой давности к требованиям во всей части в соответствии со ст. 207 ГК РФ ввиду следующего. 

 С истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному требованию (ст. 207 ГК РФ).

В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 N 10690/12 по делу N А73-15149/2011, трехлетний срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки, ежедневно начисляемой за просрочку исполнения обязательства, подлежит исчислению с учетом следующего. Срок исковой давности по требованиям об уплате периодического платежа должен исчисляться отдельно по каждому просроченному платежу за соответствующий период. Поэтому, если основное обязательство было исполнено с просрочкой, но до истечения срока исковой давности, к требованию о взыскании неустойки не может быть применено правило ст. 207 ГК РФ. Неустойка подлежит взысканию с момента нарушения исполнения основного обязательства до момента его исполнения за период в пределах трех лет, предшествующих дате предъявления иска о взыскании неустойки. За период, который входит в трехлетний срок, предшествующий дате предъявления иска о взыскании неустойки, срок исковой давности нельзя признать истекшим.

Принимая во внимание дату обращения истца с иском в суд (22.04.2019) суд соглашается с позицией ответчика о пропуске срока исковой давности в части требований о взыскании процентов за период с 31.03.2015 по 21.04.2016 и с 28.02.2015 по 21.04.2016. 

Таким образом, правомерно начисление неустойки за период с 22.04.2016 по 10.04.2017. 

В соответствии с расчетом суда, по этапу 1 по договору от 01.07.2015 №3/190114 за период с 22.04.2016 по 10.04.2017 размер неустойки составляет 844 488, 24 руб. 

В соответствии с расчетом суда, по этапу 1 по договору от 01.07.2015 №4/190314 за период с 22.04.2016 по 10.04.2017 размер неустойки составляет 1 918 259, 02 руб. 

Общий размер неустойки составляет 2 762 747, 26 руб. 

Ответчиком заявлено о применении ст. 333 ГК РФ. 

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении (ст. 333 ГК РФ).

Принимая во внимание компенсационный характер неустойки в гражданско-правовых отношениях, соотношение размера начисленной неустойки и размера основного обязательства, принцип соразмерности начисленной неустойки последствиям неисполнения обязательства и длительности периода начисления неустойки, которая по своему существу является способом обеспечения обязательств должником и не должна служить средством обогащения кредитора, учитывая, что подлежащая уплате неустойка несоразмерна последствиям нарушения обязательства, а нарушение обязательства носит несущественный, незначительный характер, считает необходимым применить положение ст. 333 ГК РФ, и уменьшить размер начисленной неустойки до  1 500 000, 00 руб., в остальной части в удовлетворении требования отказать.

Судебные расходы подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании статей 307-309, 330, 333, 702, 708, 710, 711, 746, 758 Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 9, 65, 71, 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «ПК и БЗ» в пользу ПАО «Газпром автоматизация» неустойку в размере 1 500 000 руб., а также расходы по уплате госпошлины в размере 38 609 руб. 

В остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья             К.В. Вольская