АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190121

http://fasszo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2025 года

Дело №

А21-388/2023

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Журавлевой О.Р., судей Васильевой Е.С., Корабухиной Л.И., 

при участии от общества с ограниченной ответственностью «Курскагротерминал» ФИО1 (доверенность от 23.06.2025), ФИО2 (доверенность от 30.05.2024), от общества с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж» ФИО3 (доверенность от 10.07.2023).

рассмотрев 10.09.2025 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Курскагротерминал» и кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж» на решение Арбитражного суда Калининградской области от 29.01.2025 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.05.2025 по делу № А21-388/2023,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж», адрес: 302004, 

<

...>, лит. А, пом. 138, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, (далее – ООО «Спецмонтаж», общество) обратилось в суд с уточненным иском к обществу с ограниченной ответственностью «Курскагротерминал», адрес: 306700, Курская обл., м.р-н. Касторенский, с.п. Краснодолинский сельсовет, стр. 1, к. 1, оф. 229, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, (далее - ООО «Курсагротерминал», компания) о взыскании задолженности в сумме 42 671 265 руб. 39 коп., неустойки в сумме 109 764 261 руб. 30 коп.

Судом приняты к рассмотрению уточненные встречные требования компании о взыскании неустойки в сумме 30 606 179 руб. 08 коп., затрат на электроэнергию в сумме 810 424 руб. 87 коп., штрафов в сумме 140 000 руб.

Решением суда первой инстанции от 29.01.2025 с компании в пользу общества взысканы 6 592 955 руб. 73 коп. задолженности и 12 734 721 руб. 35 коп. неустойки, в удовлетворении остальной части первоначальных требований отказано; с общества в пользу компании взысканы неустойка в сумме 3 546 610 руб. 79 коп., затраты на электроэнергию в сумме 810 424 руб. 87 коп., штрафы в сумме 140 000 руб., в удовлетворении остальной части встречных требований отказано; распределены судебные расходы по уплате государственной пошлины; произведен зачет первоначальных и встречных требований, по результатам которого с компании в пользу общества взыскано 14 649 858 руб. 42 коп.

В кассационной жалобе ООО «Курсагротерминал», ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права и несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам спора и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемые судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении требований ООО «СпецМонтаж» отказать в полном объеме, встречные требования ООО «Курсагротерминал» удовлетворить в полном объеме.

По мнению подателя жалобы, заказчик правомерно предъявил к зачету неустойку за просрочку выполнения работ и удержал ее из оплаты за выполненные работы, снижение этой неустойки судом не является основанием для взыскания с заказчика неустойки на нарушение сроков оплаты. Кроме того, неустойка по дополнительным соглашениям взыскана с заказчика необоснованно, в отсутствие нарушения последнего. Суд первой инстанции произвольно рассчитал неустойку за просрочку оплаты, не указал ни период взыскания пеней, ни сумму основного долга, на которую рассчитаны пени, апелляционный суд указанное нарушение не устранил. 

В кассационной жалобе ООО «Спецмонтаж», ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права и несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам спора и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению подателя жалобы, произведенный судом расчет неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных работ не может быть признан верным и обоснованным. Кроме того, фактические сроки выполнения работ указаны в исполнительской документации, об истребовании которой заявлял подрядчик.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы своих жалоб.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между сторонами был заключен договор подряда от 30.12.2020 N 540/02317. По условиям договора общество (подрядчик) обязалось выполнить комплекс работ, указанных в дополнительных соглашениях к договору, на строительной площадке по адресу: Курская область, Касторенский район, Краснодолинский сельский совет, а компания (заказчик) обязалась работы принять и оплатить на условиях договора.

В соответствии с пунктом 4.1 договора оплата работ по соответствующему дополнительному соглашению производится в порядке, установленном дополнительным соглашением.

В соответствии с пунктом 4.6 договора гарантийное удержание уплачивается в течение 30 рабочих дней с даты подписания последнего акта о приемке формы КС-2 по соответствующему дополнительному соглашению и вывоза со строительной площадки техники и расходных материалов.

В соответствии с пунктом 20.1.2 договора в случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ, он уплачивает заказчику пеню в размере 10% от общей стоимостью работ по дополнительному соглашению за каждую полную неделю, начиная с четвертого дня просрочки.

В соответствии с пунктом 20.15 договора за нарушение заказчиком сроков оплаты платежей он уплачивает подрядчику неустойку в размере 0,5% от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки платежа; неустойка не применяется к авансовым платежам по договору.

В соответствии с пунктом 22.1 договора подряда в отношении любой суммы, которая может подлежать оплате на каком-либо основании заказчиком подрядчику, заказчик вправе осуществить зачет в счет погашения обязательств перед подрядчиком.

В обоснование первоначального иска общество указало на наличие на стороне заказчика задолженности по оплате выполненных работ и нарушение сроков по их оплате.

Заказчик в обоснование встречных требований сослался на допущенное подрядчиком нарушение сроков выполнения работ, наличие на стороне подрядчику неисполненных обязательств по оплате электроэнергии, штрафа за нарушение правил охраны труда и промышленной безопасности.

Суд первой инстанции удовлетворил требования первоначального и встречного исков частично, произвел зачет, по результатам которого с компании в пользу общества взыскал 14 649 858 руб. 42 коп.

Апелляционный суд поддержал позицию суда первой инстанции.

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и доводы жалобы, проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, приходит к следующим выводам.

В рассматриваемом случае судами обеих инстанций установлено, что в соответствии с дополнительным соглашением от 30.12.2021 N 1 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался выполнить устройство фундаментов лестниц на объектах М2.1, М2.2, М2.3, М2.4 в период с 07.01.2021 в срок по 04.02.2021; гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по дополнительному соглашению; оплата гарантийного удержания производится в порядке, установленном договором.

В соответствии с соглашением от 01.02.2022 N 1 к дополнительному соглашению от 30.12.2021 N 1 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 стоимость работ была согласована 8 154 044,94 с НДС; оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов.

Между сторонами были подписаны акты о выполнении работ 05.04.2021 на сумму 1 553 999,76 рублей, 26.04.2021 на сумму 3 779 306,93 рублей, 25.03.2022 на сумму 2 814 897,86 рублей, всего на сумму 8 148 204,55 рублей.

Заказчик оплатил 22.01.2021 1 599 992,01 рублей, 26.04.2021 932 399,86 рублей, 18.05.2021 2 267 584,16 рублей, 15.04.2022 1 688 938,71 рублей, всего 6 488 914,74 рублей.

По дополнительному соглашению от 30.12.2020 N 1 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 1) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 1 659 289,81 рублей, неустойку за период с 16.04.2022 по 10.01.2023 с базы 844 469,35 рублей в сумме 1 131 588,92 рублей, за период с 28.05.2022 по 10.01.2023 с базы 814 820,46 рублей в сумме 965 562,24 рублей, всего 2 097 151,16 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 22.01.2021 N 2 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался на объектах М2.1, М2.2, М2.3, М.2.4 выполнить разработку и обратную засыпку грунта с уплотнением в период с 23.01.2021 по 26.02.2021; гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по дополнительному соглашению; оплата гарантийного удержания производится в порядке, установленном договором.

В соответствии с соглашением от 04.02.2022 N 1 к дополнительному соглашению от 30.12.2021 N 2 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 стоимость работ была согласована 5 038 811,22 с НДС; оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов.

Между сторонами были подписаны акты о выполнении работ 05.04.2021 на сумму 4 073 099,86 рублей, 26.04.2021 на сумму 965 711,36 рублей, всего на сумму 5 038 811,22 рублей.

Заказчик оплатил 26.04.2021 3 665 789,87 рублей.

По дополнительному соглашению от 22.01.2021 N 2 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 2) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 1 373 021,35 рублей, неустойку за период с 27.04.2021 по 10.01.2023 с базы 869 140,22 рублей в сумме 2 703 026,08 рублей, за период с 28.05.2021 по 10.01.2023 с базы 503 881,13 рублей в сумме 1 488 968,7 рублей, всего 4 191 994,78 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 20.02.2021 N 4 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался на объектах Т4.2, Т4.8 выполнить устройство железобетонных конструкций, монтаж конструкций металлических, монтаж стен, кровли, зенитного фонаря, ворот в период с 23.02.2021 по 22.07.2021; гарантийное удержание составляет 5% от цены работ по дополнительному соглашению.

В соответствии с пунктом 4.1 дополнительного соглашения от 20.02.2021 N 4 в случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ, он уплачивает заказчику пеню в размере 1% от общей цены невыполненных работ по дополнительному соглашению за каждую полную неделю, начиная с четвертого дня просрочки.

В соответствии с соглашением от 01.09.2021 N 1 к дополнительному соглашению от 20.02.2021 N 4 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 срок выполнения работ был согласован по 03.09.2021; оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов.

В соответствии с соглашением от 15.09.2022 N 3 к дополнительному соглашению от 20.02.2021 N 4 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 стоимость работ была согласована 201 039 478,18 рублей с НДС.

Между сторонами были подписаны акты о выполнении работ 25.05.2021 на сумму 15 801 230,34 рублей, 02.08.2021 на сумму 4 426 336,92 рублей, 25.08.2021 на сумму 20 376 741 рубль, 03.09.2021 на сумму 1 708 806.24 рублей, 25.09.2021 на сумму 6 849 107,94 рублей, 25.10.2021 на сумму 60 453 238,62 рублей, 25.11.2021 на сумму 18 256 338,31 рублей, 06.12.2021 на сумму 11 794 781,64 рублей, 24.12.2021 на сумму 25 748 019,81 рублей, 14.01.2022 на сумму 544 019,88 рублей, 25.01.2022 на сумму 14 615 377,66 рублей, 25.02.2022 на сумму 6 479 994.41 рублей, 25.05.2022 на сумму 10 276 842 рублей, 01.06.2022 на сумму 3 708 647,42 рублей, всего на сумму 201 039 479,19 рублей.

Заказчик оплатил 01.04.2021 112 390 149,91 рублей, 12.11.2021 23 099,48 рублей (по дополнительному соглашению от 15.10.2021 N 1 к дополнительному соглашению от 01.09.2021 N 14 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 аванс, излишне уплаченный по дополнительному соглашению от 01.09.2021 N 14 в размере 23 099,48 рублей согласован в счет оплаты аванса по дополнительному соглашению от 20.02.2021 N 4), 23.06.2021 7 110 553,65 рублей, 03.09.2021 1 991 851,61 рублей, 10.09.2021 9 169 533,45 рублей, 01.11.2021 768 962,81 рублей, 01.11.2021 3 082 098,57 рублей, 03.11.2021 15 000 000 рублей, 14.12.2021 5 307 651,74 рублей, 17.12.2021 1 796 004,56 рублей, 02.03.2022 4 000 000 рублей.

По дополнительному соглашению от 20.02.2021 N 4 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 4) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 17 322 671,9 рублей, неустойку за период с 02.06.2022 по 10.01.2023 с базы 7 270 697,99 рублей в сумме 8 034 121,27 рублей, за период с 04.07.2022 по 10.01.2023 с базы 10 051 973,91 рублей в сумме 9 499 115,34 рублей, а также неустойку за нарушение иных сроков оплаты согласно расчету в таблице (т. 12 л.д. 154-155) в сумме 36 533 889,05 рублей, всего неустойку в сумме 54 067 125,66 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 24.03.2021 N 5 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался на объектах М2.5, М2.6, М3.4 выполнить устройство монолитных конструкций в период с 11.04.2021 по 05.05.2021; гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по дополнительному соглашению; оплата гарантийного удержания производится в порядке, установленном договором.

В соответствии с соглашением от 27.08.2021 N 1 к дополнительному соглашению от 24.03.2021 N 5 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов.

В соответствии с соглашением от 01.06.2022 N 4 к дополнительному соглашению от 24.03.2021 N 5 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 стоимость работ по соглашению согласована 3 381 607,87 рублей с НДС.

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 08.06.2022 на сумму 3 381 607,87 рублей.

Заказчик оплатил 08.04.2021 592 896,03 рублей, 23.09.2021 1 810 207,49 рублей, всего 2 403 103,52 рубля.

По дополнительному соглашению от 24.03.2021 N 5 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 5) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 978 504,35 рублей, неустойку за период с 10.09.2021 по 23.09.2021 с базы 1 810 207,49 рублей в сумме 117 663,49 рублей, за период с 29.06.2022 по 10.01.2023 с базы 640 343,56 рублей в сумме 617 931,53 рублей, за период с 10.07.2022 по 10.01.2023 с базы 338 160,79 рублей в сумме 309 417,12 рублей, всего 1 045 012,14 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 12.04.2021 N 6 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался на объекте И13 выполнить монтаж металлоконструкций с 12.04.2021 по 18.04.2021; стоимость работ согласована 350 000 рублей с НДС; оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание не предусмотрено.

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 25.05.2021 на сумму 350 000 рублей.

Заказчик оплатил 24.06.2021 350 000 рублей.

По дополнительному соглашению от 12.04.2021 N 6 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 6) подрядчик просил взыскать неустойку за период с 15.06.2021 по 24.06.2021 в сумме 15 750 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 18.05.2021 N 7 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался на объекте И12.4 выполнить устройство монолитных фундаментов в период с 25.05.2021 по 24.07.2021; гарантийное удержание составляет 5% от цены работ по дополнительному соглашению; оплата гарантийного удержания производится в порядке, установленном договором.

В соответствии с соглашением от 10.08.2021 N 1 к дополнительному соглашению от 18.05.2021 N 7 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов.

В соответствии с соглашением от 03.06.2022 N 2 к дополнительному соглашению от 18.05.2021 N 7 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 стоимость работ по соглашению согласована 20 793 395,36 рублей с НДС.

Между сторонами были подписаны акты о выполнении работ 25.09.2021 на сумму 15 141 479,89 рублей, 25.10.2021 на сумму 465 912 рублей, 26.11.2021 на сумму 469 325,04 рублей, 10.06.2022 на сумму 4 716 678,43 рублей, всего на сумму 20 793 395,36 рублей.

Заказчик оплатил 25.05.2021 6 106 839,92 рублей, 01.11.2021 8 277 565,98 рублей, 14.12.2021 290 841,57 рублей, 17.12.2021 155 017,22 рублей, всего 14 830 264,69 рублей.

По дополнительному соглашению от 18.05.2021 N 7 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 7) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 5 963 130,67 рублей, неустойку за период с 16.10.2021 по 01.11.2021 с базы 8 277 565,98 рублей в сумме 703 593,11 рублей, за период с 16.11.2021 по 10.01.2023 с базы 442 616,4 рублей в сумме 925 068,27 рублей, за период с 02.07.2022 по 10.01.2023 с базы 4 480 844,51 рублей в сумме 4 279 206,5 рублей, за период с 11.06.2022 по 10.01.2023 с базы 5 963 130,67 рублей в сумме 6 320 918,51 рублей, за период с 13.07.2022 по 10.01.2023 с базы 1 039 669,77 рублей в сумме 935 702,79 рублей, всего 13 164 489,18 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 08.06.2021 N 8 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался на объекте Т3.1 выполнить устройство монолитных железобетонных конструкций в период с 14.06.2021 по 13.08.2021; гарантийное удержание составляет 5% от цены работ по дополнительному соглашению; оплата гарантийного удержания производится в порядке, установленном договором.

В соответствии с соглашением от 06.06.2022 N 1 к дополнительному соглашению от 08.06.2021 N 8 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 стоимость работ согласована 37 606 020 рублей с НДС, оплата работ производится в течение 45 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов.

Между сторонами были подписаны акты о выполнении работ 02.08.2021 на сумму 9 496 946,88 рублей, 03.09.2021 на сумму 6 814 884 рублей, 24.09.2021 на сумму 3 761 760 рублей, 25.01.2022 на сумму 12 327 584,83 рублей, 25.05.2022 на сумму 464 406 рублей, 24.06.2022 на сумму 4 253 251,13 рублей, всего на сумму 37 118 832,24 рублей.

Заказчик оплатил 25.06.2021 9 000 000 рублей, 07.07.2021 9 886 476,46 рублей, 03.09.2021 4 273 625,83 рублей, 01.11.2021 4 759 489,8 рублей, всего 27 919 592,09 рублей.

По дополнительному соглашению от 08.06.2021 N 8 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 8) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 9 199 240,15 рублей, неустойку за период с 23.08.2021 по 03.09.2021 с базы 4 273 625,83 рублей в сумме 235 049,42 рублей, за период с 14.10.2021 по 01.11.2021 с базы 1 692 792 в сумме 152 351,28 рублей, за период с 24.09.2021 по 01.11.2021 с базы 3 066 697,8 рублей в сумме 582 672,58 рублей, за период с 15.02.2022 по 10.01.2023 с базы 5 547 413,17 рублей в сумме 9 070 020,53 рублей, за период с 16.06.2022 по 10.01.2023 с базы 208 982,7 рублей в сумме 215 252,18 рублей, за период с 26.08.2022 по 10.01.2023 с базы 1 904 520,79 рублей в сумме 1 295 074,13 рублей, за период с 25.06.2022 по 10.01.2023 с базы 9 199 240,15 рублей в сумме 9 107 247,74 рублей, за период с 25.07.2022 по 10.01.2022 с базы 1 855 941,61 рублей в сумме 1 558 990,95 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 25.07.2021 N 10 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался на объекте Т3.1 выполнить работы по водопонижению с использованием погружных иглофильтров в течение 21 дня с даты подписания соглашения; стоимость работ согласована 554 400 рублей с НДС; оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по соглашению.

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 25.08.2021 на сумму 554 400 рублей.

Заказчик оплатил 03.09.2021 498 960 рублей.

По дополнительному соглашению от 25.07.2021 N 10 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 10) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 55 440 рублей, неустойку за период с 05.10.2021 по 10.01.2023 в сумме 127 697 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 20.07.2021 N 11 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался на объекте М5.11 выполнить работы по устройству монолитных фундаментов в период с 21.07.2021 по 03.09.2021; оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание составляет 5% от цены работ по соглашению.

В соответствии с соглашением от 15.09.2022 N 1 к дополнительному соглашению от 20.07.2021 N 11 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 стоимость работ согласована 9 494 039,16 рублей с НДС.

Между сторонами были подписаны акты о выполнении работ 25.11.2021 на сумму 9 436 079,16 рублей, 25.01.2022 на сумму 57 960 рублей, всего на сумму 9 494 039,16 рублей.

Заказчик оплатил 22.07.2021 - 3 121 870,35 рублей, 24.08.2021 - 24 965,95 рублей, 09.12.2021 - 6 133 451,45 рублей, 03.02.2022 - 12 708,05 рублей, всего - 9 292 995,8 рублей.

По дополнительному соглашению от 20.07.2021 N 11 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 11) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 201 043,36 рублей, неустойку за период с 04.02.2022 по 10.01.2023 с базы 226 009.31 рублей в сумме 383 085,78 рублей, за период с 05.03.2022 по 10.01.2023 с базы 474 701,96 рублей в сумме 735 788,06 рублей, всего 1 118 873,81 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 28.07.2021 N 12 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался на объектах М2.2, М2.3 выполнить работы по устройству монолитных железобетонных конструкций в период с 28.07.2021 по 13.08.2021; оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по соглашению.

В соответствии с соглашением от 07.02.2022 N 1 к дополнительному соглашению от 28.07.2021 N 12 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 стоимость работ согласована 1 389 526,98 рублей с НДС.

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 25.11.2021 на сумму 1 389 526,98 рублей.

Заказчик оплатил 433 416,33 рублей 27.07.2021, 09.12.2021 - 833 716.19 рублей, всего 1 267 132,52 рублей.

По дополнительному соглашению от 28.07.2021 N 12 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 12) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 122 394,46 рублей, неустойку за период с 10.12.2021 по 10.01.2023 с базы 122 394.46 рублей в сумме 241 729,05 рублей, с 26.12.2021 по 10.01.2023 с базы 138 952,7 рублей в сумме 263 315,36 рублей, всего 505 044,41 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 09.08.2021 N 13 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался на объекте М3.3.7 выполнить работы по устройству монолитных железобетонных конструкций в период с 15.08.2021 по 28.08.2021; стоимость работ согласована 689 411,28 рублей с НДС; оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по соглашению.

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 25.11.2021 на сумму 454 643,58 рублей.

Заказчик оплатил 25.08.2021 - 206 823,38 рублей, 09.12.2021 - 272 786,15 рублей, всего 479 609,53 рублей (переплата 24 965,95 рублей засчитана в счет оплаты работ по дополнительному соглашению N 11 (соглашение от 25.01.2022 N 1 к дополнительному соглашению от 09.08.2021 N 13, т. 12 л.д. 163).

По дополнительному соглашению от 09.08.2021 N 13 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 13) подрядчик просил взыскать неустойку за период с 10.12.2021 по 10.01.2023 с базы 24 965,95 рублей в сумме 49 307,75 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 16.09.2021 N 15 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался на объектах М2.1, М2.2, М2.3, М2.4 выполнить устройство основания под плиту пола в течение 20 календарных дней с даты подписания соглашения; оплата работ производится в течение 45 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание не предусмотрено.

В соответствии с соглашением от 25.01.2022 N 1 к дополнительному соглашению от 16.09.2021 N 15 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 стоимость работ согласована 1 946 276,88 рублей с НДС.

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 20.10.2021 на сумму 1 946 276,88 рублей.

Заказчик оплату не производил.

По дополнительному соглашению от 16.09.2021 N 15 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 15) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 1 946 276,88 рублей, неустойку за период с 24.12.2021 по 10.01.2023 с базы 1 946 276,88 рублей в сумме 3 707 657,45 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 16.09.2021 N 16 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался на объекте Т3.1 выполнить работы по водопонижению с использованием погружных фильтров в течение 20 календарных дней с даты подписания соглашения; стоимость работ согласована 1 217 809,44 рублей, оплата работ производится в течение 45 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание не предусмотрено.

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 20.10.2021 на сумму 1 217 809,44 рублей.

Заказчик оплату не производил.

По дополнительному соглашению от 16.09.2021 N 16 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 16) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 1 217 809,44 рублей, неустойку за период с 24.12.2021 по 10.01.2023 с базы 1 217 809,44 рублей в сумме 2 319 926,98 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 13.12.2021 N 17 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался на объекте Т4.2 выполнить работы по монтажу фасонных деталей, монтажу решетчатого настила, монтажу дверей, заделке технологических отверстий для установки колонн в период с 04.02.2022 по 15.03.2022, гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по соглашению.

В соответствии с соглашением от 15.09.2022 N 1 к дополнительному соглашению от 13.12.2021 N 17 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 стоимость работ согласована 8 741 230,03 рублей с НДС, оплата работ производится в течение 15 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а.

Между сторонами были подписаны акты о выполнении работ 25.01.2022 на сумму 686 160 рублей, 25.02.2022 на сумму 6 127 989,62 рублей, 25.03.2022 на сумму 1 178 667,04 рублей, 01.06.2022 на сумму 682 819,63 рублей, 24.06.2022 на сумму 65 593,74 рублей, всего на сумму 8 741 230,03 рублей.

Заказчик оплатил 13.01.2022 - 2 854 086,64 рублей, 14.05.2022 - 3 676 793,77 рублей, всего 6 530 880,41 рублей.

По дополнительному соглашению от 13.12.2021 N 17 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 17) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 2 210 349,62 рублей, неустойку за период с 29.03.2022 по 10.01.2023 с базы 411 696 рублей в сумме 586 666,8 рублей, за период с 18.05.2022 по 10.01.2023 с базы 707 200,12 рублей в сумме 830 960,5 рублей, за период с 03.08.2022 по 10.01.2023 с базы 409 691,78 рублей в сумме 323 656,5 рублей, за период с 26.08.2022 по 10.01.2023 с базы 39 356,24 рублей в сумме 26 565,46 рублей, за период с 25.06.2022 по 10.01.2023 с базы 2 210 349,62 рублей в сумме 2 188 246,12 рублей, за период с 26.07.2022 по 10.01.2023 с базы 874 123 рублей в сумме 729 892,7 рублей, всего 4 685 987,83 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 18.12.2021 N 18 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался на объекте Т3.1 выполнить устройство песчаного основания в течение 20 календарных дней с даты оплаты авансового платежа; стоимость работ согласована 720 762 рубля с НДС, оплата работ производится в течение 45 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по соглашению.

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 25.01.2022 на сумму 720 762 рублей.

Заказчик оплатил 648 685,8 рублей 03.02.2022.

По дополнительному соглашению от 18.12.2021 N 18 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 18) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 72 076,2 рублей, неустойку за период с 05.03.2022 по 10.01.2023 с базы 72 076,2 рублей в сумме 111 718,11 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 22.02.2022 N 20 к договору подряда от 30.12.2020 N 540/02317 подрядчик обязался на объекте Т4.2 выполнить работы по устройству стен лотка в период с 28.02.2022 по 23.03.2022; стоимость работ согласована 350 017,2 рублей с НДС; оплата работ производится в течение 45 рабочих дней с даты подписания актов формы КС-2, журнала учета выполненных работ формы КС-6а, отчета об использовании давальческих материалов; гарантийное удержание составляет 10% от цены работ по соглашению.

Между сторонами был подписан акт о выполнении работ 25.05.2022 на сумму 350 017,2 рублей.

Заказчик работы не оплатил.

По дополнительному соглашению от 22.02.2022 N 20 к договору подряда от 30.12.2020 N 02317 (далее - дополнительное соглашение N 20) подрядчик просил взыскать основной долг в сумме 350 017,2 рублей, неустойку за период с 29.06.2022 по 10.01.2023 с базы 315 015 рублей в сумме 305 564,55 рублей, за период с 27.06.2022 по 10.01.2023 с базы 35 001,72 рублей в сумме 34 301,68 рублей, всего 339 866,27 рублей.

Заказчик во встречном иске (т. 13 л.д. 65-76) признал наличие задолженности перед подрядчиком по оплате основного долга по дополнительному соглашению N 1 в сумме 1 659 289,81 рублей, по дополнительному соглашению N 2 в сумме 1 373 021,35 рублей, по дополнительному соглашению N 4 в сумме 17 323 523,9 рублей (подрядчиком заявлено 17 322 671,9 рублей), по дополнительному соглашению N 5 в сумме 978 504,35 рублей, по дополнительному соглашению N 7 в сумме 5 963 130,67 рублей, по дополнительному соглашению N 8 в сумме 9 199 240,15 рублей, по дополнительному соглашению N 10 в сумме 55 440 рублей, по дополнительному соглашению N 11 в сумме 201 043,36 рублей, по дополнительному соглашению N 12 в сумме 122 394,46 рублей, по дополнительному соглашению N 15 в сумме 1 946 276,88 рублей, по дополнительному соглашению N 16 в сумме 1 217 809,44 рублей, по дополнительному соглашению N 17 в сумме 2 210 349,62 рублей, по дополнительному соглашению N 18 в сумме 72 076,2 рублей, по дополнительному соглашению N 20 в сумме 350 017,2 рублей, всего в сумме 42 672 117,39 рублей.

Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в связи с нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению N 2 за периоды с 02.03.2021 по 04.04.2.21, с 05.04.2021 по 25.04.2021 в сумме 2 305 437,9 рублей.

Заказчик рассчитал неустойку (1% от стоимости невыполненных работ по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в связи с нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению N 4 за периоды с 07.09.2021 по 25.09.2021, с 26.09.2021 по 25.10.2021, с 26.10.2021 по 25.11.2021, с 26.11.2021 по 06.12.2021, с 07.12.2021 по 23.12.2021, с 24.12.2.21 по 31.01.2022, с 14.01.2021 по 24.01.2022, с 25.01.2022 по 31.03.2022 в сумме 17 663 306,44 рублей.

Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в связи с нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению N 5 за период с 06.05.2021 по 31.03.2022 в сумме 15 555 396,34 рублей.

Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в связи с нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению N 6 за период с 19.04.2021 по 25.05.2021 в сумме 140 000 рублей.

Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в связи с нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению N 7 за периоды с 28.07.2021 по 24.09.2021, с 25.09.2021 по 24.10.2021, с 25.10.2021 по 24.11.2021, с 25.11.2021 по 31.03.2022 в сумме 28 988 237,32 рублей.

Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в связи с нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению N 10 за период с 18.08.2021 по 25.08.2021 в сумме 55 440 рублей.

Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в связи с нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению N 11 за период с 07.09.2021 по 06.10.2021 в сумме 4 162 493,81 рублей.

Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в связи с нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению N 12 за период с 14.08.2021 по 25.11.2021 в сумме 1 806 385,07 рублей.

Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в связи с нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению N 15 за период с 10.10.2021 по 20.10.2021 в сумме 194 627,69 рублей.

Заказчик рассчитал неустойку (10% от стоимости невыполненных работ по дополнительному соглашению за каждую полную неделю) в связи с нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению N 17 за период с 25.03.2022 по 31.03.2022 в сумме 74 871,34 рублей.

Всего неустойка по дополнительным соглашениям NN 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17 начислена заказчиком в размере 71 067 955,85 рублей.

В соответствии с пунктом 12.1.4 договора подряда заказчик при наличии возможности обеспечивает подрядчику возможность присоединения к эксплуатационным сетям; стоимость потребленной электроэнергии компенсируется подрядчиком заказчику в течение 5 дней с момента получения требований заказчика или против представления текущих платежей.

Подрядчику были предъявлены счета-фактуры о компенсации затрат заказчика по электроэнергии N 37 от 31.01.2021 на сумму 67 890 рублей, N 23 от 28.02.2021 на сумму 23 495,12 рублей, N 37 от 31.03.2021 на сумму 292 512,79 рублей, N 76 от 30.04.2021 на сумму 200 847,12 рублей, N 101 от 31.05.2021 на сумму 121 037,48 рублей, N 123 от 30.06.2021 на сумму 338 442,49 рублей, N 163 от 31.07.2021 на сумму 165 482,75 рублей, N 191 от 31.08.2021 на сумму 174 959,92 рублей, N 215 от 30.09.2021 на сумму 413 614,15 рублей, N 237 от 31.10.2021 на сумму 444 339,39 рублей, N 268 от 30.11.2021 на сумму 537 597,32 рублей, N 290 от 31.12.2021 на сумму 407 284,37 рублей, N 14 от 31.01.2022 на сумму 326 674,85 рублей, N 38 от 28.02.2022 на сумму 195 722,45 рублей, N 53 от 31.03.2022 на сумму 155 105,23 рублей, N 71 от 30.04.2022 на сумму 48 754,45 рублей, N 86 от 31.05.2022 на сумму 22 079,19 рублей, N 99 от 30.06.2022 на сумму 4872,85 рублей, N 108 от 31.07.2022 на сумму 14 116,16 рублей, N 114 от 31.08.2022 на сумму 10 007,52 рублей, N 122 от 30.09.2022 на сумму 32 044,07 рублей, N 32 от 31.10.2022 на сумму 13 291,07 рублей, всего на сумму 4 221 626,49 рублей (т. 9. л.д. 1-77).

Подрядчик признал затраты заказчика на электроэнергию при подписании акта сверки, при формировании исковых требований до их уточнения; затраты по электроэнергии подрядчиком не оспорены ни по праву, ни по размеру.

Заказчик заявил о зачете задолженности перед подрядчиком в общей сумме 42 672 117,39 рублей:

по дополнительному соглашению N 1 в сумме 1 659 289,81 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению N 5;

по дополнительному соглашению N 2 в сумме 1 373 021,35 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению N 2;

по дополнительному соглашению N 4 в сумме 17 323 523,9 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению N 4;

по дополнительному соглашению N 5 в сумме 978 504,35 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению N 5;

по дополнительному соглашению N 7 в сумме 5 963 130,67 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению N 5;

по дополнительному соглашению N 8 в сумме 9 199 240,15 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению N 7;

по дополнительному соглашению N 11 в сумме 201 043,36 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению N 11;

по дополнительному соглашению N 12 в сумме 122 394,46 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению N 12;

по дополнительному соглашению N 15 в сумме 1 946 276,88 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению N 11;

по дополнительному соглашению N 16 в сумме 1 217 809,44 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению N 12;

по дополнительному соглашению N 17 в сумме 2 210 349,62 рублей в счет обязательств подрядчика по компенсации затрат по электроэнергии по счетам за период с 31.01.2021 по 31.10.2021 на сумму 2 210 349,62 рублей;

по дополнительному соглашению N 18 в сумме 72 076,2 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению N 2;

по дополнительному соглашению N 20 в сумме 350 017,2 рублей в полном объеме за счет неустойки за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению N 2.

По итогам зачета заказчик в рамках встречных требований просил взыскать неустойку за нарушение срока выполнения работ по дополнительному соглашению N 2 в сумме 510 323,15 рублей, по дополнительному соглашению N 4 в сумме 339 782,54 рублей, по дополнительному соглашению N 5 в сумме 12 917 602,18 рублей; по дополнительному соглашению N 6 в сумме 140 000 рублей; по дополнительному соглашению N 7 в сумме 13 825 866,5 рублей; по дополнительному соглашению N 11 в сумме 2 015 173,57 рублей; по дополнительному соглашению N 12 в сумме 466 181,17 рублей; по дополнительному соглашению N 15 в сумме 194 627,69 рублей; по дополнительному соглашению N 16 в сумме 121 780,94 рублей; по дополнительному соглашению N 17 в сумме 74 841,34 рублей; затраты в возмещение оплат электроэнергии за период с октября 2021 по октябрь 2022 в сумме 810 424,87 рублей; штрафы за нарушение правил нахождения на строительной площадке в сумме 140 000 рублей, всего 31 556 603,95 рублей.

Рассмотрев ходатайство подрядчика об уменьшении размера неустойки, суд первой инстанции, учитывая компенсационный характер неустойки, необходимость соблюдения баланса интересов сторон, пришел к выводу о несоразмерности начисленной заказчиком неустойки последствиям нарушенного обязательства. 

Согласно самостоятельному расчету суда за заявленные заказчиком периоды размер неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ по дополнительному соглашению N 2 составляет 957 997,62 рублей, по дополнительному соглашению N 4 (1% от стоимости невыполненных работ за неделю) - 17 663 306,44 рублей, по дополнительному соглашению N 5 - 5 579 653,2 рублей, по дополнительному соглашению N 6 - 64 750 рублей, по дополнительному соглашению N 7 - 10 780 760,44 рублей, по дополнительному соглашению N 10 - 22 176 рублей, по дополнительному соглашению N 11 - 1 424 105,88 рублей, по дополнительному соглашению N 12 - 722 554,04 рублей, по дополнительному соглашению N 15 - 107 045,23 рублей, по дополнительному соглашению N 16 - 66 979,52 рублей, по дополнительному соглашению N 17 - 26 194,46 рублей.

С учетом корректировки размера неустойки:

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению N 1 производится в сумме 1 659 289,81 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению N 5 (обязательства по основному долгу прекращены);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению N 2 производится в сумме 957 997,62 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению N 2 (задолженность составляет 415 023,73 рублей);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению N 4 производится в сумме 17 232 527,9 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению N 4 (обязательства по основному долгу прекращены; остаток неустойки 339 782,54 рубля);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению N 5 производится в сумме 978 504,35 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению N 5 (обязательства по основному долгу прекращены, остаток неустойки 2 941 859,04 рублей);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению N 7 производится в сумме 5 953 130,67 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению N 7 (обязательства по основному долгу прекращены);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению N 8 производится в сумме 4 817 629,77 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению N 7 (задолженность составляет 4 381 610,38 рублей);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению N 10 производится в сумме 22 176 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению N 10 (задолженность составляет 33 364 рублей);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению N 11 производится в сумме 201 043,36 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению N 11 (обязательства по основному долгу прекращены);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению N 12 производится в сумме 122 394,46 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению N 12 (обязательства по основному долгу прекращены);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению N 15 производится в сумме 1 223 062,52 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению N 11 (задолженность составляет 723 214,36 рублей);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению N 16 производится в сумме 600 159,58 рублей за счет неустойки по дополнительному соглашению N 12 (задолженность составляет 617 649,86 рублей);

зачет основного долга заказчика по дополнительному соглашению N 17 производится в сумме 2 210 349,62 рублей в счет обязательств подрядчика по компенсации затрат по электроэнергии по счетам за период с 31.01.2021 по 31.10.2021 на сумму 2 210 349,62 рублей.

После зачета задолженность заказчика по дополнительным соглашениям N 2, 8, 10, 15, 16, 18, 20 составила 6 592 955 руб. 73 коп. 

При этом судом с учетом произведенного зачета, правилах о сроках исполнения обязательств при зачете, положений о моратории, условий дополнительных положений о сроках оплаты выполненных работ и гарантийного удержания самостоятельно был произведен перерасчет неустойки за нарушение сроков оплаты работ.

Согласно расчету суда неустойка за нарушение срока оплаты выполненных работ по дополнительному соглашению N 1 по состоянию составляет 821 329 руб. 43 коп., по дополнительному соглашению N 2 по состоянию на 10.01.2023 с учетом положений о моратории составляет 848 723 руб. 67 коп., по дополнительному соглашению N 4 по состоянию на 31.03.2022 составляет 5 227 353 руб. 13 коп., по дополнительному соглашению N 6 по состоянию на 24.06.2021 составляет 12 836 руб. 25 коп., по дополнительному соглашению N 7 по состоянию на 31.03.2022 в сумме 942 605 руб. 96 коп., по дополнительному соглашению N 8 по состоянию на 10.01.2023 с учетом положений о моратории 3 215 531 руб. 53 коп., по дополнительному соглашению N 10 по состоянию на 10.01.2023 в сумме 39 369 руб. 52 коп., по дополнительному соглашению N 15 по состоянию на 10.01.2023 с учетом положений о моратории в сумме 697 901 руб. 89 коп., по дополнительному соглашению N 16 по состоянию на 10.01.2023 с учетом положений о моратории 596 032 руб. 25 коп., по дополнительному соглашению N 18 по состоянию на 10.01.2023 с учетом положений о моратории 36 398 руб. 40 коп., по дополнительному соглашению N 20 по состоянию на 10.01.2023 с учетом положений о моратории 296 639 руб. 24 коп., всего 12 734 721 руб. 35 коп.

Между тем судами не учтено следующее.

Согласно пункту 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса российской федерации о прекращении обязательств» обязательства считаются прекращенными зачетом в размере наименьшего из них не с момента получения заявления о зачете соответствующей стороной, а с момента, в который обязательства стали способными к зачету (статья 410 ГК РФ). Например, если срок исполнения активного и пассивного требований наступил до заявления о зачете, то обязательства считаются прекращенными зачетом с момента наступления срока исполнения обязательства (или возможности досрочного исполнения пассивного обязательства), который наступил позднее, независимо от дня получения заявления о зачете.

Если лицо находилось в просрочке исполнения зачитываемого обязательства, срок исполнения по которому наступил ранее, то проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ) и (или) неустойка (статья 330 ГК РФ) начисляются до момента прекращения обязательств зачетом. 

Таким образом, независимо от процедуры проведения зачета (внесудебный, судебный) обязательства считаются прекращенными ретроспективно: не с момента заявления о зачете, подписания акта о зачете, заявления встречного иска, принятия/вступления в законную силу решения суда, а тогда, когда обязательства стали способны к зачету, то есть наступили условия для прекращения обязательств зачетом. Только до обозначенного момента сторона, срок исполнения обязательства которой наступил ранее, находится в просрочке и несет соответствующую ответственность.

Рассчитывая неустойку за нарушение сроков оплаты по дополнительным соглашениям в сумме 12 734 721 руб. 35 коп., суды обеих инстанций не приняли во внимание изложенное и не проверили наличие в рассматриваемом случае правовых оснований для возложения такого вида ответственности как неустойки за просрочку оплаты задолженности после момента прекращения обязательств зачетом.

При этом по встречному иску судом взыскана неустойка за нарушение сроков выполнения работ по дополнительным соглашениям NN 4, 5, 6, 15, 16, 17 в сумме 3 546 610 руб. 79 коп. 

Таким образом, определив по итогам зачета задолженность заказчика по дополнительным соглашениям N 2, 8, 10, 15, 16, 18, 20 в размере 6 592 955 руб. 73 коп., и рассчитав по встречному иску неустойку подрядчика за нарушение срока выполнения работ по дополнительным соглашениям N 4, 5, 6, 15, 16, 17 в сумме 3 546 610 руб. 79 коп., суд первой инстанции пришел к противоположным выводам относительно итоговых результатах проведенного заказчиком зачета.

В соответствии с частью 1 статьи 288 АПК РФ основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Поскольку между первоначальным иском и встречным иском имеется взаимная связь, принимая во внимание, что встречное требование направлено к зачету первоначального требования и удовлетворение одного исключает удовлетворение другого, обжалуемые судебные акты подлежат отмене в полном объеме.

Поскольку для правильного разрешения спора требуется дополнительное исследование и оценка доказательств и установление юридически значимых для дела обстоятельств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции, а является компетенцией суда первой инстанции, то обжалуемые судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть вышеизложенное, дать надлежащую оценку доводам сторон и представленным ими доказательствам и с соблюдением норм материального и процессуального права принять законное и обоснованное решение.

Руководствуясь статьей 286, пунктом 3 части 1 статьи 287, статьями 288 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

п о с т а н о в и л:

решение Арбитражного суда Калининградской области от 29.01.2025 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.05.2025 по делу № А21-388/2023 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области.

Председательствующий

О.Р. Журавлева

Судьи

Е.С. Васильева

Л.И. Корабухина