20/2020-200(1) 

Арбитражный суд Чукотского автономного округа улица Ленина, дом 9а, Анадырь, 689000, www.chukotka.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

г. Анадырь. Дело № А80-344/2019  21 января 2020 года  

Арбитражный суд Чукотского автономного округа в составе судьи  Дерезюк Ю.В., при ведении протокола судебного заседания помощником  судьи Борисовой Е.Н.  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с  ограниченной ответственностью Проектная Фирма «ГОСТ-Стандарт» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Администрации городского округа Певек (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

о признании недействительным решения об одностороннем отказе  заказчика от исполнения муниципального контракта от 12.04.2018 №  0188300004518000038,  

встречному исковому заявлению от 24.09.2019 № 01-29/3497-1675  Администрации городского округа Певек (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью Проектная Фирма  «ГОСТ-Стандарт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании штрафа и пени в размере 613800 руб.  

 в отсутствие явки сторон 

 руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной  ответственностью Проектная Фирма «ГОСТ-Стандарт» отказать в полном  объеме.  

Встречные исковые требования Администрации городского округа  Певек удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектная  Фирма «ГОСТ-Стандарт» (ОГРН 

<

***>, место нахождения450105  Респеблика Башкортостан, 

<

...>, дата  государственной регистрации 29.03.2011, ИНН 

<

***>) в пользу  Администрации городского округа Певек (ОГРН 

<

***>, место  нахождения 689400 Чукотский автономный округ, 

<

...>, дата государственной регистрации 09.08.1994, ИНН  

<

***>) пени за просрочку исполнения муниципального контракта от  12.04.2018 № 0188300004518000038 за период с 11.12.2018 по 01.05.2019 в  сумме 253800 руб., штрафа за ненадлежащее выполнение взятых на себя  обязательств в размере 360000 руб., а всего взыскать 613800 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектная  Фирма «ГОСТ-Стандарт» в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 15276 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Шестой  арбитражный апелляционный суд в порядке главы 34 АПК РФ, а также в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в порядке, предусмотренном  частью 2 статьи 181, статьей 276 АПК РФ.  

Судья Дерезюк Ю.В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 02.06.2019 23:52:56

Кому выдана Дерезюк Юлия Владимировна