АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  ОКРУГА

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда кассационной инстанции

Дело № А53-41437/2023

г. Краснодар

19 июня 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июня 2024 года

Постановление в полном объеме изготовлено 19 июня 2024 года

 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Садовникова А.В., судей Афониной Е.И. и Зотовой И.И., при участии в судебном заседании от ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Астра констракшн» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) – ФИО1 (доверенность от 23.10.2023), в  отсутствие истца – общества с ограниченной ответственностью «Русалексгрупп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), извещенного о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Астра констракшн» на решение Арбитражного суда Ростовской области от 23.01.2024 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2024 по делу № А53-41437/2023, установил следующее.

ООО «Русалексгрупп» (далее – общество) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Астра констракшн» (далее – компания) о взыскании 2 106 756 рублей 89 копеек задолженности по договору субсубподряда от 06.10.2022 № 06-10/РУС2022, 210 675 рублей 68 копеек неустойки с 31.03.2023 по 21.09.2023, 109 439 рублей 02 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами с 26.12.2022 по 27.12.2023 (уточненные требования).

Решением суда от 23.01.2024 (с учетом исправительного определения от 23.01.2024), оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 03.04.2024, с компании в пользу общества взыскано 2 106 756 рублей 89 копеек задолженности, 210 675 рублей 68 копеек пени, распределены судебные расходы. В удовлетворении остальной части иска отказано.

В кассационной жалобе компания просит отменить обжалуемые судебные акты и отказать в удовлетворении заявленных требований. Податель жалобы указывает, что акты выполненных работ подписаны сторонами без замечаний и возражений; истцом неправомерно предъявлено требование о взыскании разницы в стоимости работ; обязательства ответчика перед истцом подлежали прекращению зачетом встречных требований.

В отзыве на кассационную жалобу общество указало на ее несостоятельность, а также законность и обоснованность принятых по делу судебных актов. 

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы жалобы.  

Законность судебных актов проверяется кассационным судом в обжалуемой части в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе (части 1 и 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; далее – Кодекс).

Изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, выслушав представителя компании, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа пришел к следующим выводам.

Из материалов дела видно и судами установлено, что компания (субподрядчик) и общество (субсубподрядчик) заключили договор субсубподряда от 06.10.2022 № 06-10/РУС-2022, по условиям которого субсубподрядчик обязался выполнить строительно-монтажные работы на объекте «Благоустройство территории земельного участка по адресу: г. Ростов-на-Дону (Гребной канал "Дон")», а субподрядчик обязался принять результат выполненных работ и оплатить их (пункт 1.1 договора). 

В соответствии с пунктом 1.2 договора перечень видов и объемов работ указан в сметном расчете № 1 (приложение № 1 к договору, являющееся его неотъемлемой частью).

Согласно пункту 2.1 договора стоимость работ определена на основании сметного расчета № 1 и составляет 25 109 837 рублей 96 копеек, в том числе НДС 20% – 4 184 972 рубля 99 копеек.

Пунктом 2.3 договора предусмотрено, что оплата за выполненные работы производится каждую неделю согласно графику выполнения и финансирования (приложение № 2 к договору).

В силу пункта 2.5 договора субподрядчик перечисляет на расчетный счет субсубподрядчика аванс в размере 979 500 рублей, в том числе НДС 20% – 163 250 рублей.

На основании пункта 8.4 договора в случае нарушения субподрядчиком сроков оплаты результатов выполненных и принятых работ субсубподрядчик вправе требовать от субподрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости выполненных и принятых работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате.

Дополнительным соглашением от 25.11.2022 № 2 согласовано выполнение дополнительных работ по укреплению откосов «ТИП-У1» на объекте, стоимость которых составила 1 839 370 рублей. 

Дополнительным соглашением от 30.11.2022 № 3 согласовано выполнение дополнительных работ по устройству фундаментной плиты на объекте, стоимость которых составила 4 836 900 рублей.

Сторонами подписаны акты выполненных работ на общую сумму 25 109 837 рублей 96 копеек.

Ответчиком обязательства по оплате выполненных работ исполнены на сумму 24 109 835 рублей 96 копеек, что подтверждается платежными поручениями.

При проверке документов истцом выявлена арифметическая ошибка в акте выполненных работ от 26.12.2022 № 5. Как утверждает истец, при составлении данного документа неверно указана цена работ. Дополнительным соглашением от 30.11.2022 № 3 предусмотрена цена соответствующих работ в размере 6900 рублей за куб. м, а в акте выполненных работ от 26.12.2022 № 5 указана иная цена – 5291 рубль 39 копеек за куб. м. Разница между первичным актом выполненных работ и откорректированным составила 1 106 755 рублей 85 копеек.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец на основании пункта 8.4 договора произвел начисление неустойки на сумму 2 106 756 рублей 89 копеек с 31.03.2023 по 21.09.2023, размер которой составил 210 675 рублей 68 копеек, а также начислил проценты за пользование чужими денежными средствами.

В целях досудебного урегулирования спора общество направило в адрес компании претензию от 16.10.2023.

Неисполнение требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика (пункт 1 статьи 706 Гражданского кодекса). 

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Согласно статье 746 Гражданского кодекса оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 названного Кодекса. 

По смыслу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 

Согласно пункту 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. 

Статьями 309 и 310 Гражданского кодекса предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий такого обязательства не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. 

В силу статьи 65 Кодекса каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (статья 71 Кодекса).

Частично удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из того, что представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 подтверждается факт выполнения обществом работ по договору субсубподряда, сдача результата работ ответчику и принятие работ компанией без замечаний и возражений. Компания  доказательств оплаты долга в полном объеме в нарушение статьи 65 Кодекса не представила.  

Дополнительным соглашением от 30.11.2022 № 3 сторонами согласовано выполнение дополнительных работ по устройству фундаментной плиты на объекте. Стоимость подлежащих выполнению по данному дополнительному соглашению работ включает в себя все расходы субсубподрядчика, связанные с их выполнением, и составляет 4 836 900 рублей. Перечень и объем подлежащих выполнению по данному дополнительному соглашению работ определяется в сметном расчете № 1-3 (приложение № 1 к дополнительному соглашению), являющемся неотъемлемой частью данного дополнительного соглашения. Срок начала работ – с даты подписания дополнительного соглашения, срок выполнения работ – 15.12.2022. Во всем остальном, что не оговорено данным дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями договора.

Суды установили, что при подписании акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 26.12.2022 № 5 допущена арифметическая ошибка, заключающаяся в том, что в акте за работы по устройству фундаментной плиты указана цена 5291 рубль 39 копеек за куб. м, тогда как в дополнительном соглашении от 30.11.2022 № 3 установлена цена данных работ в размере 6900 рублей за куб. м.

Доводы заявителя о том, что при выполнении спорных работ не должно применяться дополнительное соглашение от 30.11.2022 № 3, являются несостоятельными, поскольку данное соглашение недействительным в установленном законом порядке не признано, подписано представителями истца и ответчика, содержит печати общества и компании, в пункте 7 соглашения указано, что оно вступает в силу с даты его подписания сторонами (заявителем в нарушение статьи 65 Кодекса не опровергнуто, что указанные в акте формы № КС-2 от 26.12.2022 № 5 работы относятся непосредственно к  поименованным  в приложении № 1 к дополнительному соглашению от 30.11.2022 № 3 работам, в отношении которых сторонами согласованы самостоятельные расценки). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 453 Гражданского кодекса в случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения.

Указание заявителя на отсутствие в акте сверки взаимных расчетов задолженности в виде разницы между первичным и откорректированным актом выполненных работ подлежит отклонению, поскольку акт сверки не является первичным учетным бухгалтерским документом и в силу части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» сам по себе не может подтверждать наличие (отсутствие) задолженности при отсутствии надлежащих доказательств (первичных документов), являющихся основанием для возникновения, изменения или прекращения правоотношений (статьи 407, 408 Гражданского кодекса), не является свидетельством прощения долга (статья 415 Гражданского кодекса) и не может рассматриваться как документ, нивелирующий соглашение сторон по цене договора (статьи 421, 452, 453 Гражданского кодекса).

Вместе с тем, суды не учли следующее.

Согласно статьям 407 и 410 Гражданского кодекса обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Из разъяснений, изложенных в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» (далее – постановление № 6) следует, что согласно статье 410 Гражданского кодекса для прекращения обязательств зачетом, по общему правилу, необходимо, чтобы требования сторон были встречными, их предметы были однородными и по требованию лица, которое осуществляет зачет своим односторонним волеизъявлением (активное требование), наступил срок исполнения. Указанные условия зачета должны существовать на момент совершения стороной заявления о зачете. Например, встречные требования сторон могут в момент своего возникновения быть неоднородными (требование о передаче вещи и требование о возврате суммы займа), но к моменту заявления о зачете встречные требования сторон уже будут однородны (требование о возмещении убытков за нарушение обязанности по передаче вещи и требование о возврате суммы займа).

В соответствии с пунктом 13 постановления № 6 для зачета в силу статьи 410 Гражданского кодекса необходимо, чтобы по активному требованию наступил срок исполнения, за исключением случаев, когда такой срок не указан или определен моментом востребования.

Если лицо получило заявление о зачете от своего контрагента до наступления срока исполнения пассивного требования при отсутствии условий для его досрочного исполнения или до наступления срока исполнения активного требования, то после наступления соответствующих сроков зачет считается состоявшимся в момент, когда обязательства стали способны к зачету, то есть наступили установленные законом условия для зачета. Если наступил срок исполнения активного требования, но отсутствуют условия для досрочного исполнения пассивного требования, то должник по активному требованию вправе исполнить свое обязательство.

По смыслу абзаца первого пункта 14 постановления № 6 согласно статье 410 Гражданского кодекса для зачета необходимо и достаточно заявления одной стороны.  

Обязательства считаются прекращенными зачетом в размере наименьшего из них не с момента получения заявления о зачете соответствующей стороной, а с момента, в который обязательства стали способными к зачету (пункт 15 постановления № 6). 

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2021 № 307-ЭС20-16551 сформулирована правовая позиция, согласно которой независимо от процедуры проведения зачета (внесудебный, судебный) обязательства считаются прекращенными ретроспективно: не с момента заявления о зачете, подписания акта о зачете, заявления встречного иска, принятия/вступления в законную силу решения суда, а тогда, когда обязательства стали способны к зачету, то есть наступили условия для прекращения обязательств зачетом.

В силу разъяснений, изложенных в абзаце втором пункта 19 постановления № 6, обязательства могут быть прекращены зачетом, как путем заявления встречного иска, так и в возражениях на иск, а также после предъявления иска ответчик вправе направить истцу заявление о зачете и указать в возражении на иск на прекращение требования, по которому предъявлен иск, зачетом. 

Из приведенных норм права и разъяснений вытекает право ответчика на зачет своих встречных однородных требований к истцу непосредственно в ходе рассмотрения судом спора о взыскании задолженности с ответчика путем заявления суду о зачете, которое может содержаться в возражении на иск. Такое заявление, а также основания для зачета указанных в нем требований подлежат исследованию судом по существу наравне с иными обстоятельствами спора.

Согласно сформировавшейся правовой позиции, изложенной в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2018 № 304-ЭС17-14946, от 12.03.2018 № 305-ЭС17-17564, от 29.08.2019 № 305-ЭС19-10075, от 02.09.2019 № 304-ЭС19-11744, от 10.12.2020 № 306-ЭС20-15629, от 08.04.2021 № 308-ЭС19-24043 (2, 3), в отличие от зачета, происходящего посредством одностороннего заявления, адресованного другой стороне, действия сторон, направленные на установление сальдо взаимных предоставлений, не являются сделкой, в результате которой стороны получают какое-либо предпочтение.

Как указал Верховный Суд Российской Федерации в определении от 23.06.2021 № 305-ЭС19-17221 (2), сальдирование может иметь место как в рамках одного договора, так и в условиях нескольких взаимосвязанных договоров, когда определяется завершающая обязанность сторон при прекращении договорных отношений полностью (либо их отдельного этапа). Сопоставление обязанностей сторон из одних отношений и осуществление арифметических (расчетных) операций с целью определения лица, на которого возлагается завершающее исполнение (с суммой такого исполнения), не может быть квалифицировано как зачет. Соответственно, в подобной ситуации не возникают встречные обязанности, а формируется лишь единственная завершающая обязанность одной из сторон договора. Применительно к толкованию понятия сальдирования, данному Верховным судом Российской Федерации, сальдирование происходит автоматически, вне зависимости от констатации данного факта судом или посредством иной внесудебной фиксации.

Юридическая квалификация заявленных требований и нормативное обоснование судебного акта осуществляются судом самостоятельно с учетом характера спорного правоотношения, имеющих значение для правильного рассмотрения дела обстоятельств и очевидно преследуемого истцом материально-правового интереса. Такой подход способствует процессуальной экономии и препятствует предъявлению серии исков, направленных на разрешение, по существу, одного спора (статьи 125, 133, 168 Кодекса, пункт 3 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Компания, заявляя в отзыве на иск (л. д. 47 – 51) о прекращении взаимных обязательств, основывала соответствующие доводы на обстоятельствах, установленных при рассмотрении дела № 2-3372/2023 о взыскании с общества и ФИО2 в солидарном порядке в пользу компании имущественных потерь. Удовлетворяя требования компании, суд общей юрисдикции руководствовался положениями нормы статьи 406.1 Гражданского кодекса, а также условиями, согласованными сторонами в пункте 8.9 спорного договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 406.1 Гражданского кодекса стороны обязательства, действуя при осуществлении ими предпринимательской деятельности, могут своим соглашением предусмотреть обязанность одной стороны возместить имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных в таком соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении и т.п.). Соглашением сторон должен быть определен размер возмещения таких потерь или порядок его определения.

В пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – постановление № 7) разъяснено, что силу пунктов 1 и 5 статьи 406.1 Гражданского кодекса соглашением сторон обязательства может быть прямо установлена обязанность одной из них возместить имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных обстоятельств, каким-либо образом, связанных с исполнением, изменением или прекращением обязательства либо его предметом, и не являющихся нарушением обязательства. 

В отличие от возмещения убытков по правилам статей 15 и 393 Гражданского кодекса возмещение потерь по правилам статьи 406.1 Гражданского кодекса осуществляется вне зависимости от наличия нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) обязательства соответствующей стороной и независимо от причинной связи между поведением этой стороны и подлежащими возмещению потерями, вызванными наступлением определенных сторонами обстоятельств. 

По смыслу статьи 406.1 Гражданского кодекса возмещение потерь допускается, если будет доказано, что они уже понесены или с неизбежностью будут понесены в будущем. При этом сторона, требующая выплаты соответствующего возмещения, должна доказать наличие причинной связи между наступлением соответствующего обстоятельства и ее потерями.

Включение в условия заключенного договора положений, предусматривающих специальный порядок возмещения имущественных потерь его стороны, не является формой злоупотребления гражданскими правами. В равной степени в отсутствие доказательств наличия явного неравенства преддоговорных возможностей, вынужденного вступления субъекта предпринимательской деятельности в договорные отношения, отказ в применении к отношениям сторон основанных на законе и согласованных ими условий договора является недопустимым.

В соответствии с пунктом 8.9 договора субсубподрядчик в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса возмещает субподрядчику все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм оплаты по договору (цены договора) из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с субсубподрядчиком. Указанные имущественные (материальные) потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений (налоговых органов и/или судов), требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность возместить потери.

По смыслу изложенных разъяснений, предусмотренных в пункте 8.9 договора условий, а также учитывая компенсационный характер соответствующего требования, право требования возмещения имущественных потерь у компании возникло с момента их появления.

Решением Октябрьского районного суда от 03.10.2023 по делу № 2-3372/2023 установлено, что компания представила доказательства уплаты НДС в бюджет 29.06.2023 в сумме 1 459 168 рублей.

Суды, указывая, что на момент объявления резолютивной части решения суда первой инстанции по настоящему делу решение Октябрьского районного суда от 03.10.2023 по делу № 2-3372/2023 не вступило в законную силу, не исследовали надлежащим образом доводы компании о прекращении обязательств сторон в данной части; не установили, являлись ли способными обязательства к зачету на момент соответствующего заявления компании; не определили момент наступления срока исполнения активного требования компании (о возмещении имущественных потерь) с учетом согласованных сторонами в пункте 8.9 договора условий возникновения обязанности общества по возмещению имущественных потерь.  

При таких обстоятельствах, выводы судов первой и апелляционной инстанций являются преждевременными, поскольку сделаны без оценки всех имеющихся в деле доказательств в их совокупности и взаимосвязи с учетом требований статьи 71 Кодекса, а также без установления обстоятельств, имеющих существенное значение для рассмотрения спора.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Кодекса принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Данная норма во взаимосвязи с положениями статей 65 и 71 указанного Кодекса означает, что судом должно быть исследовано, поименовано в судебном акте и мотивированно принято или отклонено каждое доказательство, после чего по результатам оценки их совокупности во взаимной связи сделан обобщающий вывод об их достаточности для подтверждения или опровержения указываемых стороной обстоятельств полностью или в части. 

Согласно пункту 2 части 4 статьи 170 Кодекса в мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле. 

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (статья 71 Кодекса). 

В соответствии со статьями 8 и 9 Кодекса судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон и состязательности.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела (часть 2 статьи 9 Кодекса). 

Ограничение предмета доказывания при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций, повлекшее принятие ошибочных судебных актов, может являться основанием для направления дела на новое рассмотрение (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.05.2010 № 16112/09, от 16.11.2010 № 8467/2010). 

В силу части 2 статьи 287 Кодекса арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в суде первой инстанции либо были отвергнуты судом первой инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна быть применена и какое решение, постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела. 

В соответствии с частью 1 статьи 288 Кодекса основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 287 Кодекса суд кассационной инстанции по результатам рассмотрения кассационной жалобы вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. 

При таких обстоятельствах, решение и постановление суда апелляционной инстанции в части удовлетворения заявленных исковых требований подлежат отмене, а дело в данной части – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, установить и исследовать все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие значение для правильного разрешения спора, оценить доводы участвующих в деле лиц, после чего разрешить спор в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права. 

Руководствуясь статьями 274, 286 ? 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 23.01.2024 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2024 по делу № А53-41437/2023 в части удовлетворения исковых требований отменить, дело в данной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

В остальной части указанные судебные акты оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий                                                                                     А.В. Садовников

Судьи                                                                                                                   Е.И. Афонина

                                                                                                                              И.И. Зотова