Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-118390/23-42-874

г. Москва

10 августа 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 июля 2023 года

Полный текст решения изготовлен 10 августа 2023 года

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

судьи Хайло Е.А., единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи И.Н. Лозинской,

рассматривает в открытом судебном заседании по делу 

по иску ООО "ФНМ "ВЕСЬ МИР" (ИНН: 

<

***>) 

К МИНПРОМТОРГ РОССИИ (ИНН: 

<

***>) 

Об обязании заключить дополнительное соглашение к соглашению от 20.12.2017 г. №020-11- 840: - 

- изменив Соглашение от 20 декабря 2017 года № 020 — 11 — 840 согласно редакции дополнительного соглашения по приложению № 1 к иску; 

- изменив сроки выполнения (начало и окончание) по Приложению № 1 «План - график реализации инвестиционного проекта» к Соглашению от 20 декабря 2017 года № 020 — 11 — 840, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к иску; 

- изменив сроки финансового обеспечения по Приложению № 2 «План - график финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта» к Соглашению от 20 декабря 2017 года № 020 — 11 — 840, изложив его в редакции согласно приложению № 3 к иску.

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО1 по доверенности №146-04/23 от 04.04.2023 г.

от ответчика: ФИО2 по доверенности №ОВ-132713/14 от 21.12.2022 г. 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "ФНМ "ВЕСЬ МИР" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к  МИНПРОМТОРГ РОССИИ об обязании заключить дополнительное соглашение к соглашению от 20.12.2017 г. №020-11- 840: - изменив Соглашение от 20 декабря 2017 года № 020 — 11 — 840 согласно редакции дополнительного соглашения по приложению № 1 к иску;  изменив сроки выполнения (начало и окончание) по Приложению № 1 «План - график реализации инвестиционного проекта» к Соглашению от 20 декабря 2017 года № 020 — 11 — 840, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к иску; изменив сроки финансового обеспечения по Приложению № 2 «План - график финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта» к Соглашению от 20 декабря 2017 года № 020 — 11 — 840, изложив его в редакции согласно приложению № 3 к иску.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.05.2023 исковое заявление принято к производству суда, о чём стороны извещены надлежащим образом.

Истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Ответчик против иска возражал по основаниям изложенным в отзыве.

Рассмотрев исковое заявление, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела и установлено судом,  между ООО "ФАБРИКА НЕТКАНЫХ  МАТЕРИАЛОВ "ВЕСЬ МИР" и МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНПРОМТОРГ) 20 декабря 2017 года было заключено Соглашение № 020 — 11 — 840 - о предоставлении из федерального бюджета субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно — исследовательских и опытно — конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов. 

            В соответствии с Соглашением Истцом была получена субсидия в размере 118.783.783, 12 рублей.

            Срок реализации Проекта согласно Приложению № 1 «План – график реализации инвестиционного проекта» - июль 2017 г. - декабрь 2022 года.

            П. 4.4.4.1. Соглашения предусмотрена возможность обращения ( 1 раз в год) для возможности изменения срока реализации проекта в случае ведения санкций в отношений организаций, влияющих на реализацию проекта.

            п.6.1.4. Соглашения  предусмотрена возможность заключения доп.соглашения на пролонгацию сроков исполнения обязательств пропорционально периоду действия обстоятельств непреодолимой силы.

            Как следует из материалов дела, позиции Истца и подтверждается Ответчиком, представившим отзыв на иск, Истец 28.12.2020 г. направил ответчику заявление № 3012/7 об изменении срока реализации Проекта, целевых индикаторов и иных показателей на основании распоряжения № 2870-р. 

            Данное заявление было оставлено Минпромторгом России без удовлетворения в связи с тем, что на момент подачи заявления Проект реализовывался без отставаний, правовых оснований для заключения дополнительного соглашения не было. Целевой индикатор «Объем» реализации» выполнялся с опережением плана — графика. 

            08.06.2021 г. Истец направил Ответчику письмо об изменении срока реализации Проекта, целевых индикаторов и иных показателей на межведомственную комиссию (далее — МВК). 

            На  момент проведения МВК у Истца было зафиксировано отставание от графика более 12 месяцев (8 этап — октябрь 2020 г. - март 2021 г. и 9 этап — апрель 2021 г. - сентябрь 2021 г.)) и решением МВК (протокол от 29.12.2021 № 179 — ОВ/ 12) вышеуказанное обращение о продлении проекта снято с рассмотрения.

            В целях поддержки российских организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств 09.03.2022 г. издано Постановление Правительства Российской Федерации № 308 "О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств".

            Пунктом 1 Постановления № 308 установлено, что МИНПРОМТОРГ РОССИИ в отношении соглашений о предоставлении субсидий российским организациям и индивидуальным предпринимателям и (или) иных межбюджетных трансфертов, заключенных в рамках реализации государственных программ Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие авиационной промышленности", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", "Развитие оборонно-промышленного комплекса" и "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" до даты вступления в силу настоящего постановления, сроки исполнения обязательств по которым оканчиваются после 23 февраля 2022 г., вправе продлить (без увеличения размера предоставляемой субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта) сроки достижения значений результатов предоставления субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольных точек), а также при необходимости иных характеристик (показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии), установленных соответствующими порядками (правилами) предоставления субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, до 12 месяцев в следующих случаях:

            а) по не зависящим от российских организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств, обстоятельствам в связи с введением ограничительных мер со стороны иностранных государств;

            б) в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" мобилизовано более 15 процентов численности работников предприятия, выполняющих работы, соответствующие целям предоставления субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов.

            В соответствии с пунктом 2 Постановления 308 предусмотренные Постановлением № 308 изменения вносятся в соглашения 9договры о предоставлении субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов на основании заявления. Поступившего от организации или индивидуального предпринимателя — получателя субсидии или субъекта Российской Федерации — получателя иного межбюджетного трансферта 9в письменной форме) в Минпромторг России в пределах срока, предусмотренного для достижения  соответствующих значений результатов предоставления субсидий и (или)межбюджетных трансфертов, событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольных точек), а также иных характеристик (показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии), с приложением документов, подтверждающих наступление обстоятельств, указанных в пункте 1 постановления № 308.

            Письмами от 15.04.2022 № 349 и от 26.01.2023 б/н ООО «ФНМ «ВЕСЬ МИР» направило заявления в соответствии с постановлением № 308 с просьбой продлить срок реализации Проекта.

            Также из материалов дела представленных следует, что в 2020 году Истец уведомил Ответчика о снижении объемов продаж в связи с распространением COVID -19, и, как следствие, снижением заказов от предприятий мебельной промышленности, автомобильной промышленности, автомобильной отрасли.

            В 2022 году Истец уведомил Ответчика о введении ограничительных мер со стороны иностранных государств и поставщиков сырья из данных государств – компаний: W.Barnet Gmbh&Co. KG, Noble Biomaterials Inc., ОАО «Востокхимволокно»;

            В период с 2020 – по 2023 годы Истец обращался к Ответчику в порядке п.п. 4.4.4.1 и.6.1.4. Соглашения:

  - с просьбой о заключении доп.соглашения об изменении срока реализации проекта из - за введения санкций в отношений организаций, влияющих на реализацию проекта;

- с просьбой о заключении доп.соглашения на пролонгацию сроков исполнения обязательств пропорционально периоду действия обстоятельств непреодолимой силы.

            Согласно абз.2 ч. 1 ст.401 ГК РФ лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

            В соответствии с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.06.2010г. № 386/10 к отношениям сторон в связи с внесением изменений в условия договора путем заключения дополнительных соглашений подлежат применению правила статей 450-452 ГК РФ об основаниях, условиях и порядке изменения договора.

            В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

            В соответствии с п. 1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

            В силу п. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов или обычаев делового оборота не вытекает иное.

            Согласно ст.425 ГК РФ и пункту 7.2.  - Соглашение является действующим до полного исполнения принятых сторонами обязательств. 

            Согласно п.6.1.4 Соглашения к нему предусмотрено заключение дополнительных соглашений о пролонгации сроков исполнения.

            В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

            Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

            Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

            В силу п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

            В силу п. 2 ст. 422 ГК РФ если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

            В силу Постановления Правительства Российской Федерации № 308 от 9 марта 2022 г. "О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств" усатновлено условие о том, что если сроки исполнения обязательств оканчиваются после 23 февраля 2022 г., то они могут быть продлены  до 12 месяцев в определенных  случаях.

            Судом установлено, что Ответчик нарушил право Истца на продление срока действия спорного договора. Свои действия (бездействие) Ответчик в период исполнения Соглашения ничем не мотивировал, игнорировал заявления Истца, формируя лишь внутренние документы ведомственного характера.

Согласно п. 1 ст. 78 БК РФ субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг.

Согласно п. 2 ст. 78 БК РФ нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и определять:

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также результаты их предоставления;

3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;

4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии);

5) положения об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, проверок главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 настоящего Кодекса.

Согласно п. 3.1 ст. 78 БК РФ в случае нарушения получателями предусмотренных настоящей статьей субсидий условий, установленных при их предоставлении, соответствующие средства подлежат в порядке, определенном нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, предусмотренными пунктом 3, абзацем четвертым пункта 8 и пунктом 8.2 настоящей статьи, возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с условиями договора о предоставлении субсидии отчеты были проверены Министерством на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Правилами и положениями договора, и приняты истцом, при этом отчеты о целевом использовании субсидии были рассмотрены и утверждены Минпромторгом России.

В ходе реализации проекта, до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, был частично достигнут показатель "Объем реализации продукции".

При этом суд учитывает, что, начиная со второго полугодия 2019 года, достижению показателя (индикатора) проекта "Объем производства и реализация импортозамещающей продукции, которая будет создана в ходе реализации комплексного проекта" в ходе 7 и 8 этапов реализации проекта препятствовали объективные факторы, относимые к непреодолимой силе: введение торговых и экономических санкций, негативно влияющих на реализацию комплексного проекта; сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Поскольку указанные факты носят общеизвестный характер и не требуют доказывания (п. 1 ст. 69 АПК РФ), Правительство РФ указало их в качестве оснований для изменения, продления Договоров на предоставление субсидии (Постановление Правительства N 109 от 17.02.2016 в последующих редакциях, Постановление Правительства N 1065 от 16.07.2020).

При этом суд принимает ссылку истца на обстоятельства, свидетельствующие о добросовестности Исполнителя, за исключением формального и объективно невозможного достижения "Объема производства и реализации импортозамещающей продукции"; исключительно целевым использованием предоставленного бюджетного финансирования; действиями, направленными на юридическое оформление документов для продления (изменения) Договора, а также действий, направленных на продолжение реализации целей проекта.

При целевом использовании, но при не поступлении предусмотренного договором всего объема денежных средств, полученных от реализации продукции, возврат субсидии ставится в зависимость от следующих факторов: 1. наличие потребностей рынка в продукции, обеспечивающей дальнейшее достижение показателей реализации продукции, добросовестность и невиновность поведения получателя бюджетных средств.

В конкретном случае суд приходит к выводу о необходимости применения системного толкования положений законодательства относительно продления сроков выполнения истцом своих обязательств. 

Материалами дела подтверждается, что ответчик обращался в адрес истца с мотивированными заявлениями о внесении изменений в план-график, сроки реализации комплексного проекта и показатели эффективности реализации комплексного проекта, путем заключения дополнительного соглашения, которое ответчиком  подписано не было.

Ввиду отсутствия подписанных Дополнительных соглашений о внесении изменений, истец не может предоставить установленную договором отчетную документацию, а ответчик принять ее и учесть результаты показателей эффективности.

Таким образом, вывод ответчика о степени недостижения (в процентах) показателя объема продаж не основан на доказательствах, обладающих признаками относимости, допустимости, достаточности. Вывод ответчика также противоречит вышеуказанным доказательствам о продолжении реализации комплексного проекта истцом. 

Постановлением Правительства РФ от 05.11.2020 г. N 2870-р Минпромторгу России дано указание в отношении договоров о предоставлении субсидии, заключенных до 01.03.2020 г., и в отношении договоров о предоставлении субсидии, срок действия которых заканчивается в период с 01.03.2020 г. по 31.12.2020 г., заключенных в соответствии с утратившим силу Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. N 1312 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов", обеспечить в 2020 г. по соглашению сторон продление срока исполнения договоров о предоставлении субсидии до одного года без применения штрафных санкций в случае, если при их исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ возникли независящие от российской организации обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

Таким образом, Постановлением Правительства РФ от 05.11.2020 г. N 2870-р предусмотрено изменение договоров о предоставлении субсидии только в части срока исполнения договоров, продлив его на срок до одного года.

На основании представленных в материалы дела доказательств вина Истца в неполном исполнении условий Договора отсутствует, вследствие чего он вправе пролонгировать срок исполнения обязательств на основе условий самого Соглашения (п.6.1.4.) и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 308 от 9 марта 2022 г.

На основании представленных в материалы дела доказательств вина Истца в неполном исполнении условий Договора отсутствует, вследствие чего он вправе пролонгировать срок исполнения обязательств на основе условий самого Соглашения (п.6.1.4.) и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 308 от 9 марта 2022 г.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, усмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

На основании ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований либо возражений.

В силу ст. ст. 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Исследовав и оценив представленные доказательства, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, принимая во внимание конкретные обстоятельства именно данного дела, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд первой инстанции считает исковое заявление обосновано и подлежит удовлетворению. 

При этом, доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление не могут служить основанием к отказу в иске, поскольку указанные ответчиком обстоятельства не опровергают представленных истцом доказательств, подтверждающих правомерность исковых требований. 

Расходы по уплате госпошлины распределяются в порядке ст.110 АПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 307, 309, 310, 421, 431, 432, 452 ГК РФ, ст. ст. 64, 65, 71, 75,110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд   

 

РЕШИЛ:

Обязать МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНПРОМТОРГ) заключить дополнительное соглашение к Соглашению от 20 декабря 2017 года № 020 — 11 — 840 между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНПРОМТОРГ) и ООО "ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ "ВЕСЬ МИР" на следующих условия:

- изменив Соглашение от 20 декабря 2017 года № 020 — 11 — 840 согласно редакции дополнительного соглашения: Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.2. Приложение №2 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4.Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

-изменив сроки выполнения (начало и окончание) по Приложению № 1 «План -график реализации инвестиционного проекта» к Соглашению от 20 декабря 2017 года № 020 — 11 — 840, изложив его в редакции: План-график реализации инвестиционного проекта «Инновационные нетканые материалы с антибактериальными защитными свойствами, с повышенными эксплуатационными характеристиками и сорбирующими свойствами для защиты экологии».

-изменив сроки финансового обеспечения по Приложению № 2 «План - график финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта» к Соглашению от 20 декабря 2017 года № 020 — 11 — 840, изложив его в редакции «План-график финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией инвестиционного проекта».

Взыскать с МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНПРОМТОРГ) в пользу ООО "ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ "ВЕСЬ МИР" госпошлину в размере 6 000 руб. 00 коп.

 

Решение может быть обжаловано  в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья

   Е.А. Хайло