1111111482_3426063  

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А19-28431/2018

г. Иркутск

28 марта 2019 года

Арбитражный суд Иркутской области в составе: судьи Кириченко С.И.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И  РЕМОНТА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 665708, Иркутская область, город Братск,  Центральный, проспект Ленина, 37)  

к МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  БРАТСКА (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 665708, ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКАЯ, ГОРОД БРАТСК, ЖИЛОЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ПРОСПЕКТ  ЛЕНИНА, ДОМ 37, ОФИС 13)  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора - Общество с ограниченной ответственностью «Кантри» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск- Илимский, ул. Иващенко, дом 20)  

об обязании устранить недостатки 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

 Обязать МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  БРАТСКА в рамках выполнения гарантийных обязательств по муниципальным  контрактам № Ф.2016.398350 от 19.12.2016 и № Ф.2016.482741 от 16.01.2017  безвозмездно устранить на объекте: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул.  Набережная, д. 36А в срок до 01.09.2019, следующие недостатки и дефекты результата  работ по благоустройству:  

1. Осуществить демонтаж просадочных и дефектных участков асфальтобетонного  покрытия на:  

- тротуаре и пандусе со стороны лицевого фасада; - на автомобильной стоянке; 

- проезде, расположенного с южного торца в районе колодца инженерных сетей.  2. Произвести выравнивание и \планировку территорий на:  

- тротуаре и пандусе со стороны лицевого фасада; - на автомобильной стоянке; 

- проезде, расположенного с южного торца в районе колодца инженерных сетей.  3. Выполнить укладку нового асфальтобетонного покрытия на:  

- тротуаре и пандусе со стороны лицевого фасада; - на автомобильной стоянке. 

Взыскать с МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ДИРЕКЦИЯ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА" МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд,  через Арбитражный суд Иркутской области, в течение месяца со дня его принятия.  

Судья С.И. Кириченко