ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

дело № А72-3566/2023

г. Самара

20  марта 2024 года

11АП-1656/2024

 

Резолютивная часть постановления объявлена   14  марта 2024 года

Постановление в полном объеме изготовлено     20  марта 2024 года

 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Деминой Е.Г., судей Котельникова А.Г., Морозова В.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

с участием:

от общества с ограниченной ответственностью "Монолитстрой-Плюс" 

от общества с ограниченной ответственностью "Монолит" - ФИО2 (доверенность от 01.02.2024, диплом), ФИО3 (доверенность от 07.04.2023, диплом),

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в зале № 1 апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Монолитстрой-Плюс" на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 12 декабря 2023 года по делу № А72-3566/2023 (ФИО4),

по иску общества с ограниченной ответственностью "Монолитстрой-Плюс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Монолит" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Монолитстрой-Плюс" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области  с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Монолит" (далее - ответчик) о взыскании переплаты   в размере 14 445 578,60 руб.   по договору №1ЛМ/НФ от 23.12.2019, 11 350 097,40 руб. - услуги генподряда в соответствии с пунктом 7.2 договора, 4 432 969,25 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами.

Решением от 12.12.2023исковые  требования оставлены без удовлетворения.

Истец не согласился с принятым  судебным актом и обратился  в суд апелляционной инстанции с  жалобой,  в  которой просит  отменить   решение  как  незаконное и необоснованное, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указал, что   ответчиком  не  исполнены обязательства  на основании пункта   7.1 договора № 1ЛМ/НФ.

ООО "Монолит" в порядке досудебного урегулирования спора уточнение платежа и акт сверки по данному договору не представил. ООО "Монолитстрой-Плюс" усомнившись в подлинности подписи ФИО5 на данных документах, обратилось к ООО "Профессионал-Эксперт» за проведением исследования подписи на уточнении платежа от 24.01.2022 и акте сверки от 30.04.2022.

В рамках судебного процесса А72-3567/2023 было  заявлено ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы, так данные документы (уточнение платежа от 24.01.2022  и акт сверки от 30.04.2022) были представлены ранее по вышеуказанному делу.

После проведения исследования по делу А72-3567/2023 специалистом был сделан вывод, что подписи от имени ФИО5, изображение которой расположено в уточнении платежа от 24.01.2022  и акте сверки от 30.04.2022  выполнены не  ФИО5, а  иным  лицом.

Выводы в заключении эксперта № 1048/02-3 от 02.10.2023, подготовленным  старшим государственным судебным экспертом ФБУ "Ульяновская лаборатория судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ" научно и методически не обоснованы.

Ответчик в судебном заседании факт возмещения расходов, а также административно-хозяйственные расходы подрядчика, связанные с обеспечением технической документации и координацией работ, выполняемых субподрядчиком, приемкой от субподрядчика и сдачей заказчику работ, выполненных субподрядчиком, разрешением вопросов материально-технического снабжения, прочие расходы подрядчика по организации  строительства, не  оспорил. Подробно доводы  заявителя  изложены в  апелляционной  жалобе.

Кроме этого, истец заявил ходатайство  о назначении  по делу  повторной  экспертизы для установления  кем, ФИО5  или иным лицом выполнены подписи от имени ФИО5 в уточнении платежа от 24.01.2022, в акте сверки от 30.04.2022.

В качестве  дополнительного  доказательства истец представил  рецензию  №205.11-23 П Рец   на заключение судебной экспертизы.

Представители ответчика  отклонили жалобу по основаниям, изложенным в отзыве.

Представитель  истца, надлежащим образом извещенного  о времени и месте  судебного разбирательства, в судебное заседание  не явился. С учетом мнения представителя ответчика  и в соответствии  со статьями  156, 266 Арбитражного  процессуального кодекса Российской  Федерации  (далее  - АПК РФ)  дело рассмотрено в отсутствие представителя истца.

Проверив  материалы дела,  ознакомившись с отзывом ответчика,  выслушав его представителей, оценив доводы апелляционной жалобы в совокупности с представленными доказательствами,  суд апелляционной инстанции  установил.

23.12.2019 между  истцом (генподрядчик) и  ответчиком (субподрядчик) заключен договор субподряда №1ЛМ/НФ, согласно которому субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы, а генподрядчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и уплатить цену договора.                   Результатом выполненных работ по договору является законченный строительством объект, подписан акт приемки законченного строительством Объекта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором, акт комплексных испытаний, а в случае выявления недостатков при проведении комплексных испытаний,  акт об устранении замечаний, выявленных при проведении комплексных испытаний инженерных систем и проверки технической готовности Объекта к эксплуатации (пункт 2.1 договора)

Согласно пункту 2.2 договора, работы, выполняемые субподрядчиком по настоящему договору, включают строительно-монтажные работы согласно сметному расчету (приложение №1) к договору, а также иные работы и действия, направленные на строительство Объекта.

Общая стоимость работ по  договору составляет 977 228 726,42 руб.,  в том числе НДС (пункт 3.1 договора).

В соответствии с пунктом  3.2 договора цена договора рассчитана на основании и с учетом сметного расчета (приложение №1 к  договору), является твердой, включает все затраты субподрядчика, связанные с выполнение работ по настоящему договору, и не подлежит каким-либо изменениям.

Пунктом 7.1 договора предусмотрен порядок оплаты строительно-монтажных работ.

Согласно пункту 7.1.1 договора, генподрядчик перечисляет на расчетный счет субподрядчика сумму авансового платежа в размере 80 000 000 руб., в том числе НДС 20% в срок до 01.05.2020. Сумма авансового платежа по договору зачитывается с 01.05.2020  при осуществлении генподрядчиком текущих платежей за работы по настоящему договору по мере приемки выполненных строительно-монтажных работ пропорционально соотношению стоимости строительно-монтажных работ, указанной в соответствующей справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-З) к стоимости строительно-монтажных работ, указанной в пункте 3.1 договора.

Субподрядчик обязан использовать авансовый платеж на строительно-монтажные работы путем целевого расходования сумм указанного платежа на приобретение материалов, оборудования, выполнение  строительно-монтажных работ.

Субподрядчик в течение 5 рабочих дней после получения запроса генподрядчика обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа на строительно-монтажные работы в соответствии с его целевым назначением (материалы). Субподрядчик обязан возвратить генподрядчику авансовый платеж на строительно-монтажные работы в случаях и порядке, установленных законодательством РФ, включая, но, не ограничиваясь: отказ от выполнения работ, выполнение работ с нарушением срока, выполнение работ с недостатками, расторжение договора.

Согласно пункту 7.2.1 договора, фактически выполненные объемы строительно-монтажных работ оплачиваются генподрядчиком ежемесячно в течение 30  рабочих дней со дня подписания генподрядчиком и строительным контролем ежемесячного акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и получения от субподрядчика комплекта исполнительной документации, соответствующего объемам выполненных работ по форме  КС-2,  оригиналов счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ.

При осуществлении платежа за выполненные строительно-монтажные работы генподрядчик производит гарантийное удержание 10 % от суммы каждого платежа.

В соответствии с пунктом 7.2 договора  в возмещение расходов генподрядчика за услуги, оказываемые субподрядчику (административно-хозяйственные расходы генподрядчика, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ, выполняемых субподрядчиком, приемкой от субподрядчика и сдачей заказчику работ, выполненных субподрядчиком, разрешением вопросов материально-технического снабжения: прочие расходы генподрядчика по организации строительства). Субподрядчик ежемесячно по отдельным счетам производит отчисления генподрядчику в размере 1,1% от стоимости фактически выполненных работ согласно актам выполненных работ (КС-2).

Пунктом 7.3 договора предусмотрено, что возврат гарантийного удержания за строительно-монтажные работы производится в следующем порядке:

5 % от стоимости строительно-монтажных работ, выплачиваются в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами акта об устранении замечаний отраженных в акте комплексных испытаний при условии ввода Объекта в эксплуатацию, подписания генподрядчиком акта приемки законченного строительством Объекта и передачи генподрядчику исполнительной документации в отношении Объекта (что подтверждается подписанием сторонами реестра передачи генподрядчику исполнительной документации), на основании счета выставленного субподрядчиком генподрядчику.

5% от стоимости строительно-монтажных работ, выплачиваются в срок до 31.05.2021 при условии устранения всех замечаний, выявленных генеральным подрядчиком и/или представителями заказчика, обнаруженных до или после ввода объекта в эксплуатацию, а также при прохождении комплексных испытаний и не влияющих на их итоги, на основании счета выставленного субподрядчиком генподрядчику.

Дополнительным соглашением №1 от 20.10.2020 стоимость работ по договору субподряда №1 ЛН/МФ от 23.12.2019 увеличена на 46 754 583,31 руб.

Дополнительным соглашением №2 от 11.01.2021 стоимость работ по договору субподряда №1 ЛН/МФ от 23.12.2019 увеличена на 7 843 726,39 руб.

Таким  образом, общая цена по договору субподряда №1ЛМ/НФ от 23.12.2019 составляет 1 031 827 036,12 руб.

Ответчик  выполнил работы на сумму  1 031 827 036,12  руб.  что подтверждено актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат, представленными в материалы дела и подписанными сторонами без разногласий (т.1, л.106-150). Спор об объемах и стоимости выполненных работ между сторонами отсутствует.

Истец  перечислил  ответчику  за выполненные работы, гарантийное удержание, возврат гарантийных удержаний  в общей  сумме  1 046 272 614,73 руб., что  подтверждено  платежными поручениями, представленными  в материалы дела.

Истец считает, что ответчику произведена  переплата в сумме 14 445 578,60 руб. (1 046 272 614,73 руб. (оплата по платежным поручениям) - 1 031 827 036,12 руб.  (цена договора) = 14 445 578,60 руб.  (переплата).

Кроме того, истец указал, что ответчик не исполнил обязательства перед истцом  в соответствии  с пунктом 7.2 договора на сумму 11 350 097,40 руб. (1,1 % от 1 031 827 036,13 руб.).

Таким образом, истец просил взыскать с ответчика задолженность в соответствии с пунктом 7.2 договора № 1ЛМ/НФ от 23.12.2019 в сумме 11 350 097,40 руб.  (1,1 % от 1 031 827 036 руб. 13 коп.), неосновательное обогащение в размере 14 445 578,60 руб.

В соответствии  со  статьей  309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ)  обязательства должны   исполняться надлежащим образом в соответсвии с условиями обязательства  и требованиями  закона.

В  соответствии  со статьей 65 АПК РФ  каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается   как на основание  своих требований  и возражений.

Возражая против удовлетворения  исковых требований,  ответчик указал, что  работы по договору выполнены в полном объеме на общую сумму 1 031 827 036, 12 руб. все работы истцом приняты, претензий со стороны истца не предъявлялось.

Истец  оплатил  выполненные работы  в сумме  994 681 262,92 руб.

Истцом не выплачено ответчику гарантийное удержание в размере 25 795 675,81  руб. Таким образом, сумма разницы между общей стоимостью выполненных ответчиком работ (1 031 827 036,12 руб.) и общей суммой произведенной истцом оплаты (994 681 261,92 руб.) составляет 37 145 774,20 руб.

Из этой суммы истцом не оплачено гарантийное удержание в размере 2,5% от стоимости выполненных работ в размере 25 795 675,80 руб.

Сумму 11 350 097,40 руб. предусмотренную  пунктом 7.2 договора 1,1% от стоимости фактически выполненных работ согласно актам выполненных работ (КС-2) и услуг, истец удержал при оплате  общей стоимости  выполненных работ и оказанных услуг, с согласия ответчика в связи с предоставлением ему истцом соответствующих счетов, счетов-фактур и актов выполненных работ.

Таким образом, переплата со стороны истца по указанному договору отсутствует.

Ответчик свои обязательства по выплате генподрядного процента в размере 1,1% выполнил в полном объеме, задолженность отсутствует. Соответственно нет оснований для взыскания с ответчика процентов.

Платежные поручения № 13 от 14.01.2022 на сумму 25 795 676 руб. и № 19 от 18.01.2022 на сумму 25 795 676,81 руб. не относятся к оплате по  договору №1ЛМ/НФ от 23.12.2019.  Данные суммы истец просил зачесть в счет исполнения по иному договору, не имеющему отношение к рассматриваемому спору.

Письмом исх. № 01 от 24.01.2022 "уточнение платежа" ООО "Монолитстрой-Плюс" в лице директора и единственного учредителя ФИО5 уточнил назначение платежей в указанных   платежных поручениях, указав в качестве надлежащего - погашение задолженности ООО "Монолитстрой-Плюс" перед ООО "Монолит" по пункту 7 соглашения  о переводе долга от 23.04.2021.

Подтверждением непринятия данных платежей при расчетах по рассматриваемому договору субподряда № 1ЛМ/НФ от 23.12.2019, отношение  их  к расчету по соглашению о переводе долга от 23.04.2021, согласно содержанию письма об уточнении платежа, является двусторонний акт взаимных расчетов по состоянию с 01.01.2021  по 30.04.2022 (пункты 2 и 7 указанного акта).

Таким  образом,  в пункте 2 указанного акта сверки по договору № 1 ЛМ/НФ от 23.12.2019 по состоянию на 30.04.2022 отражена задолженность ООО "Монолитстрой-Плюс" в пользу ООО "Монолит" в размере 25 795 675,81 руб., которая по настоящее время ООО "Монолитстрой-Плюс" не погашена.

В материалы дела представлены акты на генподрядные удержания, а также заявления о зачете взаимных требований, согласно которым задолженность ответчика по указанным актам погашалась зачетом взаимных требований (т.2, л.99-109).

Истец заявил  о фальсификации уточнения платежа  от   24.01.2022 и акта сверки   от 30.04.2022.

В обоснование  заявления  о фальсификации  истец сослался на заключение  специалиста  № 78П от 06.07.2023  ООО "Региональный центр судебной экспертизы", согласно которому  подписи от имени ФИО5, изображения которых расположены в: 1) копии письма (уточнение платежа) №01 от 24.01.2022 от имени директора ООО "Монолитстрой-Плюс" ФИО5 на имя директора ООО "Монолит" ФИО6, на третьем листе, в строке "ФИО5".

2) копии акта сверки взаимных расчетов по состоянию с 01.01.2021 по 30.04.2022 между ООО "Монолитстрой-Плюс" и ООО "Монолит" на шестом листе, в строках: "директор ООО "Монолитстрой-Плюс" ФИО5", выполнены не ФИО5, а другим лицом.

В связи с изложенным, Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой-Плюс» заявило ходатайство о фальсификации доказательств по делу -уточнения платежа от 24.01.2022 и акта сверки от 30.04.2022 г.

Суд принял  к рассмотрению заявление о фальсификации  в порядке статьи 161 АПК РФ.

При рассмотрении заявления  о фальсификации судом установлено, что в рамках дела №А72-3567/2023 по спору между теми же лицами представителем истца также заявлялось о фальсификации доказательств по делу: уточнения платежа от 24.01.2022 и акта сверки от 30.04.2022.

Для поверки  заявления о фальсификации  по делу  была назначена судебная экспертиза.

Ответчиком представлена копия заключения эксперта №1048/02-3 от 26.10.2023,  согласно которому подписи от имени ФИО5, расположенные в уточнении платежа на имя директора ООО "Монолит" ФИО6 (исх. №01 от 24.01.2022) в графе "с уважением, директор ООО "Монолитстрой-Плюс" в строке "ФИО5", акте сверки взаимных расчетов по состоянию с 01.01.2021 по 30.04.2022 между ООО "Монолитстрой-Плюс" и ООО "Монолит", в строке "директор ООО "Монолитстрой-Плюс" ФИО5, выполнены самим ФИО5.

В судебном заседании 30.11.2023  представитель  истца заявление о фальсификации доказательств по делу не поддержал, в связи с чем,  суд прекратил проверку  заявления о фальсификации.

Принимая решение об отказе  в иске, суд первой инстанции  правомерно руководствовался  положениями статей  702,  706, 711, 720, 740, 747, 1102  ГК РФ.

Оценив представленные в материалы  дела доказательства, суд первой инстанции  пришел  к  обоснованному выводу о том, что  ответчиком  выполненные работы на сумму 1 031 827 036,12 руб., что подтверждается представленными в материалы дела документами и  истцом  не оспорено.  Истец перечислил ответчику 1 046 272 614,73 руб.

При этом, платежные поручения № 13 от 14.01.2022  на сумму 25 795 676 руб.  и №19 от 18.01.2022 на сумму 25 795 675,81руб. не относятся к оплате по спорному договору, поскольку письмом исх. № 01 от 24.01.2022,  истец в лице  директора и единственного учредителя ФИО5 уточнил назначение платежа в указанных платежных поручениях, указав в качестве надлежащего назначения - погашение задолженности  по пункту  7 Соглашения о переводе долга.

Подтверждением непринятия данного платежа при расчетах по рассматриваемому договору, а взятие его в расчет по соглашению о переводе долга от 23.04.2021 согласно содержанию письма об уточнении платежа является двусторонний акт взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 30.04.2022 (пункты 2 и 7 указанного акта).

Факт подписи директором и единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью "Монолитстрой-Плюс" ФИО5 уточнения платежа от 24.01.2022 и акта сверки от 30.04.2022 подтвержден заключением эксперта №1048/02-3 от 26.10.2023 в рамках дела №А72-3567/2023.

Результаты заключения эксперта №1048/02-3 от 26.10.2023, полученного в рамках дела №А72-3567/2023 истцом не  оспорены. Дополнительных доказательств, суду не представлено.

Представленное  истцом заключение специалиста  ООО "Профессионал-Эксперт" судом  первой инстанции в качестве доказательства обоснованно не принято,  поскольку  оно получено вне рамок судебного процесса по инициативе истца, заинтересованного в исходе настоящего дела. Несмотря на наличие подписки, об уголовной ответственности по статье  307 УК РФ эксперт судом не предупреждался. Кроме того, из данного заключения следует, что на исследование специалисту были представлены копии спорных документов, в то время как экспертом, назначенным судом, были исследованы оригиналы данных документов.

На основании  изложенного, суд первой инстанции  пришел к обоснованному выводу о том, что подлинность письма об уточнении платежа от 24.01.2022  и акта сверки от 30.04.2022  истцом относимыми и допустимыми доказательствами не опровергнута, в связи с чем, суд принял  указанные документы в качестве надлежащих доказательств по делу.

На основании представленных в материалы дела документов, суд установил, что в соответствии с пунктом 7.1 договора заказчик ежемесячно выставлял генподрядчику счета на оплату. Однако, истцом  в адрес ответчика были направлены письма о зачете взаимных требований, согласно которым имевшаяся у  ответчика перед  истцом задолженность по актам на оплату гарантийных удержаний зачтена в счет оплаты имевшейся у ООО "Монолитстрой-Плюс" перед обществом с ограниченной ответственностью "Монолит"» задолженности по актам о приемке выполненных работ на основании договора №1ЛМ/НФ от 23.12.2019.

В соответствии со статьей 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" (далее -Постановление Пленума Верховного суда N 6 от 10.06.2020), согласно статье 410 ГК РФ для прекращения обязательств зачетом, по общему правилу, необходимо, чтобы требования сторон были встречными, их предметы были однородными и по требованию лица, которое осуществляет зачет своим односторонним волеизъявлением (далее -активное требование), наступил срок исполнения. Указанные условия зачета должны существовать на момент совершения стороной заявления о зачете.

Пунктом 15 постановления Пленума ВС РФ № 6 разъяснено, что обязательства считаются прекращенными зачетом в размере наименьшего из них не с момента получения заявления о зачете соответствующей стороной, а с момента, в который обязательства стали способными к зачету (статья 410 ГК РФ). Например, если срок исполнения активного и пассивного требований наступил до заявления о зачете, то обязательства считаются прекращенными зачетом с момента наступления срока исполнения обязательства (или возможности досрочного исполнения пассивного обязательства), который наступил позднее, независимо от дня получения заявления о зачете.

Условия прекращения обязательств зачетом и случаи его недопустимости определены в статьях 410 и 412 ГК РФ. Основанием для признания заявления о зачете как односторонней сделки недействительным может являться нарушение запретов, ограничивающих проведение зачета или несоблюдение условий, характеризующих зачитываемые требования (отсутствие встречности, однородности, не наступление срока исполнения). Указанные обстоятельства в рассматриваемом случае отсутствуют.

Представленные в материалы дела заявления ООО "Монолит" о зачете взаимных требований  истцом не оспорены, каких либо возражений не заявлено.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции  признал заявления о зачете, представленные ответчиком обоснованными и подлежащими учету при определении наличия либо отсутствия задолженности между сторонами.

На основании вышеизложенного, судом установлено, что ответчик  погасил задолженность перед  истцом путем произведенных зачетов взаимных требований, в связи с чем, основания для удовлетворения исковых требований в части взыскания задолженности в соответствии с пунктом 7.2. договора № 1ЛМ/НФ от 23.12.2019 в сумме 11 350 097,40 руб.  и неосновательного обогащения в размере 14 445 578,60 руб. отсутствуют.

Истцом также заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 4 432 969,25 руб.

Поскольку требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами является акцессорным по отношению к требованию о взыскании основного долга,  требование  истца в указанной части судом первой  инстанции  также обоснованно признано  не подлежащим  удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины  отнесены на истца по правилам статьи 110 АПК РФ.

Доводы,  изложенные   в апелляционной жалобе,   отклоняются как необоснованные.

Фактические обстоятельства   дела судом первой инстанции   установлены правильно, представленные   сторонами доказательства  исследованы и оценены по правилам статьи  71 АПК РФ.

Суд апелляционной  инстанции  отказывает в приобщении  к материалам дела заключения специалиста № 205.11-23 П Рец. в связи с отсутствием  оснований.

Указанное заключение является рецензией  на судебное экспертное  заключение №1048/02-3 от 26.10.2023,  полученное в рамках дела №А72-3567/2023, решение по которому  вступило в законную силу.  В связи с чем,  оснований для  принятия заключения специалиста № 205.11-23 П Рец,  в качестве доказательства  по настоящему делу не имеется.  Указанный документ  возвращен  истцу.

Также суд  апелляционной инстанции  отказывает истцу в назначении повторной экспертизы,  поскольку  экспертиза  в рамках  настоящего дела не проводилась,  а истец в ходе судебного разбирательства заявление  о фальсификации доказательств не поддержал.

Доводы  истца, изложенные  в апелляционной жалобе, фактически сводятся  к несогласию с  заключением судебной почерковедческой экспертизы, проведенной в рамках    дела А72-3567/2023, вступившего в законную силу, что является  недопустимым.              Выводы суда соответствуют  установленным по делу  фактическим обстоятельствам  и имеющимся в деле доказательствам,  нормы материального и процессуального  права применены правильно, в связи с чем, оснований для отмены  обжалуемого решения не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины, в соответствии  со статьей  110 АПК РФ относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ульяновской области от 12 декабря 2023 года по делу № А72-3566/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Монолитстрой-Плюс" без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Поволжского округа.

 

Председательствующий                                                                          Е.Г. Демина

 

Судьи                                                                                                         А.Г. Котельников

 

В.А. Морозов