Арбитражный суд Липецкой области

пл. Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А36-5473/2019

г.Липецк

10 декабря 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 декабря 2019 года.  

Решение в полном объеме изготовлено 10 декабря 2019 года.     

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Коровина А.А.,                 при ведении протокола судебного заседания помощником судьи                     Прибытковой Т.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

федерального автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения) юридического лица: 

<

...>; адрес Воронежского филиала: Воронежская область, г.Воронеж, ул.9 Января, д.41, 41А) 

к муниципальному учреждению «Управление главного смотрителя г.Липецка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): 

<

...>) 

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: 

1) Управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): г.Липецк, пл.им.ФИО1, д.1) и 

2) Управления по контролю и регулированию контрактной системы в сфере закупок Липецкой области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения) г.Липецк, пл.им.ФИО1, д.1) 

о взыскании 735 116 руб. 91 коп., 

при участии в заседании: 

от истца – представитель не явился, 

от ответчика – ФИО2, доверенность от 06.08.2019 № 5804-39-01, 

от третьих лиц – представители не явились,

УСТАНОВИЛ:

Федеральное автономное учреждение «Российский дорожный научно-исследовательский институт» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к муниципальному учреждению «Управление главного смотрителя г.Липецка» о взыскании 735 116 руб. 91 коп., в том числе 712 886 руб. 09 коп. основного долга по договорам на оказание лабораторных услуг № 286-М от 13.08.2018, № 287-М от 13.08.2018, № 289-М от 13.08.2018, № 290-М от 13.08.2018, № 293-М от 13.08.2018, № 337-М от 13.08.2018, № 2 338-М от 13.08.2018, № 339-М от 13.08.2018, № 603-М от 26.12.2018, № 604-М от 26.12.2018, № 605-М от 26.12.2018, № 606-М от 26.12.2018, № 607-М от 26.12.2018, № 608-М от 26.12.2018, № 609-М от 26.12.2018, № 610-М от 26.12.2018, 9 794 руб. 41 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 09.11.2018 по 20.05.2019 и 12 436 руб. 41 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 17.01.2019 по 20.05.2019. 

Определением арбитражного суда от 24.05.2019 исковое заявление принято к производству.

Определением от 26.08.2019 суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области и Управление по контролю и регулированию контрактной системы в сфере закупок Липецкой области.

В судебное заседание 26.11.2019 истец и третьи лица не явились, извещались надлежащим образом.

Кроме того, информация о дате и времени судебного заседания в соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации размещена арбитражным судом на официальном сайте суда в сети «Интернет».

От истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

От третьего лица (1) поступил отзыв на исковое заявление, в котором оно считает исковые требования необоснованными, а также ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

С учетом изложенного, суд на основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным рассмотреть дело в судебном заседании в отсутствие неявившихся лиц.

Ответчик исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве и дополнениях к нему.

В судебном заседании в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв сроком на пять дней.

Информация об объявлении перерыва размещена на официальном сайте суда в сети «Интернет», что является публичным извещением.

После объявленного перерыва истец и третьи лица также не явились.

Ответчик не признал заявленные требования, представив дополнительные доказательства в обоснование своей позиции.

Арбитражный суд, выслушав ответчика, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, установил следующее.   

Как видно из материалов дела, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 286-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.08.2018 (далее – договор-1), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на следующих объектах в количестве 1 образца: 

1.1.1. «Ремонт автомобильной дороги улица имени В.И.Ленина (от улицы имени Ю.А.Гагарина до улицы имени А.В.Зегеля) в г.Липецке»,

1.1.2. «Ремонт автомобильной дороги улица имени Ю.А.Гагарина (от улицы имени К.Э.Циолковского до улицы имени В.И.Ленина, включая площадь Авиаторов) в г.Липецке».

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-1).

Согласно пункту 5.1 договора-1 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-1 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-1, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-1 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-1, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-1).

Пунктом 8.2 договора-1 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-1 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-1).

Истец оказал ответчику услуги по договору-1, что подтверждается актом № 5/20181024-07 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Также между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 287-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.08.2018 (далее – договор-2), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на объекте: «Ремонт автомобильной дороги проезд Боевой (от улицы Опытная до пересечения с улицей имени А.Г.Железнякова) в г.Липецке», в количестве 1 образца.

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-2).

Согласно пункту 5.1 договора-2 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-2 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-2, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение               5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-2 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-2, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-2).

Пунктом 8.2 договора-2 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-2 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-2).

Истец оказал ответчику услуги по договору-2, что подтверждается актом             № 5/20181024-08 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Кроме того, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 289-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.08.2018 (далее – договор-3), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на следующих объектах в количестве 1 образца: 

1.1.1. «Ремонт автомобильной дороги улица Первомайская (от площади Победы до улицы имени Карла Маркса) в г.Липецке», 

1.1.2. «Ремонт автомобильной дороги улица имени А.Г.Железнякова (от проезда Боевой до улицы Полевая) в г.Липецке».

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-3).

Согласно пункту 5.1 договора-3 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-3 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-3, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение               5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-3 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-3, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-3).

Пунктом 8.2 договора-3 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-3 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-3).

Истец оказал ответчику услуги по договору-3, что подтверждается актом               № 5/20181024-09 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) также заключен договор № 290-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.08.2018 (далее – договор-4), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на следующих объектах в количестве 1 образца: 

1.1.1. «Ремонт автомобильной дороги проспект Мира (от пересечения улицы имени Марии Расковой и переулка имени А.А.Бестужева до площади Мира, включая площадь Мира) в г.Липецке», 

1.1.2. «Ремонт автомобильной дороги улица Московская (от кольцевого движения улица Московская – улица имени Маршала ФИО3 до ул.Ангарская) в г.Липецке».

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-4).

Согласно пункту 5.1 договора-4 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-4 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-4, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение              5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-4 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-4, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-4).

Пунктом 8.2 договора-4 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-4 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-4).

Истец оказал ответчику услуги по договору-4, что подтверждается актом             № 5/20181024-10 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Кроме того, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 293-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.08.2018 (далее – договор-5), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на объекте: «Ремонт автомобильной дороги проезд Петровский (от улицы имени В.И.Ленина до площади Революции) в г.Липецке», в количестве 1 образца.

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-5).

Согласно пункту 5.1 договора-5 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-5 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-5, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение             5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-5 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-5, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-5).

Пунктом 8.2 договора-4 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-5 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-5).

Истец оказал ответчику услуги по договору-5, что подтверждается актом № 5/20181024-11 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Также между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 337-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.09.2018 (далее – договор-6), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на следующих объектах в количестве 1 образца: 

1.1.1. «Ремонт автомобильной дороги улица имени Ю.А.Гагарина (от улицы имени К.Э.Циолковского до улицы имени В.И.Ленина, включая площадь Авиаторов) в г.Липецке»,

1.1.2. «Ремонт автомобильной дороги улица имени Маршала ФИО4 (от площади Победы до кольцевого движения улицы имени П.А.Папина – улицы имени Маршала ФИО4) в г.Липецке».

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-6).

Согласно пункту 5.1 договора-6 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-6 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-6, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение            5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-6 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-6, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-6).

Пунктом 8.2 договора-6 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-6 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-6).

Истец оказал ответчику услуги по договору-6, что подтверждается актом             № 5/20181024-13 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) также заключен договор № 338-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.09.2018 (далее – договор-7), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на следующих объектах в количестве 1 образца: 

1.1.1. «Ремонт автомобильной дороги улица имени Маршала ФИО4 (от площади Победы до района ОТТ «Петровский рынок») в г.Липецке»,

1.1.2. «Ремонт участка автомобильной дороги от кольцевого движения проспекта Победы – улицы имени Маршала ФИО3 до кольцевого движения улицы Металлургов – улицы Краснозаводская (подходы ко 2-му мостовому переходу) в г.Липецке»,

1.1.3. «Ремонт участка автомобильной дороги от улицы имени П.С.Ковалева до пересечения с площадью Заводской в г.Липецке».

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-7).

Согласно пункту 5.1 договора-7 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-7 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-7, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение            5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-7 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-7, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-7).

Пунктом 8.2 договора-7 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-7 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-7).

Истец оказал ответчику услуги по договору-7, что подтверждается актом            № 5/20181024-14 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Кроме того, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 339-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов от 13.09.2018 (далее – договор-8), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (далее – услуги) на объекте: «Ремонт автомобильной дороги улица имени А.Г.Железнякова (от проезда Боевой до улицы Полевая) в г.Липецке», в количестве 1 образца.

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 4.1.2 договора-8).

Согласно пункту 5.1 договора-8 стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов геосинтетических материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-8 стоимость услуг по настоящему договору составляет 30 066 руб. 95 коп., в том числе НДС 18% - 4 586 руб. 48 коп.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости работ по проведению лабораторных испытаний строительных материалов (приложение № 2 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-8, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение           5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-8 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. Оплата услуг может быть произведена путем зачета стоимости услуг в счет оплаты работ, выполненных заказчиком (субподрядчиком) по договору субподряда. В этом случае исполнитель направляет заказчику акт взаимозачета, согласованный сторонами.

Как следует из пункта 6.1 договора-8, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 28.12.2018 (пункт 8.1 договора-8).

Пунктом 8.2 договора-1 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Согласно пункту 9.1 договора-8 исполнитель направляет в адрес заказчика оформленные соответствующим образом протоколы о результатах лабораторных исследований (испытаний) и акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет или акт взаимозачета (согласованный заказчиком и исполнителем), погашающий задолженность за выполненные заказчиком работы в рамках заключенного договора субподряда по этому же объекту.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 9.2 договора-8).

Истец оказал ответчику услуги по договору-8, что подтверждается актом              № 5/20181024-12 от 24.10.2018 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Помимо прочего, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 603-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее –              договор-9), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 5 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2, № 3, № 4) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-9).

Согласно пункту 1.3 договора-9 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ОАО «ДСУ-1, г.Рогачев»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-9 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-9).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-9, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-9 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-9 стоимость услуг по настоящему договору составляет 66 608 руб. 55 коп., в том числе НДС 18% - 10 160 руб. 63 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 10, № 11, № 12                    к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-9, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение                5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-9 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-9, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту                         1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-9).

Согласно пункту 7.1 договора-9, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-9).

Пунктом 9.2 договора-9 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-9, что подтверждается актом              № 5/20181227-17 от 27.12.2018 на сумму 66 608 руб. 55 коп.

Также между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 604-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее – договор-10), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 2 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-10).

Согласно пункту 1.3 договора-10 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ОАО «ДСУ-1, г.Рогачев»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-10 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-10).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-10, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-10 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-10 стоимость услуг по настоящему договору составляет 38 004 руб. 16 коп., в том числе НДС 18% - 5 797 руб. 24 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 6 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-10, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-10 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-10, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту 1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-10).

Согласно пункту 7.1 договора-10, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-10).

Пунктом 9.2 договора-10 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-10, что подтверждается актом  № 5/20181227-18 от 27.12.2018 на сумму 38 004 руб. 16 коп.

Кроме того, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 605-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее – договор-11), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 7 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2, № 3, № 4) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-11).

Согласно пункту 1.3 договора-11 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ООО «ЛИПЕЦК-асфальт»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-11 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-11).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-11, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-11 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-11 стоимость услуг по настоящему договору составляет 88 410 руб. 67 коп., в том числе НДС 18% - 13 486 руб. 37 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 10, № 11                            к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-11, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-11 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-11, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту 1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-11).

Согласно пункту 7.1 договора-11, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-11).

Пунктом 9.2 договора-11 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-11, что подтверждается актом  № 5/20181227-01 от 27.12.2018 на сумму 88 410 руб. 67 коп.

Также между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 606-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее – договор-12), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 4 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2, № 3) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-12).

Согласно пункту 1.3 договора-12 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ООО «ЛИПЕЦК-асфальт»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-12 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-12).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-12, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-12 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-12 стоимость услуг по настоящему договору составляет 72 306 руб. 85 коп., в том числе НДС 18% - 11 029 руб. 86 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 8, № 9 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-12, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-12 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-12, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту 1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-12).

Согласно пункту 7.1 договора-12, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-12).

Пунктом 9.2 договора-12 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-12, что подтверждается актом               № 5/20181227-19 от 27.12.2018 на сумму 72 306 руб. 85 коп.

Кроме того, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 607-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее – договор-13), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 5 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-13).

Согласно пункту 1.3 договора-13 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ООО «Инфинити Групп»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-13 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-13).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-13, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-13 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-13 стоимость услуг по настоящему договору составляет 65 505 руб. 97 коп., в том числе НДС 18% - 9 992 руб. 44 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 12, № 13, № 14 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-13, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-13 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-13, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту 1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-13).

Согласно пункту 7.1 договора-13, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-13).

Пунктом 9.2 договора-13 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-13, что подтверждается актом  № 5/20181227-23 от 27.12.2018 на сумму 65 505 руб. 97 коп.

Помимо прочего, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 608-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее –               договор-14), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 2 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-14).

Согласно пункту 1.3 договора-14 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ООО «Инфинити Групп»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-14 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-14).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-14, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-14 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-14 стоимость услуг по настоящему договору составляет 38 004 руб. 16 коп., в том числе НДС 18% - 5 797 руб. 24 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 6 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-14, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-14 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-14, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту 1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-14).

Согласно пункту 7.1 договора-14, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-14).

Пунктом 9.2 договора-14 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-14, что подтверждается актом  № 5/20181227-15 от 27.12.2018 на сумму 38 004 руб. 16 коп.

Также между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 609-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее – договор-15), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 5 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-15).

Согласно пункту 1.3 договора-15 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ООО «ПКЦ-ГАРАНТ»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-15 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-15).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-15, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-15 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-15 стоимость услуг по настоящему договору составляет 65 505 руб. 97 коп., в том числе НДС 18% - 9 992 руб. 44 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 12, № 13, № 14 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-15, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-15 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-15, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту 1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-15).

Согласно пункту 7.1 договора-15, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-15).

Пунктом 9.2 договора-15 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-15, что подтверждается актом № 5/20181227-16 от 27.12.2018 на сумму 65 505 руб. 97 коп.

Кроме того, между муниципальным учреждением «Управление главного смотрителя г.Липецка» (заказчик) и федеральным  автономным учреждением «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (исполнитель) заключен договор № 610-М на оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов от 26.12.2018 (далее – договор-16), согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов в количестве 2 образцов (проб).

Исполнитель обязуется в установленные настоящим договором сроки и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, № 2) выполнить работу, а заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором (пункт 1.2 договора-16).

Согласно пункту 1.3 договора-16 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ООО «ПКЦ-ГАРАНТ»). Началом проведения испытаний считается дата регистрации отобранного образца (пробы) в лаборатории исполнителя.

В соответствии с пунктом 2.1 договора-16 календарные сроки выполнения работ составляют:

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 29.12.2018 года.

Дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем (пункт 2.4 договора-16).

Как следует из пункта 4.2.3 договора-16, заказчик оплачивает услуги, а также компенсирует необходимые расходы исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 5.1 договора-16 установлено, что стоимость работ определяется стоимостью фактически выполненных работ по лабораторным испытаниям образцов (проб) строительных материалов.

В соответствии с пунктом 5.2 договора-16 стоимость услуг по настоящему договору составляет 38 004 руб. 16 коп., в том числе НДС 18% - 5 797 руб. 24 коп.

Оплата по настоящему договору производится заказчиком согласно расчету стоимости основных видов работ и испытаний (приложение № 6 к настоящему договору).

Цена договора включает стоимость оказания услуг, стоимость материалов, оборудования, транспортных, командировочных и иных расходов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

Заказчик оплачивает оказанные услуги по договору, при этом исполнитель не вправе требовать от заказчика оплаты услуг сверх объема услуг, предусмотренного договором. Превышение исполнителем предусмотренных настоящим контрактом объемов и стоимости услуг  оплачиваются исполнителем за свой счет. Оплата этапов оказанных услуг не предусмотрена.

Как установлено пунктом 5.6 договора-16, по факту оказания услуг сторонами оформляется акт оказанных услуг, который подписывается заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты его предоставления исполнителем.

В соответствии с пунктом 5.7 договора-16 оплата услуг (с учетом НДС 18%) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в размере 100% стоимости услуг в соответствии со счетом исполнителя в течение 10 банковских дней с даты предоставления исполнителем акта, счета-фактуры и счета на оплату. 

Как следует из пункта 6.1 договора-16, сдача работ осуществляется путем предоставления результата работ в письменной форме согласно пункту 1.5 настоящего договора. Срок выполнения работ устанавливается соответствующими нормативными документами (ГОСТ, СНиП). При завершении оказания услуг по договору исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ, счет, счет-фактуру.

При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по настоящему договору услуг заказчик обязан подписать акт оказанных услуг и возвратить его исполнителю в пятидневный срок с даты его получения от исполнителя. При наличии возражений в тот же срок в письменном виде направить исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных документов. 

В случае неподписания заказчиком акта оказанных услуг и непредоставления письменных возражений в вышеуказанный срок услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком (пункт 6.2 договора-16).

Согласно пункту 7.1 договора-16, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2018 (пункт 9.1 договора-16).

Пунктом 9.2 договора-16 установлено, что дата окончания работ по настоящему договору является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ исполнителем.

Истец оказал ответчику услуги по договору-16, что подтверждается актом  № 5/20181227-20 от 27.12.2018 на сумму 38 004 руб. 16 коп.

26.04.2019 истец направил ответчику претензию № 91 от 26.04.2019, в которой предложил оплатить образовавшуюся задолженность по договорам в общей сумме 712 886 руб. 09 коп.

Претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Неоплата ответчиком стоимости оказанных услуг послужила основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Проанализировав условия заключенных между сторонами договоров, суд приходит к выводу, что взаимоотношения сторон в рамках их заключения и исполнения должны регулироваться нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

Согласно части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе он регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:

1) планирования закупок товаров, работ, услуг;

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее - контракт);

4) особенностей исполнения контрактов;

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;

7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контроль в сфере закупок).

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона о контрактной системе законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.

Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок, операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок (части 1 и 2 статьи 8 Закона о контрактной системе).

Частями 1 и 2 статьи 24 Закона о контрактной системе предусмотрено, что заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.

В силу положений пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе (в редакции, действовавшей на дату заключения спорных договоров) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Из материалов дела следует, что между сторонами заключены 16 договоров на оказание услуг, предметом которых являлось оказание лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов (договоры 1-5 от 13.08.2018 и договоры 6-8 от 13.09.2018), а также оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов (договоры 9-16 от 26.12.2018).

Договоры 1-5 заключены в одну и ту же дату (13.08.2018), с одним и тем же лицом (истцом по делу).

Стоимость услуг, являвшихся предметом договора-1, составляет 30 066 руб. 95 коп., договора-2 – 30 066 руб. 95 коп., договора-3 – 30 066 руб. 95 коп., договора-4 – 30 066 руб. 95 коп. и договора-5 – 30 066 руб. 95 коп., всего –             150 334 руб. 75 коп.   

Договоры 6-8 также заключены в одну и ту же дату (13.09.2018), с одним и тем же лицом (истцом по делу).

Стоимость услуг, являвшихся предметом договора-6, составляет 30 066 руб. 95 коп., договора-7 – 30 066 руб. 95 коп. и договора-8 – 30 066 руб. 95 коп., всего – 90 200 руб. 85 коп.   

Договоры 9-16 также заключены в одну и ту же дату (26.12.2018), с одним и тем же лицом (истцом по делу).

Стоимость услуг, являвшихся предметом договора-9, составляет 66 608 руб. 55 коп., договора-10 – 38 004 руб. 16 коп., договора-11 – 88 410 руб. 67 коп., договора-12 – 72 306 руб. 85 коп., договора-13 – 65 505 руб. 97 коп., договора-14 – 38 004 руб. 16 коп., договора-15 – 65 505 руб. 97 коп. и договора-16 – 38 004 руб.  16 коп., всего – 472 350 руб. 49 коп.

Таким образом, суд приходит к выводу, что фактически спорные                     договоры 1-16 образуют три сделки, искусственно раздробленные и оформленные шестнадцатью договорами для формального соблюдения указанного в пункте 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе ограничения с целью уйти от соблюдения конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Совокупная стоимость услуг, определенная в договорах 1-5, составляет 150 334 руб. 75 коп., а в договорах 9-16 – 472 350 руб. 49 коп., что превышает установленный Законом о контрактной системе предельно допустимый размер стоимости закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (100 000 руб.).

Доводы сторон, что спорные договоры имеют разные предметы ввиду отбора проб с различных участков дорог, а также на различных заводах-изготовителях, не могут быть приняты судом во внимание, так как предметом указанных договоров является оказание идентичных лабораторных услуг по проведению испытаний геосинтетических материалов и лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов.

Согласно положениям части 13 статьи 22 Закона о контрактной системе идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке.

В соответствии с пунктом 3.5.2 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, идентичными признаются работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об идентичности оказываемых по договорам 1-5 от 13.08.2018, 6-8 от 13.09.2018 и 9-12 от 26.12.2018 услуг.

Также не может быть принят судом во внимание довод сторон, что предметом договоров 9-16 является оказание лабораторных услуг по проведению испытаний строительных материалов отобранных на различных заводах-изготовителях.

Так, в силу положений пунктов 1.3 договоров 9 и 10 отбор образца (пробы) производится на территории асфальтобетонного завода (ОАО «ДСУ-1, г.Рогачев»), договоров 11 и 12 – на территории асфальтобетонного завода                                 (ООО «ЛИПЕЦК-асфальт»), договоров 13 и 14 – на территории асфальтобетонного завода (ООО «Инфинити Групп»), договоров 15 и 16 – на территории асфальтобетонного завода (ООО «ПКЦ-ГАРАНТ»).

Совокупная стоимость услуг, оказываемых по договорам 9 и 10, составляет 104 612 руб. 71 коп. (66 608 руб. 55 коп. + 38 004 руб. 16 коп.), по договорам 11 и 12 – 160 717 руб. 52 коп. (88 410 руб. 67 коп. + 72 306 руб. 85 коп.), по договорам 13 и 14 – 103 510 руб. 13 коп. (65 505 руб. 97 коп. + 38 004 руб. 16 коп.), по договорам 15 и 16 – 103 510 руб. 13 коп. (65 505 руб. 97 коп. + 38 004 руб. 16 коп.), что также превышает установленный пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе предельно допустимый размер стоимости закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (100 000 руб.).

В пункте 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

Согласно пункту 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

В пункте 74 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что ничтожной является сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц. Вне зависимости от указанных обстоятельств законом может быть установлено, что такая сделка оспорима, а не ничтожна, или к ней должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки (пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

Договор, условия которого противоречат существу законодательного регулирования соответствующего вида обязательства, может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого указания на его ничтожность.

Кроме того, в пункте 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 указано, что применительно к статьям 166 и 168 ГК РФ под публичными интересами, в частности, следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды. Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы, например, сделки о залоге или уступке требований, неразрывно связанных с личностью кредитора (пункт 1 статьи 336, статья 383 ГК РФ), сделки о страховании противоправных интересов (статья 928 ГК РФ).

В данном случае заключение ряда связанных между собой гражданско-правовых договоров (договоры 1-5 от 13.08.2018 и договоры 9-16 от 26.12.2018), фактически образующих две сделки, искусственно раздробленные на пять и восемь договоров для формального соблюдения специальных ограничений, предусмотренных Законом о контрактной системе, с целью уйти от необходимости проведения конкурентных процедур вступления в правоотношения с муниципальным заказчиком, по сути, дезавуирует его применение и открывает возможность для приобретения незаконных имущественных выгод, то есть свидетельствует о совершении действий в обход установленного законом порядка.

Поставка товара, выполнение работ или оказание услуг в целях удовлетворения государственных или муниципальных нужд при отсутствии государственного или муниципального контракта не порождают у исполнителя право требовать оплаты соответствующего предоставления (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2013             № 18045/12).

Как указано в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 25.11.2015 № 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015, иной подход допускал бы поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в обход норм Закона № 44-ФЗ (статья 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных разъяснений, нарушение требований Закона контрактной системе предполагает недобросовестность обеих сторон сделки, в связи с чем истец не может рассчитывать на получение платы, так как извлечение преимущества из незаконного или недобросовестного поведения противоречит статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Такая сделка совершается в обход явно выраженного запрета, установленного законом.

Данный вывод суда согласуется со сложившейся судебной практикой при рассмотрении аналогичных дел (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 25.02.2019 по делу № А23-1027/2018).

При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым отказать во взыскании основного долга по договорам 1-5 от 13.08.2018 в размере 150 334 руб. 75 коп. и договорам 9-16 от 26.12.2018 в размере 472 350 руб. 49 коп.

В то же время, искусственное дробление сделки, заключенной 13.09.2018, на три самостоятельных договора 6-8 по 30 066 руб. 95 коп. каждый (всего 90 200 руб. 85 коп.) не повлекло за собой превышение установленного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе предельно допустимого размера стоимости закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В силу пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

При этом оплата оказанных услуг осуществляется заказчиком в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Материалами дела подтверждается факт оказания услуг по договору-6 на сумму 30 066 руб. 95 коп., по договору-7 на сумму 30 066 руб. 95 коп. и договору-8 на сумму 30 066 руб. 95 коп.

Всего на общую сумму 90 200 руб. 85 коп.

Акты оказанных услуг подписаны ответчиком без замечаний.

Ответчик факт оказания услуг не оспорил, доказательств оплаты их стоимости не представил.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

В силу частей 1 и 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Поскольку ответчик доказательств, подтверждающих оплату стоимости оказанных услуг по договорам 6-8, не представил, а также не представил доказательств, освобождающих его от исполнения принятого на себя обязательства, суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании задолженности является законным, обоснованным и подлежит удовлетворению в размере 90 200 руб. 85 коп.

В остальной части следует отказать.

Истец также просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 09.11.2018 по 20.05.2019 в размере 9 794 руб. 41 коп. и за период с 17.01.2019 по 20.05.2019 в размере 12 436 руб. 41 коп.

В пункте 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В то же время, в пункте 4 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.

В пунктах 6.1 договоров 6-8 стороны предусмотрели, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В части 5 статьи 34 Закона о контрактной системе указано, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Учитывая указанные нормы материального права, истец вправе требовать взыскания с ответчика неустойки в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, а не процентов за пользование чужими денежными средствами.

Принимая во внимание, что ответчик не оплатил стоимость оказанных по договорам 6-8 услуг, истец вправе требовать взыскания с ответчика неустойки (пени) за период с 09.11.2018 по 20.05.2019 в размере 3 771 руб. 90 коп., исходя из следующего расчета: 90 200 руб. 85 коп. * 193 дня * 1/300 * 6,5%.

Довод ответчика об отсутствии его вины в неисполнении обязательства по оплате стоимости оказанных услуг в связи с отсутствием финансирования из местного бюджета не может быть принят судом во внимание ввиду следующего.

Согласно пункту 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу положений пункта 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В пункте 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

При таких обстоятельствах, суд не усматривает оснований для освобождения ответчика от гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательства по оплате оказанных услуг либо ее уменьшения, а также для снижения неустойки (пени) на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В отношении требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами либо неустойки (пени), начисленных за неисполнение обязательств по оплате стоимости оказанных услуг по договорам 1-5 и 9-16, суд полагает необходимым отказать в их взыскании ввиду отказа в удовлетворении требования о взыскании основного долга по указанным договорам.  

Таким образом, оценив по своему внутреннему убеждению каждое доказательство в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд признает требование о взыскании неустойки (пени) подлежащим удовлетворению за период с 09.11.2018 по 20.05.2019 в сумме 3 771 руб. 90 коп.

В остальной части следует отказать.

Согласно части 1 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.   

При обращении в суд истец уплатил государственную пошлину в размере    17 710 руб. (платежное поручение № 206 от 17.05.2019).

При цене иска 735 116 руб. 91 коп. размер государственной пошлины составляет 17 702 руб. 

Поскольку исковые требования удовлетворены в части, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 702 руб. подлежат пропорциональному распределению между сторонами: на истца относится                15 439 руб. 09 коп. (17 702 руб. – 2 262 руб. 91 коп.), на ответчика 2 262 руб.                  91 коп. (17 702 руб. / 735 116 руб. 91 коп. * 93 972 руб. 75 коп.).

Излишне оплаченная истцом государственная пошлина в размере 8 руб. (17 710 руб. – 17 702 руб.) подлежит возврату ему из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в части. 

Взыскать с муниципального учреждения «Управление главного смотрителя г.Липецка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу федерального автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 93 972 руб. 75 коп., в том числе 90 200 руб. 85 коп. основной долг и 3 771 руб. 90 коп. неустойку (пеню) за период с 09.11.2018 по 20.05.2019, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 262 руб. 91 коп. 

В остальной части отказать. 

Возвратить федеральному автономному учреждению «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 руб. 

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Воронеж) через Арбитражный суд Липецкой области.

Судья                                                                                                             А.А.Коровин