Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-3126/2023

г. Хабаровск

10 мая 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 28.04.2023. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи К.А. Полегкого, при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Ресурсы Албазино» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Гидроэлектромонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 865 389 руб. 61 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца (онлайн): ФИО2, представитель по доверенности                      от 25.10.2021 № 78 АВ 0838956;

от ответчика: не явился, извещён.

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы Албазино» (далее – ООО «Ресурсы Албазино») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Гидроэлектромонтаж» (далее – ООО «Гидроэлектромонтаж») о взыскании неосновательного обогащения в размере 678 174 руб. 14 коп., убытков в размере 187 215 руб. 47 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.10.2021 по день фактической оплаты неосновательного обогащения в размере 678 174 руб. 14 коп. за исключением периода с 01.04.2022 по 01.10.2022.

О дате, времени и месте проведения судебного разбирательства по существу по настоящему делу стороны извещены надлежащим образом, в порядке, предусмотренном статьями 121-123 АПК РФ.

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении иска в полном объеме.

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, возражений против рассмотрения дела в его отсутствие не заявил, отзыв на исковое заявление не представил.

Дело рассмотрено судом в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие ответчика.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя истца, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между ООО «Ресурсы Албазино» (заказчик) и                                           ООО «Гидроэлектромонтаж» (подрядчик) 25.05.2020 заключен договор строительного подряда № РА 17(01-1-0779), в соответствии с пунктом 1.1  которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по монтажу систем электрооборудования, освещения производственно-офисной части здания на объекте(ах) - «Здание нежилое площадь 3449,4 м2». Конкретные виды и объёмы работ указаны в Рабочей документации и Расчёте договорной цены (Сметном расчёте) (приложение № 1 к договору).

Подрядчик обязуется выполнить весь объём работ:предусмотренный Рабочей документацией, даже если работы прямо не поименованы в Расчёте договорной цены (сметном расчёте),подлежащий выполнению в соответствии с технологией и организацией строительства, даже если такие работы прямо не поименованы в Рабочей документации.

Место нахождения объекта(ов) и выполнения работ – 

<

...> (пункт 1.2 договора).

Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ в порядке, предусмотренном договором (пункт 1.4 договора).

Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что подрядчик обязуется выполнить работы с соблюдением сроков, указанных в Календарном графике производства работ (приложение № 2 к договору).

В соответствии с пунктом 3.1 договора приблизительная общая стоимость работ и порядок определения окончательной общей стоимости работ определены на основании Расчёта договорной цены (сметного расчёта) (приложение № 1 к договору).

Пунктом 3.2 договора установлено, что заказчик обязуется   произвести оплату по договору в следующем порядке: уплатить подрядчику денежные средства в размере 30% от приблизительной стоимости работ в течение 5 (пять) рабочих дней с момента подписания договора сторонами, при условии получения заказчиком счета на оплату; уплачивать подрядчику денежные средства в размере 90% от стоимости фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ в отчётом месяце (далее – оплачиваемая доля) за вычетом суммы аванса (пункт 3.2.1 договора), подлежащего зачёту в порядке, предусмотренном вторым абзацем настоящего пункта договора, в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты приёмки заказчиком выполненных подрядчиком работ за отчётный месяц (с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ за отчётный месяц, в порядке, предусмотренном пунктом 1.1 приложения № 5 к договору).

Согласно пункту 3.2.3 договора заказчик обязуется уплатить подрядчику денежные средства в размере разницы между окончательной стоимостью работ и суммой денежных средств, уплаченных заказчиком в соответствии с пунктами 3.2.1-3.2.2 договора, в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты сдачи-приемки работ по договору в целом (с даты подписания сторонами акта о полном исполнении обязательств подрядчиком (пункт 1.10 приложения № 5 к договору).

Стороны обязуются по требованию любой стороны, в период выполнения работ по договору, а также в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты приёмки заказчиком выполненных подрядчиком работ (с даты подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ за последний отчётный месяц), выполнять сверку объёмов выполненных, принятых и оплаченных работ и взаиморасчётов по договору. Результаты сверки оформляются актом сверки, подписываемым уполномоченными представителями сторон. Акт должен быть рассмотрен стороной, получившей его от второй стороны, в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента его получения (пункт 3.6 договора).

Права и обязанности сторон, порядок взаимодействия сторон в ходе исполнения договора, определены в приложениях № 1-5 к договору (пункт 4.1 договора).

Договор считается заключённым с даты подписания договора обеими сторонами, распространяет своё действие на отношения сторон, фактически возникшие с даты, указанной в заголовке на первой странице договора. Договор действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств (включая гарантийные обязательства подрядчика, предусмотренные приложением № 5 к договору) (пункт 6.1 договора).

Условия и порядок расторжения договора согласованы сторонами в приложении № 5 к договору (пункт 6.2 договора).

Пунктом 7.2 договора предусмотрено, что уведомления и извещения, подлежащие передаче одной из сторон другой стороне по договору, передаются в порядке, предусмотренном договором. Уведомления и извещения, а также иные документы, подлежащие передаче одной из сторон другой стороне по договору, порядок передачи которых не установлен договором, передаются под расписку уполномоченному представителю получающей стороны или путём направления (по адресам, указанным в разделе 8 договора, либо иным адресам для корреспонденции, указанным одной стороной другой стороне в письменной форме) курьерской почтой, либо иным способом, позволяющим удостоверить факт получения уведомления и/или извещения другой стороной.

Уведомления и извещения, а также иные документы, подлежащие передаче одной из сторон другой стороне по договору, считаются полученными соответствующей стороной с момента доставки соответствующих документов уполномоченному лицу соответствующей стороны, при этом лицо, получившее документы, считается должным образом на это уполномоченным (в силу обстоятельств), а документы полученными соответствующей стороной.

В пункте 7.7 договора стороны согласовали, что к договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: приложение № 1 – Расчёт договорной цены (Сметный расчёт); приложение № 2 – График выполнения работ; приложение № 3 – Порядок обеспечения работ материалами, машинами и механизмами; приложение № 4 – Условия оказания содействия заказчиком подрядчику; приложение № 5 – Общие условия выполнения работ; приложение № 6 – Акт о полном исполнении обязательств подрядчиком (форма).

В приложении № 1 – Расчёт договорной цены (Сметный расчёт) стороны согласовали общую стоимость работ (с учетом НДС) в размере        8 550 826 руб. 42 коп., которая является приблизительной стоимостью работ (пункт 3).

В приложении № 1 к дополнительному соглашению от 01.07.2021 к договору – График выполнения работ, стороны согласовали срок окончания работ по названному договору – 30.09.2021.

В пункте 1.1 приложения № 5 – Общие условия выполнения работ стороны согласовали, что сдача-приемка фактически выполненных подрядчиком объёмов работ производится сторонами ежемесячно. 

Отчётным периодом, для целей сдачи-приёмки работ, выполненных подрядчиком, признаётся полный календарный месяц, если иное не предусмотрено следующим абзацем настоящего пункта. Отчётным периодом для целей сдачи-приёмки работ, выполненных подрядчиком в последнем календарном месяце выполнения работ по договору, является период с первого числа месяца по дату фактического окончания работ подрядчиком.

Одновременно со сдачей объёмов выполненных работ подрядчик не позднее одного дня с даты окончания соответствующего отчётного месяца, обязуется передавать заказчику: Акт о приёмке выполненных работ                     (с указанием в нём объёмов, видов и стоимости выполненных работ) за отчётный месяц, составленный в двух экземплярах, подписанный подрядчиком со своей стороны, оформленный по форме, предоставленной заказчиком (пункт 1.1.1); Справку о стоимости выполненных работ и затрат за отчётный месяц, в двух экземплярах, подписанную подрядчиком со своей стороны, оформленную по форме, предоставленной заказчиком (пункт 1.1.2); отчет об использовании материалов заказчика за отчетный месяц, оформленный по форме, предусмотренной пунктом 1.1.7 приложения № 3 к договору (пункт 1.1.3);          Исполнительную и Исполнительно-техническую документацию за отчётный месяц (пункт 1.1.4).

Заказчик обязуется осуществить приёмку объёмов работ, выполненных подрядчиком в отчётном месяце, в течение пяти календарный дней с даты окончания соответствующего отчётного периода, но в любом случае не позднее пятого числа месяца, следующего за отчётным, и передать подрядчику подписанные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ за отчетный месяц и Справку о стоимости выполненных работ и затрат за отчётный месяц, или в такой же срок отказаться от приёмки указанных объёмов работ и направить подрядчику письменный мотивированный отказ от приёмки выполненных работ за отчётный месяц с указанием перечня недостатков выполненных работ и сроков их устранения (далее – «уведомление об отказе от приёмки») (пункт 1.2).

В случае получения от заказчика уведомления об отказе от приёмки работ, подрядчик обязуется устранить недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения подрядчиком от заказчика уведомления об отказе от приёмки, если иной срок не будет установлен заказчиком в уведомлении об отказе от приёмки (пункт 1.3).

Факт сдачи подрядчиком и приемки заказчиком объёмов работ, выполненных в соответствующем отчётном месяце, подтверждается Актом о приёмке выполненных работ за соответствующий отчётный месяц, подписанным уполномоченными представителями обоих сторон (пункт 1.4).

После завершения подрядчиком работ по договору в целом, стороны осуществляют сдачу-приёмку результатов выполненных работ по договору (далее – «окончательная приёмка»), в порядке, предусмотрен пунктами 1.6-1.10 настоящего приложения (пункт 1.5).

В срок не позднее 20 (двадцать) рабочих дней с даты приёмки заказчиком выполненных подрядчиком объёмов работ за последний отчётный месяц (подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ за последний отчётный месяц), заказчик обязуется обеспечить начало работы приёмочной комиссии по проведению окончательной приёмки. Состав приёмочной комиссии и порядок её работы при проведении окончательной приёмки определяется заказчиком с учётом требований действующего законодательства РФ в отношении соответствующих видов работ (пункт 1.6).

Пунктом 1.7 предусмотрено, что подрядчик обязуется:

-до даты начала работы приёмочной комиссии по приёмке результатов работ по договору в целом передать заказчику Исполнительную и Исполнительно-техническую документацию, неиспользованные материалы, предоставленные заказчиком подрядчику, машины и механизмы, предоставленные заказчиком подрядчику, вывезти с территории объекта(ов) (пункт 1.1 договора) весь мусор, машины, механизмы, неиспользованные материалы, предоставленные подрядчиком, и иное имущество подрядчика (пункт 1.7.1);

-в срок не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты приёмки заказчиком выполненных подрядчиком объёмов работ за последний отчётный месяц (с даты подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ за последний отчётный месяц выполнения работ), вывезти с места выполнения работ (пункт 1.2 договора), машины, механизмы, неиспользованные материалы, предоставленные подрядчиком, и иное имущество подрядчика (пункт 1.7.2).

Неисполнение и/или неполное исполнение подрядчиком, указанных в пунктах 1.7.1 и 1.7.2 настоящего приложения, обязательств является основанием для отказа заказчика от приёмки работ по договору в целом            (от подписания Акта об исполнении обязательств), поскольку иное не предусмотрено пунктом 1.9 настоящего приложения (пункт 1.8).

Пунктом 1.9 предусмотрено, что в случае неисполнения подрядчиком обязательств, указанных в пункте 1.7.2 настоящего приложения, в сроки, указанные в пункте 1.7.2 настоящего приложения, заказчик вправе принять работы – подписать Акт о полном исполнении обязательств подрядчиком, при этом наступают последствия, предусмотренные пунктами 6 и 7 приложения № 1 к договору, согласно которым: 

-в случае если подрядчиком, по причинам, зависящим от подрядчика в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки заказчиком объёмов выполненных подрядчиком работ за последний отчётный месяц          (с даты подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ за последний отчётный месяц выполнения работ) не будут исполнены (полностью или частично) обязательства по вывозу с объекта машин и/или механизмов, и/или работников подрядчика, окончательная общая стоимость работ по договору определяется без учета расходов подрядчика по соответствующим обязательствам, неисполненным в срок;

-в случае если неисполнение подрядчиком обязательств по вывозу машин, механизмов, а также работников подрядчика с объекта по окончанию работ вызвано причинами, не зависящими от подрядчика, расходы подрядчика, связанные с вывозом машин, механизмов, а также работников подрядчика с объекта, для целей определения окончательной общей стоимости работ по договору, принимаются равными соответствующим расходам по доставке машин, механизмов, а также работников подрядчика на объект.  

Факт окончания выполнения работ в целом, факт сдачи подрядчиком результатов выполненных работ по договору в целом заказчику, факт приёмки результатов выполненных работ заказчиком, факт исполнения подрядчиком обязательств по договору в полном объёме, подтверждается соответствующим актом, составленным по форме, приведённой в приложении № 6 к договору (по тексту договора и Приложений к нему – Акт о полном исполнении обязательств подрядчиком (пункт 1.10 приложения           № 5). 

В разделе 7 приложения № 5 – Общие условия выполнения работ стороны согласовали следующий порядок прекращения договора.

Согласно пункту 7.1 заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в том числе по любому из нижеуказанных оснований (являющихся существенными нарушениями подрядчиком условий договора):

-в случае нарушения подрядчиком более чем на 20 (двадцать) календарных дней по обстоятельствам, не зависящим от заказчика, сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным Графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору) (пункт 7.1.1);

-в случае нарушения подрядчиком при выполнении работ требований действующих в Российской Федерации норм и правил на соответствующие виды работ или отступления подрядчика от условий договора, и не устранения подрядчиком данных нарушений, либо не возврата к соблюдению условий договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня выявления заказчиком либо соответствующим уполномоченным государственным органом указанных фактов (пункт 7.1.2);

-в случае нарушения подрядчиком два (и более) раза сроков выполнении работ (в том числе промежуточных сроков выполнения работ), установленных Графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору) (пункт 7.1.3);

-в случае если заверения подрядчика, указанные в пункте 1.6 договора, не соответствуют действительности, и/или подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее, и/или подрядчик лишается допусков (лицензий) на выполнение работ (происходит аннулирование и/или окончание их срока действия) (пункт 7.1.4).

Согласно пункту 7.2 об отказе от исполнения договора заказчик, в срок не позднее 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора, обязуется письменно уведомить подрядчика, с указанием в уведомлении даты окончания выполнения подрядчиком работ по договору и даты расторжения договора.

Пунктом 7.3 приложения № 5 к договору предусмотрено, что в случае отказа заказчика от исполнения договора, обязательства сторон по договору прекращаются, за исключением нижеследующих обязательств: подрядчик обязуется сдать заказчику результаты работ, фактически выполненных подрядчиком по договору до даты окончания выполнения подрядчиком работ по договору, указанной заказчиком в уведомлении (пункт 7.2 настоящего приложения), в порядке, аналогичном предусмотренному разделом 1 настоящего приложения (пункт 7.3.1); заказчик обязуется принять и оплатить результаты фактически выполненных подрядчиком работ на дату расторжения договора (пункт 7.3.2).

Окончательная общая стоимость фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ определяется в порядке, предусмотренном пунктом 4 приложения № 1 к договору. Сумма, подлежащая уплате заказчиком подрядчику, определяется как разница между окончательной общей стоимостью фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ, и: суммой денежных средств, уплаченных заказчиком в соответствии с условиями договора; суммами платежей, подлежащих уплате подрядчиком заказчику, в соответствии с условиями договора, в том числе, включая, но, не ограничиваясь, суммы штрафов и пеней, предусмотренных настоящим приложением, требования об уплате которых направлены заказчиком подрядчику, но не уплачены подрядчиком, суммами денежных средств, подлежащих уплате подрядчиком заказчику в соответствии с условиями приложения № 4 к договору (пункт 7.3.3).

Пунктом 7.3.4 предусмотрено, что в случае нарушения подрядчиком, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков исполнения обязательств по сдаче-приёмке объемов фактически выполненных работ и/или обязательств, предусмотренных пунктом 1.7 настоящего приложения (полностью или частично), заказчик вправе в одностороннем порядке определить окончательную общую стоимость фактически выполненных подрядчиком работ.

В случае если сумма денежных средств, уплаченных заказчиком подрядчику в соответствии с условиями договора, и платежей, подлежащих уплате подрядчиком заказчику, в соответствии с условиями договора превысит окончательную общую стоимость фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ, подрядчик обязуется возвратить заказчику указанную разницу в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с даты расторжения договора (пункт 7.3.5).

В соответствии с условиями указанного договора заказчик перечислил подрядчику аванс в размере 4 793 893 руб. 75 коп., что подтверждается платежными поручениями: от 17.06.2020 № 3927 на сумму 2 565 247 руб.             93 коп., от 14.04.2021 № 2951 на сумму 640 726 руб. 23 коп., от 19.05.2021             № 4111 на сумму 286 143 руб. 56 коп., от 19.05.2021 № 4112 на сумму 313 308 руб. 03 коп., от 10.06.2021 № 4749 на сумму 295 716 руб. 64 коп.,             от 02.07.2021 № 5524 на сумму 122 649 руб. 25 коп., от 12.07.2021 № 5800           на сумму 570 102 руб. 11 коп.

К согласованному сторонами сроку работы по указанному договору не были выполнены подрядчиком в полном объеме.

Заказчик 23.09.2021 на адрес электронной почты подрядчика, указанный в разделе 8 договора, направил уведомление от 23.09.2021                    № РА-8/06-158 об одностороннем отказе от дальнейшего действия договора от 25.05.2020 № РА-17(01-1-0779), в подтверждение чего в материалы настоящего дела представил соответствующий скриншот почтового ящика из сети Интернет от 23.09.2021, а также список внутренних почтовых оправлений от 29.09.2021 № 7.

  В уведомлении заказчик указал, что по состоянию на 14.09.2021 работы по спорному договору подрядчиком в полном объеме не выполнены, выполнение подрядчиком работ фактически прекращено 03.07.2021 в связи с чем к установленному сроку является очевидным невозможность их завершения. С учетом изложенного заказчик в одностороннем порядке отказался от его дальнейшего исполнения, уведомил подрядчика о его расторжении с 05.10.2021, а также предложил подрядчику в срок до 30.09.2021 (дата начала работы приемочной комиссии по проведению окончательной приемки фактически выполненных работ): передать  заказчику исполнительную и исполнительно-техническую документацию, неиспользованные материалы, предоставленные заказчиком подрядчику, машины и механизмы, предоставленные заказчиком подрядчику, вывезти с территории объекта(ов) весь мусор, машины, механизмы, неиспользованные материалы, предоставленные подрядчиком, и иное имущество подрядчика.

ООО «Гидроэлектромонтаж» выполнило работы на сумму                    4 115 719 руб. 61 коп., что подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ по форме КС-2: от 31.03.2021            № 1, от 30.04.2021 № 2, от 30.04.2021 № 3, от 31.05.2021 № 4, от 30.06.2021 № 5, от 30.06.2021 № 6, от 31.01.2022 № 7, от 31.01.2022 № 8, подписанными и скрепленными печатями сторон без замечаний и возражений, в том числе в отношении качества выполненных работ.

Впоследствии ООО «Ресурсы Албазино» направило в адрес                     ООО «Гидроэлектромонтаж» претензию от 08.08.2022 № РА-8/06-114                с требованием о возврате неосновательного обогащения в размере                 678 174 руб. 14 коп. и возмещении стоимости невозвращенных материалов, которая оставлена последним без удовлетворения.

Невозможность разрешить возникшие между сторонами спора разногласия явилась причиной обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные сторонами доказательства с учетом пояснений представителей сторон, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу положений статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ предусмотрено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат (статья 729 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.                        По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (пункт 3 статьи 708 ГК РФ).

Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

В пункте 1 статьи 450 ГК РФ установлено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства (абзац второй пункта 4 статьи 453 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 этого кодекса.

Обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех условий: если имело место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение произведено за счет другого лица (за чужой счет); отсутствие правовых оснований, а именно приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть происходит неосновательно. 

Недоказанность хотя бы одного из названных условий влечет за собой отказ в удовлетворении исковых требований.

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле,обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как наоснование своих требований и возражений, а часть 2 статьи 9 АПК РФпредусматривает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступленияпоследствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В данном случае материалами дела подтверждается, что подрядчиком был нарушен конечный срок выполнения работ по спорному договору, в связи с чем заказчик правомерно в одностороннем порядке отказался от его дальнейшего исполнения, направив в адрес контрагента соответствующее уведомление.

При этом сам по себе факт того, что после указанных обстоятельств определенные работы были выполнены подрядчиком и приняты заказчиком, по существу названных выводов суда не отменяет, поскольку фактически в полном объеме к согласованному между сторонами сроку работы так и не были выполнены подрядчиком вплоть до настоящего времени.  

Подрядчиком факт просрочки (нарушения срока окончания работ)              не оспорен.

При изложенных обстоятельствах суд констатирует, что договорные отношения между сторонами спора прекратились с 05.10.2021.

В рамках указанного договора заказчик перечисли подрядчику аванс в размере 4 793 893 руб. 75 коп., тогда как согласно представленным в материалы настоящего дела актам формы КС-2, подрядчиком работы по указанному договору были выполнены всего на 4 115 719 руб. 61 коп., что свидетельствует о наличии на стороне последнего неосновательного обогащения в размере  678 174 руб. 14 коп., которое подлежит взысканию в пользу истца.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.10.2021           по день фактической оплаты неосновательного обогащения в размере                 678 174 руб. 14 коп. за исключением периода с 01.04.2022 по 01.10.2022.

Пунктом 2 статьи 1107 ГК РФ предусмотрено, что на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (пункт 1 статьи 395 ГК РФ).

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).

С учетом установленного судом факта наличия на стороне ответчика неосновательного обогащения, требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами начиная с 06.10.2021 по день фактической оплаты неосновательного обогащения в размере 678 174 руб.           14 коп. за исключением периода с 01.04.2022 по 01.10.2022 также является правомерным и подлежит удовлетворению.

Также ООО «Ресурсы Албазино» заявило требование о взыскании с ООО «Гидроэлектромонтаж» убытков в виде стоимости материалов в размере 187 215 руб. 47 коп.

Заказчиком подрядчику были переданы материалы для выполнения работ по договору от 25.05.2020 № РА 17(01-1-0779), что подтверждается накладными на отпуск товарно-материальных ценностей от 03.03.2021                  № АЛХ00000023, от 11.03.2021 № АЛХ00000024, от 22.03.2021                              № АЛХ00000028, УПД от 06.07.2020 № 1563, № 1564, от 15.07.2020 № 1777.

Часть материалов была использована подрядчиком при производстве работ, в связи с чем сторонами подписаны отчеты об использовании материалов, а также акт от 03.11.2021 о передачи кабельной продукции.

По расчету истца оставшаяся часть материалов общей стоимостью 187 215 руб. 47 коп. не была возвращена заказчику, отчёт о расходовании материалов на указанную сумму подрядчиком также не представлен, сторонами не подписан.

В соответствии с пунктом 1 статьи 713 ГК РФ подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

Статьей 714 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.

В соответствии со статьей 728 ГК РФ в случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

В пункте 25 Постановления Пленума ВС РФ от 23.12.2021 № 46  разъяснено, что арбитражный суд не связан правовой квалификацией правоотношений, предложенной лицами, участвующими в деле.

Изменение правовой квалификации требования (например, со взыскания убытков на взыскание неосновательного обогащения) или правового обоснования требования (например, взыскания на основании норм о поставке на взыскание на основании норм об обязательствах вследствие причинения вреда) не является изменением предмета или основания иска, за исключением случаев, когда истец при изменении правовой квалификации изменяет также требование (предмет иска) и ссылается на иные фактические обстоятельства (основание иска).

Указанная позиция неоднократно и последовательно подтверждалась ВС РФ в пункте 9 Постановления Пленума от 23.06.2015 № 25                              «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»; пункте 3 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ 29.04.2010 № 10/22                            «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»; пункте 27 Обзора судебной практики № 2 (2019), утвержденного Президиумом ВС РФ от 17.07.2019 и других.

Таким образом, арбитражный суд не связан правовой квалификацией заявленных сторонами требований, а рассматривает иск исходя из предмета и оснований (фактических обстоятельств дела), определяя круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию и проверке, с учетом доводов и возражений сторон.

По мнению суда, стоимость невозвращенных подрядчиком ранее полученных от заказчика для выполнения работ материалов, после прекращения правоотношений между сторонами и отсутствия доказательств использования этих материалов по назначению является неосновательным обогащением подрядчика, которое также подлежит возмещению заказчику.

В данном случае представленными в материалы настоящего дела доказательствами подтверждается факт неосновательного обогащения подрядчика в размере 187 215 руб. 47 коп., составляющих стоимость невозвращенных заказчику и неиспользованных по назначению материалов.

Доказательств иного материалы настоящего дела не содержат.

При изложенных обстоятельствах соответствующее требование истца о взыскании стоимости материалов также подлежит удовлетворению в заявленном размере – 187 215 руб. 47 коп.

Расходы истца по оплате государственной пошлины по иску в сумме 20 308 руб. возлагаются на ответчика с учетом итогового результата рассмотрения настоящего дела и положений статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гидроэлектромонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ресурсы Албазино»                     (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неосновательное обогащение в размере 678 174 руб. 14 коп., стоимость материалов в размере 187 215 руб.  47 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период   с 06.10.2021 по день фактичекской оплаты неосновательного обогащения в размере 678 174 руб. 14 коп. за исключением периода с 01.04.2022                    по 01.10.2022, судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску в сумме 20 308 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                          К.А. Полегкий