АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-14999/2023

19 декабря 2023 года

город  Симферополь

Резолютивная часть решения оглашена  12.12.2023       

Полный текст решения изготовлен  19.12.2023

Арбитражный  суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ГУП РК «Крымэнерго» к ООО «Ипомея» при участии в деле в качестве  третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего  ФИО2 об обязании

при участии:

от истца – Запорожец А.В., представитель по доверенности от 11.09.2023;

от ответчика –  не явился;

          Обстоятельства дела:  Истец обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением об обязании ответчика вернуть переданные истцом 127 однофазных приборов учета AD11B.1-LRs-Z-R-TX (1-7-1), переданных по акту о приемке-передаче оборудования в монтаж от 08.12.2021.

Исковые требования обосновываются невозвратом прибором учета.

Ответчиком письменного отзыва не представлено.

Рассмотрев материалы дела, суд

                                                      УСТАНОВИЛ:

17.02.2021 между ГУП РК «Крымэнерго» (далее - Заказчик) и ООО «Ипомея» (далее - Подрядчик) заключен Договор от 17.02.2021 № 146/821 (далее - Договор), предметом которого является выполнение по заданию Заказчика работ по предварительному обследованию, проектированию, замене приборов учета, монтажу, наладке интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных домах (МКД).

В силу ч.1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы й оплатить его.

Согласно п. 2.2 в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №3 к настоящему Договору) комплекс работ по Объекту, который включает VI этапов:

I этап - Подготовительные работы - разработка, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту, составление и согласование с Заказчиком плана-графика выполнения этапов работ. Оформление запросов, обращений, получение, сбор, анализ и систематизация материалов и документов, необходимых для проектирования;

II           этап - Разработка документации - разработка, согласование проектной, рабочей и сметной документаций с Заказчиком по проектируемому объекту;

III          этап - Монтаж оборудования в соответствии с проектной документацией:

-комплектация и поставка оборудования;

- монтаж оборудования;

IV          этап - Проведение пуско-наладочных работ;

V           этап - Проведение опытной эксплуатации;

VI          этап - Приемочные испытания систем учета.

Согласно п. 2.5. Результат Работ, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора, должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.

Результатом выполнения Работ по настоящему Договору является ввод всех объектов в эксплуатацию, подтвержденный актами приема объекта интеллектуальной системы учета электроэнергии по форме согласно Приложению №6 к настоящему Договору.

Передача от Подрядчика к Заказчику прав на обладание ПО (микропрограммным обеспечением) приборов учета и УСПД (устройства сбора и передачи данных) должна выполняться на условиях лицензионного договора (соглашения).

В силу п. 2.6. Договора, работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в объеме, предусмотренном утвержденной проектной документацией, согласно Сводной смете (Приложение №1 к настоящему Договору) в сроки, предусмотренные статьей 3 настоящего Договора, а также Графиком выполнения работ, приведенном в Приложении №2 к Договору.

В соответствии с п. 3.5. Работы, предусмотренные настоящим Договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода), считаются выполненными по всем предусмотренным Договором этапам в полном объёме после подписания Заказчиком и Подрядчиком Актов приема объекта интеллектуальной системы учета электроэнергии (Приложение №6 к настоящему Договору).

Согласно ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, то подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

При этом указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Пунктом 3.4. Окончание выполнения работ (по всем этапам) - в срок 250 (двести пятьдесят) календарных дней со дня заключения Договора.

Согласно п. 8.2. (с учетом дополнительного соглашения №3-146/821 от 12.11.2021 к Договору) Договора комплектация объекта материалами и оборудованием осуществляется в соответствии с условиями Договора обеспечивает Подрядчик, принимаются Заказчиком в составе выполненных строительно-монтажных работ по Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2) или в Товарной накладной (ТОРГ-12) и/или УПД (в случает приемки оборудования по Товарной накладной (ТОРГ-12) и/или УПД).

В соответствии с п. 8.6. Договора уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр материалов и оборудования в целях подтверждения его соответствия требованиям, установленным в настоящем Договоре.

В силу п. 8.10. Договора по результатам проведения осмотра оборудования, принимаемого по Товарной накладной (ТОРГ-12) и/или УПД, при условии отсутствия недостатком оборудования, Стороны подписывают Товарную накладную (ТОРГ-12) и/или УПД. С даты подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) и/или УПД оборудование переходит в собственность Заказчику и не может быть признанным находящимся в залоге в соответствии с п. 5. ст. 488 ГК РФ. Передача оборудования в монтаж осуществляется в день его приемки Заказчиком посредством подписания между Заказчиком и Подрядчиком Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме №ОС-15.

Со стороны ГУП РК «Крымэнерго» фактически принят следующий объем работ в соответствии с условиями Договора №146/821 от 17.02.21 оплачено 164 276 710,93 руб., из них:

- Оплата оборудования по накладным ТОРГ-12 от 30.11.2021 № 120, 11300 однофазных счетчиков, 146 трехфазных и 74 УСПД на 83 655 003,62 руб. (оплачено 60% - 50 193 002,17 руб., согласно условиям договора);

- Оплата оборудования по накладным ТОРГ-12 от 24.01.2022 №5, 5500 однофазных счетчиков на 37 559 738,00 руб. (оплачено 60% - 22 559 842,80 руб., согласно условиям договора);

- Оплата проектно-изыскательских работ - 24 805 065,96 руб., акт от 11.02.2022, № 1.

Принято, но не оплачено:

- Заявка на оплату монтажных работ №150650 от 11.05.22

(60%, согласно условиям договора) по 8 МКД (акты КС-2) - 292 663,39 руб.

- Заявка на оплату монтажных работ № 153655 от 28.07.22

(60%, согласно условиям договора) по 22 МКД на 950 979,71 руб.

Работы в срок, установленные Договором, в полном объеме Подрядчиком не выполнены.

Так, в частности, ООО «Ипомея» не обеспечен монтаж 127 однофазных приборов учета ADllB.l-LRs-Z-R-TX (1-7-1), переданных Подрядчику в 2021 году, что подтверждается актом о приемке-передаче оборудования в монтаж от 08.12.2021.

Как следует из Договора, стоимость указанных 127 приборов учета составляет 723 510,11 руб., с учетом НДС - 868 212,13 руб.

В соответствии с п. 8.10 Договора (в редакции дополнительного соглашения №3- 146/821 от 12.11.2021) передача оборудования в монтаж осуществляется посредством подписания между Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме №ОС-15 (далее - Акт).

Однако указанные приборы учета ГУП РК «Крымэнерго» со стороны Подрядчика возвращены не были.

Согласно предоставленных Подрядчиком ведомостей смонтированного оборудования №1-8 установлено, что фактически выполнен монтаж 16 673 однофазного прибора учета (детализация в виде таблице в формате Excel прилагается).

В то же время ООО «Ипомея» со склада ГУП РК «Крымэнерго», согласно двух ведомостей передачи оборудования в монтаж по форме ОС-15, 'было передано 16 800 однофазных приборов учета (11 300 по первой ведомости и 5 500 по второй ведомости ОС-

Таким образом, число приборов учета не установленных Подрядчиком составит 127 штук: 16 800 - 16 673 = 127.

В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней Заказчик с учетом п. 18.3 Договора вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчик при существенном нарушении Договора Подрядчиком (ст.450 ГК РФ).

В соответствии с п. 18.4. Договора Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, письменно уведомив об этом Подрядчика. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, если иной, более поздний, срок не указан в уведомлении. Уведомление об одностороннем отказе от договора считается доставленным адресату и в том случае, когда оно поступила в место вручения адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было вручено или адресат с ним не ознакомился.

02.02.2023 Заказчик направил почтой в адрес Подрядчика уведомление М 416/4510 о расторжении Договора, что подтверждается реестром внутренних почтовых отправлений от 06.02.2023. Данное уведомление Подрядчик получил 20.02.2023, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 29503479080856.

Таким образом, Договор считается расторгнутым.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По смыслу статьи 728 ГК РФ в случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество, либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

Пунктом 15.3 Договора Сторонами установлено, что все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью. Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 (тридцать) дней со дня ее получения Стороной, которой предъявлена претензия.

В целях соблюдения урегулирования спора по Договору, в адрес Подрядчика направлена претензия № 825/17429 с просьбой возвратить ГУП РК «Крымэнерго» 127 однофазных приборов учета, что подтверждается списком почтовых отправлений №5 от 26.04.2023. Претензия Подрядчиком получена и оставлена без удовлетворения, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 29503482071803.

Обстоятельства, изложенные в исковом заявлении ответчиком не оспорены.

Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно ч. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиям.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно ст. 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

          Обязать ООО «Ипомея» вернуть переданные ГУП РК «Крымэнерго» 127 однофазных приборов учета ADllB.l-LRs-Z-R-TX (1-7-1), переданных ООО «Ипомея» по акту о приемке-передаче оборудования в монтаж от 08.12.2021.

Взыскать с ООО «Ипомея» в пользу ГУП РК «Крымэнерго» госпошлину в сумме 6000,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

          Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

          Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                               В.И. Гайворонский