Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Калининград

Дело №

А21-8649/2024

«20»

сентября 

2024 года

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

рассмотрев в упрощенном порядке дело по иску ООО "ВЕНОМ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к ООО "МАГНА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании  основного долга по договору подряда от 25.05.2023 № 01-05/23-сп в сумме 507 948 рублей, неустойки за период с 26.04.2024 по 31.05.2024 в сумме 18 286,13 рубля, неустойки с 01.06.2024 в размере 0,1% в день от суммы задолженности по день фактической оплаты долга

установил.

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНОМ» обратилось в суд с иском к  обществу с ограниченной ответственностью «МАГНА»  о взыскании основного долга  в сумме 507 948 рублей, неустойки по состоянию на 31.05.2024 года в сумме 18 286,13 рублей, неустойки на дату оплаты долга.

            Дело рассмотрено в упрощенном порядке.

            Требования истца (подрядчика) обусловлены нарушением ответчиком  (заказчиком)  обязательств по оплате работ, выполненных истцом по договору подряда от 25.05.2023 года № 01-05/23-сп на устройство систем вентиляции и кондиционирования на объекте «Реконструкция кафе по ул. У. Громовой, 26 в г. Калининграде».

            В материалы дела представлены подписанные акты о приемке работ от 07.11.2023 года № 1 на сумму 919 671 рублей, от 20.12.2023 года № 2 на сумму  292 652 рубля.  

Из материалов дела следует, что 07.03.2024 года подрядчик направил в адрес заказчика акт о приемке работ, справку формы КС-3 от 09.01.2024 года № 3 о выполнении работ на сумму 95 625 рублей, которые заказчик не подписал.

В связи с  тем, что работы по положениям пункта 4.1.4 договора в  полном объеме не оплачены, подрядчик 03.04.2024 года обратился с претензией к заказчику, а затем в суд.

При определении требований в  части основного долга подрядчик учел оплату авансовых платежей 26.04.2023 года в сумме 500 000 рублей, 22.06.2023 года в сумме 300 000 рублей.

О рассмотрении дела в суде ответчик извещался судом по юридическому адресу.

Мотивированных возражений в отношении объема и стоимости работ по договору заказчик не представил.

Согласно расчету подрядчика по положениям пункта 6.5 договора  за период с 26.04.2024 года по 31.05.224 года подлежит уплате неустойка в сумме 18 286,13 рублей.

Расчет неустойки проверен судом, признан обоснованным.                  

Требования подрядчика в заявленных суммах подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310, 330 ГК РФ, положений договора подряда. 

  Руководствуясь статьями 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МАГНА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ВЕНОМ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) основной долг по договору подряда от 25.05.2023 № 01-05/23-сп в сумме 507 948 рублей, неустойку за период с 26.04.2024 по 31.05.2024 в сумме 18 286,13 рубля, неустойку подлежащую начислению с   01.06.2024 по день уплаты долга с применением при расчете процентной ставки 0,1% за  каждый день просрочки, расходы по госпошлине  в сумме  13 525 рублей. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия решения в полном объеме.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

 

Судья                                                                                              О.Н.Шкутко