98/2019-145698(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-11736/2019

г. Хабаровск

25 сентября 2019 года

Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  

рассмотрев в заседании суда дело по иску Управления судебного  департамента в Хабаровском крае (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>,  место нахождения: 680021, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Центр строительных  технологий Инжиниринг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, место  нахождения: 680023, 

<

...>)  

об обязании устранить недостатки по выборочному капитальному ремонту  забора и входной группы здания и предоставлении исполнительской  документации по объекту  

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2, действующего по доверенности от 10.01.2019 №  41, ФИО3, действующей по доверенности от 26.08.2019 № 2014,  

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом. 

 Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 Р Е Ш И Л 

 Иск удовлетворить.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Центр  строительных технологий Инжиниринг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, место нахождения: 680023, 

<

...>) в течение 30 дней с момента вступления решения по  делу № А73-11736/2019 в законную силу устранить недостатки по  выборочному капитальному ремонту забора и входной группы здания  Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре, расположенного  по адресу: 

<

...>  виде выполнения работ: оштукатурить колонны навеса – 50м2, оштукатурить  стены навеса – 4,1м2, окрасить конструкции навеса (стены, колонны) – 7,8м2  за два раза, выполнить устройство отлива по козырьку входной группы –  1,5м2, вывезти грунт в количестве 30 тонн, устранить протекание козырька  над центральным входом в здание, восстановить разрушенный защитный  слой бетона фундамента в количестве 21 п.м, отсыпать песком места  проседания грунта под фундаментом забора длинной 21 п.м.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Центр  строительных технологий Инжиниринг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, место нахождения: 680023, 

<

...>) в течение 30 дней с момента вступления решения по  делу № А73-11736/2019 в законную силу предоставить Управлению  судебного департамента в Хабаровском крае (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, место нахождения: 680021, 

<

...>)  исполнительную схему к акту № 1 на демонтаж конструкций,  исполнительную схему к акту № 2 на бурение скважин, акт на скрытые  работы на устройство гидроизоляции свай и сертификат на изоляционный  материал, акт на скрытые работы на бетонирование буронабивных свай с  указанием объема бетона, полным комплектом паспортов на бетон и  исполнительной схемой, акт на монтаж металлического каркаса ограждения с  антикоррозионной защитой и исполнительной схемой устройства,  сертификаты на металл антикоррозийный состав, сертификаты на  профилированный лист оцинкованный и конек, акт на штукатурные работы  с приложением паспортов на раствор,сетку и антибактериальный раствор,  сертификаты на металлический каркас навеса, сертификат на алюиинивые  

конструкции входной группы, акт на скрытые работы на устройство кровли  козырька с приложением сертификатов и исполнительной схемой, журнал  сварочных работ, акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией  законченного выборочного капитального ремонта объекта.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр  строительных технологий Инжиниринг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, место нахождения: 680023, 

<

...>) в пользу Управления судебного департамента в  Хабаровском крае (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, место  нахождения: 680021, 

<

...>) убытки в размере 39  666 руб. 75 коп.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр  строительных технологий Инжиниринг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, место нахождения: 680023, 

<

...>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 14 000 руб.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

 Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Л.А. Збарацкая 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 03.04.2019 7:13:48

Кому выдана Збарацкая Лариса Анатольевна