Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-2690/2024

г. Хабаровск

15 апреля 2024 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 04.04.2024.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи К.А. Полегкого, при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Михайленко К.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дальтрансстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к акционерному обществу «Регионснаб» (ОГРН 

<

***>,              ИНН 

<

***>)

о взыскании 13 155 009 руб. 37 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности                           от 01.09.2023;

от ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Дальтрансстрой» (далее – ООО «Дальтрансстрой») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к акционерному обществу «Регионснаб» (далее –                            АО «Регионснаб») о взыскании задолженности за выполненные работы по договору от 05.12.2022 № 031/СП-22 в размере 11 598 518 руб. 89 коп., неустойки за нарушение сроков оплаты в размере 1 284 311 руб. 90 коп., неустойки по день фактической оплаты указанной задолженности за каждый день просрочки в оплате в размере 1/300 действующей на дату уплаты ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

До вынесения итогового судебного акта по настоящему спору истцом неоднократно уточнялись исковые требования, в окончательном виде (ходатайство от 04.04.2024) ООО «Дальтрансстрой» просило взыскать с ответчика задолженность за выполненные работы по договору от 05.12.2022 № 031/СП-22 в размере 11 598 518 руб. 89 коп., неустойку за нарушение сроков оплаты за период с 03.04.2023 по 04.04.2024 в размере 1 556 490 руб. 48 коп., неустойку с 05.04.2024 по день фактической оплаты указанной задолженности за каждый день просрочки в оплате в размере 1/300 действующей на дату уплаты ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы

Уточнения заявленных требований по иску судом принимались с учетом положений статьи 49 АПК РФ.

Ответчик заявленные требования не признал. В отзыве на иск указал, что неустойка не подлежит начислению за период после расторжения спорного договора. Также ответчиком заявлено ходатайство, в случае признания требований о взыскании неустойки законными, о применении положения статьи 333 ГК РФ и уменьшении ее размера. Дополнительно отметил возможность мирного урегулирования возникшего спора.

Истцом представлены возражения на отзыв, в которых опровергнуты доводы ответчика.

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, извещен о времени и месте рассмотрения дела в соответствии с правилами статей 121-123 АПК РФ, в том числе путем опубликования сведений на официальном сайте Арбитражного суда Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В день судебного заседания (04.04.2024) от ответчика поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства в целях рассмотрения сторонами возможности урегулирования настоящего спора посредством заключения мирового соглашения. 

Рассмотрев заявленное ходатайство с учетом мнения представителя истца, который указал на невозможность урегулирования настоящего спора мирным путем, суд не выявил достаточных правовых оснований для его удовлетворения, в связи с чем, руководствуясь положениями статей 158, 159 АПК РФ отказал в его удовлетворении, поскольку признал направленным исключительно на затягивание сроков рассмотрения настоящего спора.

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в судебном заседании в отсутствие ответчика по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя истца, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между АО «Регионснаб» (подрядчик) и ООО «Дальтрансстрой» (субподрядчик) заключен договор субподряда от 05.12.2022 № 031/СП-22             на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, расположенных на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края протяженностью 204,643 км., в соответствии с пунктом 1.1 которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с технической частью (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Объем выполняемых работ и материалов, применяемых при выполнении работ, определяется по фактической потребности подрядчика. Перечень видов работ, товаров (материалов), применяемых при выполнении работ, указан в технической части (пункт 1.2 договора).

Согласно пункту 2.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 06.03.2023 № 2) максимальная цена договора составляет 22 091 571 руб. 33 коп., в том числе НДС 20%. 

Исходя из положений пункта 3.2 договора оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, по цене единицы работы, единицы товара исходя из объема фактически выполненных работ, количества товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, на основании выставленного субподрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 45 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма  № КС-3). Расчет осуществляется за фактически выполненные работы, согласно графику финансирования (приложение № 4).

На основании пункта 4.2.5 договора подрядчик обязан своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Пунктом 6.1 договора установлено, что срок выполнения (завершения) работ: с 01.01.2023 по 30.04.2023.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) (пункт 7.10 договора).

Согласно пункту 9.1 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Так, пунктами 9.2, 9.3 договора предусмотрено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания сторонами и действует до 30.06.2023 включительно. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения всех обязательств по договору (пункт 11.1 договора).

Во исполнение условий названной сделки субподрядчиком выполнены, а подрядчиком приняты работы на общую сумму 19 374 136 руб. 25 коп., что подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ и справками об их стоимости от 24.01.2023 № 1,                     от 15.02.2023 № 2, от 28.02.2023 № 3, от 07.03.2023 № 4, от 23.03.2023 № 5, от 27.04.2023 № 6, подписанными и скреплёнными печатями сторон без замечаний и возражений относительно качества и объемов выполненных работ.

18.05.2023 между сторонами подписано соглашение о расторжении договора, в соответствии с которым стороны указали, что общая стоимость работ по договору составляет 22 091 571 руб. 33 коп., в том числе НДС 20%. На момент заключения настоящего соглашения о расторжении договора субподрядчиком выполнены, а подрядчиком приняты без замечаний по актам работы на сумму 19 374 136 руб. 25 коп., в том числе НДС 20%. Обязательства в оставшейся части на сумму 2 717 435 руб. 08 коп. стороны прекращают (пункты 1, 2). Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение (пункт 6).

Вместе с тем, подрядчиком оплата выполненных и принятых работ осуществлена частично, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями и актом взаимозачета от 30.06.2023 № 24. Итоговая сумма задолженности перед субподрядчиком на момент рассмотрения настоящего спора составила 11 598 518 руб. 89 коп.

Истцом в адрес ответчика направлялась претензия с требованием об оплате указанной задолженности, которая оставлена без ответа и удовлетворения.

Невозможность урегулировать возникшие между сторонами спора разногласия послужила причиной обращения истца в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу положений статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.                         По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу положений пункта 1 статьи 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункты 1, 2, 4 статьи 753 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, а часть 2 статьи 9 АПК РФ предусматривает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В данном случае факт выполнения истцом принятых на себя обязательств в рамках заключенного с ответчиком договора подтверждается материалами настоящего дела.

Указанные обстоятельства ответчик по существу не отрицал, о фальсификации представленных истцом доказательств в установленном законом порядке не заявил, иным образом их содержание, а равно факт выполнения работ в полном объеме, соответствующих условиям договора не оспорил, доказательств какого-либо встречного предоставления, включая подтверждающих оплату выполненных работ в полном объеме в материалы дела не представил.

Принимая во внимание установленные обстоятельства, а также учитывая отсутствие в деле доказательств добровольной оплаты ответчиком выполненных для него и принятых работ, суд приходит к выводу о правомерности требований ООО «Дальтрансстрой» о взыскании с                        АО «Регионснаб» основного долга за выполненные работы в размере                      11 598 518 руб. 89 коп., в связи с чем, их удовлетворяет в заявленном размере.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки (пени) за нарушение сроков оплаты выполненных работ и по день фактического исполнения обязательств по погашению образовавшейся задолженности. 

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

По смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). 

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки (пункт 65 Постановления Пленума ВС РФ                           от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 7)).

Учитывая установленный судом выше факт просрочки исполнения ответчиком обязательства по своевременной и полной оплате выполненных и принятых им работ, суд полагает, что в данном случае имеются достаточные правовые основания для привлечения АО «Регионснаб» к договорной ответственности (пункт 9.3 договора) в виде начисления неустойки на сумму образовавшейся задолженности.

При этом, довод ответчика о невозможности взыскания с него неустойки за просрочку оплаты выполненных работ ввиду расторжения договора по соглашению сторон, отклоняются судом по следующим основаниям.

Согласно пункту 3 статьи 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. При этом, окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение (пункт 4 статьи 425 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

Исходя из системного толкования указанных норм, а также разъяснений, содержащихся в пункте 10 Постановления Пленума ВАС РФ              от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» если к моменту расторжения договора, исполняемого по частям, поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе по ведению чужого дела (по договору комиссии, доверительного управления и т.п.), не были оплачены, то взыскание задолженности осуществляется согласно условиям расторгнутого договора и положениям закона, регулирующим соответствующие обязательства. При этом сторона сохраняет право на взыскание долга на условиях, установленных договором или законом, регулирующим соответствующие договорные обязательства, а также права, возникшие из обеспечительных сделок, равно как и право требовать возмещения убытков и взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства (пункты 3 и 4 статьи 425 ГК РФ).

В пункте 66 Постановления Пленума ВС РФ № 7 разъяснено, что по общему правилу, если при расторжении договора основное обязательство прекращается, неустойка начисляется до момента прекращения этого обязательства (пункт 4 статьи 329 ГК РФ). Например, отказ продавца от договора купли-продажи транспортного средства, проданного в рассрочку, прекращает обязательство покупателя по оплате товара и, соответственно, освобождает его от дальнейшего начисления неустойки за просрочку оплаты товара (пункт 2 статьи 489 ГК РФ).

Если при расторжении договора основное обязательство не прекращается, например, при передаче имущества в аренду, ссуду, заем и кредит, и сохраняется обязанность должника по возврату полученного имущества кредитору и по внесению соответствующей платы за пользование имуществом, то взысканию подлежат не только установленные договором платежи за пользование имуществом, но и неустойка за просрочку их уплаты (статья 622, статья 689, пункт 1 статьи 811 ГК РФ).

Изложенное также соответствует пункту 6 соглашения о расторжении спорного договора, в котором стороны указали, что прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

Таким образом, в данном случае, расторжение договора по соглашению сторон, не лишает субподрядчика требовать от недобросовестного подрядчика, уклоняющегося от своевременной оплаты за выполненные и принятые работы, взыскания соответствующей неустойки, так как данный вид обеспечительного обязательства направлен на защиту прав стороны, исполнившей свой объем обязательств в полном объеме и надлежащим образом, а также на побуждение ответчика к скорейшей оплате спорной задолженности.

Проверив расчет неустойки, произведенный истцом, суд признает его верным, соответствующим условиям заключенного между сторонами договора, в связи с чем, констатирует правомерность соответствующих требований.

Заявленное ответчиком ходатайство о снижении размера неустойки в порядке, предусмотренном статьей 333 ГК РФ, судом отклоняется как необоснованное, ввиду непредставления АО «Регионснаб» относимых, допустимых и достоверных доказательств, безусловно подтверждающих несоразмерность предъявленной неустойки последствиям нарушения обязательства, что согласуется с разъяснениями, содержащимися в пункте 73 Постановления Пленума ВС РФ № 7. 

Само по себе заявленное ответчиком ходатайство о необходимости применения статьи 333 ГК РФ в отсутствие в материалах дела соответствующих доказательств, не может быть удовлетворено судом произвольно, поскольку иной подход к этому вопросу нарушил бы баланс имущественный интересов сторон.

При изложенных обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика неустойки подлежит удовлетворению в полном объеме.

Поскольку до настоящего момента ответчиком не представлены доказательства погашения образовавшейся задолженности, также подлежит удовлетворению и требование истца о взыскании с него неустойки с 05.04.2024 по день фактической оплаты указанной задолженности за каждый день просрочки в оплате в размере 1/300 действующей на дату уплаты ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

Расходы истца по оплате государственной пошлины по иску возлагаются на ответчика с учетом итогового результата рассмотрения настоящего дела и положений статьи 110 АПК РФ.

Также с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина по иску с учетом того, что при увеличении размера заявленных требований истцом она доплачена не была.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с акционерного общества «Регионснаб»                                     (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дальтрансстрой» (ОГРН 

<

***>,                             ИНН 

<

***>) задолженность за выполненные работы по договору                    от 05.12.2022 № 031/СП-22 в размере 11 598 518 руб. 89 коп., неустойку за нарушение сроков оплаты за период с 03.04.2023 по 04.04.2024 в размере 1 556 490 руб. 48 коп., неустойку с 05.04.2024 по день фактической оплаты указанной задолженности за каждый день просрочки в оплате в размере 1/300 действующей на дату уплаты ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы, судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску в сумме 87 414 руб.

Взыскать с акционерного общества «Регионснаб»                                     (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 1 361 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                          К.А. Полегкий