68/2020-126622(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А13-14725/2020

город Вологда

16 декабря 2020 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л:

внести изменение в муниципальный контракт   № 01302000024200001430001 от 18.03.2020 на выполнение работ по  строительству объекта «Водовод через р. Шексна в д. Нифантово  Шекснинского района Вологодской области», изложив пункт 3.1 контракта в  следующей редакции:  

«3.1. Сроки выполнения работ: начало – с даты заключения Контракта,  окончание – до 22 декабря 2020 года (включительно).».  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья А.А. Фадеева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2020 14:15:31

Кому выдана Фадеева Анастасия Александровна