АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-4080/2017

г. Белгород

07 ноября 2017 года

резолютивная часть решения объявлена 31 октября 2017 года

полный текст решения изготовлен 07 ноября 2017 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе 

Судьи Головиной Л.В., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению АО «Белэнергомашсервис» (ИНН 3123022306, ОГРН 1023101649460) к ООО «Белгородэнергаз» (ИНН 3123210204, ОГРН 1103123002817) о взыскании задолженности по договорам и по встречному иску ООО «Белгородэнергаз» к АО «Белэнергомашсервис» о взыскании неустойки

при участии представителей: 

истца: ФИО2, по доверенности от 19.04.2017,

ответчика: ФИО3, по доверенности от 03.07.2017г.,

УСТАНОВИЛ:

АО «Белэнергомашсервис» (истец) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с уточненным иском к ООО «Белгородэнергаз» о взыскании задолженности по договорам поставки и подряда в сумме 5 076 221 руб. 

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

Представитель ответчика с заявленными требованиями не согласился и обратился со встречным иском о взыскании неустойки в сумме 2 493 788 руб. 10 коп. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующему. 

Между ООО «Белгородэнергаз» (Заказчик) и АО «Белэнергомашсервис» (Исполнитель) в период с 22.06.2016 года по 15.09.2016 года были заключены семь договоров поставки и два договора подряда.

По договору поставки №1606-05 от 22.06.2016 года исполнитель обязался изготовить и передать в срок до 05.09.2016 года рамные конструкции с площадками и опорами, выполненные по чертежам приложения №1 к договору с использованием материалов заказчика, указанных в спецификации давальческих материалов (приложение №2 к договору). Заказчик обязался принять и оплатить изделия, исходя из общей стоимости, предусмотренной настоящим договором (п. 1.5 договора).

В соответствии с п. 3.1 договора стоимость изделий составляет 4 055 800 рублей, в том числе НДС 18 % в размере 618 681 рубль 36 коп.

Пунктом 3.2 договора предусмотрено внесение трех авансовых платежей:

- платеж №1 в сумме 125 000 руб. в течение 5 банковских дней от даты подписания договора;

- платеж №2 в сумме 486 226 руб. 60 коп. в течение 25 банковских дней от даты подписания договора;

-платеж №3 в сумме 207 494 рублей 10 коп. в течение 25 банковских дней от даты подписания договора. 

Оплата в размере 3 237 079 руб. 30 коп. должна была быть оплачена в течение 60 банковских дней с даты предоставления заказчику счета на платеж, товарной накладной по форме ТОРГ-12, счета-фактуры, акта приема-передачи документации, поставляемой с изделием.

Исполнитель свои обязательства по изготовлению и передаче заказчику изделий по договору исполнил в полном объеме, что подтверждается универсальным передаточным актом, который подписанным сторонами 30.09.2016г. без замечаний (л.д.15 т.1).

По условиям заключенного 22.06.2016 между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) договора №1606-06 исполнитель обязался изготовить и передать, а покупатель принять и оплатить рамные конструкции с площадками и опорами, выполненные по чертежам Приложения №1 с использованием материалов заказчика, указанных в спецификации давальческих материалов.

Общая цена изделий, подлежащих изготовлению, с учетом НДС составила 4 055 800 рублей.

Условия по оплате предусматривали внесение авансовых платежей в сумме 818 720  руб. 70 коп.:

-платеж №1 в сумме 125 000 руб. в течение 5 банковских дней от даты подписания договора;

-платеж №2 в сумме 486 226 руб. 60 коп. в течение 25 банковских дней от даты подписания договора;

-платеж №3 в сумме  207 494 руб. 10 коп. в течение 25 банковских дней от даты подписания договора.

Оставшуюся сумму в размере 3 237 079 руб. 30 коп. заказчик должен был оплатить в течение 60 банковских дней после предоставления счета на платеж, товарной накладной ТОРГ-12, счета-фактуры, акта приема-передачи документации, поставляемой с изделием.

Изделия переданы заказчику на основании передаточного акта от 30.09.2016г., подписанного сторонами без замечаний (л.д.22 т.1).

По договору поставки №1607-01 от 01.07.2016 года исполнитель обязался изготовить и передать подогреватели газа БЭРГ 037.149.000, выполненные по рабочим чертежам, предоставляемым Заказчиком с использованием материалов заказчика, указанных в спецификации давальческих материалов (приложение №1 к договору). 

В соответствии с п. 3.1 договора стоимость изделий составляет 4 786 851 руб. с НДС.

Пунктом 3.2 договора предусмотрено внесение трех авансовых платежей:

- платеж №1 в сумме 1 436 055 руб. до 15.07.2016;

- платеж №2 в размере 70% от стоимости изделий в сумме 3 350 795 руб. 70 коп. в течение 60 банковских дней от даты предоставления счета на платеж, товарной накладной по форме ТОРГ-12, счета-фактуры, акта приема-передачи документации, поставляемой с изделием.

Исполнитель свои обязательства по изготовлению и передаче заказчику изделий по договору исполнил в полном объеме, что подтверждается универсальным передаточным актом, который подписанным сторонами 09.11.2016г. без замечаний (л.д.32 т.1).

По договору №1607-02 от 01.07.2016г. исполнитель обязался изготовить и передать заказчику подогреватели газа БЭРГ 037.149.000 в количестве 3 штук по рабочим чертежам, предоставляемым заказчиком с использованием давальческих материалов заказчика, указанных в спецификации давальческих материалов (приложение №1 к договору).

Заказчик обязался принять и оплатить изделия, исходя из общей стоимости, предусмотренной настоящим договором (п. 1.4 договора).

В соответствии с п. 3.1 договора общая стоимость по договору составляет 4 786 851 руб., в том числе НДС 18 % в размере 730 197 руб. 61 коп. 

Пунктом 3.2 договора предусматрено внесение авансового платежа в размере 1 436 055 руб. 30 коп. в срок до 15.07.2016г. Оставшаяся сумма по договору в размере 3 350 795 рублей 70 коп. должна была быть плачена в течение 60 банковских дней с даты предоставления заказчику счета на платеж, товарной накладной, счет-фактуры, акта приема-передачи документации, поставляемой с изделием.

Согласно п. 2.1 договора исполнитель обязался завершить изготовление и передать готовые изделия заказчику не позднее 15.09.2016 года, при условии предоставления заказчиком рабочих чертежей (КМД) в срок до 15.07.2016 года.

АО «Белэнергомашсервис» исполнило обязательства по изготовлению и передаче заказчику изделий по договору, что подтверждается подписанным сторонами 09.11.2016 года универсальным передаточным документом (л.д.40 т.1). Изготовленная продукция принята заказчиком без замечаний.

По договору поставки №1608-04 от 04.08.2016 года исполнитель обязался изготовить и передать заказчику комплект вспомогательных блоков трубопроводов соответствии с чертежами (приложение №1) с использованием материале заказчика, указанных в спецификации давальческих материалов (приложение №2 к договору)

Заказчик обязался принять и оплатить изделия, исходя из общей стоимости предусмотренной настоящим договором (п. 1.4 договора).

В соответствии с п. 3.1 договора стоимость изделий составляет 2 208 143 рубля, в том числе НДС 18 % в размере 336 835 руб. 37 коп.

Условия по оплате (п. 3.2 договора) предусматривали внесение авансового платежа размере 500 000 рублей в течение 5 банковских дней с даты подписания договора.

Оплата в размере 162 442 рубля 90 коп. должна была быть произведена в течение 30 банковских дней с даты предоставления счета на указанный платеж.

Оставшаяся сумма по договору в размере 1 545 700 рублей 10 коп. должна была бы оплачена в течение 60 банковских дней с даты предоставления заказчику товарной накладной, счета на платеж, счет-фактуры, акта приема-передачи документации, поставляемой с изделием.

Согласно п. 2.1 договора исполнитель обязался завершить изготовление и передать готовые изделия заказчику в течение 40 календарных дней с даты получения авансового платежа (п. 2.2 договора).

Авансовый платеж в сумме 500 000 руб. был перечислен на расчетный исполнителя 17.08.2016 года платежным поручением № 1402.

АО «Белэнергомашсервис» исполнило обязательства по изготовлению и перед; заказчику изделий по договору, что подтверждается подписанным сторонами 15.11.2016 универсальным передаточным документом. Изготовленная продукция принята заказчи- ком без замечаний.

По договору поставки №1608-05 от 04.08.2016 года исполнитель обязался изготовить и передать заказчику отсек управления в соответствии с чертежами (приложение №1 к договору) с использованием материалов заказчика, указанных в спецификации давальческих ггериалов (приложение №2 к договору).

Заказчик обязался принять и оплатить изделия, исходя из общей стоимости, предусмотренной настоящим договором (п. 1.5 договора).

В соответствии с п. 3.1 договора стоимость изделий составляет 450 000 рублей, в том числе НДС 18 % в размере 68 664 рубля 07 коп.

Условия по оплате (п. 3.2 договора) предусматривали внесение авансового платежа в размере 135 000 руб. в течение 5 банковских дней с даты подписания договора. Оплата в размере 315 000 рублей должна была быть оплачена в течение 60 банковских дней с даты предоставления заказчику товарной накладной, счет-фактуры, акта приема-передачи документации, поставляемой с изделием.

Согласно п. 2.1 договора исполнитель обязался завершить изготовление и передать готовые изделия заказчику в срок не позднее 09 сентября 2016 года.

Авансовый платеж в сумме 135 000 рублей был перечислен на расчетный счет исполнителя 

<

***>.2016 года платежным поручением №1275.

АО «Белэнергомашсервис» исполнило обязательства по изготовлению и передаче заказчику изделий по договору, что подтверждается подписанным сторонами 15.11.2016 года универсальным передаточным документом. Продукция принята заказчиком без замечаний.

По договору поставки №1608-06 от 04.08.2016 года исполнитель обязался изготовить и передать заказчику отсек управления в соответствии с чертежами с использованием материалов заказчика, указанных в спецификации давальческих материалов.

Заказчик обязался принять и оплатить изделия, исходя из общей стоимости, предусмотренной настоящим договором (п. 1.5 договора).

В соответствии с п. 3.1 договора стоимость изделий составляет 450 000 рублей, в том числе НДС 18 % в размере 68 664 руб. 07 коп.

Условия по оплате предусматривали внесение авансового платежа в размере 135 000 рублей в течение 5 банковских дней с даты подписания договора (п. 3.2 договора). Оплата в размере 315 000 руб. должна была быть произведена оплачена в течение 60 банковских дней с даты предоставления заказчику товарной накладной, счет-фактуры, акта приема-передачи документации, поставляемой с изделием.

Согласно п. 2.1 договора исполнитель обязался завершить изготовление и передать готовые изделия заказчику в срок не позднее 09 сентября 2016 года.

Авансовый платеж в сумме 135 000 руб. был перечислен на расчетный счет 

<

***>. 2016 года платежным поручением №1276. Истец исполнил обязательства по изготовлению и передаче заказчику изделий по договору, что подтверждается подписанным сторонами актом от 15.11.2016 года.

По договору подряда №1609-01 от 15.09.2016 года исполнитель обязался выполнить работы по сборке для проведения испытаний и последующей разборке для транспортировки Пункта подготовки газа GS-FMHPE-4100/35 в соответствии с инструкцией, приведенной в Приложении №1. Материалы и оборудование для выполнения работ предоставляются заказчиком.

Заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы, исходя из общей стоимости  предусмотренной договором (п. 1.1 договора).

В соответствии с п. 3.1 договора стоимость работ по договору составляет 1 922 180 рублей с НДС.

Условия по оплате предусматривали внесение авансового платежа размере 180 000 рублей в течение 5 банковских дней с даты подписания договора.

Оплата в размере 120 000 руб. оплачивается в течение 30 банковских дней от даты предоставления счета.

Оставшаяся сумма по договору в размере 1 622 180 руб. должна была быть оплачена в течение 60 банковских дней с даты предоставления заказчику акта выполненных работ, счета, счет- фактуры.

Согласно п. 2.1 договора исполнитель обязался выполнить работы не позднее 15 ноября 2016 года.

Авансовый платеж в сумме 180 000 рублей был перечислен исполнителю 15.09.2016 платежным поручением №1683. Платежным поручение №1719 перечислены денежные средства в сумме 120 000 рублей.

АО «Белэнергомашсервис» исполнило обязательства по договору, что подтверждает

подписанным сторонами 15.11.2016 года универсальным передаточным документом. Работы приняты заказчиком без замечаний.

По договору подряда №1609-02 от 15.09.2016 года исполнитель обязался выполнить работы по сборке для проведения испытаний и последующей разборке для транспортировки пункта подготовки газа GS-FMHPE-4100/35 в соответствии с инструкцией. Материалы и оборудование для выполнения работ предоставляются заказчиком.

Заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы, исходя из общей стоимости, предусмотренной договором (п. 1.1 договора).

В соответствии с п. 3.1 договора стоимость работ по договору составляет 1 922 180 руб. с НДС.

Условия по оплате предусматривали внесение авансового платежа в газмере 180 000 рублей в течение 5 банковских дней с даты подписания договора.

Оплата в размере 120 000 рублей должна была быть произведена в течение 30 банковских дней.

Оставшаяся сумма по договору в размере 1 622 180 рублей должна была быть оплачена в течение 60 банковских дней с даты предоставления заказчику счета, акта выполненных работ и счет- фактуры.

Согласно п. 2.1 договора исполнитель обязался выполнить работы не позднее 15 ноября 2016 года.

Авансовые платежи в сумме 180 000 рублей и в сумме 120 000 руб. были перечислены на расчетный счет исполнителя 16.09.2016 года платежным поручением №1684 от 15.09.2016 и платежным поручение № 1718 от 20.09.2016.

АО «Белэнергомашсервис» исполнило обязательства по договору, что подтверждается подписанным сторонами 15.11.2016 года универсальным передаточным документом. Работы приняты заказчиком без замечаний.

После подачи иска ответчик частично погасил задолженность по указанным договорам, в связи с чем истец уточнил в порядке ст. 49 АПК РФ исковые требования.

Уточненные исковые требования истца в части взыскания неустойки судом не приняты (л.д.108112 т.2).

Ответчик считает, что истцом не исполнены требования по договорам, не передана исполнительская документация, акты выполненных работ, акты сверки, бухгалтерские документы не направлены в адрес заказчика, поэтому обратился со встречным иском о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств в сумме 2 493 788 руб. 10 коп.

Истец с встречным иском не согласен, указал на то, что вся документация была передана ответчику, просит отказать в удовлетворении заявленных требований.

В соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара

В соответствии со ст. 454, 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено законом или договором.

По общему правилу только надлежащее исполнение прекращает обязательство (статья 408 ГК РФ). 

Согласно ч. 1 и 2 ст. 487 ГК РФ в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором.

Представитель ответчика указал на то, что условия договора не выполнены в полном объеме, исполнительная документация до настоящего времени не передана, в связи с чем срок для оплаты поставленной продукции не наступил.

Доводы ответчика не нашли своего подтверждения и опровергаются материалами дела. 

Из универсальных передаточных актов следует, что товар покупателем получен, товар принят без замечаний, претензий по качеству и количеству от покупателя не было (л.д.15, 22. 32, 40, 47, 53, 59, 66, 72 т1).

Факт приема передачи технической документации также подтверждается материалами дела (л.д.108-123 т.1).

Свидетель ФИО4, допрошенный в судебном заседании, подтвердил факт передачи технической документации на поставляемые товары.

Приложениями к договорам поставки предусмотрено предоставление документации (л.д.139-149, 155-157 т2, л.д.1-28. т.3).

Актами сверки взаимных расчетов, подписанных и покупателем и продавцом, факт задолженности по оплате поставленных товаров подтвержден (л.д. 31, 39, 46, 52, 58, 124, 125 т.1). 

Ответчик указывал на то, то истец обязан направить всю документацию почтовой связью.

Суд не принимает довод ответчика о нарушении истцом передачи документов не почтовой связью, а иным способом, в данном случае – лично представителю. 

Ответчик указывает на отсутствие технической документации, мотивируя тем, что в его адрес сторонняя организация направляла претензию с требование о предоставлении документации (л.д.29-41 т.3).

Суд не может принять указанные документы как доказательства отсутствия передачи технической документации, так как в судебном заседании установлено, что ответчик заключил с иными организациями договоры на поставку товара, по которым у него возникла обязанность предоставления технической документации. В указанных письмах нет указания на то, что техническая документация не передана АО «Белэнерго- машсервис».  

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании задолженности по представленным договорам обоснованны и подлежат удовлетворению.

Учитывая тот факт, что истцом предоставлены доказательства передачи технической документации ответчику, а также факт поставки подтверждается материалами дела, претензий от ответчика по качеству и срокам поставленного товара не было, суд приходит к выводу, что встречные исковые требования о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки не подлежат удовлетворению. 

Судебные расходы по оплате госпошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ подлежат взысканию в ответчика. Истец уменьшил сумму долга в связи с частичным погашением долга после подачи иска.

Руководствуясь ст. 110, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования АО «Белэнергомашсервис» удовлетворить.

Взыскать с ООО «Белгородэнергаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу АО «Белэнергомашсервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по договорам №1606-05 от 22.06.2016, №1606-06 от 22.06.2016; №1607-01 от 01.07.2016; №1607-02 от 01.07.2016; №1608-04 от 04.08.2016; №1608-05 от 04.08.2016; №1608-06 от 04.08.2016; №1609-01 от 15.09.2016; №1609-02 от 15.09.2016 в сумме 5 076 221 руб., расходы по госпошлине в сумме 111 262 руб., а всего 5 187 483 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

В удовлетворении встречного иска ООО «Белгородэнергаз» к АО «Белэнергомаш- сервис» о взыскании неустойки отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в установленный законом срок через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья

Головина Л.В.