Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-58342/2017

03 ноября 2017 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи Суркова А. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев 09.10.2017 в судебном заседании дело по иску

Администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (187602, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ПИК» (197136, Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 3А, пом. 2-Н, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

об обязании исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту

при участии:

от истца: представитель ФИО2, доверенность от 01.02.2017

от ответчика: представитель не явился, извещен;

установил:

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Администрация, истец, заказчик) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ПИК» (далее – Общество, ответчик, подрядчик) об обязании исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 28.08.2013                  № 037/13-МК (далее – контракт).

В соответствии со статьей 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражный суд признал дело подготовленным, завершил предварительное судебное заседание и перешел к судебному разбирательству.

Представитель истца уточнил исковые требования, просит обязать Общество в срок до 15.06.2018 исполнить гарантийные обязательства по Контракту и устранить дефекты на участках автомобильных дорог местного значения по адресу г. Пикалево, а именно: 

1.На объекте «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Пикалево, Театральный переулок-1» - на всем протяжении разрушение покрытия в виде ям углублений до 5 см.;

2.На объекте «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: 

<

...>» на всем протяжении разрушение покрытия в виде ям углублений до 5 см.;

3.На объекте «Ремонт дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 20 в 6 микрорайоне г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - яма, выкрашивание асфальтобетонного покрытия;

4.На объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 23 в 6 микрорайоне г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - на всем покрытии ямы, выкрашивание асфальтобетонного покрытия;

5.На объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 25 в 6 микрорайоне г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - ямы, выкрашивание асфальтобетонного покрытия;

6.На объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул.Горняков г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - ямы, до бетонного покрытия;

7.На объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул.Металлургов г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - ямы;

8.На объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул.Горняков г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - ямы;

9.На объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул.Металлургов, №№ 7,9 по ул.Горняков г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - ямы, выкрашивание асфальтобетонного покрытия.

Уточнение принято судом на основании статьи 49 АПК РФ.

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ.

Арбитражный суд, изучив представленные материалы, установил следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела.

Администрация (заказчик) и Общество (подрядчик) 28.08.2013 заключили Контракт на выполнение работ по объекту «Ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Город Пикалево» (далее – объект).

Согласно пункту 5.6 Контракта датой сдачи объекта (выполнения работ по Контракту) считается дата утверждения муниципальным заказчиком акта приемки законченных работ.

Акт приемки законченных работ по муниципальному контракту был утвержден 10.10.2013.

Пунктом 6.2 Контракта установлена обязанность подрядчика устранить за свой счет, своими или привлеченными силами недостатки в результатах его работы, выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока, который составляет 48 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.

В период гарантийного срока выявлены дефекты на участках автомобильных дорог местного значения по адресу г. Пикалево, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта, а именно: на объекте «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Пикалево, Театральный переулок-1» - на всем протяжении разрушение покрытия в виде ям углублений до 5 см.; на объекте «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: 

<

...>» на всем протяжении разрушение покрытия в виде ям углублений до 5 см.; на объекте «Ремонт дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 20 в 6 микрорайоне г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - яма, выкрашивание асфальтобетонного покрытия; на объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 23 в 6 микрорайоне г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - на всем покрытии ямы, выкрашивание асфальтобетонного покрытия; на объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 25 в 6 микрорайоне г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - ямы, выкрашивание асфальтобетонного покрытия; на объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул.Горняков г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - ямы, до бетонного покрытия; на объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул.Металлургов г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - ямы; на объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул.Горняков г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - ямы; на объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул.Металлургов, №№ 7,9 по ул.Горняков г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - ямы, выкрашивание асфальтобетонного покрытия.

В соответствии с пунктами 6.3 и 6.4 Контракта 23.03.2017 составлен акт о выявленных недостатках результата выполненных работ (рекламационный акт). Обществу предписано устранить выявленные дефекты дорожного покрытия на вышеперечисленных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в срок до 01.05.2017.

Доказательства направления данного акта Обществу с сопроводительными письмами от 26.04.2016 № 1073 и от 31.08.2016 № 2075, в которых содержатся требования об устранении гарантийных недостатков, и их получения последним представлены в материалы дела.

Поскольку Общество гарантийные обязательства по Контракту не исполнило, Администрация направила ему претензию от 28.03.2017 № 684, а затем обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения своих обязательств не допускается.

В силу положений статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В соответствии с пунктом 1 статьи 722 ГК РФ результат выполненных ответчиком работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Пунктом 3 статьи 724 ГК РФ определено, что заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В силу пункта 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, потребовать от подрядчика в том числе безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Согласно пункту 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Наличие спорных недостатков выявлено в пределах гарантийного срока, установленного Контрактом, их наличие, характер и обязанность по устранению Общество не оспорило и документально не опровергло.

Доказательства выполнения работ по устранению дефектов и их предъявления заказчику в материалах дела отсутствуют (ни к установленному истцом сроку, ни в ходе рассмотрения настоящего дела судом).

Доказательства возникновения спорных недостатков в связи с обстоятельствами, за которые ответчик ответственности не несет, также отсутствуют.

При таких обстоятельствах, исковые требования Администрации подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьей 167, пунктом 2 статьи 176, статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ПИК» исполнить в срок до 15.06.2018 гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 28.08.2013 № 037/13-ИК и устранить дефекты на участках автомобильных дорог местного значения по адресу г. Пикалево а именно: 

1.На объекте «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г.Пикалево, Театральный переулок-1» - на всем протяжении разрушение покрытия в виде ям углублений до 5 см.;

2.На объекте «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: 

<

...>» на всем протяжении разрушение покрытия в виде ям углублений до 5 см.;

3.На объекте «Ремонт дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 20 в 6 микрорайоне г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - яма, выкрашивание асфальтобетонного покрытия;

4.На объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 23 в 6 микрорайоне г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - на всем покрытии ямы, выкрашивание асфальтобетонного покрытия;

5.На объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 25 в 6 микрорайоне г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - ямы, выкрашивание асфальтобетонного покрытия;

6.На объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул.Горняков г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - ямы, до бетонного покрытия;

7.На объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул.Металлургов г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - ямы;

8.На объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул.Горняков г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - ямы;

9.На объекте «Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул.Металлургов, №№ 7,9 по ул.Горняков г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области» - ямы, выкрашивание асфальтобетонного покрытия.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПИК» в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Сурков А. А.