РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-213114/23-110-1728

г. Москва

04 апреля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 21 марта 2024 года 

Решение в полном объеме изготовлено 04 апреля 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  "МОСТЫ И ТОННЕЛИ" (119017, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА УЛ., Д. 38, СТР. 1, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью   "СИАРСИСИ РУС"(117485, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНЬКОВО, ФИО1 УЛ., Д. 30/1, СТР. 1, ЭТАЖ 5 ПОМЕЩ.VIII, КОМ. 1-31, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 7 680 495,34 руб.,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов.  от 09.01.2023,

от ответчика- ФИО3 по дов.  от  13.06.2023,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной  "МОСТЫ И ТОННЕЛИ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью   "СИАРСИСИ РУС" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 7 477 277,29 руб. задолженности по договору подряда №261121/ПД/ШЛП от 26.11.2021, 829 977,78 руб. пени, пени на сумму 7 477 277,29 руб.. исходя из расчета 0,1% за каждый день просрочки, с 22.03.2024 по дату фактического исполнения обязательства.

Ответчик иск не оспорил.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между ООО «СиАрСиСи Рус» (Генподрядчик) и ООО «Мости и тоннели» (Субподрядчик) был заключен договор подряда № 261121/ПД/ШЛП от 26.11.2021г. на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте: Жилой комплекс с торговой зоной и подземным паркингом, расположенном по адресу: г. Москва, ЦАО, район Пресненский, Шмитовский проезд, вл. 40, по устройству ограждения котлована их 496 бурокасательных свай.

В соответствии с п. 1.1. Договора, «Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1.1. к Договору), Договором,  Проектной и Рабочей документацией, строительными и иными нормативно регулирующими  нормами и правилами выполнить комплекс строительно-монтажных и  иных  работ на Объекте: Жилой комплекс с торговой зоной и подземным паркингом, расположенном по адресу: г. Москва, ЦАО, район Пресненский, Шмитовский проезд, вл. 40, (далее – Объект), по устройство ограждения котлована  из  496 (Четыреста девяносто шесть) бурокасательных свай (далее по тексту - работы); а Генподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить установленную Договором цену.

Работы выполняются поэтапно: первый этап – устройство котлована из 188 (Сто восемьдесят восемь) бурокасательных свай;

второй этап – устройство котлована из 308 (триста восемь) бурокасательных свай». 

В соответствии с п. 7.1.1. Договора, «До начала производства работ на соответствующей площадке передать Субподрядчику на период выполнения работ по акту приема-передачи строительную площадку (площадка для выполнения работ передаётся Генподрядчиком Субподрядчику поэтапно/частями), пригодную для выполнения работ. В случае отсутствия замечаний Субподрядчика по истечении 3-х календарных дней с момента передачи строительной площадки, строительная площадка считается принятой Субподрядчиком и пригодной для выполнения работ по Договору в полном объеме.

Генподрядчик передает Субподрядчику площадку (часть площадки) для производства работ свободную от подземных коммуникаций, перенос которых будет выполнен силами и средствами Заказчика».

Субподрядчик неоднократно обращался в адрес Генподрядчика о передаче фронта работ для производства работ на объекте, что подтверждается следующими письмами № 260 от 09.12.2021г., № 72 от 05.03.2022г., № 213 от 15.06.2022г.

27.06.2022г. в 12:43 на адрес электронной почты shelepikha@crccrus.ru было направленно письмо исх. № 232 о расторжении заключённого между сторонами договора № 261121/ПД/ШЛП от 26.11.2021г. в порядке ст.328 ГК РФ, в связи с отсутствием  фронта работ и отсутствием у Субподрядчика финансовой возможности держать на строительной площадке арендованную буровою установку.

 В соответствии с п. 20.4. Договора, «В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку взаиморасчетов, которой подтверждается объем Работ, выполненных Подрядчиком».

Сопроводительным письмом исх. № 301 от 15.08.2022г. ООО «Мосты и тоннели» передало в адрес ООО «СиАрСиСи Рус» Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 8 от 15.07.2022г. в 4-х экз., Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 8 от 15.07.2022г. в 4-х экз., Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) в 1-м экз., счет на оплату № 109 от 15.07.2022г., счет-фактуру № 7-15-1 от 15.07.2022г., а также Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 9 от 31.07.2022г. визовый, подтверждающий выполненный Субподрядчиком объем по договору.

Сопроводительным письмом исх. № 340 от 14.09.2022г. в адрес ООО «СиАрСиСи Рус» был передан полный комплект исполнительной документации по выполненным ООО «Мосты и тоннели» работам на объекте.

Повторно первичные бухгалтерский документы были переданы в адрес ООО «СиАрСиСи Рус» сопроводительным письмом исх. № 57 от 17.02.2023г., а также дополнительное соглашение в 2-х экз. в котором уточнился выполненный по договору объем работ.

Вышеуказанные документы, переданные в адрес Генподрядчика, остались без внимания, выполненные Субподрядчиком работы не оплачены.

В соответствии с п. 4.1. Договора, «Оплата работ по Договору производится промежуточными платежами после выполнения Субподрядчиком работ за отчетный период путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика денежных средств. Оплата работ производится на основании подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), при наличии выставленных Субподрядчиком счет-фактуры и счета на оплату.

Подписания Акта о приемке выполненных работ форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) осуществляется Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика документации, предусмотренной в настоящем пункте».

Письмом исх. № 71 от 01.03.2023г. ООО «Мосты и тоннели» уведомило ООО «СиАрСиСи Рус» о том, что в связи с неполучением мотивированного отказа на переданные письмом исх. № 57 от 17.02.2023г. документы считаются принятыми Генподрядчиком и подлежат оплате (вх. № МИТ-ШП-0103/3 от 01.03.2023г.

05.04.2023г. на адрес электронной почты ООО «Мосты и тоннели» (mosti.tonneli@gmail.com) поступило на рассмотрение и подписание дополнительное соглашение № 2 о корректировке объемов и/или стоимости выполняемых Субподрядчиком работ по Договору.

В связи с тем, что Субподрядчик не согласился с условиями изложенными в вышеуказанном Дополнительном соглашением (письмо исх. № 122 от 06.04.2023г.), Генподрядчик направил в адрес ООО «Мосты и тоннели» письмо исх. № И-ШП-1605/103 от 16.05.2023г. с приглашением на встречу для решения сложившейся ситуации.

После проведённой встречи между сторонами в адрес Субподрядчика было направленно Соглашение о корректировке объемов и/или стоимости выполняемых Субподрядчиком работ по Договору согласованное сторонами в итоговой редакции.

ООО «Мосты и тоннели» письмом исх. № 195 от 18.05.2023г. повторно передало в адрес ООО «СиАрСиСи Рус» следующий комплект документов:

Оригинал Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 8 от 10.05.2023г. в 4-х экз.;

Оригинал Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 8 от 10.05.2023г. в 4-х экз.;

Оригинал Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 9 от 15.05.2023г. в 4-х экз.;

Оригинал Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 9 от 15.05.2023г. в 4-х экз.;

Оригинал Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 3 кор.1 от 10.05.2023г. в 4-х экз.;

Оригинал Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 3 кор.2 от 10.05.2023г. в 4-х экз.;

Оригинал Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 5 кор.1 от 10.05.2023г. в 4-х экз.;

Оригинал Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 5 кор.2 от 10.05.2023г. в 4-х экз.;

Оригинал Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 6 кор.1 от 10.05.2023г. в 4-х экз.;

Оригинал Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 6 кор.2 от 10.05.2023г. в 4-х экз.;

Оригинал Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 7 кор.1 от 10.05.2023г. в 4-х экз.;

Оригинал Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 7 кор.2 от 10.05.2023г. в 4-х экз.;

Оригинал Соглашения (итогового) к Договору 261121/ПД/ШЛП от 26.11.2021г. в 2-х экз. вышеуказанные документы были получены представителем ООО «СиАрСиСи Рус» о чем имеется отметка на сопроводительном письме.

В связи с тем, что вышеуказанные документы небыли возвращены в адрес Субподрядчика, а также не направлен мотивированный отказ в соответствии с п. 4.1 Договором, соответственно документы считаются принятыми и подлежат оплате.  

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

На основании вышеизложенного задолженность ООО «СиАрСиСи Рус» перед ООО «Мосты и тоннели» составляет: 7 477 277,29 (семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч двести семьдесят семь) рублей 29 копеек.

В соответствии с п. 4.2. «Генподрядчик осуществляет промежуточные платежи в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта/тов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления Субподрядчиком Генподрядчику документов в порядке, согласно п. 4.1.1. Договора; за вычетом удержаний, которые Генподрядчик вправе произвести в соответствии с условиями Договора».

Оплата Генподрядчикам работ выполненных и предьявленных Субподрядчиком должна было произведена в соответствии с п. 4.2. Договора в срок до 7.06.2023г.

Согласно статьям 309 и 310  Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных  законом.

В силу п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, «Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса».

В соответствии со ст. 395 ГК РФ, «В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором».

Задолженность,руб.

Период просрочки

Процентнаяставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

  дни  

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]×[4]×[5]/[6]

7 477 277,29

08.06.2023

23.07.2023

46

7,50%

365

70 675,63

7 477 277,29

24.07.2023

14.08.2023

22

8,50%

365

38 308,24

7 477 277,29

15.08.2023

17.09.2023

34

12%

365

83 581,62

7 477 277,29

18.09.2023

21.09.2023

4

13%

365

10 652,56

Итого:

106

9,36%

203 218,05

Следовательно, сумма процентов составляет 203 218,05 руб.

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено ходатайство об изменении исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ.

В соответствии с подписанным между сторонами Соглашением о урегулировании спора от 20.10.2023г. ответчик (ООО «СиАрСиСи Рус») обязуется в срок до 30.11.2023 года (включительно) оплатить истцу (ООО «Мосты и тоннели») задолженность в размере 7 477 277,29 (Семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч двести семьдесят семь) рублей 29 копеек, в случае неисполнения условий Соглашения в согласованные сроки, ООО «СиАрСиСи Рус» обязуется оплатить ООО «Мосты и тоннели» пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, вплоть до полного исполнения обязательства.

С учетом изложенного, истец просит взыскать 7 477 277,29 руб. задолженности по договору подряда №261121/ПД/ШЛП от 26.11.2021, 829 977,78 руб. пени, пени на сумму 7 477 277,29 руб.. исходя из расчета 0,1% за каждый день просрочки, с 22.03.2024 по дату фактического исполнения обязательства.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью   "СИАРСИСИ РУС"(ОГРН: 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной  "МОСТЫ И ТОННЕЛИ" (ОГРН: 

<

***>) 7 477 277 руб.  29  коп. задолженности, 829 977 руб. 78  коп. неустойки, неустойку на сумму  7 477 277 руб.  29  коп. , исходя из 0,1%  за каждый день ,  с 22.03.2024  по день фактической оплаты.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью   "СИАРСИСИ РУС"(ОГРН: 

<

***>)  в федеральный бюджет госпошлину в размере 64 536 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

А.В. Мищенко